АРБИТРАЖНЫЙ СУД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

414014, г. Астрахань, пр. Губернатора Анатолия Гужвина, д. 6

Тел/факс (8512) 48-23-23, E-mail: astrahan.info@arbitr.ru

http://astrahan.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А06-5658/2023

г. Астрахань

16 августа 2023 года

Резолютивная часть решения объявлена 09 августа 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 16 августа 2023 года.

 

Арбитражный суд Астраханской области в составе судьи Измайловой А.Э.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «БТ Свап» (127644, 

<

...>, эт/пом/ком 3/VI/6К, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ВИМАР ОФФШОР» (414000, 

<

...>, помещ. 010; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании задолженности по договору подряда от 20.07.2020 №282-ВО в размере 3 471 346 руб. 40 коп., неустойки в размере 824 363 руб. 25 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 44 479 руб.,

при участии: 

от общества с ограниченной ответственностью «БТ Свап»: ФИО2, представитель по доверенности от 06.12.2022, диплом ЭВ №323388 от 24.06.1994, паспорт;  

от общества с ограниченной ответственностью «ВИМАР ОФФШОР»: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «БТ Свап» (далее – ООО «БТ Свап», истец) обратилось в Арбитражный суд Астраханской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «ВИМАР ОФФШОР» (далее – ООО «ВИМАР ОФФШОР», ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда от 20.07.2020 №282-ВО в размере 3 471 346 руб. 40 коп., неустойки в размере 824 363 руб. 25 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере 44 479 руб.

Представитель ответчика в предварительное судебное заседание не явился, явку своего представителя не обеспечил, извещен надлежащим образом о времени и месте предварительного судебного заседания, в соответствии со статьей 123 АПК РФ. 

Информация о назначении предварительного судебного заседания размещена на официальном интернет-сайте Арбитражного суда Астраханской области (http://astrahan.arbitr.ru) 24.06.2023.

На основании части 1 статьи 136 АПК РФ предварительное судебное заседание  проводится в отсутствие представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте предварительного судебного заседания.

Представитель истца заявила ходатайство об уточнении (уменьшении) размера исковых требований в части взыскания неустойки, просит взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за период с 02.10.2022 по 06.06.2023  в размере 821 599 руб. 91 коп.

Судом принято уточнение (уменьшение) размера исковых требований в части взыскания неустойки, указанные документы приобщены к материалам дела.

Поскольку лицами, участвующими в деле, не заявлено возражений относительно открытия судебного заседания, суд, руководствуясь пунктом 4 статьи 137  АПК РФ, завершил предварительное заседание и  продолжил рассмотрение дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции. 

В соответствии с частью 3 статьи 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие представителя ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания определением Арбитражного суда Астраханской области от 23.06.2023 по делу №А06-5658/2023.

Представитель истца поддержала правовую позицию, изложенную в исковом заявлении, просила удовлетворить уточненные требования в полном объеме.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям. 

Как следует из материалов дела, 20.07.2020 между ООО «БТ Свап» (Подрядчик) и ООО «ВИМАР ОФФШОР» (Заказчик) заключен договор подряда № 282-ВО (далее – договор), по условиям которого Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить под техническим наблюдением Федерального автономного учреждения (ФЛУ) «Российский морской регистр судоходства» (РМРС), с соблюдением всех правил и стандартов, комплекс Работ, включающий в себя, в том числе:

2.1.1. нанесение термоусаживаемых манжет ('ГУМ) Canusa KLON-B 500 на сварные стыковые соединения труб O168,3x12,7 мм. Количество стыковых соединений не более 679 шт.;

2.1.2. нанесение ТУМ Canusa KLON-B 500 на сварные стыковые соединения труб O273,1x12,7 мм Количество стыковых соединений не более 671 шт.;

2.1.3. нанесение ТУМ Canusa KLON-B 500 на сварные стыковые соединения труб O406.4,1x19,1 мм. Количество стыковых соединений не более 671 шт.;

2.1.4. установку скального листа на сварные стыковые соединения труб O273,1x12,7 мм. Количество стыковых соединений не более 671 шт.;

2.1.5. нанесение па сварные стыковые соединения труб O406,4x19,1 мм с тепловой пенополиуретановой (ППУ) изоляцией толщиной 50 мм и защитным утяжеляющим бетонным покрытием «ЗУБ» толщиной 65 мм теплогидроизоляционного покрытия, состоящего из ППУ сегментов и заливочного полиуретанового компаунда ЛДВ-2 1311 (марка 90). Количество стыковых соединений не более 43 шт.;

2.1.6. нанесение на сварные стыковые соединения труб O406,4x19,1 мм с тепловой пенополиуретановой (ППУ) изоляцией толщиной 50 мм и защитным утяжеляющим бетонным покрытием «ЗУБ» толщиной 130 мм теплогидроизоляционного покрытия, состоящего из ППУ сегментов и заливочного полиуретанового компаунда ЛДН-213П (марка 90). Количество стыковых соединений не более 628 шт.;

2.1.7.   установка  браслетных  протекторов  на трубопровод O168,3x12,7 мм.   Количество браслетных протекторов - не более 60 шт.;

2.1.8.   установка магнитных маркеров на трубопровод O168,3x12,7 мм, с последующей установкой защитного кожуха в количестве не более 3 шт.:

2.1.9.- нанесение ТУМ Canusa KLON-B 500 па сварные стыковые соединения трубных вставок O168,3x12,7 мм. Количество трубных неганок   не более 2 шт.;

2.1.10,- нанесение ТУМ  Canusa  KLON-B  500 на сварные стыковые соединения трубных  вставок O273,1 х 12,7 мм. Количество трубных вставок   не более 2 шт.:

2.1.11. нанесение ТУМ Canusa KLON-B 500 па сварные стыковые соединения трубных вставок O406,4х 19.1 мм. Количество трубных вставок - не более 2 шт.;

2.1.12. нанесение теплоизоляционного ПНУ покрытия па сварные стыковые соединения трубных вставок O406,4x19,1 мм. Количество трубных вставок - не более 2 шт.

2.1.13. изготовление защитных кожухов для магнитных маркеров трубопровода O168,3x12,7 мм   не более 3 шт.;

2.1.14. подготовка труб O168,3x12,7 мм под установку браслетных протекторов. Количество браслетных протекторов - не более 60 шт.

Подробный перечень Работ указан в Приложении №2 «Объём работ» к настоящему Договору.

Согласно пункту 2.2 договора заказчик обязуется принять выполненные подрядчиком работы и оплатить обусловленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

Место выполнения работ: ОП ООО «БТ СВАН» 

<

...> и трубоукладочное судно (ТУС) Заказчика UR2. (пункт 2.3 договора).

В соответствии с пунктом 2.4 договора срок выполнения работ по договору: начало работ - с даты подписания договора и передачи материалов для испытания, окончание работ - до 31.08.2021.

Цена Договора в соответствии с «Коммерческой спецификацией» (Приложение №1 к Договору) составляет 354 485 800 (триста пятьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% процентов 70 897 160 (семьдесят миллионов восемьсот девяноста семь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 копеек, всего с НДС 20% 425 382 960 (четыреста двадцать пять миллионов триста восемьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек». (пункт 4.1 договора).

 Пунктами 5.1, 5.2 договора предусмотрено, что оплата товара производится поэтапно на шестидесятый календарный день после подписания Покупателем без замечаний документов, указанных в п. 10.2. при условии получения Покупателем оригинала счета-фактуры,   оформленной)   в   соответствии   с   действующим   законодательством   РФ,   па   основании выставленного счета на оплачу. Наименование и сроки этапов указаны в приложении №1 к настоящему договору.

Оригинал счета-фактуры за выполненные и переданные Работы представляется Подрядчиком не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента выполнения  и передачи Работ, по не позднее 5-го числа месяца, следующею за месяцем сдачи-приемки выполненных Работ.

В силу пункта 12.3 договора за нарушения срока оплаты выполненных работ заказчик выплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы несвоевременного платежа за каждый день просрочки, от несвоевременно оплаченной суммы.

В соответствии с пунктами 13.1-13.2 договора при возникновении спора стороны будут стремиться разрешить его мирным путем, посредством направления претензий, срок ответа на претензию - 15 календарных дней с момента ее получения. В случае не урегулирования спора мирным путем, все споры, противоречия и разногласия, возникшие между сторонами из (или в связи с) настоящего договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.

Согласно пункту 15.1 договора настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

Дополнительным соглашением от 25.01.2022 №4 к договору подряда от 20.07.2020 №282-ВО стороны договорились внести в Договор следующие изменения: 1.1. Внести изменения в раздел 2 Договора «ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА», изложив его в следующей редакции:

«2.1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Договором срок по заданию Заказчика выполнить под техническим наблюдением Федерального автономного учреждения (ФАУ) «Российский морской регистр судоходства» (РМРС) с соблюдением всех правил и стандарте) и комплекс Работ, включающий в себя, в том числе:

Изготовление защитных кожухов для магнитных маркеров трубопровода 0168,3x12.7 мм в количестве 3 шт.

Подготовка труб O168,3x12,7 мм под установку браслетных протекторов. Количество браслетных протекторов - не более 60 шт.

Выполнение комплекса подготовительных работ для изоляции сварных стыковых соединений труб, установке браслетных протекторов и магнитных маркеров с целью получения Заключения о готовности Подрядчика к выполнению работ в 2020 году.

Поставка и изготовление материалов для теплогидроизоляции стыков мультифазного трубопровода O406,4x19,1 мм.

2.1.5.Выполнение комплекса подготовительных работ для изоляции сварных стыковых соединений труб, установке браслетных протекторов и магнитных маркеров с целью получения Заключения о готовности Подрядчика к выполнению работ в 2021 году.

2.1.6.   Нанесение ТУМ Canusa KLON-B 500 и скального листа на сварные стыковыесоединения труб O168,3x12,7 мм в количестве 617 шт.

2.1.7.   Установка браслетных протекторов на трубопровод O168,3x12,7 мм в количестве 57 шт.

Установка магнитных маркеров на трубопровод O168,3x12,7 мм, с последующей установкой защитного кожуха в количестве 3 шт.

Нанесение ТУМ Canusa KLON-B 500 и скального листа на сварные стыковые соединения труб O273,1x12,7 мм в количестве 612 шт.

2.1.10.Выполнение комплекса подготовительных работ для изоляции сварных стыковых соединений труб, установке браслетных протекторов и магнитных маркеров с целью получения Заключения о готовности Подрядчика к выполнению работ в 2022 году (мобилизационный сбор).

Нанесение ТУМ Canusa KLON-B 500 на сварные стыковые соединения трубных вставок O168,3x12,7 мм в количестве 2 шт.

Нанесение ТУМ Canusa KLON-B 500 на сварные стыковые соединения трубных вставок O273,1x12,7 мм в количестве 2 шт.

Подробный перечень Работ указан в Приложении № 2 «Объём работ» к настоящему Договору.

2.2. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком Работы и материалы и уплатить обусловленную Договором цену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором. Работы Подрядчика принимаются по акту выполненных работ, материалы, указанные в Приложении № 1 «Коммерческая спецификация» передаются Заказчику по унифицированной форме ТОРГ-12.

2.3. Место выполнения работ: ОП ООО «БТ СВАП» 

<

...>: д.г. трубоукладочное судно (ТУС) Заказчика UR2, строительная площадка Заказчика.

2.4. Срок выполнения Работ по Договору:

- начало Работ - с даты подписания Договора и передачи материалов для испытаний;

- окончание Работ в море по изоляции сварных стыковых соединений труб O168,3x12.7 мм, O273,1x12,7 мм, установки браслетных протекторов и маркеров магнитных на трубопровод O168,3x12,7 мм - не позднее 15.06.2022;

- окончание Работ на берегу по изоляции сварных стыковых соединений трубных вставок O168,3x12,7 мм, O273,1x12,7 мм - не позднее 15.08.2022.

1.2. Внести изменения в пункт 4.1. Договора, изложив его в следующей редакции: «Цена Договора в соответствии с «Коммерческой спецификацией» (Приложение №1 к Договору) составляет 118 420 688 (Сто восемнадцать миллионов четыреста двадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% процентов 23 684 137 (Двадцать три миллиона шестьсот восемьдесят четыре тысячи сто тридцать семь) рублей 60 копеек, всего с НДС 20% 142 104 825 (Сто сорок два миллиона сто четыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 60 копеек».

1.3. Ввести в Договор пункт 4.5. следующего содержания: «В связи с существенным продлением срока выполнения работ, отраженного в пункте 2.4. Договора, ростом накладных расходов, в том числе на подготовку персонала, консервацию и расконсервацию оборудования, а также в целях обеспечения сохранения согласованных ранее Сторонами ставок по видам выполняемых в 2022 году работ (Приложение №1 «Коммерческая спецификация») и исключению рисков несвоевременной оплаты, Стороны пришли к соглашению, что Заказчик перед началом мобилизации оборудования и персонала сезона 2022 года производит:

- оплату мобилизационного сбора (п.2.1.10 Договора) в размере 3 674 000,00 (Три миллиона шестьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% 734 800,00 (Семьсот тридцать четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, итого с НДС - 4 408 800,00 (Четыре миллиона четыреста восемь тысяч восемьсот) рублей 00 копеек.

- а также авансового платежа в размере 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек, кроме того НДС 20% 1 200 000,00 (Один миллион двести тысяч) рублей 00 копеек, итого с НДС -7 200 000,00 (Семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, подлежащего зачету в счет выполняемого в 2022 году объема работ.

1.4.      Ввести в Договор пункт 5.4. следующего содержания: «Оплата Исполнителю мобилизационного сбора перед началом работ сезона 2022 года, а также авансового платежа, производится до начала мобилизации персонала и оборудования на морской участок работ, но не позднее 27.04.2022, на основании счета, выставленного Заказчику».

1.5.      Внести изменения в пункт 5.1. Договора, изложив его в следующей редакции:«Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные им за месяц работы на шестидесятый календарный день после подписания Заказчиком без замечаний документов, указанных в п. 10.1. настоящего Договора, при условии получения Заказчиком оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с действующим законодательством и счета на оплату, а также Заказчик дополнительно оплачивает Подрядчику стоимость работы персонала и использование оборудования по суточным ставкам в соответствии с приложением № 8 к Договору «Расчёт стоимости суточных ставок персонала и оборудования ООО «БТ СВАП». Наименование работ, сроки и стоимость работ и материалов указаны в Приложении №1 «Коммерческая спецификация» к настоящему Договору».

1.6.      Внести изменения в Приложение № 1 «Коммерческая спецификация» к Договору, изложив его в редакции Приложения № 1 «Коммерческая спецификация» к настоящему Дополнительному соглашению.

1.7. Внести изменения в Приложение № 2 «Объем работ по изоляции стыковых соединений груб, установке браслетных протекторов и магнитных маркеров», изложив его в редакции Приложения № 2 «Объем работ по изоляции стыковых соединений труб, установке браслетных протекторов и магнитных маркеров» к настоящему Дополнительному соглашению.

1.8. Внести изменения в Приложение № 4 «План реализации проекта по изоляции сварных стыковых соединений труб, установке браслетных протекторов и магнитных маркеров», изложив его в редакции Приложения № 3 «План реализации проекта по изоляции сварных стыковых соединений труб, установке браслетных протекторов и магнитных маркеров» к настоящему Дополнительному соглашению.

1.9. Внести изменения в Приложение № 8 «Расчёт стоимости суточных ставок персонала и оборудования ООО «БТ СВАП», изложив его в редакции Приложения № 4 «Расчёт стоимости суточных ставок персонала и оборудования ООО «БТ СВАП»» к настоящему Дополнительному соглашению.

Во исполнение условий договора ООО «БТ Свап» выполнило работы  по договору на сумму 20 167 346 руб. 40 коп., что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей актами от 30.06.2022 №1006 на сумму 17 988 480 руб., от 29.07.2022 № 1271 на сумму 1 470 866 руб. 40 коп., от 06.09.2022 №1583 на сумму 354 000 руб., от 14.10.2022 №1979 на сумму 354 000 руб.

ООО «ВИМАР ОФФШОР» платежным поручением от 04.05.2022 №1145 внес аванс на сумму 7 200 000 руб., а также платежным поручением от 20.07.2022 №1855 произвел частичную оплату по договору на сумму 9 496 000 руб., задолженность ответчика составила 3 471 346 руб. 40 коп.

Ввиду несвоевременной оплаты выполненных работ истец начислил неустойку за период с 02.10.2022 по 06.06.2023  в размере 821 599 руб. 91 коп.

В целях досудебного урегулирования спора ООО «БТ Свап» 25.04.2023 направило в адрес ООО «ВИМАР ОФФШОР» претензию от 25.04.2023 №121. Ответа на претензию не поступило. 

Неисполнение требований, изложенных в претензии, послужило основанием для обращения истца в Арбитражный суд Астраханской области с настоящим исковым заявлением. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Статья 307 ГК РФ предусматривает, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. 

На основании статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В силу положений статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

Заключенный сторонами договор является договором строительного подряда и регулируется, как общими положениями гражданского законодательства, так и нормами для отдельных видов обязательств, содержащихся в параграфах 1, 3, 5 главы 37 «Подряд» ГК РФ, а также положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ).

Договор не признан недействительным или незаключенным в установленном законом порядке. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ). 

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1 статьи 740 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. 

По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение, как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (пункт 2 статьи 708 ГК РФ). 

На основании пункта 1 статьи 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. 

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 ГК РФ). 

Истец выполнил работы  по договору  на сумму 20 167 346 руб. 40 коп., что подтверждается подписанными сторонами и удостоверенными оттисками их печатей актами от 30.06.2022 №1006 на сумму 17 988 480 руб., от 29.07.2022 № 1271 на сумму 1 470 866 руб. 40 коп., от 06.09.2022 №1583 на сумму 354 000 руб., от 14.10.2022 №1979 на сумму 354 000 руб.

ООО «ВИМАР ОФФШОР» платежными поручениями от 04.05.2022 №1145, от 20.07.2022 №1855 произвел частичную оплату по договору на сумму 16 696 000 руб.

Судом установлено, что акты содержат сведения о подрядчике и заказчике, наименовании, стоимости работ, отметки о принятии товара ответчиком.

Указанные документы подписаны и скреплены печатями со стороны истца и ответчика без замечаний и возражений по качеству выполненных работ. 

Согласно расчету истца задолженность ответчика по договору, с учетом частичной оплаты, составляет 3 471 346 руб. 40 коп.

Суд, проверив расчеты истца, признал их верными.

В судебном заседании представитель истца пояснил, что что задолженность до настоящего времени не погашена.

По общему правилу, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (часть 1 статьи 65 АПК РФ). Однако такая обязанность не является безграничной. Если истец в подтверждение своих доводов приводит убедительные доказательства, а ответчик с ними не соглашается, не представляя документы, подтверждающие его позицию, то возложение на истца дополнительного бремени опровержения документально неподтвержденной позиции процессуального оппонента будет противоречить состязательному характеру судопроизводства (статьи 8, 9 АПК РФ).

Непредставление доказательств должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументированного со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент, участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения (Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 №12505/11).

На основании пункта 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Контррасчет в подтверждение фактов исполнения ответчиком встречной обязанности по оплате выполненных работ со ссылками на первичные документы вопреки требованиям процессуального закона не представлен.

Доказательств надлежащего исполнения ответчиком обязательств, отсутствия долга, а равно его наличия в ином (меньшем) размере, чем заявлено истцом, ответчиком не представлено.

В силу части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

С учетом изложенного суд пришел к выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию задолженность по договору в размере 3 471 346 руб. 40 коп.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика по договору неустойку за период с 02.10.2022 по 06.06.2023  в размере 821 599 руб. 91 коп.

Согласно статье 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, предусмотренной законом или договором.

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

В силу пункта 12.3 договора за нарушения срока оплаты выполненных работ заказчик выплачивает подрядчику неустойку в размере 0,1% от суммы несвоевременного платежа за каждый день просрочки, от несвоевременно оплаченной суммы.

Ввиду несвоевременной оплаты произведенных работ истцом ответчику начислена по договору неустойка за период с 02.10.2022 по 06.06.2023  в размере 821 599 руб. 91 коп.

Учитывая, что факт несвоевременной оплаты поставленного товара подтвержден материалами дела и не опровергнут ответчиком, принимая во внимание отсутствие доказательств уплаты суммы неустойки, суд считает, что требования истца в части взыскания неустойки подлежат удовлетворению.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу о том, что с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка за период с 02.10.2022 по 06.06.2023  в размере 821 599 руб. 91 коп.

При таких обстоятельствах суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

Истцом при обращении в суд с настоящим исковым заявлением уплачена государственная пошлина в размере 44 479 руб.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено настоящей главой.

В связи с чем излишне уплаченная государственная пошлина в размере 14 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

В силу статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ВИМАР ОФФШОР» в пользу общества с ограниченной ответственностью «БТ СВАП» по договору подряда от 20.07.2020 №282-ВО задолженность в размере 3 471 346 руб. 40 коп., неустойку за период с 02.10.2022 по 06.06.2023  в размере 821 599 руб. 91 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 44 465 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «БТ Свап» из федерального бюджета уплаченную платежным поручением от 06.06.2023 №3200 государственную пошлину в размере 14 руб.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, через Арбитражный суд Астраханской области.

 

Судья

А.Э. Измайлова