Четвертый арбитражный апелляционный суд 

672007, Чита, ул. Ленина 145 http://4aas.arbitr.ru 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Дело № А58-9930/2022

г. Чита

24 мая 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 17 мая 2023 года. Полный текст постановления изготовлен 24 мая 2023 года. 

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Сидоренко В.А., судей Кайдаш Н.И., Ломако Н.В., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью «ЭкспертСервис-Юг» на решение Арбитражного суда  Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2023 года по делу № А58-9930/2022 по заявлению  общества с ограниченной ответственностью «ЭкспертСервис-Юг» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике  Саха (Якутия) (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о признании недействительным  решения от 17 октября 2022 года по делу № 014/06/104-1481/2022 о рассмотрении  сведений для включения в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) Российской Федерации,  

в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, участвует государственное казенное учреждение «Служба  государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>),  

в отсутствие в судебном заседании представителей участвующих в деле лиц, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ЭкспертСервис-Юг» (далее –  заявитель, общество или ООО «ЭкспертСервис-Ю) обратилось в Арбитражный суд  Республики Саха (Якутия) к Управлению Федеральной антимонопольной службы по  Республике Саха (Якутия) (далее – антимонопольный орган, Якутское УФАС России или  Управление) с заявлением о признании недействительным решения от 17 октября 2022  года по делу № 014/06/104-1481/2022 о рассмотрении сведений для включения в реестр  недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Российской Федерации.  

Определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 08 декабря 2022  года к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных  требований относительно предмета спора, привлечено государственное казенное  учреждение «Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)» (далее –  ГКУ «СГЗ»).  

Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2023 года в  удовлетворении заявленных требований отказано. Суд первой инстанции, принимая  решение, пришёл к выводу, что оспариваемое решение не противоречит Федеральному  закону от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о  контрактной системе) и не нарушает права и законные интересы заявителя.  

Не согласившись с решением суда первой инстанции, общество обжаловало его в  апелляционном порядке. Заявитель апелляционной жалобы ставит вопрос об отмене  решения суда первой инстанции как незаконного и необоснованного, принятого с  нарушением норм материального и процессуального права, по мотивам, изложенным в  жалобе.  

Якутское УФАС России в представленном письменном отзыве на апелляционную  жалобу считает её доводы необоснованными, а требования не подлежащими  удовлетворению.  

Общество в представленных возражениях на отзыв возражает против его доводов. ГКУ «СГЗ» отзыв на апелляционную жалобу не представило. 

О месте и времени рассмотрения апелляционной жалобы, лица, участвующие в  деле, извещены надлежащим образом в порядке, предусмотренном главой 12  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), что  подтверждается отчетом о публикации на официальном сайте Арбитражных судов  

Российской Федерации в сети «Интернет» (https://kad.arbitr.ru) определения о принятии  апелляционной жалобы к производству, однако общество, Якутское УФАС России ГКУ  «СГЗ» явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили. Якутское УФАС  России представило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие его  представителя.  

В соответствии с частью 2 статьи 200 АПК РФ неявка лиц, участвующих в деле,  надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания, не является  препятствием для рассмотрения дела.  

Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело в порядке главы 34  АПК РФ, проанализировав доводы апелляционной жалобы и отзывы на неё, возражений  на отзыв, изучив материалы дела, проверив правильность применения судом первой  инстанции норм процессуального и материального права, пришел к следующим выводам.  

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, 25  февраля 2022 года на официальном сайте Единой информационной системы (далее –  ЕИС) и на сайте оператора электронной площадки «АО «ЕЭТП» ГКУ «СГЗ» (Заказчик)  размещено извещение № 0816500000622002026 по осуществлению авторского надзора по  объекту: «Этнокультурный центр в с. Жиганск, Жиганского района PC (Я)».  

Начальная (максимальная) цена контракта составила 422 000 рублей.  

15 марта 2022 года ГКУ «СГЗ» и ООО «ЭкспертСервис-Юг» заключили  государственный контракт № 0816500000622002026, в соответствии с которым  Исполнитель (ООО «ЭкспертСервис-Юг») обязуется оказать Заказчику (ГКУ «СГЗ»)  услуги по осуществлению авторского надзора за строительством объекта Этнокультурный  центр в с. Жиганск, Жиганского района PC (Я)» в соответствии с техническим заданием и  План-графиком Заказчика на период строительства объекта, а Заказчик обязуется принять  и оплатить за оказанные услуги.  

Цена контракта составляет 400 000 рублей (п. 1.4). 

Согласно пункту 1.6 разделу 1 государственного контракта от 15 марта 2022 года   № 0816500000622002026, Исполнитель приступает к оказанию Услуг с момента  заключения Контракта и обязуется оказать Услуги по Контракту в полном объеме в срок  по 20 ноября 2022 года.  

Пунктом 2.2 раздела 2 государственного контракта от 15 марта 2022 года №  0816500000622002026 Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания  оказания Услуг формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной  подписью лица, имеющего право действовать от имени Исполнителя, и размещает в ЕИС  документ о приемке, который должен содержать информацию, предусмотренную  подпунктами «а» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.  

11 июля 2022 года Заказчиком направлено письмо № 523/12/1-07/5002 в адрес ООО  «ЭкспертСервис-Юг» о проведении проверки от 05 июля 2022 года № 01-08-С-548-22 с  просьбой принять участие в проверке в рамках авторского надзора согласно пункту 5  графы 9 Технического задания государственного контракта, требования к оказываемым  услугам – Исполнитель обязан участвовать в приемке в процессе строительства отдельных  ответственных конструкций согласно плану-графику осуществления авторского надзора,  являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта, прибыть на Объект в течение  3 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления Заказчика.  

02 августа 2022 года Заказчиком составлен акт об отсутствии представителя  авторского надзора на момент проверки с 28 июля 2022 года по 01 августа 2022 года.  

07 сентября 2022 года Заказчиком направлено письмо № 523/12/1-07/6375 в адрес  ООО «ЭкспертСервис-Юг» о проведении проверки от 30 августа 2022 года № 01-08-С765-22 с просьбой принять участие в проверке в рамках авторского надзора Контракта №  0816500000622002026.  

07 сентября 2022 года Заказчиком в адрес ООО «ЭкспертСервис-Юг» направлен  мотивировочный отказ от подписания акта сдача-приемки оказанных услуг в связи с тем,  что Исполнитель не принимал участие в рамках авторского надзора по уведомлениям от  11 июля 2022 года № 523/12/1-07/5002, от 07 сентября 2022 года № 523/12/1-07/6375.  

14 сентября 2022 года Заказчиком направлено в адрес ООО «ЭкспертСервис-Юг»  претензионное письмо № 523/12/1-07/6572, где, руководствуясь пунктами 4.2.2 Контракта,  Заказчик потребовал у Исполнителя информацию об исполнении им обязательств по  Контракту.  

15 сентября 2022 года Заказчиком составлен акт об отсутствии представителя  авторского надзора на момент проверки с 14 по 15 сентября 2022 года.  

27 сентября 2022 года Заказчиком принято решение № 523/02-11/6843 об  одностороннем расторжении контракта, поскольку ООО «ЭкспертСервис-Юг» не  предпринимались меры по исполнению контракта.  

10 октября 2022 года Контракт расторгнут в одностороннем порядке. 

11 октября 2022 года Заказчик – ГКУ «СГЗ» обратилось в Якутское УФАС России  с обращением о включении в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения  государственного контракта от 15 марта 2022 года № 0816500000622002026 в отношении  ООО «ЭкспертСервис-Юг».  

11 октября 2022 года письмом № 06/2876 Якутское УФАС России направило  запрос в адрес ГКУ «СГЗ», ООО «ЭкспертСервис-Юг» в связи с поступлением от  Заказчика сведений об участнике закупки об одностороннем отказе заказчика от  

исполнения контракта для включения в реестр недобросовестных поставщиков  (подрядчиков, исполнителей) о необходимости представления сведений и документов в  срок до 14 октября 2022 года и указанием места и времени рассмотрения жалобы и  возможности рассмотрения посредством web-видеоконференции 17 октября 2022 года в  12-30 час.  

14 октября 2022 года в адрес Якутского УФАС России от ООО «ЭкспертСервис- Юг» поступили возражения № 172 без приложения документов в обоснование  возражений.  

14 октября 2022 года в адрес Якутского УФАС России от ГКУ «СГЗ» поступили  пояснения от 14 октября 2022 года № 523/02-011/7257 с приложением документов в  обоснование, в том числе переписки с Исполнителем, письма подрядчика ООО  «Строительная компания «Сахастрой 2002», осуществляющего строительство объекта  «Этнокультурный центр в с. Жиганск Жиганского района PC (Я)» о том, что с начала  строительства в период с апреля 2022 года по настоящее время выполнение работ  осуществляется силами ООО «СК «Сахастрой 2002» без сопровождения и/или контроля  проектировщика, т.е. без авторского надзора, лицо, осуществляющее авторский надзор по  контракту, не выходит на связь, о наличии журнала авторского надзора пояснить не  представляется возможным по причине отсутствия журнала в его распоряжении.  

24 октября 2022 года комиссией Якутского УФАС России состоялось рассмотрение  сведений об участнике закупки ООО «ЭкспертСервис-Юг» для включения в реестр  недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), по результатам которого  вынесено решение по делу № 014/06/104-1481/2022 о включении сроком на два года в  реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Российской  Федерации сведений, представленных заказчиком о включении информации об участнике  закупки ООО «ЭкспертСервис-Юг», в связи с односторонним отказом Заказчика от  исполнения контракта по результатам запроса котировок в электронной форме по  осуществлению авторского надзора по объекту «Этнокультурный центр в с. Жиганск  Жиганского района PC (Я)» (изв. № 0816500000622002026).  

02 декабря 2022 года ООО «ЭкспертСервис-Юг», не согласившись с принятым  решением, обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.  

Суд апелляционной инстанции считает, что суд первой инстанции правильно  установил фактические обстоятельства дела и дал им надлежащую правовую  квалификацию, в связи с чем, у суда нет оснований к удовлетворению апелляционной  жалобы. Выводы суда первой инстанции являются верными и соответствуют  обстоятельствам дела.  

Заинтересованное лицо в силу части 1 статьи 4 АПК РФ вправе обратиться в  арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных  интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

Частью 1 статьи 198 АПК РФ установлено, что граждане, организации и иные лица  вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными  ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов,  осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что  оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не  соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и  законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,  незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для  осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.  

Таким образом, для признания оспариваемого ненормативного правового акта  недействительным, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов  местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными суд должен  установить наличие двух условий, а именно:  

– оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие)  органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц не соответствуют  закону или иному нормативному правовому акту;  

– оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие)  органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц нарушают права и  законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  

В соответствии с частью 4 статьи 200 АПК РФ при рассмотрении дел об  оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов,  осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный суд в судебном  заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений,  оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону  или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа  или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые  действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение  и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере  предпринимательской и иной экономической деятельности.  

В части 5 статьи 200 АПК РФ указано, что обязанность доказывания соответствия  оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному  правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых  действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие  

оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также  обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения,  совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо,  которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).  

Закон о контрактной системе регулирует отношения, направленные на обеспечение  государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,  результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и  прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других  злоупотреблений. Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах  открытости, прозрачности информации, обеспечения конкуренции, эффективности  осуществления закупок (статьи 1, 6 Закона о контрактной системе).  

По смыслу Закона о контрактной системе ведение реестра недобросовестных  поставщиков призвано обеспечивать защиту государственных и муниципальных  заказчиков от действий (бездействия) недобросовестных поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) при заключении и исполнении государственных и муниципальных  контрактов.  

В соответствии с частью 8 статьи 95 Закона о контрактной системе расторжение  контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего  отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским  законодательством.  

Согласно частями 9, 12.2 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе  принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего  отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было  предусмотрено контрактом.  

В случае принятия заказчиком предусмотренного частью 9 настоящей статьи  решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, заключенного по результатам  проведения закрытого конкурса, закрытого аукциона, при осуществлении закупок,  предусмотренных статьей 93 (за исключением закупки товара у единственного  поставщика на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 настоящего Федерального  закона), статьей 111 (в случае определения в соответствии с частью 1 статьи 111  настоящего Федерального закона особенностей, предусматривающих неразмещение  информации и документов в единой информационной системе, на официальном сайте при  определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и статьей 111.1 настоящего  Федерального закона, такое решение передается лицу, имеющему право действовать от  имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку или направляется  

поставщику (подрядчику, исполнителю) с соблюдением требований законодательства  Российской Федерации о государственной тайне по адресу поставщика (подрядчика,  исполнителя), указанному в контракте. Выполнение заказчиком требований настоящей  части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об  одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления  считается:  

1) дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени поставщика  (подрядчика, исполнителя), в расписке о получении решения об одностороннем отказе от  исполнения контракта (в случае передачи такого решения лицу, имеющему право  действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), лично под расписку);  

2) дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику,  исполнителю) заказного письма, предусмотренного настоящей частью, либо дата  получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя)  по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении  срока хранения (в случае направления решения об одностороннем отказе от исполнения  контракта заказным письмом).  

Согласно части 13 статьи 95 Закона о контрактной системе, решение заказчика об  одностороннем, отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается  расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика  (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.  

Ведение реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в  силу части 1 статьи 104 Закона о контрактной системе ведение осуществляется  федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление  контроля в сфере закупок.  

В реестр недобросовестных поставщиков на основании части 2 статьи 104 Закона о  контрактной системе, включается информация об участниках закупок, уклонившихся от  заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми  контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика  от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов.  

В течение десяти рабочих дней с даты поступления документов и информации,  указанных в частях 4 – 6 настоящей статьи, федеральный орган исполнительной власти,  уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, осуществляет проверку  содержащихся в указанных документах и информации фактов. В случае подтверждения  достоверности этих фактов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный  на осуществление контроля в сфере закупок, включает информацию, предусмотренную  

частью 3 настоящей статьи, в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,  исполнителей) в течение трех рабочих дней с даты подтверждения этих фактов (часть 7).  

Информация, содержащаяся в реестре недобросовестных поставщиков  (подрядчиков, исполнителей), размещается в единой информационной системе и должна  быть доступна для ознакомления без взимания платы (часть 8).  

Информация, предусмотренная частью 3 настоящей статьи, исключается из  указанного реестра по истечении двух лет с даты ее включения в реестр  недобросовестных поставщиков (часть 9).  

Аналогичные положения содержатся и в Правилах ведения реестра  недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 года № 1078  (далее – Правила № 1078).  

Пунктом 13 Правил № 1078 предусмотрено, не позднее пяти рабочих дней со дня,  следующего за днем поступления обращения, орган контроля (за исключением случаев,  предусмотренных подпунктом «е» пункта 9 и подпунктом «г» пункта 10 настоящих  Правил), осуществляет следующую совокупность действий, в том числе:  

а) рассматривает обращение, проводит проверку содержащихся в обращении  фактов, свидетельствующих об уклонении участника закупки от заключения контракта, о  расторжении контракта по решению суда в связи с существенным нарушением  поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, об одностороннем отказе  заказчика от исполнения контракта в связи с существенными нарушениями поставщиком  (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или об отсутствии оснований для  одностороннего отказа поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта, а  также внеплановую проверку, предусмотренную пунктом 5 части 15 статьи 99 Закона о  контрактной системе, при этом:  

б) по результатам рассмотрения обращения и проведения проверок, указанных в  подпункте «а» настоящего пункта, принимает решение о включении информации об  участнике закупки, о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр либо в случаях,  предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящих Правил, об отказе во включении участника  закупки, поставщика (подрядчика, исполнителя) в реестр, а также выдает (при  необходимости) предписание, предусмотренное пунктом 2 части 22 статьи 99  Федерального закона, в случае выявления нарушений законодательства Российской  Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок  товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее –  законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о  контрактной системе в сфере закупок).  

Из решения Заказчика от 27 сентября 2022 года № 523/02-11/6843 об  одностороннем отказе от исполнения государственного контракта от 15 марта 2022 года   № 0816500000622002026 следует, что в качестве основания для расторжения  государственного контракта Заказчик сослался на не исполнение пункта 5 графы 9  Технического задания контракта (Приложением № 1 контракта), не соблюдение условия,  предусмотренного Планом-графиком (Приложение № 2 контракта), пункт 8.3 контракта,  статью 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 9 статьи 95 Закона о  контрактной системе.  

Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, 15 марта  2022 года по результатам проведенного запроса котировок в электронной форме между  Заказчиком (ГКУ «СГЗ») и ООО «Эксперт СервисЮг» заключен государственный  контракт № 0816500000622002026 на оказание услуг по осуществлению авторского  надзора за строительством объекта «Этнокультурный центр в с. Жиганск Жиганского  района Республики Саха (Якутия)», в соответствии с которым Исполнитель (ООО  «ЭкспертСервис-Юг») обязуется оказать Заказчику (ГКУ «СГЗ») услуги по  осуществлению авторского надзора за строительством объекта Этнокультурный центр в с.  Жиганск, Жиганского района PC (Я)» в соответствии с техническим заданием и План-графиком Заказчика (Приложения № 1, 2) на период строительства объекта, а Заказчик  обязуется принять и оплатить за оказанные услуги.  

Состав и объем Услуг, иные данные об услуге определяются приложением № 1 к  Контракту (п. 1.2 контракта).  

Согласно пункту 1.6 раздела 1 государственного контракта от 15 марта 2022 года   № 0816500000622002026, Исполнитель приступает к оказанию Услуг с момента  заключения Контракта и обязуется оказать Услуги по Контракту в полном объеме в срок  по 20 ноября 2022 года.  

Согласно пункту 2.2 раздела 2 Исполнитель не позднее 5 (пяти) рабочих дней со  дня окончания оказания Услуг формирует с использованием ЕИС, подписывает  усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени  Исполнителя, и размещает в ЕИС документ о приемке, который должен содержать  информацию, предусмотренную подпунктами «а» - «ж» пункта 1 части 13 статьи 94  Закона о контрактной системе.  

Пунктом 8.3 контракта предусмотрено, что Заказчик вправе принять решение об  одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным  Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения  данного вида обязательства.  

В соответствии с пунктом 5 графы 9 Технического задания контракта требования к  оказываемым услугам, Исполнитель обязан участвовать в приемке в процессе  строительства отдельных ответственных конструкций согласно плану-графику  осуществления авторского надзора, являющегося неотъемлемой частью контракта,  прибыть на объект в течение 3 рабочих дней с даты получения соответствующего  уведомления Заказчика.  

Согласно пункту 6.3 Приказа Минстроя Россиии от 19 февраля 2016 года № 98/пр  «Об утверждении свода правил «Положение об авторском надзоре за строительством  зданий и сооружений», выезд специалистов группы авторского надзора на строительную  площадку осуществляется в установленные планом-графиком сроки.  

Согласно Плану-графику (Приложение № 2 контракта) Исполнитель обязуется  посетить объект в количестве 7 раз.  

Заказчик неоднократно направлял в адрес Исполнителя требования от 11 июля  2022 года № 523/12/1-07/5002, от 07 сентября 2022 года № 523/12/1-07/6375 об  обеспечении явки представителя Исполнителя на объект в рамках осуществления  авторского надзора по условиям контракта, направлено претензионное письмо от 14  сентября 2022 года № 523/12/1-07/6572 об осуществлении явки на объект в соответствии с  План-графиком и предоставлением информации об исполнении обязательств  установленных контрактом.  

Между тем, Исполнитель ни одного выезда на объект не осуществил, о чем  составлены соответствующие акты о не явке представителя авторского надзора.  

Из содержания оспариваемого решения антимонопольного органа, следует, что по  результатам изучения представленных документов и пояснений Заказчика,  антимонопольный орган пришел к выводу о соблюдении Заказчиком порядка  одностороннего расторжения контракта, отсутствии доказательств, подтверждающих  надлежащее исполнение контракта ООО «ЭкспертСервис-Юг».  

В пункте 41 Обзора судебной практики применения законодательства Российской  Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Президиума  Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2017 года, указано, что санкция в  виде включения в реестр недобросовестных поставщиков влечет для участника торгов  значительные неблагоприятные последствия, в том числе экономического характера,  поскольку в будущем может ограничить права такого участника на участие в торгах по  размещению государственных и муниципальных заказов.  

Как следует из определений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации  от 17 сентября 2012 года № ВАС-11617/12 и от 12 июля 2013 года № ВАС-8371/13, реестр  

недобросовестных поставщиков является специальной мерой ответственности,  установленной законодателем в целях обеспечения исполнения лицом принятых на себя в  рамках процедуры размещения государственного заказа обязательств. Включение  сведений о лице в реестр недобросовестных поставщиков по существу является санкцией  за недобросовестное поведение данного лица.  

Данная мера связана с возложением на нарушителя негативных последствий -  наличие в свободном доступе информации о лице как о ненадежном поставщике,  ненадлежащим образом исполнившим принятое на себя обязательство и, как следствие,  подрыв деловой репутации и возможное уменьшение в будущем количества заключенных  сделок, а также выгоды от осуществления предпринимательской деятельности.  

Одним из последствий такого включения (в качестве санкции за допущенное  нарушение) может являться ограничение прав такого лица на участие в течение  установленного срока в торгах по размещению государственного и муниципального  заказов.  

В частности, на основании части 1.1 статьи 31 Закона о контрактной системе  заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре недобросовестных  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том  числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,  лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки –  юридического лица.  

Основанием для включения в реестр недобросовестных поставщиков является  только такое уклонение лица от заключения контракта или от исполнения условий  государственного контракта, которое свидетельствует о его недобросовестном поведении,  совершении им умышленных действий (бездействия), в том числе приведших к  невозможности заключения контракта с этим лицом, ранее признанным победителем  торгов, и нарушающих права заказчика относительно условий (заявленных  недобросовестным лицом как лучшие) или к нарушению срока исполнения контракта, что  в итоге приводит к неэффективному использованию бюджетных средств.  

При этом ни Закон о контрактной системе, ни Правила № 1078 не содержат  безусловной обязанности антимонопольного органа включать представленные заказчиком  сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных  поставщиков без оценки его действий в каждом конкретном случае.  

Из приведенных положений части 7 статьи 104 Закона о контрактной системе,  пунктов 11 и 12 Правил № 1078 ведения реестра недобросовестных поставщиков  (подрядчиков, исполнителей) следует обязанность антимонопольного органа полно,  объективно и всесторонне проверить представленные заказчиком документы и  

информацию. Только в случае подтверждения достоверности приведенных в них фактов и  обстоятельств антимонопольный орган вправе принять решение о включении  соответствующих сведений в реестр недобросовестных поставщиков. В иных случаях  антимонопольный орган должен вынести решение об отказе во включении информации о  поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр недобросовестных поставщиков.  

Следовательно, при рассмотрении вопроса о признании участника размещения  заказа уклонившимся от исполнения условий контракта антимонопольный орган не  должен ограничиваться формальным установлением факта нарушения Закона о  контрактной системе либо наличием решения заказчика об одностороннем расторжении  контракта, а обязан всесторонне исследовать все обстоятельства дела, дав оценку  существенности нарушения, степени вины поставщика (подрядчика, исполнителя),  правомерности принятия заказчиком решения об одностороннем расторжении контракта и  т.д.  

С учетом изложенного суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда  первой инстанции, что при рассмотрении вопроса о законности решения  антимонопольного органа о включении или не включении лица в реестр  недобросовестных поставщиков нельзя ограничиваться только формальной констатацией  ненадлежащего исполнения хозяйствующим субъектом тех или иных нормативных  требований, без выяснения и оценки всех фактических обстоятельств дела в их  совокупности и взаимосвязи.  

Из части 8 статьи 95 Закона о контрактной системе следует, что расторжение  контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего  отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским  законодательством.  

Согласно части 9 статьи 95 Закона о контрактной системе заказчик вправе принять  решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,  предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего  отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было  предусмотрено контрактом.  

В пункте 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено,  что в случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или  частично, если такой отказ допускается, договор считается соответственно расторгнутым  или измененным.  

В силу статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства  должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, односторонний отказ от их исполнения не допускается.  

Рассматриваемый государственный контракт предусматривает его расторжение по  основаниям в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

Суд первой инстанции пришел к правомерному выводу, что имеющиеся в  материалах дела доказательства свидетельствуют о намеренном уклонении Исполнителя  от исполнения рассматриваемого государственного контракта, повлекшие его  неисполнение в согласованные сроки.  

Принимая во внимание достоверность представленной Якутским УФАС России  информации о расторжении государственного контракта ввиду одностороннего отказа  Заказчика от исполнения контракта, а также фактическое неисполнение условий  государственного контракта, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что  у антимонопольного органа имелись правовые основания для включения сведений об  участнике закупки ООО «ЭкспертСервис Юг» в связи с односторонним отказом Заказчика  от исполнения государственного контракта на осуществление авторского надзора по  объекту строительства в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,  исполнителей).  

При этом суд первой инстанции законно согласился с выводами антимонопольного  органа, исходя из следующего.  

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации  предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск  деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования  имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,  зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке.  

Следовательно, заинтересованное лицо, самостоятельно совершая определенные  действия (подача заявки на участие в запросе котировок, заключение контракта по ее  итогам и его исполнение/неисполнение и т.д.), обязано было предполагать возможные  последствия своих действий, и несло риски, в том числе, негативные при осуществлении  предпринимательской деятельности.  

Таким образом, лицо, приняв решение об участии в процедуре осуществления  государственной закупке и подав соответствующую заявку, несет риск наступления  неблагоприятных для него последствий, предусмотренных Законом о контрактной  системе, в случае совершения им действий (бездействия) в противоречие требованиям  данного закона, в том числе, включения его в реестр недобросовестных поставщиков  (подрядчиков, исполнителей).  

Значит, заинтересованное лицо несет самостоятельные риски  предпринимательской деятельности и должно прогнозировать возможные последствия, в  том числе и негативные, связанные с ее осуществлением.  

С учетом вышеизложенного, суд первой инстанции пришёл к правомерному и  обоснованному выводу, что у Якутского УФАС России, действовавшего в соответствии с  требованиями части 7 статьи 104 Закона о контрактной системе, пунктов 11 и 12 Правил   № 1078, в рассматриваемом конкретном случае имелись достаточные основания для  применения такой меры государственного принуждения, как включение сведений об ООО  «Эксперт Сервис Юг» в реестр недобросовестных поставщиков.  

При указанных фактических обстоятельствах и правовом регулировании суд  апелляционной инстанции не находит оснований для удовлетворения апелляционной  жалобы, доводы которой проверены в полном объеме, но не могут быть учтены как не  влияющие на законность принятого по делу судебного акта. Оснований, предусмотренных  статьей 270 АПК РФ, для отмены или изменения решения суда первой инстанции не  имеется.  

Приведенные в апелляционной жалобе доводы, свидетельствуют не о нарушении  судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а о несогласии  заявителя жалобы с установленными по делу фактическими обстоятельствами и оценкой  судом доказательств.  

Настоящее постановление выполнено в форме электронного документа,  подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи, в связи с чем  направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном  сайте суда в сети «Интернет».  

По ходатайству указанных лиц копии постановления на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.  

Лица, участвующие в деле, могут получить информацию о движении дела в  общедоступной базе данных Картотека арбитражных дел по адресу www.kad.arbitr.ru.  

Четвертый арбитражный апелляционный суд, руководствуясь статьями 258, 268 –  271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2023 года по  делу № А58-9930/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без  удовлетворения.  

Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную  силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев в  кассационном порядке в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа путем подачи  

жалобы через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд. 

Председательствующий судья Сидоренко В.А. 

Судьи Кайдаш Н.И.  

 Ломако Н.В.  

Электронная подпись действительна. 

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России 

Дата 22.02.2023 2:03:00Кому выдана СИДОРЕНКО ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧЭлектронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России 

Дата 22.02.2023 2:09:00Кому выдана ЛОМАКО НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНАЭлектронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство России 

Дата 22.02.2023 2:02:00

Кому выдана КАЙДАШ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА