Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«14» октября 2021 года

                                    Дело № А12-6461/2021

Резолютивная часть оглашена 07 октября 2021 года

Полный текст изготовлен 14 октября 2021 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Поповой Т.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Донцовой Н.Н., рассмотрел в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) о взыскании неустойки, третье лицо:   общество с ограниченной ответственностью «Поволжская Строительная Компания-34» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>).

В судебном заседании участвовали представители:

от истца – ФИО1, по доверенности №2232 от 20.08.2021,

от ответчика – не явились, извещены,

от третьего лица - не явились, извещены.

Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Волгоградской области с исковым заявлением к к  обществу с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой» (далее – ответчик) о взыскании неустойки по договору подряда №465-18 от 19.04.2018 за нарушение сроков выполнения работ по этапу «Водопроводные очистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Новый блок очистных сооружений. Система отведения промывных вод» за период с 14.04.2018 по 28.05.2018 в размере 41 700 руб. 93 коп., неустойки за нарушение сроков выполнения работ по этапу «Водопроводные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Устройство перемычки между водоводами от насосных станций первого подъема до блоков очистных сооружений» за период с 31.05.2018 по 22.06.2018 в размере 91 990 руб. 23 коп., расходов по уплате государственной пошлины  в размере 5 011 руб.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд

установил:

Между ООО «Концессии водоснабжения» (Заказчик) и ООО«ПСК-34» (Подрядчик) 19.04.2021  был заключен договор подряда № 465-18 на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ при проведении пусковых мероприятий на объекте «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда» (далее- Договор подряда).

Цена выполняемых работ, согласно п.2.1 Договора подряда, является твердой и составляет 10 570 030,00 рублей.

Между Заказчиком, Подрядчиком и ООО «ЮгСтрой» (Новый подрядчик,Ответчик) 20.11.2019  было заключено соглашение № 989-19 о передаче прав и обязанностей по Договору подряда (Соглашение).

Согласно ст. 392.3 ГК РФ, в случае одновременной передачи стороной всех прав иобязанностей по договору другому лицу (передача договора) к сделке по передачесоответственно применяются правила об уступке требования и о переводе долга.

В результате передачи Договора к третьему лицу переходят все права и обязанности стороны, в том числе возникшие до передачи договора, если иное прямо не установлено в соглашении о передаче договора. 

В соответствии с п. 1.1.  Соглашения, Подрядчик уступает Новому подрядчикуправа и передает обязанности по Договору подряда, заключенному между Заказчиком иПодрядчиком в части гарантийных обязательств, предусмотренных разделом 10 договора и иные права и обязанности, вытекающие из исполнения передаваемого договора, а Новый Подрядчик принимает указанные в настоящем пункте права и обязанности и становится стороной договора Подряда в порядке и на условиях настоящего соглашения.

Согласно ч. 1. ст. 740 ГК РФ, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкциюпредприятия, здания (в том числе жилого дома),сооружения или иного объекта, а также навыполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимсяобъектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

Согласно ч. 1 ст. 708 ГК РФ, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно п.7.2.1. Договора подряда, Подрядчик обязуется выполнить работы в срок и на условиях, установленных договором.

Согласно календарному плану выполнения работ (приложение № 4) весь комплекс работ подразделен на два  этапа: «Водопроводные очистные сооруженияКраснооктябрьского района г. Волгограда. Новый блок очистных сооружений. Системаотведения промывных вод» и «водопроводные сооружения Краснооктябрьского района г.Волгограда. Устройство перемычки между водоводами от насосных станций первого подъема до блоков очистных сооружений», каждый из которых подразделяется на подэтапы.

По первому этапу «Водопроводные очистные сооружения Краснооктябрьского района г. Волгограда. Новый блок очистных сооружений. Система отведения промывных вод» работы должны быть сданы Подрядчиком 13 апреля 2018 г., фактическая дата сдачи работ- 28 мая 2018 г. Стоимость данного этапа, согласно акту выполненных работ, составила 1 917 284.06 руб.

По второму этапу «Водопроводные сооружения Краснооктябрьского района г.Волгограда. Устройство перемычки между водоводами от насосных станций первого подъема до блоков очистных сооружений» работы должны быть сданы 31.05.2018 г., при этом фактически были сданы 22 июня 2018 г. Стоимость данного этапа, согласно акту выполненных работ, составила 8 651 119,26 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В соответствии с ч.1 ст. 330 ГК РФ, неустойкой (штрафом, пеней) признаетсяопределенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатитькредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 11.2 Договора, в случае просрочки Подрядчиком сроковвыполнения работ, предусмотренных Календарным планом выполнения работ, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает Заказчику неустойку в размере 2/300 от ключевой ставкиЦентрального банка РФ от Цены Договора за каждый день просрочки.

Неустойка по этапу «Водопроводные очистные сооружения Краснооктябрьскогорайона г. Волгограда. Новый блок очистных сооружений. Система отведения промывных вод» за период с 14.04.2018 г. по 28.05.2018 г. по расчету Истца составила 41 700,93 руб.

По второму этапу «Водопроводные сооружения Краснооктябрьского района г.Волгограда. Устройство перемычки между водоводами от насосных станций первого подъема до блоков очистных сооружений» неустойка за период с 31.05.2018 г. по 22.06.2018 г. составила 91 990,23 руб. Расчет неустойки судом проверен и принят.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.110, 112, 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЮгСтрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  неустойку в размере  133 692,16 руб. и государственную пошлину в размере 5 011 руб.

Полный текст решения  будет изготовлен в течение пяти рабочих дней с даты оглашения резолютивной части. 

Решение может быть обжаловано в течение  одного месяца с момента изготовления в полном объеме в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья                                                                                                                   Т.В.Попова