Именем Российской Федерации 

Резолютивная часть Решения

 

г. Краснодар Дело № А32-734/2019  «27» августа 2020 года  

Руководствуясь ст. 27, 102, 110, 167-170, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Ходатайство представителя ответчика о назначении и проведении  повторной судебной строительно-технической экспертизы оставить без  удовлетворения.  

Исковые требования истца удовлетворить. 

Обязать индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304010529500699) в течение трех  месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу в полном  объёме безвозмездно устранить недостатки (дефекты) выполненных по  Контракту на выполнение ремонтно-восстановительных работ конструкций  пола кольцевого проезда № 0763 от 03.05.2018 работ, в том числе:  

- Удаление финишного покрытия полов шлифованием или иным  способом – 100% площади полов – 4094,7803 кв.м;  

- Расшивка и заделка трещин в бетонном основании – 222,8 м;  

- Демонтаж и установка люков смотровых колодцев и  дождеприемников дренажных колодцев до отметки чистого пола – 9 люков;  

- Обеспыливание поверхности – 100% площади бетонного основания  полов – 4094,7803 кв.м;  

- Грунтование поверхности бетонной подготовки водно-дисперсионной  грунтовкой – 100% площади полов – 4094,7803 кв.м;  

- Устройство финишного покрытия толщиной 6 мм из  самовыравнивающейся смеси – 100% площади полов – 4094,7803 кв.м;  

- Затирка поверхности гидроизоляции песком – 100% площади полов –  4094,7803 кв.м;  

- Обеспыливание поверхности после устройства слоя с песком – 100%  площади бетонного основания полов – 4094,7803 кв.м;  

- Грунтование поверхности финишного покрытия водно- дисперсионной грунтовкой – 100% площади полов – 4094,7803 кв.м;  

- Окраска поверхности финишного покрытия двухкомпонентной  эпоксидной краской – 100% площади полов – 4094,7803 кв.м;  

- Устройство деформационных швов здания и усадочных  деформационных швов в покрытии полов – 682,46 м.  

В случае неисполнения индивидуальным предпринимателем ФИО1 решения суда в течение установленного срока, у  ГБУ КК «Фишт» возникает право устранить недостатки за счет  предпринимателя со взысканием с него необходимых расходов.  

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 304010529500699) в пользу ГБУ КК  «Фишт» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 6 000 руб. возмещения  расходов по оплате государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия  в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Краснодарского края.  

Судья А.Г. Пристяжнюк