АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А40-26417/23-96-199

10 мая 2023 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 20.04.2023 Полный текст решения изготовлен 10.05.2023 

Арбитражный суд в составе: судья Гутник П.С. (единолично), при ведении  протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном  заседании дело по исковому заявлению ООО "М1 КОНСТРАКШН" 109004, РОССИЯ,  Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТАГАНСКИЙ, АЛЕКСАНДРА  СОЛЖЕНИЦЫНА УЛ., Д. 27, ЭТАЖ 1, ПОМЕЩ. II, КОМ. 23, ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 07.06.2013, ИНН: 

<

***>, КПП: 770901001  

к ответчику ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-ПН" 367003, РОССИЯ, РЕСП. ДАГЕСТАН,  ГОРОД МАХАЧКАЛА Г.О., МАХАЧКАЛА Г., СОВЕТСКИЙ РАЙОН ВН.Р-Н,  МАХАЧКАЛА Г., ИРЧИ КАЗАКА УЛ., Д. 2Б, ЭТАЖ 3, КАБ. 5, ОГРН: 

<

***>,  Дата присвоения ОГРН: 13.03.2015, ИНН: 

<

***>, КПП: 057201001  

о взыскании 48 087 021,00 руб. при участии: от истца: ФИО2 по дов. от 06.12.22г.; диплом; от ответчика: не явился, извещён, Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ:

ООО "М1 КОНСТРАКШН" (далее по тексту – Истец) обратилось в  арбитражный суд с иском к ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-ПН" (далее по тексту –  Ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 48 087 021 (Сорок  восемь миллионов восемьдесят семь тысяч двадцать один) рубль 00 копеек.  

Истец требования поддержал в полном объеме по основаниям изложенным в  иске.  

Ответчик не воспользовался предоставленными ему АПК РФ процессуальными  правами, отзыв или иную письменную позицию по спору не представил, требования  истца не оспорил, не предоставил истребованные судом доказательства оплаты  задолженности либо ее отсутствия, извещенный надлежащим образом о дате, месте и  времени проведения судебного разбирательства, в судебное заседание не явился, в  связи с чем, суд рассматривает спор в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ в его отсутствие.  

Рассматривая данный спор по существу, суд исходит из следующего.  

Между сторонами были заключены договоры подряда. К спорным  правоотношениям подлежат применению нормы, регулирующие договор подряда, а  также нормы о неосновательном обогащении.  

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в  арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных  интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение  права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в  разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.  

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию  другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а  заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ч. 1 ст. 702 ГК РФ).  

Согласно ч. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и  конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре  могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы  (промежуточные сроки).  

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения  работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены  также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708  ГК РФ).  

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не  предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как  начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.  

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей  выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких  указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего  Кодекса.  

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые  предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять  выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора,  ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об  этом подрядчику.  

Согласно части 1 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации  обязательство прекращается полностью или частично по основаниям,  предусмотренным данным Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или  договором.  

В соответствии с частью 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской  Федерации, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора  подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку  становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и  потребовать возмещения убытков.  

Согласно ч. 4 ст. 453 ГК РФ в случае, когда до расторжения или изменения  договора одна из сторон, получив от другой стороны исполнение обязательства по  договору, не исполнила свое обязательство либо предоставила другой стороне  неравноценное исполнение, к отношениям сторон применяются правила об  обязательствах вследствие неосновательного обогащения (глава 60), если иное не  предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.  

Согласно позиции, обозначенной в Постановлении Президиума ВАС РФ от  05.11.2013 N 1123/13, если стороны не согласовали условие о возврате неосвоенного  (неотработанного) аванса при расторжении договора подряда, то уплаченная сумма  аванса подлежит возврату как неосновательное обогащение.  

В силу положений ч. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных  законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло  

имущество за счет другого лица, обязано возвратить последнему неосновательно  приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).  

Между ООО «М1 Констракшн» (далее – «Заказчик», «Истец») и ООО  «Электромонтаж-ПН» (далее – «Подрядчик», «Ответчик»), по единой типовой форме  были заключены договоры подряда (далее совместно именуемые – «Договоры»), по  каждому из которых Истцом перечислен аванс, а Ответчиком допущена существенная  просрочка выполнения работ и не осуществлен возврат неотработанных денежных  средств. В этой связи Истец в одностороннем порядке отказался от каждого из  Договоров и потребовал вернуть неосновательное обогащение в виде неотработанного  аванса в установленный Договорами срок. Ответчик денежные средства не вернул, что  явилось причиной обращения Истца в суд с настоящим исковым заявлением.  

Договор подряда № 1420/11-08-20/ЭПН-1 от «11» августа 2020 года 

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...>, корп. 4.1 (далее в настоящем пункте –  «работы).  

Согласно платежным поручениям № 4210 от 19.08.2020, № 4364 от 26.08.2020,  Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 1 800 000,00 руб., в том  числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1. Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки,  указанные в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно  Графику производства работ последний день выполнения работ - «05» сентября 2020  года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ не исполнил.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 1  800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%.  

Договор подряда № 057/23-01-20/ЭПН-1 от «23» января 2020 года  

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить работы по устройству навесного  вентилируемого фасада на объекте по адресу: 

<

...>  (далее в настоящем пункте – «работы).  

Согласно платежным поручениям № 222 от 24.01.2020, № 441 от 10.02.2020, №  560 от 14.02.2020, № 1290 от 23.03.2020, № 3438 от 17.07.2020, № 5108 от 28.09.2020,  Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 3 954 327,94 руб., в том  числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1. Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки,  указанные в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно  Графику производства работ последний день выполнения работ - «25» февраля 2020  года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ в полном объеме  не исполнил. Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 3 930 463,32 руб., в  том числе НДС 20%, что следует из подписанных сторонами актов о приемке  выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.06.2020, № 2 от 30.11.2020.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 23  864 (Двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят четыре) рубля 62 копейки, в том числе  НДС 20%.  

Договор подряда № 030/15-01-21/ЭПН-1 от «15» января 2021 года 

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...> (далее в настоящем пункте – «работы).  

Согласно платежному поручению № 468 от 03.02.2021, Заказчиком в рамках  Договора был перечислен аванс в размере 194 616,00 руб., в том числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1 Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки, указанные  в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно Графику  производства работ (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 13.08.2021 к  Договору) последний день выполнения работ - «22» августа 2021 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил (что также подтверждается Подрядчиком в п. 5 Дополнительного  соглашения № 1 от 13.08.2021 к Договору), Подрядчик обязательства по проведению  работ не исполнил.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 194  616 (Сто девяносто четыре тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в том  числе НДС 20%.  

Договор подряда № 2023/06-11-20/ЭПН-1 от «06» ноября 2020 года 

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...> (далее в настоящем пункте – «работы).  

Согласно платежным поручениям № 6793 от 07.12.2020, № 6837 от 08.12.2020,   № 7133 от 22.12.2020, Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 5  450 199,95 руб., в том числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1 Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки, указанные  в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно Графику  производства работ последний день выполнения работ - «30» сентября 2020 года  (примечание: п. 16.1 Договора предусмотрено, что условия Договора распространяются  на правоотношения сторон, возникшие с 06.09.2020).  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ не исполнил.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 5  450 199 (Пять миллионов четыреста пятьдесят тысяч сто девяносто девять) рублей 95  копеек, в том числе НДС 20%.  

Договор подряда № 664/07-05-20/ЭПН-1 от «07» мая 2020 года 

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...> (далее в настоящем пункте – «работы).  

Согласно платежным поручениям № 2278 от 19.05.2020, № 2454 от 29.05.2020,   № 3256 от 08.07.2020, Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере  348 054,85 руб., в том числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1. Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки,  указанные в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно  Графику производства работ последний день выполнения работ - «15» мая 2020 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ в полном объеме  не исполнил. Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 295 109,35 руб., в том  числе НДС 20%, что следует из подписанного сторонами акта о приемке выполненных  работ по форме КС-2 № 1 от 30.06.2020.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 52  945 (Пятьдесят две тысячи девятьсот сорок пять) рублей 50 копеек, в том числе НДС  20%.  

Договор подряда № 026/14-01/21ЭПН-1 от «14» января 2021 года 

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...> (далее в настоящем  пункте – «работы).  

Согласно платежным поручениям № 491 от 03.02.2021, № 1096 от 02.03.2021,  Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 1 286 499,77 руб., в том  числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1 Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки, указанные  в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно Графику  производства работ последний день выполнения работ - «08» марта 2021 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ не исполнил.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 1  286 499 (Один миллион двести восемьдесят шесть тысяч четыреста девяносто девять)  рублей 77 копеек, в том числе НДС 20%.  

Договор подряда № 225/25-02-20/ЭПН-1 от «25» февраля 2020 года 

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...> (далее в настоящем  пункте – «работы).  

Согласно платежным поручениям № 827 от 02.03.2020, № 4757 от 08.09.2020, №  275 от 22.01.2021, № 1093 от 02.03.2021, № 2179 от 21.04.2021, Заказчиком в рамках  Договора был перечислен аванс в размере 9 602 006,00 руб., в том числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1. Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки,  указанные в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно  Графику производства работ последний день выполнения работ - «25» апреля 2020  года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ в полном объеме  не исполнил. Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 2 494 390,00 руб., в  том числе НДС 20%, что следует из подписанного сторонами акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 31.08.2020.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 7  107 616 (Семь миллионов сто семь тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 00 копеек, в  том числе НДС 20%.  

Договор подряда № 291/04-03-20/ЭПН-1 от «04» марта 2020 года  

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...> (далее в настоящем  пункте – «работы).  

Согласно платежным поручениям № 1138 от 17.03.2020, № 1292 от 23.03.2020,   № 7212 от 23.12.2020, № 277 от 22.01.2021, Заказчиком в рамках Договора был  перечислен аванс в размере 7 896 837,21 руб., в том числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1 Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки, указанные  в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно Графику  производства работ последний день выполнения работ - «30» апреля 2020 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ не исполнил.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 7  896 837 (Семь миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч восемьсот тридцать семь)  рублей 21 копейка, в том числе НДС 20%.  

Договор подряда № 294/05-03-20/ЭПН-1 от «05» марта 2020 года  

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...> (далее в настоящем  пункте – «работы).  

Согласно платежным поручениям № 386 от 28.01.2021, № 1095 от 02.03.2021, №  1140 от 17.03.2020, Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 1  458 496,31 руб., в том числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1. Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки,  указанные в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно  Графику производства работ последний день выполнения работ - «10» апреля 2020  года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ в полном объеме  не исполнил. Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 498 575,82 руб., в том  числе НДС 20%, что следует из подписанного сторонами акта о приемке выполненных  работ по форме КС-2 № 1 от 31.01.2021.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 959  920 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот двадцать) рублей 49 копеек, в том  числе НДС 20%.  

Договор подряда № 295/05-03-20/ЭПН-1 от «05» марта 2020 года  

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...> (далее в настоящем  пункте – «работы).  

Согласно платежным поручениям № 1139 от 17.03.2020, № 1092 от 02.03.2021,  Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 1 211 640,65 руб., в том  числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1. Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки,  указанные в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно  

Графику производства работ последний день выполнения работ - «30» апреля 2020  года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ в полном объеме  не исполнил. Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 150 881,08 руб., в том  числе НДС 20%, что следует из подписанного сторонами акта о приемке выполненных  работ по форме КС-2 № 1 от 31.01.2021.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 1  060 759 (Один миллион шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 57 копеек,  в том числе НДС 20%.  

Договор подряда № 320/12-03/20ЭПН-1 от «12» марта 2020 года  

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...> (далее в настоящем  пункте – «работы).  

Согласно платежным поручениям № 1517 от 01.04.2020, № 1921 от 12.04.2021,   № 1938 от 13.04.2021, Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 3  126 980,20 руб., в том числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1 Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки, указанные  в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно Графику  производства работ последний день выполнения работ - «07» мая 2020 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ не исполнил.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 3  126 980 (Три миллиона сто двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 20  копеек, в том числе НДС 20%.  

Договор подряда № 323/12-03/20ЭПН-1 от «12» марта 2020 года  

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...> (далее в настоящем  пункте – «работы).  

Согласно платежным поручениям № 1765 от 17.04.2020, № 1098 от 02.03.2021,  Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 1 652 651,18 руб., в том  числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1 Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки, указанные  в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно Графику  производства работ последний день выполнения работ - «07» мая 2020 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ не исполнил.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 1  652 651 (Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль  18 копеек, в том числе НДС 20%.  

Договор подряда № 326/12-03/20ЭПН-1 от «12» марта 2020 года  

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  

Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  

установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  

по адресу: 

<

...> (далее в настоящем  пункте – «работы).  

Согласно платежным поручениям № 1773 от 17.04.2020, № 1097 от 02.03.2021,  Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 1 471 793,09 руб., в том  числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1 Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки, указанные  в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно Графику  производства работ последний день выполнения работ - «07» мая 2020 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ не исполнил.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 1  471 793 (Один миллион четыреста семьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) рубля  09 копеек, в том числе НДС 20%.  

Договор подряда № 1337/03-08/20ЭПН-1 от «03» августа 2020 года 

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...> (далее в настоящем  пункте – «работы).  

Согласно платежным поручениям № 4126 от 17.08.2020, № 7086 от 18.12.2020,  Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 2 947 104,00 руб., в том  числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1 Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки, указанные  в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно Графику  производства работ (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 24.03.2021 к  Договору) последний день выполнения работ - «20» июля 2021 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил (что также подтверждается Подрядчиком в п. 5 Дополнительного  соглашения № 1 от 24.03.2021 к Договору), Подрядчик обязательства по проведению  работ не исполнил.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 2  947 104 (Два миллиона девятьсот сорок семь тысяч сто четыре) рубля 00 копеек, в том  числе НДС 20%.  

Договор подряда № 011/12-01/21ЭПН-1 от «12» января 2021 года 

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...> (далее в настоящем пункте – «работы).  

Согласно платежным поручениям № 841 от 18.02.2021, № 1406 от 15.03.2021,  Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 2 676 700,04 руб., в том  числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1 Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки, указанные  в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно Графику  производства работ последний день выполнения работ - «30» апреля 2021 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ не исполнил.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 2  676 700 (Два миллиона шестьсот семьдесят шесть тысяч семьсот) рублей 04 копейки, в  том числе НДС 20%.  

Договор подряда № 2298/03-12/20ЭПН-1 от «03» декабря 2020 года  

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...>, лит. К1 (далее в настоящем пункте –  «работы).  

Согласно платежным поручениям № 588 от 05.02.2021, № 1125 от 03.03.2021,  Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 3 623 298,45 руб., в том  числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1. Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки,  указанные в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно  Графику производства работ (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от  05.03.2021 к Договору) последний день выполнения работ - «15» апреля 2021 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ в полном объеме  не исполнил. Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 2 771 974,37 руб., в  том числе НДС 20%, что следует из подписанного сторонами акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.11.2021.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 851  324 (Восемьсот пятьдесят одна тысяча триста двадцать четыре) рубля 08 копеек, в том  числе НДС 20%.  

Договор подряда № 2360/14-12-20/ЭПН-1 от «14» декабря 2020 года  

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...>, лит. К1 (далее в настоящем пункте –  «работы).  

Согласно платежным поручениям № 490 от 03.02.2021, № 1426 от 15.03.2021,  Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 2 435 113,98 руб., в том  числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1. Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки,  указанные в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно  Графику производства работ последний день выполнения работ - «25» марта 2021 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ в полном объеме  не исполнил. Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 42 854,60 руб., в том  числе НДС 20%, что следует из подписанного сторонами акта о приемке выполненных  работ по форме КС-2 № 1 от 30.11.2021.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 2  392 259 (Два миллиона триста девяносто две тысячи двести пятьдесят девять) рублей  38 копеек, в том числе НДС 20%.  

Договор подряда № 1780/05-10-20/ЭПН-1 от «05» октября 2020 года  

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...>, лит. К1 (далее в настоящем пункте –  «работы).  

Согласно платежным поручениям № 5878 от 03.11.2020, № 1404 от 15.03.2021,  Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 1 546 333,36 руб., в том  числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1. Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки,  указанные в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно  Графику производства работ (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от  09.03.2021 к Договору) последний день выполнения работ - «15» апреля 2021 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ в полном объеме  не исполнил. Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 507 326,22 руб., в том  числе НДС 20%, что следует из подписанного сторонами акта о приемке выполненных  работ по форме КС-2 № 1 от 30.11.2021.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 1  039 007 (Один миллион тридцать девять тысяч семь) рублей 14 копеек, в том числе  НДС 20%.  

Договор подряда № 1804/09-10-20/ЭПН-1 от «09» октября 2020 года  

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...>, лит. К1 (далее в настоящем пункте –  «работы).  

Согласно платежным поручениям № 6270 от 18.11.2020, № 1409 от 15.03.2021,  Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 5 390 343,15 руб., в том  числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1. Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки,  указанные в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно  Графику производства работ (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от  09.03.2021 к Договору) последний день выполнения работ - «15» апреля 2021 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ в полном объеме  не исполнил. Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 2 061 624,78 руб., в  том числе НДС 20%, что следует из подписанного сторонами акта о приемке  выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 30.11.2021.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 3  328 718 (Три миллиона триста двадцать восемь тысяч семьсот восемнадцать) рублей 37  копеек, в том числе НДС 20%.  

Договор подряда № 1451/14-08-20/ЭПН-1 от «14» августа 2020 года  

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...>, лит. К1 (далее в настоящем пункте –  «работы).  

Согласно платежным поручениям № 5735 от 26.10.2020, № 7253 от 25.12.2020,   № 1126 от 03.03.2021, Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 9  089 497,87 руб., в том числе НДС 20%. Кроме того, в качестве аванса по Договору в  соответствии с письмом Подрядчика исх. № 65 от 14.04.2021 следует считать ранее  уплаченные Заказчиком и неотработанные Подрядчиком денежные средства по  договору № 1372/05-08/20ЭПН-1 от 05.08.2020, в размере 3 153 168, 00 руб., в том  числе НДС 20%, что подтверждается платежными поручениями № 5090 от 25.09.2020,   № 7245 от 25.12.2020, а также соглашением б/н от 02.03.2021 о расторжении договора  подряда № 1372/05-08/20/ЭПН-1 от «05» августа 2020 года. Принимая во внимание  вышеизложенное, сумма аванса, оплаченная Заказчиком Подрядчику по Договору,  составляет 12 242 665,87 руб.  

В силу п. 5.1. Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки,  указанные в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно  Графику производства работ (в редакции Дополнительного соглашения № 2 от  22.04.2021 к Договору) последний день выполнения работ - «31» мая 2021 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ в полном объеме  не исполнил. Подрядчиком выполнены работы на общую сумму 10 052 666,01 руб., в  том числе НДС 20%, что следует из подписанных сторонами актов о приемке  выполненных работ по форме КС-2 № 1 от 21.12.2020, № 2 от 28.02.2021, № 3 от  30.11.2021.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс составляет 2 189 999 (Два  миллиона сто восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 86 копеек,  в том числе НДС 20%.  

Договор подряда № 1806/09-10-20/ЭПН-1 от «09» октября 2020 года 

В соответствии с п. 2.1. Договора и положениями Технического задания к  Договору (Приложение № 3 к Договору) Подрядчик принял на себя обязательства в  установленный Договором срок выполнить строительно-монтажные работы на объекте  по адресу: 

<

...>, лит. К1 (далее в настоящем пункте –  «работы).  

Согласно платежным поручениям № 5879 от 03.11.2020, № 1410 от 15.03.2021,  Заказчиком в рамках Договора был перечислен аванс в размере 577 224,55 руб., в том  числе НДС 20%.  

В силу п. 5.1 Договора Подрядчик должен выполнить работы в сроки, указанные  в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору). Согласно Графику  производства работ (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 05.03.2021 к  Договору) последний день выполнения работ - 15» апреля 2021 года.  

Несмотря на то, что Заказчик свои обязательства по перечислению авансовых  платежей выполнил, Подрядчик обязательства по проведению работ не исполнил.  

Таким образом, неотработанный Подрядчиком аванс по Договору составляет 577  224 (Пятьсот семьдесят семь тысяч двести двадцать четыре) рубля 55 копеек, в том  числе НДС 20%.  

Итого общая сумма задолженности Ответчика перед Истцом по вышеуказанным  Договорам (неосновательное обогащение в виде неотработанного аванса) составляет 48  087 021 (Сорок восемь миллионов восемьдесят семь тысяч двадцать один) рубль 00  копеек. Расчет суммы задолженности (неосновательного обогащения в виде  неотработанного аванса) и цены иска прилагается.  

В соответствии с пп. (б) п. 16.2 каждого из Договоров Заказчик вправе  отказаться от исполнения Договоров в одностороннем внесудебном порядке в случае  нарушения Подрядчиком срока окончания работ более чем на 10 (Десять) календарных  дней.  

В связи с тем, что Подрядчиком по каждому из Договоров был нарушен срок  окончания работ более чем на 10 (Десять) календарных дней, руководствуясь пп. (б) п.  16.2 каждого из Договоров, ст. 450.1 и ч. 2 ст. 715 ГК РФ Заказчик отказался от  исполнения всех вышеперечисленных Договоров с «14» декабря 2022 года (последним  днем действия Договоров являлось «13» декабря 2022 года), направив заказным  письмом с уведомлением о вручении и описью вложения Уведомление об  одностороннем отказе от договоров вместе с досудебной претензией о возврате  неотработанного аванса № 176-2 от 30.11.2022 (далее – «Уведомление», «Претензия»).  

В п. 16.4 каждого из Договоров закреплено, что при расторжении Договоров по  основаниям, указанным в п. 16.2 Договоров, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти)  

календарных дней с даты расторжения Договоров возвратить Заказчику  неотработанный аванс, передать Заказчику рабочую документацию и результат  выполненных работ на момент расторжения Договоров.  

Руководствуясь п. 16.4 каждого из Договоров, Истец в Уведомлении потребовал  от Ответчика в течение 5 (пяти) календарных дней с даты расторжения Договоров  возвратить неотработанные авансы.  

В Уведомлении Истец также указал о своем намерении, в случае невозврата  Истцу вышеуказанных сумм авансов в установленный Договорами срок, обратиться в  суд с иском за защитой своих прав и интересов, и обратил внимание Ответчика, что  Уведомление одновременно следует считать досудебной претензией.  

Судом установлено, что доказательств выполнения работ ответчиком в полном  объёме не представлено, что свидетельствует о нарушении ответчиком условий  договора и об отсутствии с его стороны эквивалентного встречного исполнения на  перечисленную сумму аванса.  

Таким образом, судом установлено прекращение Договоров в одностороннем  порядке истцом в связи с невыполнением ответчиком.  

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства в порядке  статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд,  руководствуясь разъяснениями Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской  Федерации, изложенными в пункте 1 информационного письма от 11.01.2000 N 49  "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о  неосновательном обогащении", пришел к выводу о том, что с расторжением договора у  исполнителя отпали правовые основания для удержания перечисленных заказчиком  денежных средств.  

Таким образом, размер неосновательного обогащения на стороне ответчика  установлен в размере 48 087 021 руб.  

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-ПН" (ИНН: 

<

***>) в пользу ООО  "М1 КОНСТРАКШН" (ИНН: 

<

***>) неосновательное обогащение в размере  48 087 021 руб., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 200 000 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья П.С. Гутник