10293_11551144  

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-42448/23

14 февраля 2024 г.

г. Ростов-на-Дону

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Украинцевой Ю. В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Комитета по охране объектов  культурного наследия Ростовской области (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к Федеральному государственному казенному учреждению "Северо-Кавказское  территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны  Российской Федерации (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

об обязании, 3-е лицо: Министерство обороны Российской Федерации, 

 Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Федеральное государственное казенное учреждение "Северо-Кавказское  территориальное управление имущественных отношений" Министерства обороны  Российской Федерации в течение 24 месяцев с момента вступления решения суда в  законную силу выполнить работы по сохранению объекта культурного наследия  регионального значения «Казенная палата», состоящего на государственной охране на  основании решения малого Совета Ростовского областного Совета народных депутатов от  17.12.1992 № 325 «О принятии на государственную охрану памятников истории и  культуры Ростовской области», расположенного по адресу: 

<

...> литер Р (реставрации объекта  культурного наследия) в соответствии с согласованной с комитетом проектной  документацией в порядке ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об  объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской  Федерации», которые включают в себя:  

- получение Федеральным государственным казенным учреждением «Северо-Кавказское  территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны  Российской Федерации задания на проведение работ по сохранению объекта культурного  наследия;  

разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта  культурного наследия юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,  имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов  культурного наследия (памятников истории и культуры), на основании заключенного  гражданско-правового договора между Федеральным государственным казенным  учреждением «Северо-Кавказское территориальное управление имущественных  отношений» Министерства обороны Российской Федерации и юридическим лицом или  индивидуальным предпринимателем, имеющим лицензию на осуществление деятельности  по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);  

- получение положительного заключение историко-культурной экспертизы; 

- согласование Федеральным государственным казенным учреждением «Северо- Кавказское территориальное управление имущественных отношений» Министерства  обороны Российской Федерации либо юридическим лицом или индивидуальным  предпринимателем, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению  объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) научно-проектной  документации в комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области;  

- получение разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного  наследия юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имеющим  лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия  (памятников истории и культуры) в комитете по охране объектов культурного наследия  Ростовской области, в соответствии с заключенным гражданско-правовым договором  между Федеральным государственным казенным учреждением «Северо-Кавказское  территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны  Российской Федерации и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,  имеющим лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов  культурного наследия (памятников истории и культуры);  

- предоставление в комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области  на утверждение отчетную документацию о выполненных работах по сохранению объекта  культурного наследия;  

- организацию приемки Федеральным государственным казенным учреждением «Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений Министерства  обороны Российской Федерации работ на объекте культурного наследия с целью выдачи  комитетом по охране объектов культурного наследия Ростовской области  соответствующего акта приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного  наследия.  

 На решение может быть подана апелляционная жалоба в течение месяца после его  принятия арбитражным судом первой инстанции через Арбитражный суд Ростовской  области в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.  

 Судья Украинцева Ю. В.