Арбитражный суд Тамбовской области

   392020, г.Тамбов ул.Пензенская , 67/12

  http://tambov.arbitr.ru

       ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

263 июля  2023 г.                                                                                     Дело № А64-3354/2024

Резолютивная часть решения объявлена  в судебном заседании – 23.07.2024.; 

дата изготовления решения в полном объеме -  26.07.2024.( ч.3 ст.113 , ч.2ст.176 АПК РФ).

 

Арбитражный суд Тамбовской области в составе: судья  И.И.Белоусов 

при ведении протокола судебного заседания : секретарь судебного заседания А.Е.Анненская

рассмотрев в  судебном заседании дело по иску:  

истец: Администрация города Тамбова Тамбовской области, г. Тамбов (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

ответчик: Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовтеплосервис» г. Тамбов (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о восстановлении нарушенного благоустройства 

при участии:

от истца – не явился  

от ответчика – ФИО1 , доверенность от 14.05.2024

установил:

Администрация города Тамбова Тамбовской области, г. Тамбов (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) обратилась в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к Муниципальному унитарному предприятию  «Тамбовтеплосервис» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) с требованием:  

«Обязать ответчика - Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовтеплосервис» - восстановить нарушенное благоустройство в соответствии с СП 82.133302016 «Благоустройство территорий», СП 78.133302012 «Автомобильные дороги» и национальным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", в срок, не позднее трех дней с момента вступления решения в законную силу, согласно акту обследования мест осуществления земляных работ, проведенных на территории г Тамбова от 03.04.2024., по следующим разрешениям и адресам местонахождения, указанным в таблице:

 

№ п/п

Адрес проведения работ

Место

проведения

работ

№

Разре

шени

я

Нарушено покрытие

S асф

S ТрПл

Б.К м.п.

S щеб

S грунт

 

 

 

 

 

Засыпка

Планировка

1.

<

...> Октября, 17

дворовая территория

33

асфальт

10,0

 

 

 

2.

<

...>

дворовая территория

40

асфальт,

бордюрный

камень,

грунт

20,0

 

3,0

 

6,0

3.

<

...>

дворовая территория

41

асфальт

16,0

 

 

 

4.

<

...> Ж

дворовая территория

48

асфальт

5,0

 

 

 

5.

<

...>

дворовая территория

54

грунт

 

 

 

40,0

6.

<

...>

дворовая территория

56

грунт

 

 

 

8,0

7.

<

...>

дворовая территория

60

асфальт, грунт

12,0

 

 

10,0

8,

<

...> А

дворовая территория

62

щебень

 

 

6,0

 

9.

<

...>

дворовая территория

66

асфальт, фунт

3,0

 

 

10,0

10.

<

...>

зеленая зона

73

фунт,

дорожный

знак-1

штука

 

 

 

10,0

11.

<

...>

тротуар, зеленая зона

75

асфальт, фунт

7,0

 

 

2,0

12.

<

...>

дворовая территория

79

фунт

 

 

 

30,0

13.

<

...>

дворовая территория

80

асфальт, фунт

14,0

 

 

6,0

14.

<

...>

дворовая территория

82

асфальт, фунт

3,0

 

 

6,0

15.

<

...>

дворовая территория

84

фунт

 

 

 

9,0

16.

<

...>

дворовая территория

88

асфальт, фунт

4,0

 

 

14,0

14,0

17.

<

...>

дворовая территория

90

фунт

 

 

 

40,0

18.

<

...> Октября, 5

дворовая территория

94

асфальт,

бордюрный

камень,

фунт

10,0

 

2,0

 

40,0

19.

<

...>

дворовая территория

96

фунт

 

 

 

40,0

20.

<

...>

проезжая часть

97

щебень

 

 

12,0

 

21.

<

...>

дворовая территория

98

асфальт, фунт

6,0

 

 

6,0

22.

<

...>

дворовая территория

101

асфальт, фунт

6,0

 

 

9,0

23.

<

...>

зеленая зона

103

фунт

 

 

 

12,0

24.

<

...>

дворовая территория

106

асфальт

50,0

 

 

 

25.

<

...>

дворовая территория

ПО

фунт

 

 

 

20,0

I

26.

г. Тамбов, Тамбов-4, 20/7

дворовая территория

117

асфальт, фунт

6,0

 

 

20,0

27.

<

...>

дворовая территория

119

щебень, фунт

 

 

4,0

 

5,0

28.

г. Тамбов, ул.

Интернациональная,

54

дворовая территория

121

асфальт,

бордюрный

камень,

фунт

5,0

 

3,0

 

15,0

29.

<

...>

дворовая территория

122

фунт

 

 

 

10,0

30.

<

...>

дворовая территория

123

асфальт, фунт

4,0

 

 

8,0

31.

<

...>

дворовая территория

126

фунт

 

 

 

20,0

32.

<

...>

2А

дворовая территория

127

асфальт,

бордюрный

камень,

фунт

4,0

 

4,0

 

16,0

33.

<

...>

дворовая территория

131

асфальт,

бордюрный

камень,

фунт

4,0

 

9,0

 

70,0

34.

<

...>

дворовая территория

132

фунт

 

 

 

30,0

35.

<

...>

проезжая часть

137

асфальт

8,0

 

 

 

36.

<

...>

дворовая территория

140

фунт

 

 

 

10,0

37.

<

...>

тротуар, зеленая зона

141

асфальт, фунт

6,0

 

 

6,0

38.

<

...>

дворовая территория

144

фунт

 

 

 

18,0

39.

<

...>

47/1

дворовая территория

145

фунт

 

 

 

16,0

40.

<

...>

зеленая зона

146

фунт

 

 

 

8,0

41.

<

...>

тротуар, зеленая зона

147

асфальт, фунт

4,0

 

 

4,0

42.

<

...>

дворовая территория

156

фунт

 

 

 

30,0

43.

<

...>

дворовая территория

158

асфальт

20,0

 

 

 

44.

<

...>

дворовая территория

160

грунт

 

 

 

5,0

45.

<

...>

дворовая территория

163

грунт

 

 

 

28,0

46.

<

...>

дворовая территория

166

асфальт

6,0

 

 

 

47.

<

...>

дворовая территория

167

грунт

 

 

 

4,0

48.

<

...>

проезжая

часть,

зеленая зона

170

асфальт, грунт

30,0

 

 

20,0

49.

<

...>

дворовая территория

187

асфальт,

бордюрный

камень,

грунт

10,0

 

3,0

 

14,0

50.

<

...>

зеленая зона

190

грунт

 

 

 

24,0

51.

<

...>

дворовая территория

200

асфальт

8,0

 

 

 

52.

<

...>

зеленая зона

202

грунт

 

 

 

50,0

53.

<

...>

дворовая территория

204

грунт

 

 

 

9,0

54.

<

...>

проезжая

часть,

зеленая зона

206

асфальт,

бордюрный

камень,

грунт

3,0

 

3,0

 

6,0

55.

<

...>

дворовая территория

207

грунт

 

 

 

32,0

56.

<

...>

проезжая

часть,

технический

тротуар, зеленая зона

210

асфальт,

бордюрный

камень,

грунт

3,0

 

2,0

 

2,0

57.

<

...>

дворовая территория

212

асфальт, грунт

1,0

 

 

10,0

58.

<

...>

дворовая территория

214

асфальт,

бордюрный

камень,

грунт

1,0

 

10,0

 

16,0

59.

<

...>

дворовая территория

222

грунт

 

 

 

6,0

60.

<

...>

дворовая территория

224

грунт

 

 

 

18,0

- поддерживать места нарушенного благоустройства в состоянии обеспечения безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и автотранспорта до завершения окончательного этапа восстановительных работ.

В соответствии с ч.1 ст.49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) истец  заявлением по делу от  07.06.2024   уточнил требования по иску :

«Обязать  Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовтеплосервис» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) :

 - восстановить нарушенное благоустройство в соответствии с СП 82.133302016 «Благоустройство территорий», СП 78.133302012 «Автомобильные дороги» и национальным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", в срок, не позднее трех дней с момента вступления решения в законную силу, согласно акту обследования мест осуществления земляных работ, проведенных на территории г Тамбова от 03.04.2024., по следующим разрешениям и адресам местонахождения, указанным в таблице:

№ п/п

Адрес проведения работ

Место

проведения

работ

№

Разре шения

Нарушено покрытие

8 асф

5 ТрПл

Б.К м.п.

8 щеб

8 грунт

 

 

 

 

 

Засып -ка

Планировка

1.

<

...>

дворовая территория

60

асфальт, грунт

12,0

 

 

10,0

2.

<

...>

зеленая зона

73

грунт,

дорожный

знак-1

штука

 

 

 

10,0

3.

<

...>

дворовая территория

79

грунт

 

 

 

30,0

4.

<

...>

дворовая территория

80

асфальт, грунт

14,0

 

 

6,0

5.

<

...>

дворовая территория

84

грунт

 

 

 

9,0

6.

<

...>

дворовая территория

88

асфальт, грунт

4,0

 

 

14,0

14,0

7.

<

...>

дворовая территория

90

грунт

'

 

 

40,0

8.

<

...>

5

проезжая часть

97

щебень

 

 

12,0

 

9.

<

...>

дворовая территория

110

грунт

 

 

 

20,0

10.

г. Тамбов, Тамбов-4, 20/7

дворовая территория

117

асфальт, грунт

6,0

 

 

20,0

11.

<

...>

дворовая территория

123

асфальт, грунт

4,0

 

 

8,0

12.

<

...>

дворовая территория

126

грунт

 

 

 

20,0

13.

<

...>

дворовая территория

131

асфальт,

бордюрный

камень,

грунт

4,0

 

9,0

 

70,0

14.

<

...>

тротуар,

зеленая

зона

141

асфальт, грунт

6,0

 

 

6,0

15.

<

...>

дворовая территория

144

грунт

 

 

 

18,0

16.

<

...>

47/1

дворовая территория

145

грунт

 

 

 

16,0

17.

<

...>

тротуар,

зеленая

зона

147

асфальт, грунт

4,0

 

 

4,0

18.

<

...>

дворовая территория

156

грунт

 

 

 

30,0

19.

<

...>

дворовая территория

158

асфальт

20,0

 

 

 

20.

<

...>

дворовая территория

160

грунт

 

 

 

5,0

21.

<

...>

дворовая территория

163

грунт

 

 

 

28,0

22.

<

...>

проезжая

часть,

зеленая

зона

170

асфальт, грунт

30,0

 

 

20,0

23.

<

...>

дворовая территория

187

асфальт,

бордюрный

камень,

грунт

10,0

 

3,0

 

14,0

24.

<

...>

зеленая зона

190

грунт

 

 

 

24,0

25.

<

...>

дворовая территория

204

грунт

 

 

 

9,0

26.

<

...>

дворовая территория

212

асфальт, грунт

1,0

 

 

10,0

27.

<

...>

дворовая территория

224

грунт

 

 

 

18,0

- поддерживать места нарушенного благоустройства в состоянии обеспечения безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и автотранспорта до завершения окончательного этапа восстановительных работ.»

Ответчик заявлением по делу от  23.07.2024. требования  по иску признал полностью.

В  соответствии с ч.ч.3 , 5 ст.49 АПК РФ ,  ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать иск полностью или частично ; арбитражный суд не принимает признание ответчиком иска  если это противоречит закону или нарушает права других лиц. 

Признание иска ответчиком  не противоречит  закону, представленным по делу  доказательствам, не  нарушает права других лиц  и подлежит принятию судом. 

В  соответствии с ч.4 ст.170  АПК РФ , в  случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом.

На основании  указанных  норм  закона и изложенных обстоятельств , требования  истца  по иску правомерны,  обоснованны  и подлежат  удовлетворению.  

В соответствии с ч.1ст.110 АПК РФ , судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Подлежащие распределению  судебные  расходы по делу составляет  уплаченная  истцом  государственная пошлина по исковому  заявлению.

В соответствии   с пп. 3 п.1 ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 198-ФЗ) – при  признании ответчиком   иска   до принятия решения судом первой инстанции возврату истцу    подлежит 70 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Согласно с пп. 1.1 п.1 ст.333.37 Налогового кодекса Российской Федерации государственные органы, органы местного самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, арбитражными судами, в качестве истцов или ответчиков освобождены от уплаты государственной пошлины  (пп. 1.1 в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 198-ФЗ).

В соответствии   с п.4 ст.333.22 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных арбитражным судом исковых требований.

Соответственно , государственная пошлина подлежит  взысканию  с  ответчика  в доход федерального бюджета    с учетом  правил пп. 3 п.1 ст.333.40 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 198-ФЗ). 

В силу подп. 2 п. 1 ст. 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации  ответчик  обязан  уплатить  указанную в судебном акте государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления акта в законную силу. 

На основании изложенного  и руководствуясь  ст.ст.110,112,167,169,170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

                                                СУД   РЕШИЛ :

1. Принять уточнение  исковых требований   по заявлению Администрации  города Тамбова  от 22.07.2024 .

2. Принять признание иска по заявлению ответчика от 23.07.2024 .

3.Обязать  Муниципальное унитарное предприятие «Тамбовтеплосервис» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) :

 - восстановить нарушенное благоустройство в соответствии с СП 82.133302016 «Благоустройство территорий», СП 78.133302012 «Автомобильные дороги» и национальным стандартом РФ ГОСТ Р 50597-2017 "Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля", в срок, не позднее трех дней с момента вступления решения в законную силу, согласно акту обследования мест осуществления земляных работ, проведенных на территории г Тамбова от 03.04.2024., по следующим разрешениям и адресам местонахождения, указанным в таблице:

№ п/п

Адрес проведения работ

Место

проведения

работ

№

Разре шения

Нарушено покрытие

8 асф

5 ТрПл

Б.К м.п.

8 щеб

8 грунт

 

 

 

 

 

Засып -ка

Планировка

1.

<

...>

дворовая территория

60

асфальт, грунт

12,0

 

 

10,0

2.

<

...>

зеленая зона

73

грунт,

дорожный

знак-1

штука

 

 

 

10,0

3.

<

...>

дворовая территория

79

грунт

 

 

 

30,0

4.

<

...>

дворовая территория

80

асфальт, грунт

14,0

 

 

6,0

5.

<

...>

дворовая территория

84

грунт

 

 

 

9,0

6.

<

...>

дворовая территория

88

асфальт, грунт

4,0

 

 

14,0

14,0

7.

<

...>

дворовая территория

90

грунт

'

 

 

40,0

8.

<

...>

5

проезжая часть

97

щебень

 

 

12,0

 

9.

<

...>

дворовая территория

110

грунт

 

 

 

20,0

10.

г. Тамбов, Тамбов-4, 20/7

дворовая территория

117

асфальт, грунт

6,0

 

 

20,0

11.

<

...>

дворовая территория

123

асфальт, грунт

4,0

 

 

8,0

12.

<

...>

дворовая территория

126

грунт

 

 

 

20,0

13.

<

...>

дворовая территория

131

асфальт,

бордюрный

камень,

грунт

4,0

 

9,0

 

70,0

14.

<

...>

тротуар,

зеленая

зона

141

асфальт, грунт

6,0

 

 

6,0

15.

<

...>

дворовая территория

144

грунт

 

 

 

18,0

16.

<

...>

47/1

дворовая территория

145

грунт

 

 

 

16,0

17.

<

...>

тротуар,

зеленая

зона

147

асфальт, грунт

4,0

 

 

4,0

18.

<

...>

дворовая территория

156

грунт

 

 

 

30,0

19.

<

...>

дворовая территория

158

асфальт

20,0

 

 

 

20.

<

...>

дворовая территория

160

грунт

 

 

 

5,0

21.

<

...>

дворовая территория

163

грунт

 

 

 

28,0

22.

<

...>

проезжая

часть,

зеленая

зона

170

асфальт, грунт

30,0

 

 

20,0

23.

<

...>

дворовая территория

187

асфальт,

бордюрный

камень,

грунт

10,0

 

3,0

 

14,0

24.

<

...>

зеленая зона

190

грунт

 

 

 

24,0

25.

<

...>

дворовая территория

204

грунт

 

 

 

9,0

26.

<

...>

дворовая территория

212

асфальт, грунт

1,0

 

 

10,0

27.

<

...>

дворовая территория

224

грунт

 

 

 

18,0

- поддерживать места нарушенного благоустройства в состоянии обеспечения безопасного и беспрепятственного движения пешеходов и автотранспорта до завершения окончательного этапа восстановительных работ.

2. Взыскать с Акционерного общества «Тамбовские коммунальные системы» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>)  в доход федерального бюджета 1800,00руб. –государственную  пошлину. 

Истцу  и налоговому органу выдать исполнительные   листы  после вступления решения в законную силу.

Решение  суда, не вступившее в законную силу,  может быть обжаловано   в порядке апелляционного производства через Арбитражный суд Тамбовской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд    (394006,

<

...>).

 

            Судья                                                                                                            И.И.Белоусов