ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994 Москва, ГСП-4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№09АП-66441/2023

Дело № А40-62174/23

г. Москва

11 октября 2023 года

Резолютивная часть постановления оглашена: 11 октября 2023 года

Полный текст постановления изготовлен: 11 октября 2023 года

 

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи: Семёновой А.Б.,

судей: Тетюка В.И., Семикиной О.Н.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО Проектно-строительная компания "Фрегат" на решение Арбитражного суда города Москвы от 02.08.2023 по делу № А40-62174/23

по иску  ООО "Спецтехнологии" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)

к ответчику ООО Проектно-строительная компания "Фрегат" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>)

о взыскании денежных средств в размере 11 576 782 руб. 81 коп.

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2 по доверенности от 12.05.2023,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 09.04.2023, генеральный директор ФИО4 приказ №1 от 18.11.2022. 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Спецтехнологии» (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО ПСК «Фрегат» (далее – ответчик) о взыскании неосновательного обогащения в размере 10 735 00 руб. 00 коп. и 841 782 руб. 81 коп. неустойки по договору №08-ПР-2021-02 от 19.08.2021 за период с 18.07.2022 по 21.11.2022.

Решением от 02.08.2023 исковые требования удовлетворены.

Не согласившись с судебным актом, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит суд удовлетворить ходатайство о назначении судебной экспертизы, решение Арбитражного суда Московской области от 02.08.2023 по делу А40-62174/23-19-479 отменить, принять новый судебный акт, в котором отказать в удовлетворении требований ООО «Спецтехнологии» к ООО ПСК «Фрегат» о взыскании с него денежных средств в полном объеме.

В судебном заседании апелляционного суда истец и ответчик ходатайствовали об утверждении мирового соглашения. К материалам дела приобщен текст мирового соглашения, подписанный сторонами. Полномочия лиц, подписавших мировое соглашение, проверены судом в порядке ст. 63 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Согласно ч.1 ст.139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.

В соответствии с ч. 1 ст.141 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело.

В силу ч. 6 ст.141 АПК РФ арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Рассмотрев заявленное ходатайство сторон, исследовав условия мирового соглашения, суд апелляционной инстанции считает возможным утвердить мировое соглашение, поскольку его условия не противоречат закону и не нарушают права и законные интересы других лиц.

На основании ч.2 ст.150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу в случае утверждения мирового соглашения.

Согласно абзацу второму подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении) на стадии рассмотрения дела судом апелляционной инстанции возврату истцу подлежит 50 процентов суммы уплаченной им государственной пошлины.

Руководствуясь ст.ст. 110, 139-141, 150, 266-271 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 02.08.2023 по делу № А40-62174/23 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО "Спецтехнологии" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) и ООО Проектно-строительная компания "Фрегат" на следующих условиях:

«МИРОВОЕ   СОГЛАШЕНИЕ

г. Москва                                                                                                     «11»октября 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Спецтехнологии», именуемое в дальнейшем «Истец», в лице представителя ФИО2, действующего на основании доверенности б/н от 12.05.2023г. (далее – Доверенность), с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «Фрегат», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», в целях урегулирования и прекращения спора по делу № А40-62174/23-19-479, рассматриваемому Арбитражным судом города Москвы, на основании части 4 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –«АПК РФ»), в порядке, определенном статьями 139 - 141 АПК РФ, заключили настоящее мировое соглашение (далее –«Мировое соглашение») на следующих условиях:

1.                       Стороны договорились, определить порядок исполнения Ответчиком обязательств, вытекающих из спорного договора№08-ПР-2021-02 от 19.08.2021г. (далее – Договор) по разработке научно-проектной и/или проектно-изыскательской документации для реконструкции административного здания Главной военной прокуратуры по адресу: 

<

...> (далее – «Объект») в 3 (три) этапа:

1.1.                 Этап № 1. Передача разработанного комплекта исходно-разрешительной документации (далее – ИРД) с актом государственной историко-культурной экспертизы (далее – Акт ГИКЭ):

1.1.1.           в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Мирового соглашения Ответчик обязуется передать Истцу полный комплект научно-проектной документация (далее – НПД) в формате PDF с Актом ГИКЭ в PDF путем предоставления доступа к облачному хранилищу с правами на чтение (кроме раздела шифра проекта: 08-ПР-2021-02-СС-ЗС.4.4.8, содержащего сведения о государственной тайне) через ссылку, направленную на электронную почту Истца: info@sconstruct.ru;

1.1.2.           в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения определением суда, согласованного Сторонами и подписанного Мирового соглашения в настоящей редакции Ответчик обязуется передать Истцу полный комплекта НПД в форматахPDF, DWG, DOC с оригинальным Актом ГИКЭ в формате PDF, подписанным электронными цифровыми подписями (далее – ЭЦП) экспертов, а также передать прилагаемые документы для разработки Истцом проектной документации (далее – ПД) в редактируемых форматах (DOC, DWG, XLS), а именно:

- проект дополнения № 1 к техническому заданию (далее – ТЗ) со сравнительными таблицами по внесённым изменениям; 

- проект задания на проектирование (далее – ЗнП);

- перечень оборудования и мебели для оснащения Объекта;

- техническое задание на выполнение работ по обследованию Объекта с границами работ цокольного, 1-го, 2-го и 3-го этажей, чердачного помещения (далее – ТЗ на ТЗК);

- программу обследования по комплексным научным и инженерно-техническим исследованиям Объекта со схемами расположения зондажей цокольного, 1-го, 2-го и 3-го этажей, чердачного помещения (далее – Программа ТЗК);

- задание на проведение инженерно-геодезических изысканий (далее – Задание ИГДИ);

- программу инженерно-геодезических изысканий (далее – Программа ИГДИ);

- задание на проведение инженерно-геологических изысканий (далее – Задание ИГИ);

- программу инженерно-геологических изысканий со схемой расположения инженерно-геологических скважин в цокольном этаже (далее – Программа ИГИ);

- задание на проведение инженерно-экологических изысканий (далее – Задание ИЭИ);

- программу инженерно-экологических изысканий (далее – Программа ИЭИ);

- проект акта на стесненность;

- проект имеющихся у Ответчика транспортных схем доставки стройматериалов (изделий);

- исполнительную смету на проектно-изыскательские работы (далее – ПИР) с обосновывающими письмами АО «Центринвестпроект» по применению некоторых базовых расценок.

1.1.3.           Раздел шифра проекта: 08-ПР-2021-02-СС-ЗС.4.4.8, содержащего сведения о государственной тайне, направляется Истцу на CD-диске в форматах PDF, DWG, DOC спецсвязьюв течение 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения определением суда согласованного Сторонами и подписанного Мирового соглашения в настоящей редакции и предоставления Ответчику:

- заверенной копии Приказа Истца на бумажном носителе на уполномоченное лицо Ответчика по рассмотрению и приемке НПД (шифра проекта: 08-ПР-2021-02-СС-ЗС.4.4.8), содержащей сведения о государственной тайне;

- оригинала Письма Истца на бумажном носителе о юридическом адресе режимно-секретного подразделения для направления НПД (шифра проекта: 08-ПР-2021-02-СС-ЗС.4.4.8) по спецсвязи.

1.1.4.           Истец, проверяет полученный по Этапу №1 комплект документов в присутствии Ответчика на компьютере (кроме раздела шифра проекта: 08-ПР-2021-02-СС-ЗС.4.4.8) и в случае отсутствия замечаний по комплектности, составу разделов, наличия всех форматов (PDF, DWG, DOC), указанных в п.1.1.2 Мирового соглашения, подписывает Акт об исполнении обязательств по Этапу № 1 (далее – Акт № 1), который является доказательством выполнения Сторонами взаимных обязательств по Этапу № 1 без наличия замечаний и претензий.

1.2.                 Этап № 2. Согласование НПД в Департаменте культурного наследия города Москвы (далее – ДКН).

1.2.1.          Ответчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта №1:

- готовит заявление на согласование НПД в ДКН, направляет Истцу на подпись в формате PDF на электронную почту: info@sconstruct.ru;

1.2.2.          Истец, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Акта № 1, предоставляет Ответчику подписанные уполномоченными лицами с печатями организаций (ООО «Спецтехнологии», ППК «ВСК», ТУ ФКП «УЗКС МО РФ») в формате PDF и 3 (три) оригинальных экземпляра на бумажном носителе:

- ТЗ на ТЗК;

- Программу на ТЗК.

Согласование ответственных лиц Главной военной прокуратуры на указанных документах не требуется.

1.2.3.          Истец, не позднее 30(тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта № 1, предоставляет Ответчику подписанные уполномоченными лицами с печатями организаций в формате PDF и 3 (трёх) оригинальных экземпляра на бумажном носителе:

- Задание на ИГДИ и Программа на ИГДИ, заверенные: ООО «Спецтехнологии», ППК «ВСК», ТУ ФКП «УЗКС МО РФ»;

- Задания на ИГИ и ИЭИ, а также Программы на ИГИ и ИЭИ, заверенные: ООО «Спецтехнологии», ППК «ВСК», ТУ ФКП «УЗКС МО РФ».

Согласование ответственных лиц Главной военной прокуратуры на указанных документах не требуется.

1.2.4.          Истец, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Акта № 1, предоставляет Ответчику подписанные документы:

- оригинал письма Истца на бумажном носителе о согласовании НПД;

- письмо ППК «ВСК» в формате PDFо согласовании НПД;

- оригинал сопроводительного письма Истца на бумажном носителе на ППК «ВСК» с просьбой согласования НПД в бумажном виде, которая ранее рассмотрена и согласована в электронном виде;

- титульные листы Истца, подписанные ответственными лицами Истца (генеральный директор и главный инженер) с печатью Истца в формате PDF и в 2 (двух) оригинальных экземплярах на бумажном носителе.

1.2.5.          Не позднее 30(тридцати) рабочих дней с даты получения Истцом НПД, указанной в п.1.2.1 Мирового соглашения, предоставляет оформленное надлежащим образом от имени ООО «Спецтехнологии» заявление на согласование НПД в ДКН в 2 (двух) оригинальных экземплярах, а также предоставляет доверенность (без права передоверия) от ООО «Спецтехнологии»  для подачи НПД в ДКН на генерального директора Ответчика - ФИО4: паспорт 

<

...>, выдан: ОВД «Восточное Измайлово» города Москвы, 02.03.2004г., к.п.: 772-066 (в случае поручения Истцом процедуры подачи НПД в ДКН силами Ответчика).При получении отказа ДКН от приемки на рассмотрение НПД по предоставленному заявлению и доверенности от ООО «Спецтехнологии», Истец передает в течении 20(двадцати) рабочих дней Ответчику заявление и доверенность от имени ППК «ВСК». При не предоставлении Истцом Ответчику доверенности от имени ППК «ВСК» в срок, установленный настоящим пунктом Мирового соглашения, подача НПД в ДКН осуществляется Истцом собственными силами, при этом сопровождение процесса согласования НПД в ДКН осуществляется Ответчиком.

1.2.6.          Ответчик, не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты предоставления ему документов, предусмотренных п.п.1.2.2-1.2.4 Мирового соглашения, обязуется:

- подготовить свои титульные листы, подписанные ответственными лицами (генеральный директор и главный инженер) с печатью Ответчика в формате PDF и в 2 (двух) оригинальных экземплярах на бумажном носителе;

- направить свои оригинальные титульные листы в типографию и подготовить 2 (два) прошитых и пронумерованных комплекта НПД на бумажном носителе в мягком переплете для подачи в ДКН;

- подготовить комплект НПД в формате PDFсоответствующий бумажному экземпляру для подачи в ДКН.

1.2.7.          Истец, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подготовки НПД на бумажном носителе в мягком переплете согласно п.1.2.6 Мирового соглашения, организует её совместное подписание в ППК «ВСК».

1.2.8.          Ответчик, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты подписания бумажных экземпляров НПД в ППК «ВСК», записывается на прием в ДКН на ближайшую свободную дату для сдачи НПД на согласование в ДКН. В назначенную дату Ответчик подает НПД в ДКН (только при условии наличия доверенности, полученной от Истца согласно п.1.2.5 Мирового соглашения).

1.2.9.          Истец обязуется незамедлительно (не позднее 2(двух) рабочих дней с даты их получения) направить Ответчику на электронную почту info@psk-fregat.ru официальные замечания ДКН по переданной на согласование НПД. Ответчик, в установленный для этого регламентный срокустраняет официальные замечания ДКН по переданной на согласование НПД до получения согласования ДКН.

1.2.10.      Недостающую дополнительную исходно-разрешительную документацию по требованию ДКН в процессе согласования НПД, предоставляет Истец.

1.2.11.      После получения информации о согласовании НПД от ДКН, Ответчик по доверенности забирает 1 (один) экземпляр согласованной НПД на бумажном носителе и оригинальное письмо ДКН о согласовании НПД и передает Истцу. При передаче, согласованной ДКН НПД Истцу, Стороны подписывают Акт об исполнении обязательств по Этапу № 2 (далее – Акт № 2).При не предоставлении Истцом Ответчику доверенности от своего имени и/или от имени ППК «ВСК» (по требованию ДКН) в срок, установленный п.1.2.5 Мирового соглашения, получение1 (одного) экземпляра согласованной НПД и оригинального письма ДКН о согласовании НПД осуществляется Истцом собственными силами, при этом Истец обязуется за 3 (три) рабочих дня уведомить Ответчика о дате и времени получения вышеупомянутых документов в ДКН путем направления письма на электронную почту info@psk-fregat.ru и тогда Стороны подписывают Акт № 2 при получении Истцом вышеупомянутой документации в ДКН.

1.3. Этап № 3. Консультационная поддержка.

1.3.1.          Консультационная поддержка (услуга, далее – КУ) – это услуга, которая включает в себя предоставление индивидуальных устных разъяснений и рекомендаций в дистанционном режиме посредством телефонной связи (в т.ч. удалённого участия в совещаниях Истца посредством видео конференц-связи (ВКС) не чаще 1 (одного) раза в неделю и продолжительностью не более 1 (одного) часа - при условии согласования с Ответчиком через электронную почту GorskovVV@psk-fregat.ru даты и времени планируемого Истцом совещания за сутки, с приложением актуальной работающей ссылки на проводимое совещание в режиме ВКС),включая высказывание своего частного профессионального мнения по обсуждаемому вопросу и/или проблеме в отношении разработанной Ответчиком НПД и выполняемой Истцом и/или иной организацией проектной документации для реконструкции Объекта. Предоставляемая услуга носит рекомендательный характер, а принятие окончательного решения в любом случае остается за Истцом. Консультационная поддержка не включает в себя обязательства по разработке, корректировке, проверке, согласованию и сопровождению любого вида технической документации для реконструкции Объекта, а также планирование, координацию и контроль за ее выполнением и реализацией в процессе строительно-монтажных работ, подготовку и/или проверку любого вида технической (отчетной) документации по результатам любых строительно-монтажных работ на Объекте. Истец не может требовать от Ответчика личного присутствия на производственных совещаниях, выездов на Объект, а также иные заинтересованные организации (согласующие, экспертные и прочие).

1.3.2.          Ответчик обязуется оказывать КУ Истцу и/или иной организации, выбранной Истцом для продолжения выполнения ПИР на Объекте, при наличии вопросов, возникших после изучения разработанной НПД в течение 40 (сорока) рабочих дней после предоставления Истцу НПД согласно п.1.1.2 Мирового соглашения. Срок предоставления ответа на возникающие вопросы Истца или/и иной организации, выбранной Истцом для продолжения выполнения ПИР на Объекте не может превышать 3 (трех) рабочих дней при условии направления возникших вопросов на электронную почту Ответчика (GorskovVV@psk-fregat.ru).

1.3.3.          Ответчик обязуется оказывать КУ Истцу и/или иной организации, выбранной Истцом для продолжения выполнения ПИР на Объекте, при наличии вопросов, возникающих при подготовке ПД в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 (ред. от 06.05.2023) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее – ПП-87) в течение 100 (ста) рабочих дней после предоставления Истцу НПД согласно п.1.1.2 Мирового соглашения.

1.3.4.          По завершению указанных периодов оказания КУ, Стороны подписывают Акт об исполнении обязательств по Этапу № 3 (далее – Акт № 3).

2.                       Стороны определили общую стоимость выполняемых работ Ответчика по Мировому соглашению в размере 10 735 000,00 (десять миллионов семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается, ст.149, ч.2, п.п.15 НК РФ), исходя из стоимости каждого из этапов:

- Этап № 1 –10 000 000,00 (десять миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается, ст.149, ч.2, п.п.15 НК РФ);

- Этап № 2 –335 000,00 (триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается, ст.149, ч.2, п.п.15 НК РФ);

- Этап № 3 –400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается, ст.149, ч.2, п.п.15 НК РФ).

3.        Стороны засчитывают ранее произведенные Истцом платежи по Договору № 08-ПР-2021-02 от 19.08.2021г. (№4878 от 03.09.2021г., №6155 от 03.11.2021г.) в сумме 10 735 000,00 (десять миллионов семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается, ст.149, ч.2, п.п.15 НК РФ) в счет оплаты работы Ответчика по настоящему Мировому соглашению, частями, после подписания Актов по каждому из этапов, пропорционально их стоимости.

4. За нарушение установленных настоящим соглашением сроков по Этапам № 1 и/или № 2 и/или № 3, виновная сторона несет ответственность в размере 0,05% от общей стоимости работ за каждый день просрочки соответствующего этапа, но не более 10% от стоимости работ по просроченному этапу.

В случаях нарушения сроков исполнения своих обязательств по настоящему Мировому соглашению Истцом, сроки выполнения соответствующих обязательств Ответчика переносятся пропорционально таким просрочкам. При переносе сроков в этом случае Ответчик освобождается от ответственности согласно п.4 Мирового соглашения.

5. Частичный или полный отказ Истца от исполнения своих обязательств по настоящему Мировому соглашению, не является основанием для предъявления требований к Ответчику по возврату ранее перечисленной и зачтенной ему суммы по настоящему Мировому соглашению. Сумма стоимости работ засчитывается в полном объеме в счет оплаты, выполненной Ответчиком работы, вне зависимости от количества сданных Истцу этапов.

6. Ответчик несет ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств по настоящему Мировому соглашению, по каждому из этапов отдельно.

В случае неисполнении Ответчиком взятых на себя обязательств, а также частичного или полного отказа Ответчика от исполнения своих обязательств, Ответчик оплачивает Истцу сумму стоимости соответствующего этапа, обязательства по которому не исполнены, что подтверждается отсутствием подписанного сторонами соответствующего акта исполнения обязательств по этапу: 

- по этапу № 1 сумму в размере 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается, ст.149, ч.2, п.п.15 НК РФ);

- по этапу № 2 сумму в размере 335 000,00 (триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается, ст.149, ч.2, п.п.15 НК РФ);

- по этапу № 3 – сумму в размере 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается, ст.149, ч.2, п.п.15 НК РФ).

7. Стороны договорились о приостановке исполнения обязательств по настоящему Мировому соглашению, в случае наступления одного из обстоятельств:

- мобилизация генерального директора Ответчика в зону специально военной операции или иного военного конфликта;

- возбуждение уголовного дела против генерального директора Ответчика с заключением его под стражу на период проведения следственных мероприятий за неисполнение обязательств по Договору или по иным уголовным делам.

8. Истец подтверждает, что ему известны и понятны положения  пункта 13 статьи 141 АПК РФ, согласно которым, утверждение судом настоящего Мирового соглашения влечет прекращение производства по делу.

9. Утверждение Мирового соглашения влечет за собой отмену судебного акта и прекращение производства по делу № А40-62174/23-19-479.

10. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации на основании исполнительного листа, выдаваемого арбитражным судом по ходатайству Истца.

11. Судебные расходы, расходы по оплате услуг представителя и любые иные расходы Сторон, связанные прямо и/или косвенно с рассмотрением дела всуде первой и апелляционной инстанции, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.

12. Настоящее Мировое соглашение составлено и подписано в 3 (трёх) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - один экземпляр для предоставления Девятому Арбитражному апелляционному суду, по одному экземпляру для Истца и Ответчика.

13. Стороны подтверждают, что Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.

14. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и утверждения его Девятым арбитражным апелляционным судом.

15. Последствия прекращения производства по делу в связи с утверждением Мирового соглашения, предусмотренные частью 3 статьи 151 АПК РФ, Сторонам известны и понятны.

16. Приложение к настоящему соглашению: 

16.1.  Перечень разработанной научно-проектной документации (Приложение №1).

16.2. Форма Акта об исполнении обязательств по Этапу № 1 (Приложение № 2).

16.3. Форма Акта об исполнении обязательств по Этапу № 2 (Приложение № 3).

16.4. Форма Акта об исполнении обязательств по Этапу № 3 (Приложение № 4).

Истец:                                                              Ответчик:

ООО «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ»                             ООО ПСК «Фрегат»

Представитель по Доверенности                          Генеральный директор

 

___________________ФИО2                    ____________________В.В. ФИО4

 

Приложение № 1

к Мировому соглашению от «11» октября 2023г.

по Делу № А40-62174/23-19-479

Перечень разработанной научно-проектной документации.

Номер тома

Обозначение (шифр проекта)

Наименование

1

2

3

 

Научно-проектная документация

 

Раздел 1. Предварительные работы

1.1

08-ПР-2021-02-ПР.1

Подраздел 1. Исходно-разрешительная документация

1.2

08-ПР-2021-02-ПР.2

Подраздел 2. Предварительные исследования.

1.3

08-ПР-2021-02-ПР.3

Подраздел 3. Фотофиксация

 

Раздел 2. Комплексные научные исследования

2.1

08-ПР-2021-02-КНИ.1

Подраздел 1. Историко-архивные и библиографические исследования. Историческая записка

2.2

08-ПР-2021-02-КНИ.2

Подраздел 2. Историко-архитектурные натурные исследования. Архитектурно-археологические обмеры

 

Подраздел 3. Инженерно-технические обследования конструкций

2.3.1

08-ПР-2021-02-КНИ.3.1

Часть 1. Инженерно-техническое обследование конструкций. Основная часть.

2.3.2

08-ПР-2021-02-КНИ.3.2

Часть 2. Инженерно-техническое обследование конструкций. Прилагаемые документы.

2.4

08-ПР-2021-02-КНИ.4

Подраздел 4. Технологические исследования по строительным и отделочным материалам (интерьеры)

 

Подраздел 5. Инженерные изыскания.

2.5.1

08-ПР-2021-02-КНИ.5.1

Часть 1. Инженерно-геодезические работы.

2.5.2

08-ПР-2021-02-КНИ.5.2

Часть 2. Инженерно-геологические работы.

2.5.3

08-ПР-2021-02-КНИ.5.3

Часть 3. Инженерно-экологические работы.

2.6

08-ПР-2021-02-КНИ.6

Подраздел 6. Отчет по комплексным научным исследованиям.

 

Раздел 3. Проект реставрации и приспособления

 

Стадия

Проект реставрации

3.1/ПР

08-ПР-2021-02/ПР-ПЗ.1

Подраздел 1. Пояснительная записка

3.2/ПР

08-ПР-2021-02/ПР-АР.2

Подраздел 2. Архитектурные решения

 

Стадия

Проект приспособления

3.1/ПП

08-ПР-2021-02/ПП-ПЗ.1

Подраздел 1. Пояснительная записка

3.2/ПП

08-ПР-2021-02/ПП-АР.2

Подраздел 2. Архитектурные решения

 

Подраздел 3. Конструктивные и объемно-планировочные решения.

3.3.1

08-ПР-2021-02/ПП-КР.3.1

Часть 1. Конструктивные решения.

3.3.2

08-ПР-2021-02/ПП-КР.3.2

Часть 2. Огнезащита строительных конструкций.

3.3.3

08-ПР-2021-02/ПП-РПЗ

Часть 3. Расчётно-пояснительная записка.

 

Подраздел 4. Сведения об инженерном оборудовании, сетях инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения

3.4.1

08-ПР-2021-02-ЭОМ.4.1

Часть 1. Система электроснабжения. Внутреннее электрооборудование и электроосвещение.

3.4.2

08-ПР-2021-02-ВС.4.2

Часть 2. Система водоснабжения и водоотведения.

3.4.3

08-ПР-2021-02-ОВ.4.3

Часть 3. Отопление. Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование. Противодымная вентиляция.

3.4.3.1

08-ПР-2021-02-ОВ.4.3.1

Книга 1. Отопление.

3.4.3.2

08-ПР-2021-02-ОВ.4.3.2

Книга 2. Приточно-вытяжная вентиляция и кондиционирование.

 

Часть 4. Сети связи.

3.4.4.1

08-ПР-2021-02-ЛВС-О.4.4.1

Книга 1. Локальная вычислительная сеть. Структурированная кабельная сеть. Система телефонной связи. Местная телефонная связь. Открытый сегмент.

3.4.4.2

08-ПР-2021-02-СОТ.4.4.2

Книга 2. Система охранного телевидения.

3.4.4.3

08-ПР-2021-02-СКУД.4.4.3

Книга 3. Система контроля и управления доступом.

3.4.4.4

08-ПР-2021-02-СТС.4.4.4

Книга 4. Система охранно-тревожной сигнализации.

3.4.4.5

08-ПР-2021-02-ЧС.4.4.5

Книга 5. Система часофикации.

3.4.4.6

08-ПР-2021-02-СОУЭ.4.4.6

Книга 6. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре.

3.4.4.7

08-ПР-2021-02-АПС.4.4.7

Книга 7. Автоматическая пожарная сигнализация.

3.4.4.8

08-ПР-2021-02-СС-ЗС.4.4.8

Книга 8. Локальная вычислительная сеть. Структурированная кабельная сеть. Система телефонной связи. Местная телефонная связь. Закрытый сегмент.

3.4.4.9

08-ПР-2021-02-АК.4.4.9

Книга 9. Автоматизация комплексная. Управление инженерными системами при пожаре.

3.4.5

08-ПР-2021-02-ТХ.4.5

Часть 5. Технологические решения.

3.4.6

08-ПР-2021-02-ПОР.4.6

Часть 6. Проект организации реставрации.

3.4.7

08-ПР-2021-02-ООС.4.7

Часть 7. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

3.4.7.1

08-ПР-2021-02-ООС.4.7.1

Книга 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.

3.4.7.2

08-ПР-2021-02-ООС.4.7.2

Книга 2. Светотехнические расчеты инсоляции и естественной освещенности.

3.4.7.3

08-ПР-2021-02-ДП.4.7.3

Книга 3. Дендроплан и перечётная ведомость.

3.4.9

08-ПР-2021-02-АПТ.4.9

Часть 9. Система автоматического водяного пожаротушения.

3.4.10

08-ПР-2021-02-ГПТ.4.10

Часть 10. Система автоматического газового пожаротушения.

3.4.11

08-ПР-2021-02-УТВ.4.11

Часть 11. Узел теплового ввода. Узел учета тепловой энергии

3.4.12

08-ПР-2021-02-МОПБ.4.12

Часть 12. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

 

Подраздел 5. Схема планировочной организации земельного участка.

3.5.1

08-ПР-2021-02-ПЗУ.5.1

Часть 1. Схема планировочной организации земельного участка.

Истец:                                                              Ответчик:

ООО «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ»                             ООО ПСК «Фрегат»

Представитель по Доверенности                          Генеральный директор

___________________ ФИО2                   ____________________В.В. ФИО4

ФОРМА

Приложение № 2

к Мировому соглашению от «11» октября 2023г.

по Делу № А40-62174/23-19-479

АКТ

об исполнении обязательств по Этапу № 1

г. Москва                                                                      «_____» _________________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ», именуемое в дальнейшем «Истец», в лице генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «ФРЕГАТ», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», составили настоящий Акт об исполнении обязательств по Этапу № 1 (далее – Акт № 1) Мирового соглашения от «11» октября 2023г.(далее – Мировое соглашение) о нижеследующем:

В соответствии с Мировым соглашением Ответчик исполнил свои обязательства по Этапу № 1 перед Истцом, а Истец в свою очередь исполнил свои обязательства по Этапу № 1 перед Ответчиком.

Обязательства по Этапу №1Сторонами по отношению друг к другу исполнены в полном объеме, в установленный Мировым соглашением срок и надлежащим образом, Стороны претензий друг к другу не имеют.

1.        Стоимость исполненных Ответчиком обязательств составляет 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей 00 копеек (НДС не облагается, ст.149, ч.2, п.п.15 НК РФ).

2.        Оплата за исполненные Ответчиком обязательства не предусматривается, оплата осуществлена согласно п. 3 Мирового соглашения от «11» октября 2023г. по Делу № А40-62174/23-19-479.

3.        Настоящий Акт № 1 составлен Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

Подписи Сторон:

Истец:                                                              Ответчик:

ООО «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ»                             ООО ПСК «Фрегат»

Генеральный директор                                           Генеральный директор

 

___________________ ФИО5                         ____________________В.В. ФИО4

 

Форма согласована Сторонами:

ООО «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ»                             ООО ПСК «Фрегат»

Представитель по Доверенности                                      Генеральный директор

___________________ФИО2                    ____________________В.В. ФИО4

 

ФОРМА                                                Приложение № 3 к Мировому соглашению от «11» октября 2023г.

по Делу № А40-62174/23-19-479

АКТ

об исполнении обязательств по Этапу № 2

 

г. Москва                                                                      «_____» _________________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ», именуемое в дальнейшем «Истец», в лице генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «ФРЕГАТ», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», составили настоящий Акт об исполнении обязательств по Этапу № 2 (далее – Акт № 2) Мирового соглашения от «11» октября 2023г.(далее – Мировое соглашение) о нижеследующем:

В соответствии с Мировым соглашением Ответчик исполнил свои обязательства по Этапу № 2 перед Истцом, а Истец в свою очередь исполнил свои обязательства по Этапу № 2 перед Ответчиком.

Обязательства по Этапу № 2 Сторонами по отношению друг к другу исполнены в полном объеме, в установленный Мировым соглашением срок и надлежащим образом, Стороны претензий друг к другу не имеют.

1.        Стоимость исполненных Ответчиком обязательств составляет 335 000,00 (триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается, ст.149, ч.2, п.п.15 НК РФ).

2.        Оплата за исполненные Ответчиком обязательства не предусматривается, оплата осуществлена согласно п. 3 Мирового соглашения от «11» октября 2023г.по Делу № А40-62174/23-19-479.

3.        Настоящий Акт № 2составлен Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

Подписи Сторон:

Истец:                                                              Ответчик:

ООО «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ»                             ООО ПСК «Фрегат»

Генеральный директор                                           Генеральный директор

 

___________________ ФИО5                         ____________________В.В. ФИО4

 

Форма согласована Сторонами:

ООО «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ»                             ООО ПСК «Фрегат»

Представитель по Доверенности                                      Генеральный директор

_________________ ФИО2                                   __________________В.В. ФИО4

ФОРМА                                                Приложение № 4 к Мировому соглашению от «11» октября 2023г.

по Делу № А40-62174/23-19-479

АКТ

об исполнении обязательств по Этапу № 3

 

г. Москва                                                                      «_____» _________________ 202__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ», именуемое в дальнейшем «Истец», в лице генерального директора ФИО5, действующего на основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью Проектно-строительная компания «ФРЕГАТ», именуемое в дальнейшем «Ответчик», в лице генерального директора ФИО4, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – «Стороны», составили настоящий Акт об исполнении обязательств по Этапу № 3 (далее – Акт № 3)Мирового соглашения от «11» октября 2023г.(далее – Мировое соглашение) о нижеследующем:

 

В соответствии с Мировым соглашением Ответчик исполнил свои обязательства по Этапу № 3 перед Истцом, а Истец в свою очередь исполнил свои обязательства по Этапу № 3 перед Ответчиком.

Обязательства по Этапу № 3 Сторонами по отношению друг к другу исполнены в полном объеме, в установленный Мировым соглашением срок и надлежащим образом, Стороны претензий друг к другу не имеют.

1.        Стоимость исполненных Ответчиком обязательств составляет 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается, ст.149, ч.2, п.п.15 НК РФ).

2.        Оплата за исполненные Ответчиком обязательства не предусматривается, оплата осуществлена согласно п. 3 Мирового соглашения от «11» октября 2023г.по Делу № А40-62174/23-19-479.

3.        Настоящий Акт № 3составлен Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

Подписи Сторон:

Истец:                                                              Ответчик:

ООО «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ»                             ООО ПСК «Фрегат»

Генеральный директор                                           Генеральный директор

 

___________________ ФИО5                         ____________________В.В. ФИО4

 

Форма согласована Сторонами:

ООО «СПЕЦТЕХНОЛОГИИ»                             ООО ПСК «Фрегат»

Представитель по Доверенности                          Генеральный директор

_________________ФИО2                        ____________________В.В. ФИО4».

 

 

Производство по делу № А40-62174/23 прекратить.

Возвратить ООО "Спецтехнологии" (ИНН: 

<

***> ОГРН: 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 40 442 руб. 00 коп., перечисленную платежным поручением № 526 от 17.03.2023. Настоящее постановление является основанием для перечисления государственной пошлины.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражный суд Московского округа.

 

Председательствующий судья                                                                     А.Б. Семёнова

 

Судьи                                                                                                              В.И. Тетюк

 

О.Н. Семикина