Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

16. 09. 2020 года.                                               Дело № А40-70340/20-43-525

Резолютивная часть решения объявлена 09. 09. 2020 года.

Решение изготовлено в полном объеме 16. 09. 2020 года.

Судья Арбитражного суда г. Москвы Романов О.В., единолично,

протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

ООО " ПАРТНЕР " (ОГРН 

<

***>) к ООО " СИП-энерго " (ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1 810 110 руб. 22 коп. – долга, неустойки,

с участием представителей: от истца – ФИО1, доверенность б/н от 20.02.2020 г., от ответчика – не явился.

Изучив имеющиеся в деле документы, заслушав представителя, арбитражный суд

У  С  Т  А  Н  О  В  И  Л  :

Иск заявлен о взыскании 1 810 110 руб. 22 коп. – долга, неустойки, на основании статей  309, 310, 314, 384, 388, 740, 746  ГК РФ.

Истец направил в судебное заседание представителя, который заявил об увеличении размера исковых требований до 1 849 369 руб. 51 коп., в том числе: 1 744 304 руб. 00 коп. – долга, 105 165 руб. 51 коп. – неустойки, иск поддержал, повторив доводы, изложенные в исковом заявлении с учётом заявления об увеличении размера исковых требований; не согласился с возражениями ответчика против иска по основаниям изложенным в возражениях на отзыв ответчика, представил истребованные судом документы; каких-либо иных ходатайств не заявил.

Ответчик не направил представителя в судебное заседание, представил по электронной почте отзыв на исковое заявление, в котором иск не признал полностью; истребованные судом документы, опровергающие иск не предъявил; расчет истца оспорил по основаниям, изложенным в отзыве; о времени и месте судебного заседания извещен в установленном порядке, в соответствии со статьями 121-124 АПК РФ; каких-либо ходатайств не заявил.

Заявление истца об увеличении размера исковых требований до 1 849 369 руб. 51 коп., в том числе: 1 744 304 руб. 00 коп. – долга, 105 165 руб. 51 коп. – неустойки, соответствует требованиям ст. 49 АПК РФ, является правом истца и принимается судом к рассмотрению.

Дело рассмотрено в соответствии с порядком предусмотренным ст. 156 АПК РФ, по имеющимся в деле документам, представленным истцом и ответчиком, в отсутствие представителя ответчика.

Суд, с учетом изложенных истцом и ответчиком обстоятельств и доводов, в соответствии с имеющимися в материалах дела документами, пришел к следующим выводам и считает установленными следующие обстоятельства:

Из материалов дела усматривается, что 03 октября 2019г. между ООО «СИП-энерго» (Подрядчик) и ООО «ПАРТНЕР» (Субподрядчик) был заключен Договор подряда № 03/10/19-ГНБ по условиям которого Субподрядчик обязуется выполнить работы по прокладке труб методом ГНБ на объекте: "Создание интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на территории инновационного центра «Сколково». 11 этап строительства. Кабельные линии 20 кВ СП-5 - ТП-37 - ТП-38 - ТП-39 -ТП-40 - СП-6, устройство ГНБ №1, ГНБ №2, ГНБ №3 и ГНБ №4 - именуемые в дальнейшем «Объект», в объеме, предусмотренном Приложением №1 к Договору («Протокол согласования договорной цены на наименования (виды) работ, предварительного объема и приблизительной стоимости работ»), а подрядчик принять результаты работы и оплатить в порядке, установленном в Договоре.

В соответствии с п. 2.1. Договора стоимость работ по Договору является приблизительной, определяется на основании Приложения №1 и составляет 7 890 600,00 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС (20%) - 1 315 100 рублей 00 копеек. Окончательная стоимость работ по Договору определяется по фактически выполненным объемам работ и рассчитывается согласно Приложению №1.

На основании п.2.2.1 Подрядчик осуществляет авансовые платежи в размере 70% от стоимости каждого этапа работ, указанного в Приложении №2 к Договору в течение пяти рабочих дней до даты начала выполнения соответствующего этапа работ согласно Приложению №2 к Договору.

В соответствии с п. 2.3. Договора расчеты за фактически выполненные объемы работ производятся в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Актов приемки выполненных работ в порядке, установленном п. 8.1 Договора.

Оплата фактически выполненных работ производится в размере сокращенном (сниженном) на часть суммы фактически оплаченного по Договору аванса, относящуюся к выполненным работам. Сумма, подлежащая оплате (зачету), указывается Субподрядчиком в форме №КС-3. Авансовые платежи погашаются путем их удержания из сумм, подлежащих оплате по Договору, пропорционально стоимости выполненных работ (по актам по форме КС-2, КС-3) до полного погашения.

В силу статьи 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В ст. 720 ГК РФ указано: заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику; заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте, либо в ином документе,, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

В соответствии с п. 4.6. Договора после окончания каждого этапа работ подрядчик обязан рассматривать и подписывать Акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 и Акт приемки-сдачи выполненных работ и производить оплату за выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных ст. 8 Договора.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

В силу статьи 711 ГК РФ заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы.

Во исполнение условий Договора истец обязательства по выполнению работ по объекту исполнил в полном объеме и в отведенные сроки на сумму 7 829 760,00 рублей, что подтверждается актами о приемке выполненных работ (КС-2) № 1 от 25.10.2019г. на сумму 1 109 040,00 руб., №2 от 25.11.2019г. на сумму 6 720 720,00 руб. и актом сверки за период с 03.10.2019 - 31.12.2019 подписанный сторонами.

Указанная документация, подписана ответчиком без замечаний и скреплена печатью учреждения.

Истец оплатил ответчику 6 085 456,00 рублей, что подтверждается платежными поручениями №2759 от 09.10.2019г. на сумму 776 328,00 руб., №3003 от 23.10.2019г. на сумму 709 128,00 руб., №3173 от 05.11.2019г. на сумму 1 000 000,00 руб., №3411 от 18.11.2019г. на сумму 700 000,00 руб., №3589 от 25.11.2019г. на сумму 400 000,00 руб., №4309 от 229 324,00 руб., №4310 от 30.12.2019г. на сумму 332 712,00 руб., №4312 от 30.12.2019г. на сумму 687 204,00 руб., №4311 от 30.12.2019г. на сумму 1 250 760,00 руб.

Таким образом, задолженность ответчика ООО «СИП-энерго» перед истцом ООО «ПАРТНЕР» по Договору подряда № 03/10/19-ГВБ от 03.10.2019г. составляет 1 744 304,00 рубля 00 копеек.

В соответствии с п. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно п.1 ст. 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения или период времени, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или, соответственно, в любой момент в пределах такого периода.

Требование истца о взыскании долга в сумме 1 744 304 руб. 00 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Кроме  того, в соответствии с п. 9.2. Договора в случае нарушения подрядчиком, установленных Договором сроков платежей Субподрядчик вправе предъявить подрядчику требование об уплате неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка России, действующей на день подачи Требования, от суммы не произведенных в срок платежей, за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы Договора.

Требование истца о взыскании неустойки в сумме 105 165 руб. 51 коп. - законное, обоснованное, соответствует условиям договора, заключенного сторонами, подтверждено имеющимися в деле документами, представленными истцом, не опровергнуто ответчиком и подлежит удовлетворению. 

Расходы по уплате госпошлины относятся на ответчика  в соответствии со статьями 110, 112 АПК РФ. 

В соответствии с изложенным, на основании статей 8, 9, 11, 12, 153, 154, 161, 307-310, 314, 328, 329-331, 401, 420-424, 431-434, 702, 708, 709, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 102, 103, 110, 112, 121-124, 155, 156, 159, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд

Р  Е  Ш  И  Л  :

Заявление истца об увеличении размера исковых требований до 1 849 369 руб. 51 коп., в том числе: 1 744 304 руб. 00 коп. – долга, 105 165 руб. 51 коп. – неустойки принять.

Взыскать с ООО " СИП-энерго " (ОГРН 

<

***>):

- в пользу ООО " ПАРТНЕР " (ОГРН 

<

***>) 1 849 369 руб. 51 коп., в том числе: 1 744 304 руб. 00 коп. – долга, 105 165 руб. 51 коп. – неустойки;

- в доход федерального бюджета РФ госпошлину в сумме 31 493 руб. 70 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья                                                           О.В. Романов