52_37031146 

 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-32070/2022-52-235

г. Москва

25 сентября 2023 года

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Галиевой Р.Е.,  

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску 

общества с ограниченной ответственностью «ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  «АТОМЭНЕРГОПРОМА» (141400, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ХИМКИ ГОРОД,  ВАШУТИНСКОЕ ШОССЕ, 6, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН:  12.11.2007, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику: MICo, spol. s.r.o. (Чешская Республика., ФИО2 270/6, Старжечка, 674  01 Тршебич, идентификационный номер 494 33 946)  

третье лицо: акционерное общество «РОССИЙСКИЙ КОНЦЕРН ПО  ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА  АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ» в лице филиала «Калининская атомная станция»  (109507, 

<

...>, ОГРН: 

<

***>, Дата  присвоения ОГРН: 17.09.2008, ИНН: 

<

***>)  

об обязании исполнить договор от 22.03.2018 № 6591-9-04 в части поставки  оборудования и документации в натуре в срок не позднее 30 дней с даты вступления в  законную силу решения суда; взыскании неустойки в размере 3 312 769 евро 60 центов  за период с 26.07.2019 по 14.01.2022, далее по дату фактического исполнения;  неустойки в размере 2 746 376,80 евро за период с 01.12.2019 по 14.01.2022 за  нарушение срока проведения шефмонтажа оборудования; неустойки в размере 37 264  евро по п. 10.3 Договора; судебной неустойки в размере 100 000 руб. за каждый день  неисполнения решения суда.  

при участии: от истца – ФИО3 (удост., дов. от 17.10.2022), ФИО4 (паспорт), 

от ответчика – ФИО5 (удост., дов. от 16.11.2022), ФИО6 (удост., дов. от  16.11.2022),  

от третьего лица – представитель не явился, извещен. 

РЕШИЛ:

Принять отказ от иска в части взыскания убытков в размере 48 323 146,40 ЕВРО,  убытков в размере 13 320 ЕВРО, об обязании произвести шеф-монтаж в срок не  позднее 10 дней с даты вступления в законную силу решения суда. Производство по  делу в данной части прекратить.  

 Обязать MICo, spol. s.r.o. (Чешская Республика., ФИО2 270/6, Старжечка,  674 01 Тршебич, идентификационный номер 494 33 946) исполнить договор поставки   № 6591-9-04 от 22.03.2018г. в части поставки оборудования и документации:  

- в части оборудования: байпасные указатели уровня с арматурой на дренажах и  воздушниках (4 шт), арматура на дренажах и воздушниках (48 шт), сосуды  уравнительные (6 шт. на один ПВД- всего 24 шт), сопроводительная документация; в  части документации: ТУ (ТТ) на производимое оборудование, планы качества, решение  о применении импортного оборудования в срок не позднее 30 дней с даты вступления в  законную силу решения суда.  

 В случае неисполнения решения суда в течение тридцати дней с даты  вступления судебного акта в законную силу в силу взыскать с MICo, spol. s.r.o.  (Чешская Республика, ФИО2 270/6, Старжечка, 674 01 Тршебич,  идентификационный номер 494 33 946) в пользу общества с ограниченной  ответственностью «ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «АТОМЭНЕРГОПРОМА» (ИНН:  

<

***>) судебную неустойку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. за каждый  день неисполнения судебного акта, начиная с тридцать первого дня с даты вступления  судебного акта в силу и до его фактического исполнения.   

Взыскать с MICo, spol. s.r.o. (Чешская Республика, ФИО2 270/6, Старжечка,  674 01 Тршебич, идентификационный номер 494 33 946) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «ВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «АТОМЭНЕРГОПРОМА»  (ИНН: 

<

***>) неустойку по п. 10.2 договора за просрочку поставки в размере  1 500 000 ЕВРО по 14.01.2022, далее по дату фактического исполнения, неустойку по  п. 10.3 договора в части поставки некомплектной документации в размере 37 264  ЕВРО, госпошлину в размере 200 000 руб.  

В остальной части отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: Р.Е. Галиева