233/2017-45940(1) 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

 01 марта 2017 года 

по делу № А33-774/2017 Красноярск

01 марта 2017 года 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить. 

Внести изменения в государственный контракт № 135/16 от 27.12.2016 на выполнение  

работ по сохранению объекта культурного наследия, заключенный между Краевым  

государственным казённым учреждением «Управление автомобильных дорог по  

Красноярскому краю» и обществом с ограниченной ответственностью «Красноярская  

Геоархеология», изложив: пункт 3.1. в следующей редакции:  «3.1. Срок действия Контракта: начало – с момента заключения Контракта; окончание – 31 августа 2017 года»; пункт 3.2. в следующей редакции: «3.2. Срок выполнения работ по Контракту: начало – с момента заключения Контракта; окончание – 31 июля 2017 года. 

Сроки выполнения конкретных видов, этапов работ определяются календарным планом  

выполнения работ (Приложение 2)». 

Внести изменения в Приложение № 2 к Контракту (Календарный план выполнения  

работ), изложив его в следующей редакции: 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано  в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

 Судья О.В. Сысоева