86/2019-197862(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-11954/2019

г. Хабаровск

25 декабря 2019 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Е.Е. Яцышиной,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1,  

рассмотрев дело по иску по иску некоммерческой организации  «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных  домов в Хабаровском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место  нахождения: 680030, 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Истим» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680009, 

<

...>, литер Е, оф.201)  

об обязании устранить недостатки выполненных работ по договору подряда   № 2016/02/109 от 08.06.2016,  

третьи лица - общество с ограниченной ответственностью «Управляющая  компания «Амурлифт», главное управление регионального государственного  контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края,  

при участии представителей сторон, руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Истим» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680009, 

<

...>, литер Е, оф.201) до 01.07.2020 для устранения  недостатков работ, выполненных по договору подряда № 2016/02/84 от  19.05.2016 работ по капитальному ремонту кровли в многоквартирном доме,  расположенному по адресу: 

<

...>, произвести следующие ремонтно-строительные работы:  

-провести демонтаж гидроизоляционного ковра на 100% площади кровли;  

-выполнить ремонт цементно-песчаной стяжки кровли (заделка трещин,  выравнивание стяжки). При этом возможно выполнение дополнительной  

цементно-песчаной стяжки толщиной 3-5 см поверх существующей по всей  площади кровли;  

-выполнить устройство температурно-усадочных швов по стяжке кровли,  путем нарезки борозд и заполнения их герметиком. Деформационные швы  устраиваются по всей площади кровли шагом 3*3 м;  

-выполнить устройство температурно-усадочного шва, путем приклейки  дополнительного слоя наплавляемого материала, согласно п. 5.10. СП  17.1330.2011 выполнить по температурно-усадочным швам цементно- песчаной стяжки;  

- выполнить устройство двуслойного гидроизоляционного ковра на 100%  площади кровли;  

- выполнить примыкание к парапетам, вентиляционным шахтам и т.д. - 100%  примыканий.  

 Обязать ООО «Истим» уведомить НО «Региональный оператор – Фонд  капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае» о  начале и окончании выполнения указанных ремонтно-строительных работ  путем направления в его адрес письменного уведомления, пригласить  представителей истца на приемку скрытых работ и по окончании выполнения  работ.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Истим» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 680009, 

<

...>, литер Е, оф.201) в пользу некоммерческой  организации «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта  многоквартирных домов в Хабаровском крае» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, место нахождения: 680030, 

<

...>) судебные расходы в сумме 76 000 руб., в том числе:  расходы по оплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб. и расходы  по оплате судебной экспертизы в сумме 70 000 руб.  

 Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

 Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной  инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.  

 Судья Е.Е. Яцышина 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 09.04.2019 6:12:36

Кому выдана Яцышина Елена Евгеньевна