Арбитражный суд Краснодарского края

Именем  Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

 

№ А32-54428/2021

г. Краснодар

13 мая 2022г.

Резолютивная часть решения объявлена 05 мая 2022г.

Полный текст решения изготовлен 13 мая 2022г. 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи  Миргородской О.П., при ведении протокола помощником судьи Гоовым Н.Ю., рассмотрев материалы производства по делу № А32-54428/2021

по исковому заявлению ПАО «Тензор» (ИНН 

<

***>) г. Дубна

к ФГУП «ГВСУ № 4» (ИНН 

<

***>) г. Санкт-Петербург

о взыскании 211 772,83 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 472,50 рублей. 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Тензор» (далее – истец) обратилось в суд с иском к ФГУП «ГВСУ № 4» (далее – ответчик) о взыскании 211 772,83 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 472,50 рублей.

В судебное заседание стороны явку представителей не обеспечили, о времени и месте заседания уведомлены надлежащим способом в порядке статьи 123 АПК РФ.

Судебное заседание проведено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей сторон.

Суд, изучив и исследовав материалы дела, счел требования подлежащими удовлетворению на основании следующего.

16 декабря 2015года между Федеральным государственным унитарным предприятием «Главное управление специального строительства по территории Южного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» (ФГУП «ГУССТ № 4 при Спецстрое России») (подрядчик) и открытым акционерным обществом «Приборный завод «ТЕНЗОР» (ОАО «ТЕНЗОР») (субподрядчик) был заключен договор субподряда № 1415187382552090942000000/1485 на выполнение комплекса работ по монтажу технических средств охраны и пусконаладочных работ этих систем на Объекте: «Общежитие для размещения личного состава экипажа подводных лодок в Геопорту г. Новороссийска» (шифр объекта: 68/19-ОПБ/ОБ, (далее - Объект)) (Далее - Договор).

30 августа 2016г. сторонами было заключено дополнительное соглашение №1 к договору, по которому были внесены изменения по тексту касательно переименования субподрядчика на акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР», изменения в части расчетного счета Субподрядчика и изменения Приложения № 2 «Форма итогового акта», приложения № 3 «Форма акта сверки» к договору.

30 января 2019г. сторонами было заключено дополнительное соглашение №2 к договору, по которому были внесены изменения по тексту касательно переименования подрядчика на Федеральное государственное унитарное предприятие "Главное военно-строительное управление № 4" (ФГУП "ГВСУ № 4"), изменения в части наименования банка Подрядчика в статье 30 «Адреса и банковские реквизиты Сторон», изменения в статье 17 «Сдача-приемка выполненных работ» - дополнена пунктами 17.6.-17.8. Согласно указанного Дополнительного соглашения № 2 абзац 1 пункта 3.1. Статьи 3 «Цена Договора» принят в новой редакции, где изменена цена договора, а именно: Цена договора ориентировочная и составляет 4 235 456 рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% 646 086 (Шестьсот сорок шесть тысяч восемьдесят шесть) рублей 60 копеек. Также пункт 4.9. Статьи 4 «Порядок оплаты и расчетов» принят в новой редакции.

25 июня 2021г. сторонами было заключено дополнительное соглашение №3 к договору, по которому были внесены изменения по тексту касательно переименования субподрядчика на публичное акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР» и изменения в части КПП Подрядчика.

В соответствии с условиями договора (п. 2.1.) подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить комплекс работ по монтажу технических средств охраны и пусконаладочных работ этих систем на объекте: «Общежитие для размещения личного состава экипажа подводных лодок в Геопорту г. Новороссийска, согласно техническому заданию, в соответствии с Документацией и другими условиями договора.

Свои обязательства по условиям договора субподрядчиком исполнены, что подтверждается подписанным итоговым актом приемки выполненных работ по договору. Работы выполнены на сумму в размере 4 235 456 рублей 60 копеек.

По условиям п. 4.8. договора оплата выполненных субподрядчиком работ производится подрядчиком в размере, не превышающем 95% от стоимости работ. Оставшиеся 5% от стоимости выполненных работ будут выплачены субподрядчику при окончательном расчете.

Оплата выполненных субподрядчиком работ произведена подрядчиком в размере 4 023 683 рубля 77 копеек. Размер окончательного платежа по условиям договора в размере 5% (пять) от стоимости выполненных работ, составляет 211 772 рубля 83 копейки.

Согласно п. 17.5. договора выполнение всех обязательств субподрядчиком (Истцом) (за исключением гарантийных) подтверждается итоговым актом приемки выполненных работ, который подписывается сторонами и является основанием для проведения окончательного расчета.

Итоговый акт приемки выполненных работ по договору подписан сторонами 25 июня 2021 года. Согласно итоговому акту субподрядчик выполнил работы на сумму 4 235 456 рублей 60 копеек.

В соответствии с п. 4.9. окончательный расчет по договору осуществляется в течение 35 банковских дней с момента подписания сторонами итогового акта приемки выполненных работ по объекту.

Таким образом, окончательный расчет за выполненные субподрядчиком работы в размере 211 772 рубля 83 копейки должен был быть произведен в срок по 13 августа 2021 года.

24.08.2021г. в адрес Ответчика была направлена претензия № 77-03ю/467 от 24.08.2021г. о возврате удержанных 5 (пяти) % от стоимости выполненных работ по договору субподряда № 1415187382552090942000000/1485 от 16 декабря 2015г. на расчетный счет ПАО «ТЕНЗОР». Срок возврата денежных средств установленный в претензии до 31 августа 2021 года. На момент подачи искового заявления обязательство ответчика не исполнено, ответ на претензию не поступил.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения истца с настоящими требованиями в суд.

При решении вопроса об обоснованности требований суд руководствуется следующим.

В силу пункта 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно статье 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

Согласно положениям статей 711, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 720 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом, в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Факт выполнения работ по договору, факт принятия работ ответчиком, а также наличие задолженности подтверждается материалами дела и ответчиком не оспаривались. Ответчик подписал акта выполненных работ без разногласий.

Доказательств последующей оплаты задолженности ответчик не представил.

Поскольку размер задолженности подтвержден материалами дела, а ответчик доказательств надлежащего исполнения обязательств по оплате выполненных работ не представил, суд приходит к выводу об удовлетворении исковые требования в части взыскания основного долга в размере 211 772,83 рублей.

Истец просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14.08.2021 по 09.11.2021 в размере 3 472,50 рублей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. 

Суд проверил расчет процентов и признает его составленным верно.

Поскольку ответчик допустил просрочку в оплате работ, требование заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.

Оплату государственной пошлины следует возложить на ответчика в порядке статьи 110 Гражданского кодекса РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями  167 – 170, 176  Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ФГУП «ГВСУ № 4» (ИНН 

<

***>) г. Санкт-Петербург в пользу ПАО «Тензор» (ИНН 

<

***>) г. Дубна 211 772,83 рублей задолженности, 3 472,50 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, 7 305 рублей в порядке возмещения судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Решение суда может быть обжаловано в порядке, определенном главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Краснодарского края

СудьяО.П. Миргородская