Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

город Пермь        

24.02.2025 года                                                             Дело № А50-730/24

Резолютивная часть решения объявлена 10.02.2025 года. 

Полный текст решения изготовлен 24.02.2025 года.

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондиной Е.Ю., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Желудевой Е.М., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Кама» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 

о задолженности, процентов,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, уд.адвоката, доверенность, ФИО1, паспорт,

от ответчика: ФИО3, паспорт, диплом, доверенность,

          Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – Истец, Подрядчик) обратился в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Кама» (далее – Ответчик, Заказчик) о взыскании задолженности в размере 137 691,96 руб., неустойки в размере 16 179,75 руб., с учетом изменения размера исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ.

  Определением суда от 31.01.2024 исковое заявление принято к производству, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

        14.03.2024 г. от ООО «Кама» поступило встречное исковое заявление к ИП Филиппу И.И. о взыскании неосновательного обогащении, процентов.

        Суд определением от 18.03.2024 перешел к рассмотрению дела по правилам общего искового производства, этим же определением судом принят к рассмотрению встречное исковое заявление.

    14.08.2024 г. от ООО «Кама» поступило ходатайство об отказе от встречных исковых требований. 

    Определением суда от 14.08.2024 г. принят отказ общества с ограниченной ответственностью «Кама» от встречных исковых требований.  Производство по встречному иску в рамках дела №А50-730/2024 прекращено.

        Истец на иске настаивает. Пояснил суду, что после сверки взаимных расчетов неоплаченными остались работы по Актам №40 и 41 (с учетом всех оплаченных сумм по данному договору) на сумму 137 691,96 руб. Повторное выполнение работ по Актам 10 и 28 связано именно с действиями самого Заказчика. Просят иск удовлетворить.

        Ответчик с иском не согласен по доводам, изложенным в отзыве, пояснил суду, что по данному Договору имеется переплата, поскольку, дважды оплачены работ по Акта №10 и 28. Ответчик полагает, что эти работы являются дополнительными, Подрядчик в свою очередь не согласовал выполненные данных работ в порядке ст. 743 ГК РФ. Просит в иске отказать.

         Исследовав материалы дела, суд установил.

Как следует из материалов дела, 24.04.2023 г. между ООО «Кама» (Заказчик) и ИП ФИО1 (Подрядчик) заключен договор № 416/3 на выполнение лесохозяйственных работ.

В соответствие с п. 1.1 Договора Подрядчик обязуется выполнить работы по охране, защите, воспроизводству лесов (далее - лесохозяйственные работы) на лесных участках Заказчика, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору в полном объеме, установленном Проектом освоения лесов в отношении таких лесных участков, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Требования к качеству, объему, срокам выполнения работ и иные требования к выполняемым работам устанавливаются Техническим заданием на выполнение лесохозяйственпых работ (Приложение № 2 к настоящему договору) (п. 1.2 Договора).

Лесные участки находятся в аренде у Заказчика на основании Договора аренды лесного участка для заготовки древесины № 996 от 11.08.2021 в Чусовском лесничестве, заключенного между Заказчиком и Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (далее по тексту - Договор аренды) (п. 1.3 Договора).

        В соответствие с п. 1.5 Договора Работы должны выполняться Подрядчиком с соблюдением положений настоящего Договора и приложений к нему, а также с соблюдением:

- Проекта освоения лесов на лесные участки;

- Лесной декларации на лесные участки; 

-Технологической картой;

- Проекта па выполнения работ;

- Лесного кодекса Российской Федерации;

- Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации (утверждены Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 993) (далее - Правила заготовки древесины);

- Правил ухода за лесами (утверждены Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 30.07.2020 № 534) (далее - Правила ухода за лесами);

- Правил санитарной безопасности в лесах (утверждены Постановлением Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047) (далее - Правила санитарной безопасности в лесах);

- Правил пожарной безопасности в лесах (утверждены Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614) (далее - Правила пожарной безопасности в лесах);

- Правил лесовосстаиовления (утверждены Приказом Минприроды России от 04.12.2020 № 1014) (далее - Правила лесовосстаиовления);

- Иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

В соответствие с п. 2.1 Договора в целях проверки соблюдения Подрядчиком требований договора, приложений к нему, а также требований, установленных законодательством РФ, Заказчик в любое время вправе проверять ход и качество выполняемых работ, а также состояние лесосек, на которых Подрядчиком производятся работы, и выписывать Подрядчику предписание об устранении выявленных в ходе проверки нарушений и/или направлять претензии с требованием об оплате неустоек/пени/штрафов/убытков/ушерба, начисленных по результатам проверки ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» и в соответствии с условиями настоящего Договора.

В соответствие с п.п. 3.1.1 – 3.1.4 Договора подрядчик обязан выполнять работы в соответствии с положениями настоящего Договора, приложении и соглашений к нему, с соблюдением требований нормативных актов, в том числе в сфере земельных отношений, отношений по охране окружающей среды и природопользования.

Выполнять работы качественно и в установленные Техническими заданиями и настоящим договором сроки.

Сдать Заказчику результат лесохозяйственных работ по Акту выполненных лесохозяйствеиных работ по форме, установленной Приложением № 4 к договору. К акту выполненных лесохозяйственных работ должен быть приложен документ, подтверждающий приемку работ лесничеством ГКУ (Управление лесничествами Пермского края» (Акт, составленный и подписанный уполномоченным лицом лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края»).

Выполнять предписания, полученные от Заказчика и/или от уполномоченных органов, в указанные в предписаниях сроки.

В соответствие с Разделом 5 Договора ежемесячно не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным, Подрядчик составляет в 2 экз. Акт выполненных работ, и подписывает по результатам приемки представителем ПСУ «Управление лесничествами Пермского края». На основании Акта приемки работ лесничеством оформляется Акт выполненных лесохозяйственных работ по форме установленной Приложением № 4 к- настоящему Договору, а также первичные бухгалтерские документы (счет-фактура).

После подписания Акта выполненных работ представителем ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» и Заказчика без замечаний, производится оплата в соответствии с условиями п.7.1.1. настоящего договора, при наличии замечаний оплата производится после полного их устранения Заказчиком за свой счет.

В соответствие с п. 6.3 Договора за нарушение сроков оплаты более, чем на 7 (семь) календарных дней Подрядчик вправе потребовать от Заказчика пени в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Из материалов дела следует, что Подрядчиком были выполнены работы на общую сумму 6 062 442,02 руб. по Актам №№ 5-41. Фактически оплачено 5 924 750,06 руб. Задолженность составляет 137 691,96 руб.

Вышеуказанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Согласно статье 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

Отношения сторон регулируются положениями главы 37 Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде.

В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

Согласно п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Пунктом 6 ст. 753 ГК РФ предусмотрено, что заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

По смыслу указанных норм обязанность доказывания обоснованности мотивов отказа от подписания актов о приемке выполненных работ возложена на заказчика, а суд должен проверить обоснованность мотива отказа заказчика от подписания акта.

При оценке мотивов отказа от подписания актов выполненных работ суд исходит из следующего.

Обоснованными мотивами для отказа от подписания акта могут быть: отрицательные результаты испытаний при приемке; нарушение процедуры приемки работ, предусмотренной договором или установленной нормативно-правовыми актами для отдельных объектов строительства; обнаружение недостатков, которые исключают возможность использования объекта строительства для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком и др. (существенные недостатки).

Из материалов дела следует, что Подрядчиком были выполнены работы на общую сумму 6 062 442,02 руб. по Актам №№ 5-41. Все Акты выполненных работ подписаны заказчиком без замечаний, за исключением Акта № 28 от 18.09.2023 г. на сумму 292 500 руб. на выполнение подготовки почвы под лесные культуры (ЗКС) Чусовского лесничества квартал №8 выдел №5, объем работ 11,7 Га.

Фактически оплачено, с учетом назначения платежа) - 5 924 750,06 руб. Задолженность составляет 137 691,96 руб.

Возражая по заявленным требованиям Ответчик пояснил суду, что истец предъявил ко взысканию стоимость работ по акту № 28 от 18.09.2023 в сумме 292 500 руб., которые были ему ранее оплачены по акту № 7 от 05.05.2023 (платежным поручением № 39818 от 11.05.2023) в рамках договора от 24.04.2023 416/23.

Кроме того, Ответчик полагает, что Подрядчиком завышены объемы работ (подготовка почвы под лесные культуры (ЗКС), путем задвоения истцом работ, т.е. отражения одних и тех же работ в разных актах, и необоснованное завышение их стоимости.

Также обращаем, внимание, что выполнение работ: повторная подготовка почвы под посадку лесных культур будущего года, согласно повторному акту сдачи-приемки работ на территории аренды ООО «Кама» от 11.09.2023, условиями согласованного договора не предусмотрены.

Истцом не представлено в материалы дела согласование дополнительных работ. Поскольку подрядчиком был нарушен порядок согласования выполнения дополнительных работ, не предусмотренных договорами, и в материалы дела не представлено доказательств, свидетельствующих о необходимости немедленных действий в интересах заказчика в порядке, установленном пунктом 4 статьи 743 ГК РФ, считает что предприниматель не вправе требовать от общества оплаты дополнительных работ.

В свою очередь Истец пояснил суду, что необходимость срочного проведения повторных работ по подготовке почвы под лесные культуры (ЗКС) согласно акту № 28, а равно по уходу за противопожарными минерализованными полосами согласно акту № 10 были согласованы между ИП «Филип И.И.» и ООО «Кама» в лице ФИО4, ФИО5

Цена и объемы вышеуказанных работ также были согласованы между ИП «Филип» и ФИО4, ФИО5 как представителем ООО «Кама», что подтверждается представленными материалами. Работы как по акту № 10, так и по акту № 28 были им согласованы, на их проведение было получено разрешение.

Возможность внесения в договор № 416/23 от 24.04.2023 дополнений относительно работ по актам № 10 и № 28 отсутствовала в связи с неотложным характером указанных работ и необходимостью их незамедлительного проведения в интересах заказчика, ввиду нижеследующих обстоятельств.

Работы по акту № 7 от 05.05.2023 г по подготовке почвы под лесные культуры ЗКС были согласованы с представителем ООО «Кама» и выполнены ИП Филип И.И., приняты Чусовским лесничеством ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Чусовским участковым лесничеством, в лице лесничего Чусовского участкового лесничества ФИО6, на основании чего был составлен первичный акт сдачи-приёмки выполненных работ от 05.05.2023 г., а также акт выполненных работ № 7 от 05.05.2023г. Работы по подготовке почвы выполнялись ИП Филип И.И. в целях последующей посадки лесных культур ЗКС.

На ООО «Кама», как сторону по договору № 416/23 от 24.04.2023, была возложена обязанность по поставке семян (посадочного материала), необходимого для посадки лесных культур ЗКС 9п. 10 Приложения 3 к Договору). Указанная обязанность не была своевременно исполнена, ООО «Кама», не был предоставлен посадочный материал, в связи с чем было упущено посадочное время. Ввиду изменения погодных условий, отсутствовала возможность для осуществления последующей посадки лесных культур ЗКС, было принято решение о переносе сроков посадки на осенний период.

08.09.2023 лесничим Чусовского участкового лесничества ФИО6 было проведено повторное обследование данной площади в квартале 8 выделе 5(12) и выявлено, что посадочные полосы сильно заросли травой. Согласно правилам лесовосстановления № 1024 от 29.12.2021 г. посадка лесных культур на заросших площадях не допускается. Об указанных обстоятельствах представители ООО «Кама» были уведомлены, в связи с чем ООО «Кама» и ИП Филип И.И. было принято решение о повторной подготовке почвы.

С 08.09.2023 г по 11.09.2023 г была произведена повторная подготовка почвы ИП Филип И.И. 11.09.2023 г. Чусовским лесничеством ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Чусовским участковым лесничеством, в лице лесничего Чусовского участкового лесничества ФИО6 были приняты работы и составлен повторный акт сдачи - приёмки работ по подготовке почвы от 11.09.2023 г. На основании данного акта, с учетом вышеуказанных обстоятельств был составлен акт выполненных работ № 28 от 18.09.2023.

По запросу суда в материалы дела ООО «Кама» представлен Договор поставки №4 от 05.04.2023 г. и Товарная накладная №107 от 19.09.2023 г. подтверждающую поставку сеянцев ЗКС (закрытой корневой системы) 19 сентября 2023 г. 

Доказательств закупки сеянцев ЗКС и передачи их Подрядчику для проведения работ в мае 2023 года Ответчиком в материалы дела не  представлены.

Согласно п. 49 Приказа Минприроды России от 29.12.2021 N 1024 (ред. от 03.08.2023) «Об утверждении Правил лесовосстановления, формы, состава, порядка согласования проекта лесовосстановления, оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной форме проекта лесовосстановления» посадка и дополнение лесных культур сеянцами, саженцами с закрытой корневой системой осуществляются весной, летом, за исключением засушливых периодов, и осенью не позднее чем за 2 недели до устойчивого замерзания почвы, за исключением лесных участков с переувлажненными, глинистыми и тяжелыми суглинистыми избыточно увлажненными почвами.

Работы по акту № 10 от 25.05.2023 г. по уходу за противопожарными минерализованными полосами были согласованы с представителем ООО «Кама» выполнены ИП Филип И.И. Указанные работы были приняты Чусовским лесничеством ГКУ «Управление лесничествами Пермского края», в лице лесничего Вильвенского участкового лесничества ФИО7 в моем присутствии, на основании чего был составлен первичный акт сдачи-приёмки работ от 25.05.2023 г., а также акт выполненных работ № 10 от 25.05.2023 г.

Впоследствии ООО «Кама» в установленный срок не была осуществлена вывозка леса, что обусловило необходимость осуществления работ по уходу за противопожарными минерализованными полосами исходя из требований пожарной безопасности. По причинам требований пожарной безопасности, действующей в Пермском крае со стороны ООО «Кама» в адрес ИП Филип И.И. было предложено оказать услуги по уходу за противопожарными минерализованными полосами в Чусовском лесничестве, Вильвенском участковом лесничестве в срочном порядке. Объемы и стоимость указанных работ были согласованы мной ИП Филип И.И., выполнены им. Указанные работы были приняты Чусовским лесничеством ГКУ «Управление лесничествами Пермского края», в лице лесничего Вильвенского участкового лесничества ФИО7 в присутствии Подрядчика, на основании чего был составлен акт проверки участков лесных культур на территории аренды ООО «Кама» по Пермскому краю от 24.05.2023. На основании акта лесничества был составлен акт выполненных работ № 24 от 03.07.2023.

Согласно п. 70 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,  валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

На основании п. 29 Правил пожарной безопасности в лесах утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 г. N 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» (далее — Правила) срубленные деревья в случае оставления их на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона должны быть очищены от сучьев и плотно уложены на землю. Заготовленная древесина, оставляемая на местах рубок (лесосеках) на период пожароопасного сезона, должна быть собрана в штабеля или поленницы и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

Согласно п. 30 Правил места рубки (лесосеки) в хвойных равнинных лесах на сухих почвах с оставленной на период пожароопасного сезона заготовленной древесиной, а также с оставленными на перегнивание порубочными остатками отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Места рубок (лесосеки) площадью свыше 25 гектаров должны быть, кроме того, разделены противопожарными минерализованными полосами указанной ширины на участки, не превышающие 25 гектаров. Места складирования и противопожарные разрывы вокруг них очищаются от горючих материалов и отделяются противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - 2 такими полосами на расстоянии 5-10 метров одна от другой (п. 31 Правил).

В судебном заседании 21.11.2024 г. удовлетворено ходатайство Истца о допросе в качестве свидетеля ФИО6. Отобрана расписка.

Свидетель ФИО6 ответил на вопросы суда и сторон. Свидетель пояснил суду, что является Лесничим Чусовского участкового лесничества ГКУ. Работы по акту № 7 от 05.05.2023 г по подготовке почвы под лесные культуры ЗКС были выполнены ИП Филип И.И. и приняты Чусовским лесничеством ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Чусовским участковым лесничеством,  на основании чего был составлен первичный акт сдачи-приёмки выполненных работ от 05.05.2023 г. Работы по подготовке почвы были выполнены в целях последующей посадки лесных культур ЗКС. В связи с тем, что ООО «Кама» не был предоставлен посадочный материал, было упущено посадочное время, в связи с изменением погодных условий (высокая температура), объективно отсутствовала возможность для осуществления посадки, поскольку, проводить посадку в летний засушливый период запрещено. В связи с  чем было принято решение о переносе сроков посадки на осенний период. 08.09.2023 г проведено повторное обследование данной площади в квартале 8 выделе 5(12) и выявлено, что посадочные полосы сильно заросли травой. Согласно правилам лесовосстановления № 1024 от 29.12.2021 г, посадка лесных культур на заросших площадях не допускается. ООО «Кама» и ИП «Филип И.И.» было принято решение о повторной подготовке почвы.

С 08.09.2023 г по 11.09.2023 г была произведена повторная подготовка почвы ИП Филип И.И. и 11.09.2023 г. Чусовским лесничеством ПСУ «Управление лесничествами Пермского края» Чусовским участковым лесничеством были приняты работы, составлен акт сдачи -приёмки работ по подготовке почвы от 11.09.2023 г.

          Кроме того, Министерством природных ресурсов письмом от 25.12.2024 г. № 05-561 даны пояснения по поводу изменения нумерации кварталов. Так, Министерство указало, что нумерация кварталов и выделов была указана по действующим на тот момент материалам  лесоустройства 1993 года. В сентябре 2023 года лесничим ФИО6 был осуществлен выезд на данную площадь  и составлен Акт приемки работ от 11.09.2023 г. В данном Акте указан квартал 8 выдел 12, площадь выполненных работ 11,7 Га. Номер квартала и выдела указан по данным таксации 2022 года, произведенной ООО «Кама». Данные площади вырубки в квартале 8 выдела 5 и выдела 12 являются идентичными по объему и по координатам. Номера выделов в квартале 8 были изменены согласно таксации 2022 года с выдела 5на выдел 12.

Таким образом, учитывая вышеизложенное суд пришел к выводу, что работы по повторной подготовке почвы, а равно работы по уходу за противопожарными минерализованными полосами возникли по вине ООО «Кама», имели срочный и необходимый характер, выполнены в интересах ООО «Кама» и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Результат лесохозяйственных работ как по Актам выполненных лесохозяйственных работ № 10 и № 24, так и по актам № 7 и № 28 были сданы ИП Филип И.И. ООО «Кама» вместе с документами, подтверждающими приемку работ лесничеством ГКУ «Управление лесничествами Пермского края»:

-  Акт № 24 от 03.07.2023 - работы были приняты лесничеством согласно акту проверки участков лесных культур на территории аренды ООО «Кама» по Пермскому краю от 24.05.2023, подписанному представителем ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Чусовское лесничество и представителем арендатора ООО «Кама» без предложений по устранению замечаний, нарушений. После принятия лесничеством акт № 24 был подписан заказчиком ООО «Кама»;

-    Акт № 10 от 25.05.2023 работы были приняты представителями ГКУ «Управление лесничествами ПК» Чусовское лесничество согласно первичному акту сдачи-приемки работ и представителем арендатора ООО «Кама» без предложений по устранению замечаний, нарушений, после чего Акт № 10 был подписан заказчиком ООО «Кама»;

-    акт № 7 от 05.05.2023 работы были приняты лесничеством согласно первичному  акту  сдачи-приемки работ арендатором  ООО  «Кама»  от 05.05.2023, подписанному представителем ГКУ «Управление лесничествам Пермского края» Чусовское лесничество и представителем арендатора ООО «Кама» без предложений по устранению замечаний, нарушений. После принятия лесничеством акт № 28 был подписан заказчиком ООО «Кама»;

- акт № 28 от 18.09.2023 работы были приняты лесничеством согласно повторному акту сдачи-приемки работ на территории аренды ООО «Кама» по Пермскому краю от 11.09.2023, подписанному представителем ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Чусовское лесничество и представителем арендатора ООО «Кама» без предложений по устранению замечаний, нарушений. После принятия лесничеством акт № 28 был подписан заказчиком ООО «Кама».

После приемки вышеуказанных работ лесничеством и арендатором вплоть до настоящего времени подрядчик не извещался ООО «Кама» об обнаружении в результатах выполненных им работ отступлений от договора № 416/23 от 24.04.2023 или иных недостатков выполненных работ. Какие-либо предписания по устранению выявленных недостатков не выдавались подрядчику со стороны ООО «Кама».

         Также судом принято во внимание, что работы по данным Актам были оплачены Заказчиком. В настоящем деле ко взысканию представлены работы по Актам №40 и 41. 

         Поскольку Ответчиком в материалы дела не представлено доказательств оплаты выполненных работ по актам 40 и 41, акты подписаны Заказчиком, требования истца заявлены правомерно и подлежат удовлетворению.

         Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании пени за нарушение сроков оплаты за период с 20.12.2023 по 10.08.2024 в размере 16 179 руб. 75 коп.

В силу п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство (п. 2 ст.401 ГК РФ).

На основании п. 7.1.1. договора № 416/23 от 24.04.2023 выполненные в соответствии с настоящим Договором работы оплачиваются не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком Акта выполненных лесохозяйственных работ и получения оформленного счет-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, либо иным способом, не противоречащим требованиям действующего законодательства Российской Федерации и согласованным с Заказчиком.

Согласно п. 6.3. за нарушение сроков оплаты более, чем на 7 (семь) календарных дней Подрядчик вправе потребовать от Заказчика пени в размере 0,05% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Акт выполненных работ № 41 был подписан 31.10.2023, с учетом положений п. 7.1.1 договора № 416/23 от 24.04.2023 оплата по указанному акту в размере 161 415 руб. должна быть произведена 13.12.2023. Задолженность составляет 137 691, 96 руб. Просрочка за период с 20.12.2023 по 10.08.2024 составляет 235 дней.

         Расчет судом проверен, признан верным. Требование подлежит удовлетворению.

  В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Кама» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу  индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 137 691 (сто тридцать семь тысяч шестьсот девяносто один) руб. 96 руб., неустойку за нарушение срока оплаты за период с 20.12.2023 по 10.08.2024 в размере 16 179 (шестнадцать тысяч сто семьдесят девять) руб. 75 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 5 616 (пять тысяч шестьсот шестнадцать) руб.

Выдать индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ОГРНИП: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)  справку на возврат госпошлины, уплаченной по платежному поручению №1 от 15.01.2024 г. в размере 4 707 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья                                                                   Е.Ю. Дрондина