244/2020-51738(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-5671/2020

г. Салехард

24 ноября 2020 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Курековой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  муниципального казённого учреждения «Управление коммунального заказа» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью  «ЛенАр» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>) об обязании выполнить  обязательства по контракту,  

при участии в судебном заседании: от истца – представитель не явился; от ответчика – представитель не явился; 

Руководствуясь статьями 110, 167-174 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ЛенАр» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>) надлежащим образом исполнить обязательства по  муниципальному контракту № Ф.2019.250050/110-19/ЭА от 13.05.2019 на выполнение  работ по объекту: «Реконструкция здания «Телецентра» под муниципальный архив по  адресу: ЯНАО, 

<

...>», а именно, в течение 10-ти календарных  дней со дня вступления решения суда в законную силу:  

- выполнить выравнивающую стяжку из цементно-песчаного раствора M150 в  соответствии с требованиями проекта л. 20 шифр 254-17/К-АР;  

- при устройстве стропильной системы кровли выполнить мероприятия по  креплению стропил скруткой из проволоки к керамзитобетонным панелям на  химический анкер;  

- выполнить огнезащиту металлических конструкций конструктивной  огнезащитой МБОР-1 фирмы «ТИЗОЛ» толщиной 20 мм с приклеиванием на  специальный состав Плазас, в соответствии с требованиями рабочей документации л.  6,20 шифр 254-17/К-КР;  

- для подтверждения прочности бетона предоставить лабораторное заключение  специализированной организации, выполненное по ГОСТ 18105-2010. Определение  прочности методом неразрушающего контроля или отбор проб из монолитной  конструкции произвести в присутствие представителя муниципального казённого  учреждения «Управление коммунального заказа».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЛенАр» (ИНН:  8906008363, ОГРН: 1088906000028) в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 6000 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения  формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет»  http://yamal.arbitr.ru.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

О.В. Курекова

Судья 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 08.06.2020 5:36:14

Кому выдана Курекова Ольга Владимировна