72/2020-145148(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-9305/2019

г. Ярославль

14 декабря 2020 года

Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Бессоновой И.Ю.  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Муниципального  учреждения Администрация городского поселения Пошехонье Ярославской  области (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Обществу с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью «АрхиМастер»,  государственное автономное учреждение Ярославской области «Государственная  экспертиза в строительстве».  

об обязании устранить недостатки 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение четырех месяцев с момента вступления  решения суда в законную силу устранить недостатки работ, допущенные при  строительстве многоквартирных жилых домов, расположенных по адресам:  

<

...>, 

<

...>, а именно:  

В отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>:  

1.Выполнить дренажную систему по периметру здания, в процессе выполнения  дренажной системы очистить поверхность стен основания и выполнить ремонт  вертикальной гидроизоляции.  

2.Стены: 

- выполнить ремонт штукатурки локальных участков стен, имеющих поражение  грибком, с пропиткой нейтрализующими составами основания поверхности стен до  нанесения штукатурного слоя, после ремонта штукатурного слоя поверхность стен  окрасить.  

- на участках образования трещин на внутренних поверхностях несущих стен  выполнить разделку трещин и ремонт штукатурки с последующей окраской  отремонтированной поверхности.  

3. По фасаду здания: - выполнить ремонт штукатурного слоя на уровне цоколя, покрытого мхом; 

- участки повреждения штукатурного слоя с утеплением и локальные образования  

трещин восстановить ремонтом штукатурного слоя с последующей окраской. 

4.Лестничные клетки: 

-выполнить ремонт участков образования трещин с последующим  

восстановлением окрасочного слоя; 

- установить в слуховые окна блоки со щелевыми решетками, либо  

открывающиеся оконные блоки для обеспечения вентилирования подкровельного  

пространства; - восстановить в первоначальное состояние снегозадержатели на кровле доме, - утеплить все имеющиеся вентшахты в доме. 

В отношении многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ярославская  

область, 

<

...>: 

1.Выполнить дренажную систему по периметру здания, в процессе выполнения  

дренажной системы очистить поверхность стен основания и выполнить ремонт  

вертикальной гидроизоляции. 2.Стены: 

-выполнить ремонт штукатурки локальных участков стен, имеющих поражение  

грибком, с пропиткой нейтрализующими составами основания поверхности стен до  

нанесения штукатурного слоя, после ремонта штукатурного слоя поверхность стен  

окрасить. 3.В квартире № 29: 

-в помещениях кухни и большой жилой комнаты выполнить ремонт штукатурки  

под оконным проемом и устранить горизонтальную трещину с устройством каркаса с  

целью восстановления целостности плоскости стен; по окончании ремонта  

штукатурного слоя восстановить отделочные покрытия; 

-в дверном проеме, ведущем из коридора в жилую комнату, а так же в дверном  

проеме, входном в квартиру, выполнить ремонт перемычек (с заменой в жилой  

комнате), по окончании ремонта перемычек восстановить отделочные покрытия. 

4.На участках образования трещин на внутренних поверхностях несущих стен в  

лестничных клетках подъездов выполнить разделку трещин и ремонт штукатурки с  

последующей окраской отремонтированной поверхности. 

5.По фасаду здания выполнить ремонт штукатурного слоя на уровне цоколя,  

покрытого мхом. 6.По кровле: 

-установить в слуховые окна блоки с щелевыми решетками, либо открывающиеся  

оконные блоки для обеспечения вентилирования подкровельного пространства. 

-выполнить пароизоляцию слоя утеплителя с целью защиты его от намокания из- 

за конденсата. 7.В лестничных клетках: 

-выполнить ремонт участков образования трещин с последующим  

восстановлением окрасочного слоя. 

8.Восстановить в первоначальное состояние водостоки на кровле доме.  

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального учреждения  Администрация городского поселения Пошехонье Ярославской области (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку на случай неисполнения  решения суда в размере: 5 000 руб. в день за первые 30 календарных дней  неисполнения судебного акта, начиная со следующего дня после истечения срока,  установленного судом для исполнения судебного акта, 10 000 руб. за все последующие  дни неисполнения судебного акта.  

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления  решения в законную силу.  

Взыскать с Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройМонтаж" в  доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления  решения в законную силу.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во  Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия  (изготовления его в полном объеме).  

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в  том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в  сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).  

Судья Бессонова И.Ю. 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 02.09.2020 12:13:47

Кому выдана Бессонова Ирина Юрьевна