ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело№А40-246573/20-83-1252

г. Москва

18 марта 2021 г.

Резолютивная часть решения объявлена 04 марта 2021 года 

Решение в полном объеме изготовлено 18 марта 2021 года

Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Сорокина В.П. (шифр судьи 83-1252), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО "ПМ РЕНОВЕЙТ" (ИНН 

<

***>) к ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" (ИНН 

<

***>) о взыскании денежных средств в размере 11.822.038 руб. 82 коп. 

при участии:

от истца - ФИО2 на основании доверенности № 1 от 09.12.2020 

от ответчика - ФИО3 на основании доверенности от 25.02.2021

УСТАНОВИЛ:

ООО "ПМ РЕНОВЕЙТ"   обратилось в суд с требованиями о взыскании с    ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" 11 373 991, 32 рублей в качестве оплаты за выполненные работы; 448 047, 50 рублей - неустойки за нарушение срока оплаты выполненных работ.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик поддержал позицию, изложенную в отзыве.

Выслушав представителей истца и ответчика, исследовав письменные доказательства, суд находит иск подлежащим удовлетворению в части по следующим основаниям.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации договоры являются основанием для возникновения гражданских прав и обязанностей.

Пункт 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает приобретение и осуществление юридическими лицами своих гражданских прав своей волей и в своем интересе, гарантирует свободу в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

Из материалов дела усматривается, что между ООО «ПМ Реновейт» (Подрядчик) и ООО «Либерти Финанс» (Заказчик) заключен Договор подряда № П37.ПОД134 от 11.06.2018 г. (далее по тексту - «Договор»), в соответствии с которым согласно которому Подрядчик принимает обязательства собственными силами, средствами и механизмами выполнить работы по внутренней отделке помещений на объекте по адресу: 

<

...>, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы на условиях Договора.

В соответствии с п. 3.1. Договора цена Договора составляет 5 155 304, 99 (Пять миллионов сто пятьдесят пять тысяч триста четыре и 99/100) рублей, включая НДС.

К Договору также были заключены дополнительные соглашения №№ 1-19, в которых Стороны увеличили стоимость и объем работ. 

Общая стоимость работ по Договору подряда № П37.ПОД134от 11.06.2018 г. и Дополнительным соглашениям № 1-19 составляет сумму 163 091 202, 26 рублей.

Истцом указано на то, что в рамках исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик выполнил, а Генподрядчик принял работы на общую сумму 135 540 812, 21 рублей, что подтверждается двусторонне подписанными Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Истцом указано на то, что задолженность Заказчика перед Подрядчиком составляет 11 373 991, 32 рублей, в том числе: по Дополнительному соглашению № 2 в сумме 47 689,69 рублей по оплате КС-2, 3 № 7 от 25.07.2019; по Дополнительному соглашению № 3 в сумме 2 631 227,14 рублей по оплате КС-2, 3 № 8 от 25.07.2019 и № 10 от 13.11.2019; по Дополнительному соглашению № 4 в сумме 187 636,38 рублей по оплате КС-2, 3 № 4 от 25.07.2019; по Дополнительному соглашению № 6 в сумме 680 810,24 рублей по оплате КС-2, 3 № 4 от 01.10.2019 и № 5 от 13.11.2019;  по Дополнительному соглашению № 7 в сумме 196 497,58 рублей по оплате КС-2, 3 № 2 от 13.11.2019; по Дополнительному соглашению № 8 в сумме 1 123 258,25рублей по оплате КС-2, 3 № 5 от 25.07.2019, № 6 от 01.10.2019 и № 6 от 13.11.2019; по Дополнительному соглашению № 13 в сумме 323 119,36 рублей по оплате КС-2, 3 № 2 от 13.11.2019;  по Дополнительному соглашению № 14 в сумме 1 563 031,99 рублей по оплате КС-2, 3 № 2 от 25.07.2019 и № 3 от 13.11.2019; по Дополнительному соглашению № 15 в сумме 283 918,10 рублей по оплате КС-2, 3 № 2 от 25.09.2019 и № 3 от 13.11.2019;  по Дополнительному соглашению № 16 в сумме 392 566,44 рублей по оплате КС-2, 3 № 2 от 13.11.2019; по Дополнительному соглашению № 17 в сумме 2 789 206,95 рублей по оплате КС-2, 3 № 1 от 13.11.2019; по Дополнительному соглашению № 19 в сумме1 155 029,22 рублей по оплате КС-2, 3 № 1 от 13.11.2019.

В соответствии с п. 3.6. Договора оплата за фактически выполненные работы осуществляется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком соответствующих Актов о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (о форме КС-3), счетов-фактур, на основании представленного Подрядчиком счета.

Сумма задолженности подтверждается Актами о приемке выполненных работ (КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат, подписанными обеими сторонами Договора.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Статьей 711 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с п. 4 ст. 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно ч. 1 ст. 746 Гражданского кодекса Российской Федерации оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.

Согласно статье 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованием оплатить 11 373 991, 32 рублей в качестве оплаты за выполненные работы, которая была оставлена ответчиком без удовлетворения, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском.

В представленном в материалы дела отзыве на исковое заявление ответчик требования не признал, ссылаясь на то, что за период с июня 2018 года по май 2020 года Истец в соответствии с Договором и дополнительными соглашениями выполнил работы на общую сумму 139 314 489,55 руб., а Ответчиком в свою очередь была произведена оплата выполненных работ на сумму 131 165 280,78 руб. (в том числе непосредственно Истцу, а также третьему лицу за Истца согласно распорядительному письму последнего). Факт оплаты подтверждается платежными поручениями.

Следовательно, разница между стоимостью выполненных работ и стоимостью оплаченных работ составляет 8 149 208,77 руб.

В соответствии с п.3.6 Договора оплата работ производится за минусом сумм гарантийного удержания. 

Пунктом 3.14 Договора Стороны определили, что Гарантийное удержание составляет 5 (Пять) процентов от стоимости выполненных и принятых работ по Актам о приемке выполненных Работ (КС-2) и Справкам о стоимости выполненных Работ (КС-3), которое выплачивается Заказчиком Подрядчику в следующем порядке: 50 (Пятьдесят) процентов от удержанной суммы - по истечении первого года с даты подписания Сторонами Итогового Акта сдачи-приемки выполненных Работ, при условии устранения всех Дефектов/несоответствий, в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на оплату; 50 (Пятьдесят) процентов от удержанной суммы - по истечении второго года с даты подписания Сторонами Итогового Акта сдачи-приемки выполненных Работ, при условии устранения всех Дефектов/несоответствий, в течение 5 рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на оплату; в случае досрочного расторжения Договора Гарантийное удержание выплачивается Заказчиком Подрядчику в следующем порядке: 50 (Пятьдесят) процентов от удержанной суммы по истечении одного года с даты подписания последнего Акта приемки выполненных работ (КС-2), в течение 5 рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на оплату; 50 (Пятьдесят) процентов по истечении второго года с момента подписания последнего Акта приемки выполненных работ (КС-2), в течение 5 (Пять) рабочих дней с даты получения от Подрядчика счета на оплату; в случае, если Договор расторгается по соглашению Сторон, в соглашении о расторжении Стороны вправе предусмотреть иной порядок возврата Гарантийного удержания.

На момент оформления Сторонами последнего акта о приемке выполненных работ (16.04.2020) сумма гарантийного удержания составила 6 862 909,19 руб. К настоящему времени основания для выплаты гарантийного удержания согласно вышеуказанным условиям Договора не наступили.   

Следовательно, из стоимости выполненных и не оплаченных работ подлежит вычитанию сумма гарантийного удержания, вследствие чего задолженность по состоянию на 01.01.2021 составит сумму в размере 1 286 299,58 руб. (8 149 208,77 руб. - 6 862 909,19 руб.). Таким образом, с учетом указанных обстоятельств, требования Истца являются обоснованными в части основного долга по оплате выполненных работ в размере 1 286 299,58 руб.

Истцом факт оплаты по представленным ответчиком платежным поручениям не оспорен, как и факт того, что срок выплаты гарантийного удержания не наступил.

В остальной части доводы истца судом отклоняются как необоснованные.

Оплата выполненных работ ответчиком в полном объеме до настоящего времени не произведена. Доказательств обратного ответчиком не представлено. Сумма задолженности составляет: 1 286 299,58 руб.

Оценив и исследовав в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, проанализировав условия договора, суд пришел к выводу о том, что работы  истцом выполнены, замечания в отношении объема и качества выполненных работ не представлены, оплата работ ответчиком добровольно не произведена, поэтому требования  истца о взыскании задолженности в судебном порядке являются обоснованными и подлежат удовлетворению в части в размере 1 286 299,58 руб.

В остальной части требования истца удовлетворению не подлежат.

Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. 8.2. Договора за нарушение установленных Договором сроков оплаты выполненных работ Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01 % от неоплаченной стоимости Работ, но не более 10 % от неоплаченной суммы.

На основании п. 8.2.  договора истец начислил ответчику неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных работ в размере 448 047, 50 руб. за период с 08.08.2019  по  08.12.2020.

 Между тем, установленное п. 8.2. Договора ограничение неустойки не более 10 % от неоплаченной суммы, размер взыскиваемой неустойки не может превышать 128 629 руб. 96 коп.

Ввиду чего, требование истца о взыскании неустойки подлежит удовлетворению в части в размере 128 629 руб. 96 коп.

В остальной части требования истца удовлетворению не подлежат.

Расходы по госпошлине распределены на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

На основании статей 307-309, 330, 702, 711, 740, 746, 753  Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 65, 71, 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ЛИБЕРТИ ФИНАНС" (ИНН 

<

***>) в пользу ООО "ПМ РЕНОВЕЙТ" (ИНН 

<

***>) денежные средства в размере 1 286 299 руб. 58 коп., неустойку в размере 128 629 руб. 96 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 27 149 руб.

В остальной части иска - отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.П. Сорокин