РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Москва 

12.04.2018 года                                                           Дело № А40-250583/17-110-2178

Резолютивная часть решения объявлена 05.04.2018 года 

Решение в полном объеме изготовлено 12.04.2018 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Мищенко А.В.  /единолично/, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГИДРОКОР" (ОГРН 

<

***>, 192012, 

<

...> литер Е) к обществу с ограниченной ответственностью "ГЕЛАР ГРУПП" (ОГРН 

<

***>, 123290, 

<

...>, этаж5; комната16) о взыскании 1 591 615,24 руб.,

при участии:

от истца – ФИО2 по дов.  от  26.01.18№26

от ответчика- не явился, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГИДРОКОР" обратилось с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ГЕЛАР ГРУПП" о взыскании (с учетом изменений в порядке ст.49 АПК РФ) 1 647 690 руб. задолженности, 169 126,89 руб. неустойки за период с 21.08.2017г. по 05.04.2018г. по Договору подряда №04/20/01-2017 от 30.01.2017г.

Ответчик отзыв не представил, в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом о времени и месте судебного заседания. С учетом своевременного размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, суд   рассмотрел спор в их отсутствие на основании ст.ст.121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, п.5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011г. №12 «О некоторых вопросах применения АПК РФ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК РФ».

Заслушав представителя истца, исследовав и оценив представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам:

Как усматривается из материалов дела, 30 января 2017 года между ООО «ГЕЛАР ГРУПП» (Генподрядчик) и ООО «СК «Гидрокор» (Подрядчик) был заключен договор подряда № 04/20/01-2017 на выполнение комплекса гидроизоляционных работ на Объекте: корпус «В», входящий в состав Многофункционального жилого комплекса «Снегири ЭКО», расположенного по адресу: 

<

...> кор. 1-26, р-н Раменки, ЗАО (далее по тексту - Объект).

До начала работ Ответчик выплатил Истцу аванс согласно пункту 2.2.2. Договора в размере 1 903 227 рублей 70 копеек, что подтверждается:

платежным поручением № 263 от 03.02.2017 г. на сумму 1 200 000,00 руб.

платежным поручением № 288 от 08.02.2017 г. на сумму 703 227,70 руб.

Истец выполнил в срок и качественно и сдал Ответчику часть работ по договору на общую сумму 5 456 855 рублей 91 копейку, что подтверждается подписанными Сторонами Актами сдачи-приемки выполненных работ:

Акт № 1 от 30.04.2017 г. на сумму 2 707 379,13 руб. Акт № 2 от 30.06.2017 г. на сумму 1 646 037,00 руб. Акт № 3 от 31.07.2017 г. на сумму 765 348,10 руб. Акт № 4 от 31.08.2017 г. на сумму 338 091,68 руб. Акт № 4 от 31.08.2017 года по Договору подряда № 04/20/01-17 от 30.01.2017 года был передан   Генподрядчику  на подпись и оплату в сентябре 2017 года, о чем имеется подпись должностного лица.

До настоящего времени Акт № 4 от 31.08.2017 года Генподрядчиком не подписан, в адрес Подрядчика не возвращен, каких-либо возражений по Акту в адрес Подрядчика не поступало.

В соответствии с п. 2.2. договора, оплата фактически выполненных по договору работ производится Генподрядчиком в течение 14 банковских дней с даты подписания Сторонами актов о приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В соответствии с п. 2.2.1. размер суммы подлежащей перечислению Генподрядчиком Подрядчику в качестве оплаты за выполненные в отчетном периоде работы (согласно справок по ф. КС-3) и принятых Генподрядчиком, уменьшается на величину гарантийного обеспечения, а также пропорциональной суммы выплаченного аванса.

Гарантийное обеспечение составляет 5% от стоимости выполненных работ (п. 2.4. договора)

Ответчиком была произведена оплата выполненных работ в размере 1 700 000 рублей 00 копеек, что подтверждается:

платежным поручением № 1536 от 25.05.2017 г. на сумму 600 000,00 руб.

платежным поручением № 1711 от 13.06.2017 г. на сумму 1 100 000,00 руб.

В связи с длительной неоплатой выполненных работ письмом за исх. № б/н от 31.08.2017 г. ООО «СК «Гидрокор» провело взаимозачет аванса на сумму 367 598,43 руб. за счёт выполненных работ по Актам №№ 1, 2, и таким образом, погасило аванс в полном объёме.

С учетом гарантийного удержания и зачёта аванса (в том числе взаимозачета) фактические суммы, подлежащие к оплате Подрядчику, составляют:

Акт № 1 от 30.04.2017 г. к оплате 1 700,00 руб. (оплачен в полном объёме)

Акт № 2 от 30.06.2017 г. к оплате 762 122,05 руб.

Акт № 3 от 31.07.2017 г. к оплате 497 476,26 руб.

Акт № 4 от 31.08.2017 г. к оплате 388 091,68 руб.

На момент предъявления иска у Ответчика имеется задолженность за выполненные работы по Договору в размере 1 647 690 руб.

Положениями ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В соответствии со ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии со ст. 711 ГК РФ если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. 

02 октября 2017 года письмом за исх. № 539 в адрес Ответчика была направлена досудебная претензия с актами сверки и требованием в срок до 15 октября 2017 года оплатить имеющуюся перед Истцом задолженность.

По состоянию на 27.11.2017 года Ответчик добровольно задолженность не погасил, от подписания актов сверки уклонился, никакого мотивированного отказа или претензий к качеству выполненных работ не предъявил.

Ответчик свои обязательства не исполнил, оплату в срок в размере 1 647 690 руб. не произвел, доказательств погашения задолженности не представил.

При указанных обстоятельствах иск в этой части подлежит удовлетворению.

Кроме того, в соответствии со ст. 330 ГК на основании п.11.9. договора, в случае, если по вине Генподрядчика нарушены условия оплаты, на срок свыше 30 календарных дней, Генподрядчик, при условии надлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, обязан уплатить Подрядчику исключительную неустойку в виде пени в размере 0,05% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, но не более 5% от таковой, что по расчету истца за период с 21.08.2017г. по 05.04.2018г., проверенному судом, составляет 169 126,89 руб. 

В соответствии со ст. 110 АПК РФ расходы по госпошлине относятся на ответчика.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 123,156,169-171 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с   общества с ограниченной ответственностью "ГЕЛАР ГРУПП"  в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГИДРОКОР" 1 647 690 руб. задолженности, 169 126 руб.  89  коп. неустойки, 28 916 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

Взыскать с   общества с ограниченной ответственностью "ГЕЛАР ГРУПП"  в  федеральный бюджет госпошлину в размере  2 252 руб.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца с даты его принятия.

Судья:               А.В.Мищенко