47/2022-116728(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Герцена, д. 1 «а», Вологда, 160000 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

«

Дело № А13-9819/2021

город Вологда

12» октября 2022 года

 

Руководствуясь статьями 110, 167–170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Вологодской области  

р е ш и л:

урегулировать разногласия, возникшие при заключении договоров на  осуществлении технологического присоединения между публичным  акционерным обществом «Россетти Северо-Запад» и акционерным обществом  «Вологодская областная энергетическая Компания».  

Пункты 1, 1.1, 1.3, 3.2 договора на осуществлении технологического  присоединения по поселку Пяжелка, пункты 1, 4, 5, 7, 9, 10.1, 10.1.1, 10.1.1.1,  10.1.2, 11, 11.1.1, 11.1.2, 11.10 технических условий к названному договору  изложить в редакции публичного акционерного общества «Россетти Северо- Запад»:  

«1.1. По договору сетевая организация принимает на себя обязательства  по осуществлению технологического присоединения КТП-10/0,4кВ (далее –  электроустановка) заявителя, расположенной по адресу: поселок Пяжелка  Бабаевского района Вологодской области со следующими характеристиками:  

- максимальная мощность электроустановок 15 кВт, в том числе: максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок -; максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок 15 кВт; - категория надежности электроснабжения – сетевой объект, через проектируемые объекты электросетевого хозяйства заявителя: 

ВЛ 35 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в совокупности с  распределительной и групповой сетью.  

Точки присоединения: 

точка 1 – контактные соединения проводов на проектируемой опоре ВЛ  10 кВ по ВЛ 10 кВ «Волна» от ПС Пяжелка 35/10 кВ на границе участка  заявителя;  

точка 2 - отходящие контрактные соединения УСЛ-реклоузера на опоре   № 3 ВЛ 35 кВ «Тешемля».  

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется  технологическое присоединение 10 кВ, 35 кВ, в том числе по обеспечению  готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование,  строительств, реконструкцию) к присоединению электроустановок заяителя,  урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов  электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов  электроэнергетики).  

Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные для него  в Технических условиях, внести плату за технологическое присоединение и, в  случае расторжения договора, оплатить фактически понесенные сетевой  организацией расходы в соответствии с условиями договора.  

Местом исполнения договора является местонахождение  присоединяемых электроустановок заявителя.  

1.3. Срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому  присоединению по договору составляет не более 12 месяцев с даты заключения  договора.  

3.2. Заявитель осуществляет платеж в размере 100% (сто процентов) от  размера платы за технологическое присоединение в течение 15 календарных  дней с момента заключения настоящего договора.  

Пункт 1 технических условий: «Наименование объектов электросетевого  хозяйства (далее – энергоустановки) заявителя: ВЛ 35 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ 10  кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в совокупности с распределительной и групповой  сетью для электроснабжения конечных потребителей.»  

Пункт 4 технических условий: «Категория надежности сетевой объект»  

Пункт 5 технических условий: «Класс напряжения электрических сетей, к  которым осуществляется технологическое присоединение 10, 35 кВ».  

Пункт 7 технических условий: «Точка(и) присоединения (вводные  распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции,  генераторы) и максимальная мощность электроустановок по каждой точке  присоединения (для вновь присоединяемых электроустановок заявителя):  

 № точки 

Источник питания  (наименование питающих  линий)  

Описание точки  присоединения  

Категор ия  

надежно сти  

Максималь ная  

присоединя емая  

мощность  (кВт)  

Вид 

питания  

1. 

ВЛ 10 кВ Волна (1 с.ш. РУ  10 кВ ПС 35/10 кВ Пяжелка)  

Контактные соединения  проводов на опоре № 3  ВЛ 10 кВ «Волна» от ПС  35/10 кв Пяжелка  

Сетевой  объект  

15 

основное  

 

ВЛ 35 кВ ФИО1  110/35/10 кВ Бабаево  

Отходящие контактные  соединения УСЛ- 

 

2. 

реклоузера 35 кВ 

 

резервное 

Пункты 9, 10, 10.1, 10.1.1, 10.1.1.1, 10.1.2, 11, 11.1.1, 11.1.2, 11.10  

технических условий: «9. Резервный источник питания: ПС 110/35/10 кВ Бабаево. 10. Сетевая организация осуществляет: 10.1 Требования к усилению существующей электрической сети. 10.1.1. Развитие существующих объектов сетевой организации: 

10.1.1.1 Выполнить реконструкцию ВЛ 35 кВ Тешемля с установкой  

УСЛ-реклоузера 35 кВ у опоры № 3. 10.1.2. Новое строительство не требуется.» 11. Заявитель осуществляет: 11.1. Требования к электрической сети: 11.1.1. Первая точка присоединения: 

- выполнить строительство необходимого количества распределительных  

сетей 10 (0,4) кВ в целях приема присоединяемой мощности;  

- выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом  

из расчета проектируемой нагрузки. 11.1.2. Вторая точка присоединения: 

- выполнить строительство ЛЭП 35 кВ. Трассу, способ прокладки, марку  

и сечение провода (кабеля),тип опор уточнить на стадии проектирования; 

- выполнить строительство ПС 35/10 кВ. Количество, тип, мощность  

силовых трансформаторов ПС, модификацию, применяемого оборудования  

определить проектом. Присоединяемая мощность силовых трансформаторов  

должна соответствовать максимальной мощности присоединяемых  

электроустановок заявителя; 

- выполнить строительство необходимого количества распределительных  

сетей 10 (0,4 кВ) в целях приема присоединяемой мощности;  

- выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом  

из расчета проектируемой нагрузки. 

Мероприятия по проектированию и строительству в отношении  

линейных объектов выполнить в соответствии с требованиями статьи 48  

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,  

ГОСТ и действующих руководящих нормативно-технических документов.  

11.10. Срок выполнения мероприятий по технологическому  

присоединению составляет 1 год со дня заключения договора об  

осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.». 

Пункт 13 в технические условия не включать. 

Пункты 1, 1.1, 1.3, 3.2 договора на осуществлении технологического  

присоединения по поселку Борисово-Судское, пункты 1, 4, 5, 7, 9, 10.1, 10.1.1,  

10.1.1.1, 10.1.2, 11, 11.1.1, 11.1.2, 11.10 технических условий к названному  

договору изложить в редакции публичного акционерного общества «Россетти  

Северо-Запад»: 

«1. По договору сетевая организация принимает на себя обязательства по  осуществлению технологического присоединения КТП-10/0,4кВ «Борисово- Суда» для энергоснабжения конечных потребителей (далее – электроустановка)  заявителя, расположенной по адресу: поселок Борисово-Суда Бабаевского  района Вологодской области со следующими характеристиками:  

- максимальная мощность электроустановок 20 кВт, в том числе: максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок -; максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок 20 кВт; - категория надежности электроснабжения – сетевой объект, через проектируемые объекты электросетевого хозяйства заявителя: 

ВЛ 35 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в совокупности с  распределительной и групповой сетью.  

1.1. Точки присоединения (новые): 

точка 1 – контактные соединения проводов на опоре № 19 ВЛ 10 кВ  «Борисово» от ПС 35/10 кВ Борисово-Суда;  

точка 2 отходящие контрактные соединения УСЛ-реклоузера на опоре  № 3 ВЛ 35 кВ «Тешемля». 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется  технологическое присоединение 10 кВ, 35 кВ, в том числе по обеспечению  готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование,  строительств, реконструкцию) к присоединению электроустановок заяителя,  урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости  строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов  электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов  электроэнергетики).  

Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные для него  в Технических условиях, внести плату за технологическое присоединение и, в  случае расторжения договора, оплатить фактически понесенные сетевой  организацией расходы в соответствии с условиями договора.  

Местом исполнения договора является местонахождение  присоединяемых электроустановок заявителя.  

1.3 Срок выполнения сторонами мероприятий по технологическому  присоединению по договору составляет не более 12 месяцев с даты заключения  договора.  

3.2. Заявитель осуществляет платеж в размере 100% (сто процентов) от  размера платы за технологическое присоединение в течение 15 календарных  дней с момента заключения настоящего договора.  

Пункт 1 технических условий: «Наименование объектов электросетевого  хозяйства (далее – энергоустановки) заявителя: ВЛ 35 кВ, ПС 35/10 кВ, ВЛ 10  кВ, ТП 10/0,4 кВ, ЛЭП 0,4 кВ в совокупности с распределительной и групповой  сетью для электроснабжения конечных потребителей»  

Пункт 4 технических условий: «Категория надежности сетевой объект». 

Пункт 5 технических условий: «Класс напряжения электрических сетей, к  которым осуществляется технологическое присоединение 10, 35 кВ»  

Пункт 7 технических условий: «Точка(и) присоединения (вводные  распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции,  генераторы) и максимальная мощность электроустановок по каждой точке  присоединения (для вновь присоединяемых электроустановок заявителя):  

 № точки 

Источник питания  (наименование питающих  линий)  

Описание точки  присоединения  

Категор ия  

надежно сти  

Максималь ная  

присоединя емая  

мощность  (кВт)  

Вид 

питания  

1. 

ВЛ 10 кВ Борисово (1 с.ш.  РУ 10 кВ ПС 35/10 кВ  Борисово-Суда)  

Контактные соединения  проводов на опоре № 19  ВЛ 10 кВ «Борисово» от  ПС 35/10 кв Юорисово- 

Суда 

Сетевой  объект  

20 

основное  

2. 

ВЛ 35 кВ ФИО1  110/35/10 кВ Бабаево  

Отходящие контактные  соединения УСЛ- реклоузера 35 кВ  

 

резервное  

Пункты 9, 10, 10.1, 10.1.1, 10.1.1.1, 10.1.2, 11, 11.1.1, 11.1.2, 11.10  

технических условий: 

«9. Резервный источник питания: ПС 110/35/10 кВ Бабаево.  10. Сетевая организация осуществляет:  

10.1 Требования к усилению существующей электрической сети.  10.1.1. Развитие существующих объектов сетевой организации:  

10.1.1.1 Выполнить реконструкцию ВЛ 35 кВ Тешемля с установкой  

УСЛ-реклоузера 35 кВ у опоры № 3. 10.1.2. Новое строительство не требуется.» 11. Заявитель осуществляет: 11.1. Требования к электрической сети: 11.1.1. Первая точка присоединения: 

- выполнить строительство необходимого количества распределительных  

сетей 10 (0,4) кВ в целях приема присоединяемой мощности;  

- выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом  

из расчета проектируемой нагрузки. 11.1.2. Вторая точка присоединения: 

- выполнить строительство ЛЭП 35 кВ. Трассу, способ прокладки, марку  

и сечение провода (кабеля), тип опор уточнить на стадии проектирования;  

- выполнить строительство ПС 35/10 кВ. Количество, тип, мощность  

силовых трансформаторов ПС, модификацию, применяемого оборудования  

определить проектом. Присоединяемая мощность силовых трансформаторов  

должна соответствовать максимальной мощности присоединяемых  

электроустановок заявителя; 

- выполнить строительство необходимого количества распределительных  

сетей 10 (0,4 кВ) в целях приема присоединяемой мощности;  

- выполнить монтаж ТП 10/0,4 кВ. Тип, мощность определить проектом  из расчета проектируемой нагрузки.  

Мероприятия по проектированию и строительству в отношении  линейных объектов выполнить в соответствии с требованиями статьи 48  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ,  ГОСТ и действующих руководящих нормативно-технических документов.  

11.10. Срок выполнения мероприятий по технологическому  присоединению составляет 1 год со дня заключения договора об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.»  

Пункт 13 в технические условия не включать. 

В удовлетворении требований о возложении на публичное акционерное  общество «Россети Северо-Запад» обязанности по направлению в адрес истца  договоров об осуществлении технологического присоединения на условиях,  предлагаемых акционерным обществом «Вологодская областная  энергетическая Компания», отказать.  

Решение суда может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.  

Судья И.В. Кутузова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.08.2021 4:11:28

Кому выдана Кутузова Ирина Викторовна