АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело № А81-8769/2024

г. Салехард

16 октября 2024 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Осиповой Ю.Г. рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "СистемСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о взыскании 194 605 рублей 70 копеек, 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "СистемСервис" обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к НО "Фонд капитального ремонта МКД в ЯНАО" о взыскании задолженности за фактически выполненные работы по договору на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества МКД № 6КР-2023 от 12.04.2023 в размере 164 790 руб. 39 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 29 815 руб. 31 коп. за период с 24.11.2023 по 31.07.2024, с последующим начислением до фактической оплаты долга.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечено муниципальное казённое учреждение «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством».

Согласно части 1 статьи 226 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела в порядке упрощенного производства рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными главой 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

Определением Арбитражного суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 августа 2024 года в соответствии с положениями пункта 1 части 2 статьи 227 АПК РФ, дело назначено к рассмотрению в порядке упрощённого производства.

Заявление и приложенные к нему документы были опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте: http://kad.arbitr.ru в режиме ограниченного доступа для ознакомления сторон с материалами судебного дела.

В определении суда лицам, участвующим в деле в установленные сроки было предложено представить соответствующие документы и пояснения.

Исходя из положений части 5 статьи 228 АПК РФ, дело рассматривается в порядке упрощенного производства без вызова сторон, судебное разбирательство по правилам главы 19 АПК РФ не проводится. В связи с этим арбитражный суд не извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия.

Согласно имеющимся в материалах дела документам, лица, участвующие в деле извещены надлежащим образом о принятии заявления к производству и возбуждении производства по делу.

От ответчика поступило возражение на исковое заявление, в котором указал, что с исковыми требованиями истца не согласен, указывает, что предъявленная сумма была удержана ответчиком при окончательном расчете по договору, поскольку истцом нарушены сроки выполнения обязательств по договору, а также возражал против начисления процентов за пользование чужими денежными средствами.

От истца поступило возражение на отзыв, в котором с доводами ответчика не согласился.

От ответчика поступило дополнение к возражениям на исковое заявление.

От истца поступили дополнения к возражениям на отзыв. Кроме того от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ просит принять отказ от исковых требований в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в размере 29 815 рублей 31 копейки, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ с 01.08.2024 до даты фактического исполнения, просит взыскать задолженность по договору  на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов № 6КР-2023 от 12.04.2023 в размере 164 790 руб. 39 коп.

Поступившие документы приобщены к материалам дела.

По истечении сроков, установленных арбитражным судом для представления доказательств и иных документов, суд счел возможным рассмотреть дело по существу в порядке упрощенного производства.

На основании части 1 статьи 229 АПК РФ решение по настоящему делу принято судом путем подписания резолютивной части решения от 07 октября 2024 года.

От ответчика поступило заявление об изготовлении мотивированного решения по делу в соответствии с частью 2 статьи 229 АПК РФ.

Согласно положениям части 2 статьи 229 АПК РФ по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 настоящего Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

На основании поступившего заявления, суд составляет мотивированное решение.

Рассмотрев материалы дела, исследовав представленные доказательства, суд установил следующее.

Как следует из материалов дела, между муниципальным казённым учреждением «Служба муниципального заказчика по управлению парком и муниципальным хозяйством» (Заказчик), обществом с ограниченной ответственностью «СистемСервис» (Подрядчик) и некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе» (Плательщик) по результатам электронного аукциона был заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов № 6КР-2023 от 12.04.2023 (далее - Договор).

В соответствии с п. 1.1 Договора Подрядчик обязуется по заданию Заказчика оказать услуги и (или) выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (многоквартирных домов) согласно адресному перечню многоквартирных домов (п. 3.1 договора) на условиях настоящего договора, в соответствии с графиком выполнения работ, техническим заданием и сдать результат работ Заказчику, Заказчик обязуется принять результат работ, а Плательщик оплатить результат работ в соответствии с условиями договора. Место выполнения работ ЯНАО, 

<

...>

Согласно п.2.1 Договора дата окончания выполнения работ – 29.09.2023.

Согласно п. 3.3.7 Договора в случае изменения объёмов работ, предусмотренных к выполнению приложением № 1 к Договору, в локальные сметы (локальные сметные расчёты), являющиеся приложением к аукционной документации, вносятся соответствующие изменения. При таких обстоятельствах индекс договорной цены подлежит пересчёту по фактическим локальным сметам (локальным сметным расчётам), па основании которых составлены акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2), для формирования итоговой стоимости работ.

Согласно п. 5.1.8 Договора Заказчик обязан осуществить приемку выполненных работ в порядке и в сроки, установленные Договором. В случае изменения проектных решений инициировать внесение изменений проектной организацией в проектную документацию. В случае изменения объёмов работ обеспечить внесение изменений в техническое задание. Изменение условий договора подлежат согласованию сторонами договора, путём заключения дополнительного соглашения.

12 июля 2023 года представителями Заказчика, Подрядчика и Управляющей организации подписан акт о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем электроснабжения по ул. Комсомольская, д. 12/3.

12 июля 2023 года представителями Заказчика, Подрядчика и Управляющей организации подписан акт о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем водоснабжения по ул. Комсомольская, д. 12/3.

21 июля 2023 года представителями Заказчика, Подрядчика и Управляющей организации подписан акт о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем электроснабжения по пр-ту Ленинградский, д. 24.

29 сентября 2023 года представителями Заказчика, Подрядчика и Управляющей организации подписан акт о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем водоснабжения по пр-ту Ленинградский, д. 24.

Согласно п. 8.6. Договора, в случае изменения объёмов работ Заказчик обеспечивает внесение изменений в техническое задание. Изменение условий договора подлежит согласованию всеми сторонами договора, путём заключения дополнительного соглашения.

В соответствии с п. 8.9 Договора Подрядчиком в адрес Заказчика направлено письмо исх. № 69/06 от 19.07.2023 об изменении объемов работ.

По итогам подписания актов о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем  и актов измерения (выверки) объемов выполненных работ Заказчик инициировал заключение дополнительных соглашений к Договору.

Дополнительное соглашение № 1 к Договору заключено в форме электронного документа и подписано сторонами 28.08.2023.

Дополнительное соглашение № 2 к Договору заключено в форме электронного документа и подписано сторонами 20.10.2023.

Как указывает истец, подписание актов по форме КС-2, КС-3 20.10.2023 связано с корректировкой цены договора в связи с изменением договорных объемов и не может быть поставлено в прямую зависимость от даты подписания дополнительных соглашений к договору.

Таким образом, подписание актов по форме КС-2. КС-3 и дополнительных соглашений к договору 20.10.2023 обусловлено несвоевременным оформлением со стороны Заказчика и длительной процедурой заключения дополнительных соглашений на торговой площадке. По качеству и объему выполненных работ в установленные Договором сроки замечания отсутствовали, что не может опровергать право Подрядчика па получение предусмотренной Договором платы в полном объеме.

Работы по Договору Подрядчиком исполнены в установленные сроки, что подтверждается и исполнительной документацией, в том числе общим журналом работ от 14.03.2023 по пр-ту Ленинградский, д. 24 (Приложение №11), актами о завершении работ (Приложение № 2, 3,4, 5) общим журналом работ от 14.04.2023 по ул. Комсомольская, д. 12/3 (Приложение № 12). Исходя из указанных документов следует, что работы выполнены четко в соответствии с условиями договора. 

По качеству и объему выполненных работ в установленные Договором сроки замечания отсутствовали, результат выполненных работ достигнут и использовался Подрядчиком, что не может опровергать право Подрядчика на получение предусмотренной Договором платы в полном объеме.

В пояснительных записках к Договору Заказчик детально указывает, что фактически сложившийся объем выполненных работ содержится в акте выполненных работ, а также в акте изменения (выверки) объемов выполненных работ. Изменение объемов не влечет за собой ухудшения качества выполненных работ и не влияет на эксплуатационные характеристики внутридомовых инженерных систем водоснабжения и электроснабжения.

Подписанные сторонами акты завершения работ являются безусловным основанием для взыскания с заказчика оплаты за работу. После 29.09.2023 каких-либо работ Подрядчиком не проводилось.

Окончательный расчет производится Плательщиком путем безналичного перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Плательщиком сопроводительного письма на оплату с приложением документов, перечисленных в пункте 5.1.11 Договора, при наличии акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусмотренного ст. 190 Жилищного кодекса РФ, по форме, утверждённой Плательщиком (п. 4.7 Договора).

Оплата Плательщиком по Договору произведена в размере 12 528 492 рублей 55 копеек, а сумма выполненных работ Подрядчиком по договору составляет 12 693 282 рубля 94 копейки, работы исполнены своевременно.

Таким образом, Плательщиком оплата произведена не в полном объеме, задолженность по договору составила 164 790 рублей 39 копеек.

Письмом исх. № 89-174/2701-08/3518 от 08.11.2023 Заказчик уведомил Подрядчика о применении п. 4.1. по Договору и взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств в размере 164 790  рублей 39 копеек.

Истец считает, что сумма неустойки в размере 164 790  рублей 39 копеек удержана ответчиком необоснованно, поскольку подписание актов по форме КС-2, КС-3 спустя продолжительное время после выполнения работ обусловлено необходимостью внесения изменений в смету, изменений технического задания, размещением Заказчиком проекта дополнительного соглашения на торговой площадке, в соответствии с условиями Договора, что не может порождать негативные правовые последствия для Подрядчика. Не принять работы по указанным причинам, не относящимся к результатам выполненных работ, у ответчика не имелось, работы истцом выполнены в срок.

В порядке досудебного урегулирования спора истцом в адрес ответчика направлена претензия о необоснованном удержании неустойки по Договору в размере 164 790  рублей 39 копеек. 

Письмом исх. № 89-3510/01-06/514 от 31.01.2024 Плательщик уведомил Подрядчика об отказе в удовлетворении претензии, ссылаясь на п. 8.8 Договора, а также о том, что Подрядчик имел возможность реализовать своё право, предусмотренное пунктом 6.2.4 Договора, между тем данным правом не воспользовался.

В связи с тем что, требование оставлено ответчиком без удовлетворения, Истец обратился в суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования суд руководствовался следующим.

Статьёй 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в качестве оснований возникновения гражданских прав и обязанностей указаны основания, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также действия граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии со статьей 307 ГК РФ обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

Согласно части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных её этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы.

Исходя из статьи 720 ГК РФ основанием для оплаты выполненных работ является факт принятия результата работ, доказательством передачи результата работ является акт приёма-передачи или иной приравненный к нему документ.

В соответствии с положениями пункта 4 статьи 753 ГК РФ, сдача результата работ подрядчиком и приёмка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно разъяснениям, данным Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в пункте 8 Информационного письма от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - Информационное письмо № 51), основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику.

В подтверждение выполнения работ представлены следующие документы: акт о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем электроснабжения по ул. Комсомольская, д. 12/3, акт о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем водоснабжения по ул. Комсомольская, д. 12/3, акт о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем электроснабжения по пр-ту Ленинградский, д. 24, акт о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем водоснабжения по пр-ту Ленинградский, д. 24, акт измерения (выверки) объемов выполненных работ по пр-ту Ленинградский, д. 24 от 22.09.2023, акт измерения (выверки) объемов выполненных работ по ул. Комсомольская, д. 12/3 от 22.09.2023, общий журнал работ от 14.04.2023 по пр-ту Ленинградский, д. 24, общий журналом работ от 14.04.2023 по ул. Комсомольская, д. 12/3.

Факт выполнения работ заказчиком не оспаривается.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчик ссылается на то, что задолженность по оплате работ отсутствует, поскольку из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы, удержана неустойка за нарушение срока выполнения работ по договору в размере 164 790  рублей 39 копеек.

Согласно части 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Согласно статье 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признаётся определённая законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Согласно п.9.3. Договора в случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).

Дата составления акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 является правоустанавливающей датой для определения имущественной ответственности Подрядчика в случае нарушения сроков выполнения работ по настоящему Договору.

Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором о проведении капитального ремонта срока исполнения обязательства (срока работ).

Размер неустойки (штрафа, пеней) составляет одну сто тридцатую действующую на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от стоимости этапа услуг и (или) работ, сроки по которому нарушены.

Между тем, срок выполнения работы необходимо отличать от срока приёмки выполненной работы, который является самостоятельным и может быть установлен в договоре подряда (пункт 1 статьи 720 ГК РФ). Названные сроки разведены в ГК РФ как терминологически, так и с точки зрения применения последствий их нарушения.

При этом, как правило, соблюдение срока выполнения работы зависит от подрядчика, срока приёмки - от подрядчика и заказчика.

Право заказчика осуществлять приёмку в течение установленного контрактом срока после поступления отчётной документации не отменяет право исполнителя выполнить работу в течение предусмотренного срока и предъявить работу к сдаче в последний день срока без учёта времени на приёмку работ. При расчёте заказчиком пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательства, в период просрочки исполнения обязательства не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приёмки выполненной работы (её результатов) и оформления итогов такой приёмки (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 15.10.2019 № 305-ЭС19-12786 по делу № А40-236034/2018).

Согласно п. 8.6. Договора, в случае изменения объёмов работ Заказчик обеспечивает внесение изменений в техническое задание. Изменение условий договора подлежит согласованию всеми сторонами договора, путём заключения дополнительного соглашения.

В соответствии с п. 8.9 Договора Подрядчиком в адрес Заказчика направлено письмо исх. № 69/06 от 19.07.2023 об изменении объемов работ.

В силу п. 8.8. Договора, до подписания актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2), в случае изменения объёмов работ, проектных решений, иных обстоятельств, послуживших для изменения условий договора, по основаниям Положения № 615 от 01.07.2016 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», и Договора, Заказчик обязан обеспечить заключение дополнительного соглашения, содержащее правовое основание, предоставляющее право сторонам изменить условия Договора, с приложением соответствующих документов, подтверждающих и дающих право сторонам изменить условия Договора. Изменение условий Договора должно быть подписано всеми сторонами Договора.

По итогам подписания актов о завершении капитального ремонта конструктивных элементов многоквартирного дома и (или) внутридомовых инженерных систем и актов измерения (выверки) объемов выполненных работ Заказчик инициировал заключение дополнительных соглашений к договору.

Дополнительное соглашение № 1 к Договору заключено в форме электронного документа и подписано сторонами 28.08.2023.

Дополнительное соглашение № 2 к Договору заключено в форме электронного документа и подписано сторонами 20.10.2023 года.

Подписание актов по форме КС-2, КС-3 20.10.2023 связано с изменением (корректировкой цены договора) в связи с изменением договорных объемов и не может быть поставлено в прямую зависимость от даты подписания дополнительных соглашений к договору.

Таким образом, подписание актов по форме КС-2, КС-3 только 20.10.2023 обусловлено оформлением и длительной процедурой заключения дополнительных соглашений на торговой площадке Заказчиком.

Как указанно выше, работы по Договору Подрядчиком исполнены в установленные сроки, что подтверждается и исполнительной документацией, в том числе общими журналами работ.

Исходя из указанных документов следует, что работы выполнены четко в соответствии с условиями Договора (согласно п. 2.1 договора срок окончания работ – 29.09.2023).

После 29.09.2023 каких-либо работ Подрядчиком не проводилось.

Иного ответчиком не доказано.

Из актов о завершения капитального ремонта следует, что работы выполнены в полном объеме, претензий по объему выполненных работ отсутствуют. Из актов выверки объемов следует, что изменения (выверки) объемов выполненных работ следует, что фактически выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома по отдельным видам и конструктивным элементам не соответствуют объемам работ, предусмотренным проектно-сметной документацией к договору. В связи с тем, что работы по капитальному ремонту общего имущества МКД, предусмотренные проектно-сметной документацией, выполнены в полном объеме, комиссия считает необходимым принять к оплате объемы работ в соответствии с фактически выполненными.

В актах, например, указана информация о том, что по фактическим замерам выявлено уменьшение материала (ошибка СД задвоение материала, данный материал не применялся в связи с отсутствием технической необходимости, и трубопровода ДУ 40 на данном участке; данный материал не был учтён ПСД, согласно пункту № 10, Письмо согласование проектировщика № 29/9 от 29.06.2023; данный материал необходим для окрашивания после проведения кап. ремонта (ниши этажных щитов, строительные конструкции) не были учтены ПСД, согласно пункт №10 Письмо согласование проектировщика № 29/9 от 29.06.2023; не устанавливается ввиду отсутствия скрытой проводки , согласно пункта № 9, Письмо согласование проектировщика № 29/10 от 29.06.2023; замена способа прокладки кабельных линий ввиду невозможности прокладки в штробах, согласно пункта № 5, Письмо согласование проектировщика № 29/10 от 29.06.2023).

Подписание дополнительных соглашений к Договору было вызвано не действиями Истца либо его бездействием, а несоответствием фактического объема работ и материалов, подлежащего выполнению и проектно-сметной документации.

При этом ненадлежащее документальное оформление выполненных работ не является в данном случае основанием для начисления неустойки, учитывая, что по условиям договора неустойка начисляется за несоблюдение сроков производства работ.

То обстоятельство, что формы КС-2, КС-3 были подписаны сторонами позднее, не является основанием считать, что работы выполнялись подрядчиком вплоть до октября 2023 года.

Таким образом, из материалов дела следует, что просрочка выполнения работ истцом не допущена, поэтому начисление неустойки ответчиком необоснованно.

В соответствии со статьей 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).

Лицо, неосновательно временно пользовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило (пункт 2 статьи 1105 ГК РФ).

Правила, предусмотренные главой 60 ГК РФ, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2 статьи 1102 ГК РФ).

Как указано в пункте 3 статьи 1103 ГК РФ, поскольку иное не установлено настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами и не вытекает из существа соответствующих отношений, правила, предусмотренные настоящей главой, подлежат применению также к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в связи с этим обязательством.

Поскольку оснований для удержания заказчиком начисленной неустойки из стоимости выполненных работ не имелось, требование истца о взыскании 164 790  рублей 39 копеек задолженности по спорному договору является обоснованным.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку истец уточнил исковые требования и отказался от взыскания с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, излишне уплаченная государственная пошлина подлежит возврату истцу из федерального бюджета в размере 894 рубля.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "СистемСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от исковых требований некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в части взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в размере 29 815 рублей 31 копейки, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ с 01.08.2024 до даты фактического исполнения. Производство по делу в указанной части прекратить.

Уточненные исковые требования общества с ограниченной ответственностью "СистемСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить.

Взыскать с некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СистемСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по договору  на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов № 6КР-2023 от 12.04.2023 в размере 164 790 руб. 39 коп., расходы по уплате государственной пошлины в размере 5 944 руб.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "СистемСервис" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 894 рубля уплаченную по платежному поручению № 183 от 03.08.2024.

Настоящее решение принято немедленно после разбирательства дела путем подписания резолютивной части решения, которое приобщается к делу.

По заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://kad.arbitr.ru/.

Мотивированное решение изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или апелляционной жалобы. 

Решение, вынесенное по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

Решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия и может быть обжаловано в Восьмой арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

 

Судья

Ю.Г. Осипова