РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Дело № А40-244843/23-126-1900

г. Москва

29 марта 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 21 марта 2024 года

Полный текст решения изготовлен 29 марта 2024 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: 

председательствующего судьи Новикова М.С. 

протокол судебного заседания вел помощник судьи С.А. Антоновский, 

рассматривает в судебном заседании дело 

по иску АО "ПОЛИТЕХСТРОЙ" (ИНН 

<

***>) 

к ООО "ТЕПЛОГАЗТРАНССТРОЙ" (ИНН 

<

***>) 

о взыскании 4 458 000 руб. 

В судебном заседании приняли участие: 

от истца: ФИО1, доверенность от 02.10.2023. 

от ответчика: ФИО2, доверенность от 02.11.2023, ФИО3, доверенность от 14.07.2022

УСТАНОВИЛ:

АО "ПОЛИТЕХСТРОЙ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО "ТЕПЛОГАЗТРАНССТРОЙ" о взыскании неосновательного обогащения в размере 4 458 000 руб. 

В судебном заседании 13 марта 2024 года в порядке ст. 163 АПК РФ объявлялся перерыв до 21 марта 2024 года.

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик против удовлетворения исковых требований возражал по доводам изложенным в отзыве.

Истец заявил ходатайство о назначении по делу судебной экспертизы. 

Ответчик против удовлетворения ходатайства истца возражал.

В соответствии с положениями ст. 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.

Истцом не представлено обоснований заявленного ходатайства.

Ходатайство Истца о назначении по делу судебной экспертизы судом рассмотрено и отклонено Протокольным определением от 21 марта 2024 г.

Изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца заявлены не обоснованно и не подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

При этом суд исходит из того, что в соответствии со ст.4 Арбитражного процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном АПК РФ.

Согласно ст.65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Вместе с тем, согласно ч.2 ст.9 Арбитражного процессуального кодекса РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 

Как следует из материалов дела, 24 октября 2022 года между АО «Политехстрой» (Генподрядчик) и ООО «Теплогазтрансстрой» (Субподрядчик) был заключен ряд договоров, согласно которым Субподрядчик обязуется выполнить комплекс пуско-наладочных работ по общекотельной автоматике (№ 1-ПНР/22), отоплению, вентиляции и кондиционированию, программированию контроллеров, с написанием инструкций управления для обслуживающего персонала (№ 2-ПНР/22), диспетчеризации (построение SCADA), с написанием инструкций управления для обслуживающего персонала (№ 4-ПНР/22), указанных в «Ведомости объемов и стоимости работ» на объекте: «Котельная, предназначенная для теплоснабжения жилых домов и объектов инфраструктуры, расположенная на земельном участке с кадастровым номером № 50:20:0040306:266 по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи с. Лайково» (далее - Объект).

В соответствии с п. 2.6 Договора Генподрядчик произвел выплату авансовых платежей в пользу Субподрядчика в общей сумме 4 458 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями №109629 от 21.11.2022 на сумму 1 620 000 руб. по договору № 1-ПНР/22, №10743 от 17.11.2022 на сумму 1 746 000 руб. по договору № 2-ПНР/22, №10644 от 21.11.2022 на сумму 1 092 000 руб. по договору № 4-ПНР/22.

Датой окончания работ по договорам является 09.02.2023, т.е. 60 (шестьдесят) календарных дней с момента пуска газа на объект (п. 3.1 договоров).

Согласно пункта 4.1.1. Договоров Субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить в соответствии с переданной Заказчиком согласованной Рабочей документацией пуско-наладочные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и предъявить их приемочной комиссии в полной готовности с комплектом исполнительной технической документации.

Субподрядчик принимает на себя обязательство своевременно передать Генподрядчику всю исполнительную документацию выполненных строительно-монтажных Работ (п. 4.1.13 Договоров), а также осуществить все действия, необходимые для предъявления законченных Работ по Объекту к приемке рабочей комиссией. Обеспечить свое участие в приемке и участие привлеченных им Субподрядчиков. В случае выявления несоответствия Работ при их приемке рабочей комиссией, незамедлительно устранить такие недостатки за свои счет (п. 4.1.20 Договоров).

В соответствии с п. 5.1. Договоров Субподрядчик обязан не позднее 20 (двадцатого) числа отчётного месяца предоставить Генподрядчику или уполномоченному Генподрядчиком лицу в 4 (четырех) экземплярах Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2), Справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанные со стороны Субподрядчика и счет-фактуру в 2-х экземплярах, а также 4 экземпляра Исполнительной документации (оригинала), на фактически выполненные Работы в отчетном периоде. Отсутствие исполнительной документации на объем представленных к приемке Работ, и/или счета, и/или счет-фактуры на стоимость выполненных Работ является основанием для отказа в приемке работ.

Субподрядчик обязан надлежащим образом вести и на ежемесячной основе предоставлять в течение всего срока действия Договора Генподрядчику полный комплект исполнительной документации (графические материалы, журналы. производства работ, акты скрытых работ, геодезические схемы, иные документы), техническую документацию паспорта, сертификаты, инструкции по эксплуатации и рекомендации по обслуживанию, текущему и послегарантийному ремонту, паспорта на испытания) и другие документы, удостоверяющие качество применяемых (используемых) при выполнении Работ материалов и оборудования на русском языке, а также все принадлежности материалов и оборудования. Субподрядчик ежемесячно при сдаче Работ представляет Генподрядчику /казанную документацию на выполненный в отчетном месяце объем работ (п. 8.3. Договоров).

Как указывает истец, на настоящий момент Субподрядчиком вышеуказанные работы выполнены не были.

В соответствии с п. 12.5 Договоров Генподрядчик вправе в одностороннем внесудебном уведомительном порядке отказаться от исполнения договора в случае просрочки Субподрядчиком срока начала или окончания выполнения Работ, а также -промежуточных сроков более чем на 10 (десять) календарных дней. Договор считается расторгнутым через 5 (пять) дней с даты направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

В силу п. 1 ст. 450.1 ГК РФ право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

На основании вышеизложенных обстоятельств, руководствуясь ст. 715 ГК РФ, п. 12.5, Истец (АО «Политехстрой») в одностороннем порядке отказался от исполнения договоров. Одновременно с отказом от договоров было заявлено требование о возврате неотработанного аванса, которое в связи с отказом переквалифицировано на неосновательное обогащение.

Доказательством прекращения действия Договоров является факт направления почтовым отправлением на юридический адрес Ответчика уведомлений об одностороннем отказе от исполнения договоров: исх. №№ 2794-и-Л, 2796-и-Л, 2797-и-Л от 26.07.2023 (РПО ED366184696RU).

Таким образом, договоры №№ 1-ПНР/22, 2-ПНР/22, 4-ПНР/22 от 24.10.2022 считаются расторгнутыми с 07.09.2023 (5 дней с даты направления уведомления).

Ответчиком обязательства по возврату денежных средств в полном объеме не исполнены, в связи с чем у ответчика образовалась задолженность в сумме 4 458 000 руб.

Направленная в адрес ответчика претензия оставлена без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для подачи искового заявления в Арбитражный суд г.Москвы.

В соответствии со ст.ст.309, 310 Гражданского Кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом и в установленный срок в соответствии с условиями обязательства. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Согласно п.3.1 договоров №1-ПНР/22, №2-ПНР/22, №3-ПНР/22 и №4-ПНР/22 от 24.10.2022г. сроки проведения пуско-наладочных работ составляют 60 (шестьдесят) календарных дней с момента пуска газа на Объект. Факт принятие Объекта, законченного строительно-монтажными работами, и дата пуска газа на объект фиксируется следующими документами:

08 декабря 2022 года Приказом Технического заказчика Фонда развития территорий  № 08.1-609-ОД создана комиссия  по приёмке подающих трубопроводов котельной и тепловой сети, трубопроводов ввода в ИТП жилых домов ЖК «Лайково». В комиссию в качестве члена включён представитель АО «Политехстрой» ФИО4

09 декабря 2022 года комиссией, включающей представителя ЦУ Ростехнадзора, составлен Акт приёмки законченно строительством объекта Котельная, расположенного по адресу: Московская  область, Одинцовский район, с Лайково. Решение приёмочной комиссии, зафиксированное в акте: 

1. Строительно-монтажные работы выполнены в полном объёме в соответствии с рабочей документацией и требованиями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01.2002».

2. Предъявленный к приёмке объект сети газораспределения вместе с прилагаемой исполнительной документацией считать принятым заказчиком с 09.12.2022 г.

09 декабря 2022 года Комиссия, назначенная приказом  ООО «Технический заказчик Фонда развития территорий» № 08.1-609-ОД от 08 декабря 2022 года, с включением в состав комиссии Руководителя строительства ФИО4, составила Акт готовности оборудования, работающего под избыточным давлением, к вводу в эксплуатацию. Согласно Акту: техническое освидетельствование трубопровода проведено ООО «Евросертификация» 16.11.2022г.; по результатам технического освидетельствования внесена запись в паспорт трубопровода тепловой сети №б/н с выводом о возможности эксплуатации оборудования; составлен Акт рабочей комиссии о приемке оборудования после  комплексного апробирования б/н от 14 ноября 2022 г. При проведении проверки организации надзора за эксплуатацией Трубопровода установлено, что оснащение оборудования арматурой, контрольно-измерительными приборами, приборами безопасности и технологическими щитами соответствует Проекту, требованиям промышленной безопасности, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности; исправность арматуры, контрольно-измерительных приборов, приборов безопасности и технологических защит подтверждается. Для ответственных лиц и специалистов, осуществляющих эксплуатацию оборудования, разработаны должностные инструкции, для обслуживающего персонала разработаны производственные инструкции, для обеспечения контроля за работой оборудования разработаны: Регламент по эксплуатации тепловой сети, утверждённый 30.11.2022; Оперативный журнал; Журнал осмотров; Журнал дефектов оборудования; Графики планово-предупредительных работ; график обходов; Ремонтный журнал. ВЫВОД: Подающий трубопровод горячей воды от котлов на потребителя в пределах котельной соответствует установленным требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности и может быть допущен в эксплуатацию. Акт подписан, в том числе Уполномоченным представителем Центрального управления Ростехнадзора.

23 декабря 2022 года Одинцовской районной эксплуатационной службой филиала АО «Мособлгаз» «Запад» и ПТУ ООО «Технический заказчик Фонда развития территорий» составлен и подписан акт о передаче газа по адресу:  Московская  область, Одинцовский г.о, вблизи с. Лайково, после проведения работ по врезке вновь построенного объекта. Дальнейшие мероприятия по организации пуско-наладочных работ переданы подписантами сотрудникам специализированной организации ООО «Теплогазтрансстрой».

Основываясь на перечисленных документах, дата пуска газа на Объект - 23 декабря 2023 года; начало пуско-наладочных работ с 24 декабря 2023 года. 

С этой даты согласно п. 3.1 договоров №1-ПНР/22, №2-ПНР/22, №3-ПНР/22  и №4-ПНР/22 от 24.10.2022 следует вести отчёт 60 (шестидесяти) календарных дней отведенных условиями договора на проведение пуско-наладочных работ. Согласно расчётам срок проведения пуско-наладочных работ истекает 21 февраля 2023 года, а не 09 февраля 2023 года согласно заявлению истца.  

13 февраля 2023 года составлен и подписан Акт приёмки в эксплуатацию  газопроводов и газоиспользующей установки после пуско-наладочных работ трёх водогрейных котлов ТТ150 мощностью 9,2 МВт каждый с горелками OILON модель GRP-700 M-III исп. WD34 в котельной для теплоснабжения комплекса жилых домов и объектов инфраструктуры, расположенных по адресу: Московская область, Одинцовский район, вблизи с Лайково. Членом комиссии являлся так же представитель АО «Политехстрой» ФИО4. Комиссии предъявлено: 1. Технический отчёт по пуско-наладочным работам и режимно-наладочным испытаниям; 2. Акт комплексного 72-х часового апробирования оборудования от 05 февраля 2023 г. Заключение комиссии: Газовое оборудование котельной ПРИНИМАЕТСЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. Профессиональное обслуживание газового оборудования будет производиться ООО «Теплогазтрансстрой» по договору 8/11/22-ТО от 09.12.2022г. Акт подписал, в том числе Главный государственный инспектор Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Из изложенного следует, что срок выполнения пуско-наладочных работ, предусмотренный вышеперечисленными договорами, соблюден. 

Также указанные документы подтверждают факт выполнения пуско-наладочных работ в полном объёме

В связи с изложенным оснований для удовлетворения исковых требований АО "ПОЛИТЕХСТРОЙ" о взыскании с ООО "ТЕПЛОГАЗТРАНССТРОЙ" неосновательного обогащения в сумме 4 458 000 руб. не имеется.

Стороны согласно ст. ст. 8, 9 АПК РФ, пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Согласно требованиям ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Согласно ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судебные расходы по оплате государственной пошлины распределяются по правилам ст. 110 АПК РФ.

На основании ст. ст. 8, 12, 309, 310, ГК РФ, и руководствуясь ст.ст. 65, 68, 71, 75, 110, 167-171, 176, 180, 181 АПК РФ, суд  .

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья:

М.С. Новиков