АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, 

<

...>, тел. 

<

***>, факс 

<

***> 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ 

(резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-13263/2024  

от 26 июня 2025 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  

Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области 

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью «РК-Инвест»  

(ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) исполнить гарантийные обязательства по  

государственному контракту от 13.05.2020 регистрационный № 0124200000620001634 на  

выполнение работ по строительству объекта «Многоцелевой физкультурно-оздоровительный объект (хоккейная арена «Ледовый дворец») в г. Коряжма»  

(далее – объект) в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу,  

а именно: 

в отношении помещений 1.21, 1.24, 1.28, 1.31 объекта - выполнить демонтаж покрытия из керамической плитки;  

- выполнить демонтаж водоприемных трапов; - выполнить демонтаж цементно-песчаной стяжки; 

- выполнить демонтаж канализационных труб, попадающих в стяжку; - выполнить демонтаж армирования;  

- выполнить монтаж канализационных труб; - выполнить монтаж водоприемных трапов; 

- выполнить монтаж цементно-песчаной стяжки в два слоя, между слоями  

выполнить оклеечную гидроизоляцию, нижний слой стяжки армировать, верхний слой  

сделать с уклоном 0,01 - 0,02 в сторону трапа; 

- выполнить монтаж покрытия из керамической плитки; в отношении помещений 2.11, 2.17 объекта  

- выполнить демонтаж покрытия из керамической плитки; - выполнить демонтаж водоприемных трапов;  

- выполнить демонтаж цементно-песчаной стяжки; 

- выполнить демонтаж канализационных труб, попадающих в стяжку; - выполнить демонтаж звукоизолирующей прослойки;  

- выполнить демонтаж оклеечной гидроизоляции; - выполнить монтаж звукоизолирующей прослойки; - выполнить монтаж оклеечной гидроизоляции; - выполнить монтаж канализационных труб; - выполнить монтаж водоприемных трапов; 

- выполнить монтаж цементно-песчаной стяжки с уклоном 0,01 - 0,02 в сторону трапа;  

- выполнить монтаж покрытия из керамической плитки. В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РК-Инвест» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 50 000 руб. государственной пошлины.  

На случай неисполнения обществом с ограниченной ответственностью «РК- Инвест» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) решения суда в части обязательства по выполнению работ в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу взыскать с общества с ограниченной ответственностью «РК-Инвест» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) в пользу государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>) денежную сумму в размере 700 руб. за каждый день неисполнения.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья М.Г. Вилова