АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Седова, стр. 76, г. Иркутск, Иркутская область, 664025,

тел. 

<

***>; факс 

<

***>

https://irkutsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

г. Иркутск Дело № А19-15698/2025

04.02.2026 г.

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Никитиной И.К., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Хазимуллиной А.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ОБУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИРКУТСКА (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, АДРЕС: 664011, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ИРКУТСК, УЛ. СУХЭ- БАТОРА, СТР. 11)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРТ" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***> АДРЕС: 664038, ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ИРКУТСКИЙ, С.П. МОЛОДЕЖНОЕ, ТЕР. СНТ БЕРЁЗКА-2, УЛ. ЗЕЛЕНАЯ, Д. 175)

об обязании устранить недостатки в рамках гарантийных обязательств, взыскании неустойки,

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Обязать ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРТ" в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 010-64-1611/24 от 10.09.2024 на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Территория около дворца бракосочетания (ул. Декабрьских Событий, 106) в том числе площадь Конституции» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, устранить недостатки своими силами и за собственные средства, согласно требований строительных норм, а именно устранить:

- провалы плиточного покрытия;

- трещины на плиточном покрытии;

- некачественную укладку бутового камня на парапете;

- водоотводный лоток установлен выше уровня плиточного покрытия, плиточное

покрытие без устройства уклона для отвода воды;

- вырубку асфальтобетонного покрытия путем заполнения асфальтобетонной

смесью;

- складирование строительного мусора на территории;

- повреждение газонного покрытия на земельном участке с кадастровым номером

38:36:000021:267;

- при проведении работ по устройству асфальтового покрытия заасфальтирован

люк, доступ к люку не обеспечен.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРТ"

в пользу администрации Тайшетского муниципального образования «Тайшетское

городское поселение» судебную неустойку начиная со дня, следующего за истечением

месячного срока для исполнения судебного акта в следующем размере 1000 руб. за

каждый день просрочки исполнения судебного акта до даты фактического исполнения

судебного акта.

Во взыскании остальной части неустойки отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛАРТ" в

доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 50 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд,

через Арбитражный суд Иркутской области, в течение месяца со дня его принятия.

Судья И.К. Никитина