95/2018-164041(1) 

Арбитражный суд Хабаровского края 

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е 

резолютивная часть

дело № А73-15684/2018

г. Хабаровск

26 ноября 2018 года

Арбитражный суд Хабаровского края в составе  

судьи Ж.А. Усенко, 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи В.Н. Крисюк  рассмотрел в заседании суда дело по иску краевого государственного  казенного учреждения «Служба заказчика министерства строительства  Хабаровского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  местонахождения: 680021, 

<

...>)  

к открытому акционерному обществу «Дальстроймеханизация» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, местонахождения: 680025, 

<

...>)  

о понуждении к исполнению договорных обязательств При участии в судебном заседании: 

от истца – ФИО1, действующей по доверенности от  09.01.2018г;  

от ответчика – ФИО2, действующей по доверенности № 3 от  09.01.2018г;  

Руководствуясь статьями 167-170, 174 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать открытое акционерное общество «Дальстроймеханизация» за  свой счет устранить дефекты, допущенные при выполнении обязанностей  по контракту № 0322200000116000021-ЗП от 28.06.2016г, а именно:  

В срок с 01.05.2019г по 30.06.2019г устранить дефекты, допущенные  при отделке железобетонных конструкций на ротондах, подпорных стенах,  лестничных сходов, колонн и антаблементов мраморной штукатуркой  «Savtas» (устранить неровности, наплывы, не однотонность цветового  решения) в объеме 1 117, 8 кв.м.  

Обязать открытое акционерное общество «Дальстроймеханизация»  исполнить обязанности по контракту № 0322200000116000021-ЗП от  28.06.2016, а именно:  

- в срок с 01.06.2019 по 30.06.2019 осуществить монтаж  крупногабаритных люков в объеме, определенном ЛСР 06-01-02 доп.3  согласно рабочему проекту 1506-Р-ТКР.НДК, изм.9;  

- в срок с 01.05.2019г по 25.05.2019г осуществить монтаж штоков в  объеме, предусмотренном ЛСР 06-01-01 доп.3, согласно рабочему проекту  1506-Р-ТКР. НДК;  

- в срок с 15.05.2019г по 25.05.2019г осуществить монтаж решеток в  объеме ЛСР 02-01-02 доп.2, согласно рабочему проекту 1506-Р-ГР, изм.7;  

- в срок с 01.06.2019 по 30.06.2019 осуществить пусконаладочные  работы дизельных насосных установок в количестве 5 штук;  

- в срок до 30.12.2018г осуществить поставку рукавов с  комплектующими для насосов в объеме ЛСР 06-01-01 доп.2, согласно  рабочему проекту 1506-Р-ТКР.НДК;  

- в срок с 01.06.2019 по 30.06.2019г осуществить монтаж  железобетонных блоков для насосов в объеме ЛСР 06-01-01 доп.2 согласно  рабочему проекту 1506-Р-ТКР.НДК.  

В случае неисполнения решения суда в установленные в решении  суда сроки предоставить краевому государственному казенному учреждению  «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края» право  осуществить соответствующие действия за счет открытого акционерного  общества «Дальстроймеханизация» со взысканием с него необходимых  расходов.  

 Взыскать с открытого акционерного общества  «Дальстроймеханизация» в доход федерального бюджета государственную  пошлину в сумме 6 000 рублей.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со  дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана  апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение,  если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения.  

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края. 

Судья Ж.А. Усенко