АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Рокоссовского, д. 2, г. Калининград, 236040 http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

Дело № А21- 8312 /2023

25 декабря 2023 года

г. Калининград

Руководствуясь статьями 106, 110, 112, статьями 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Калининградской области  

Р Е ШИ Л:

Исковые требования акционерного общества «Прибалтийский  судостроительный завод «ЯНТАРЬ» удовлетворить частично.  

Взыскать с акционерного общества «780 ремонтный завод технических  средства кораблевождения» в пользу акционерного общества «Прибалтийский  судостроительный завод «ЯНТАРЬ» задолженность в размере 2 608 032 рублей, в  том числе, неустойку в размере 290 065 рублей по пункту 10.2 договора № 1/4012015 от 22.09.2015 в редакции протокола разногласий от 25.11.2015 за нарушение  сроков выполнения работ по этапу № 4 договора № 1/401-2015 от 22.09.2015 за  период с 30.10.2021 по 30.03.2022, неустойку в размере 177 048 рублей по пункту  10.2 договора № 1/401-2015 от 22.09.2015 в редакции протокола разногласий от  25.11.2015 за нарушение сроков выполнения работ по этапу № 5 договора № 1/4012015 от 22.09.2015 за период с 30.11.2021 по 30.03.2022, неустойку на дату  вынесения решения в размере 2 140 919 рублей по пункту 10.2 договора № 1/4012015 от 22.09.2015 за нарушение сроков выполнения работ по этапу № 4, 5  договора № 1/401-2015 от 22.09.2015 за период с 01.04.2022 по 25.12.2023.  

Взыскать с акционерного общества «780 ремонтный завод технических  средства кораблевождения» в пользу акционерного общества «Прибалтийский  судостроительный завод «ЯНТАРЬ неустойку, начисленную на сумму  

 2 Дело № А21-8312/2023  невыполненных работ 6 321 612 рублей 55 копеек, исходя 1/300 ставки  рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за период с  26.12.2023 и по дату фактического исполнения обязательств по этапу № 4, № 5  договора № 1/401-2015 от 22.09.2015.  

В остальной части иска акционерному обществу «Прибалтийский  судостроительный завод «ЯНТАРЬ» отказать.  

Взыскать с акционерного общества «Прибалтийский судостроительный  завод «ЯНТАРЬ» в доход федерального бюджета 941 рублей государственной  пошлины.  

Взыскать с акционерного общества «780 ремонтный завод технических  средства кораблевождения» в доход федерального бюджета 21 025 рублей  государственной пошлины.  

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной  квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным  лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок  со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Калининградской области.  

 Судья М.С. Глухоедов