АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/,

сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

 

Именем Российской Федерации

 

РЕШЕНИЕ

Дело № А07-24209/2021

г. Уфа

19 июня 2024 года

Резолютивная часть решения объявлена 06.06.2024

Полный текст решения изготовлен 19.06.2024

 

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе

судьи Кузнецова Д.П.,

при ведении протокола судебного заседания

секретарем судебного заседания Зайнуллиной А.Р.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Дортрансстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о обязании в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства в рамках Государственного контракта на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство взрослой поликлиники на 400 посещений в смену и детской поликлиники на 200 посещений в смену в р.п. Чишмы Чишминского района РБ» от 26 июля 2016г., а именно:

1.1. привести в качественное состояние устройство кровли, примыкание кровли к слуховым окнам и вентиляционным трубам;

1.2. произвести замену 12 унитазов;

1.3. произвести замену сердцевин в количестве 150 шт., дверных ручек - 60 шт., полную замену замков - 25 шт.;

1.4. произвести регулировку оконных фрамуг;

1.5. произвести ремонт на цокольном этаже и кабинетах инфекционного отделения;

1.6. произвести замену подоконников в количестве 15 шт.;

1.7. устранить трещину температурного шва между взрослой и детской поликлиниками;

1.8. произвести наружную отделку фасада;

1.9. устранить промокание кирпичной кладки на входных группах (инфекционные кабинеты и детская поликлиника);

1.10. привести в соответствие работу вентиляционных систем.

1.1. провести капитальный ремонт по восстановлению помещений старой поликлиники.

1.2. привести используемые здание, оборудование и инвентарь в соответствие с требованиями законодательства о пожарной безопасности.

третьи лица Казенное предприятие Республики Башкортостан "Республиканское управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора Общество с ограниченной ответственностью «Система» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

 

при участии в судебном заседании:

От истца – ФИО1 по доверенности от 25.07.2023, диплом, паспорт.

От ГБУЗ РБ Чишминской центральной районной больницы – ФИО2 по доверенности № 4 от 10.01.2024, диплом, паспорт.

От иных лиц  - явки нет, извещены надлежащим образом.

 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "Дортрансстрой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о обязании в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу исполнить гарантийные обязательства в рамках Государственного контракта на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство взрослой поликлиники на 400 посещений в смену и детской поликлиники на 200 посещений в смену в р.п. Чишмы Чишминского района РБ» от 26 июля 2016г., а именно:

1.1. привести в качественное состояние устройство кровли, примыкание кровли к слуховым окнам и вентиляционным трубам;

1.2. произвести замену 12 унитазов;

1.3. произвести замену сердцевин в количестве 150 шт., дверных ручек - 60 шт., полную замену замков - 25 шт.;

1.4. произвести регулировку оконных фрамуг;

1.5. произвести ремонт на цокольном этаже и кабинетах инфекционного отделения;

1.6. произвести замену подоконников в количестве 15 шт.;

1.7. устранить трещину температурного шва между взрослой и детской поликлиниками;

1.8. произвести наружную отделку фасада;

1.9. устранить промокание кирпичной кладки на входных группах (инфекционные кабинеты и детская поликлиника);

1.10. привести в соответствие работу вентиляционных систем.

1.1. провести капитальный ремонт по восстановлению помещений старой поликлиники.

1.2. привести используемые здание, оборудование и инвентарь в соответствие с требованиями законодательства о пожарной безопасности.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 03 сентября 2021 года исковое заявление было принято к производству.

Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 03 сентября 2021 года к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены Казенное предприятие Республики Башкортостан "Республиканское управление капитального строительства" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 450071, 

<

...>), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Чишминская центральная районная больница (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 452172, Республика Башкортостан, рабочий 

<

...>).

 

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования, просил удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании поддержал позицию, изложенную в отзыве на исковое заявление.

Третьи лица в судебное заседание не явились, отзыв, возражения по существу иска не представили, об уважительных причинах неявки не сообщили.

Согласно ч. 5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.

Суд учитывает, что информация о времени и месте судебного разбирательства дополнительно размещена на интернет-сайте Арбитражного суда Республики Башкортостан и является общедоступной.

Дело рассмотрено в порядке ч. 5 ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Рассмотрев материалы дела, выслушав сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела между Обществом с ограниченной ответственностью «Дортрансстрой» и Министерством здравоохранения Республики Башкортостан был заключен государственный контракт №0064-03 от 26.07.2016 г. (далее – Контракт).

Предметом заключенного контракта является выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объекту «Строительство взрослой поликлиники на 400 посещений в смену и детской поликлиники на 200 посещений в смену в р.п. Чишмы Чишминского района РБ».

Согласно разделу 8 Контракта, Гарантийный срок эксплуатации объекта составляет 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Исследовав изложенные обстоятельства дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

Истец неоднократно обращался к ответчикам с досудебными претензиями об устранении недостатков от 23.09.2019 г., 04.03.2020 г., 30.06.2020 г., 15.07.2020 года.

В соответствии со статьей 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов. Таким образом любой иск должен быть направлен на защиту нарушенных прав обратившегося в суд лица, а следовательно, согласно статье 65 АПК РФ истец обязан доказать те обстоятельства, на которые ссылается в обоснование заявленного иска.

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле (пункт 1 статьи 66 АПК РФ). В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со ст. 153 Гражданского кодекса Российской Федерации сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В ходе рассмотрения дела, Ответчик возражал относительно удовлетворения исковых требований и представил отзыв на исковое заявление.

В отзыве Ответчик указывает, что недостатки, на которые ссылается Истец, могли быть выявлены при обычном способе приемки выполненных работ, однако замечаний от истца в ходе выполнения и приемки работ в адрес ответчика не поступало, следовательно, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Не согласившись с требованиями Истца, представитель ООО «Дортрансстрой» заявил ходатайство о назначении экспертизы.

Определением от 27.12.2021 года производство по делу приостановлено, назначена судебная строительно-техническая экспертиза. Производство экспертизы поручено эксперту ООО «Межрегиональный центр судебных экспертиз» ФИО3.

08.04.2022 года от ООО «Межрегиональный центр судебных экспертиз» поступило ходатайство о замене эксперта по настоящему делу в связи с болезнью эксперта.

14.04.2022 года Определением Суда эксперт ООО «Межрегиональный центр судебных экспертиз» заменен на ФИО4.

Перед экспертом поставлены следующие вопросы:

1. Имеются ли указанные в акте о выявленных дефектах от 21.07.2020г., подписанный Начальником ОКС Министерства здравоохранения РБ ФИО5, Начальником ОМТС ГБУЗ Чишминская ЦРБ ФИО6, Инженером по надзору за строительством КП РБ РУКС строительные недостатки (дефекты) объекта капитального строительства «Взрослая поликлиника на 400 посещений в смену и детская поликлиника на 200 посещений в смену в р.п. Чишмы Чишминского района РБ»? Если есть, определить каковы эти недостатки, перечень данных недостатков. Являются ли они явными или скрытыми, существенными и неустранимыми?

2. Если возможно определить причины возникновения недостатков (при их наличии), определить являются ли данные недостатки следствием некачественного выполнения работ по Контракту, либо возникли по иным причинам (указать каким)?

3. В случае, если имеются недостатки, указанные в акте о выявленных дефектах от 21.07.2020г., определить перечень, виды и объем ремонтно-восстановительных работ по устранению данных недостатков? 

В ответе на 1 вопрос эксперт указывает, что указанные в акте о выявленных дефектах от 21.07.2020 г., строительные недостатки частично имеются и подтверждаются.

Вследствие некачественного выполнения работ по Контракту возникли следующие недостатки:

1) В местах обхода кровельной картиной слуховых окон в осях 6-9 / Г-Ж, внутренние (нижние) ендовы не обнаружены, примыкания не герметичны, имеются просветы, прокладки, уплотнительная лента (герметик) отсутствует, вследствие чего происходит намокание и повреждение отделки наружной стены в помещениях 6-7 технического чердака с отслоением штукатурки, повреждение отделки помещений 25-27, 21, 21* 6-ого этажа;

В местах расположения водоприемных воронок (2 шт) внутренней системы водоотведения с плоской кровли на отметке +23,580, следы протекания, не герметичны примыкания, вследствие чего производит намокание и повреждение конструкции подвесного потолка типа «Армстронг» в коридоре 6-ого этажа в осях 4-6 / Г-Д.

Конструктивное исполнение примыкания крыши к слуховым окнам, не герметичное примыкание водосливных воронок к покрытию кровли не соответствует пункту 6.4.4.5. СП 71.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», пунктам 5.8.7., 5.9.7. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», пунктам 7.14., 7.19., 7.22. МДС 12-33.2007. «Кровельные работы», не выполняется требование к обеспечению защиты от влаги - статьи 25 Федерального закона от 30.12.2009 № 384- ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

2) В осях 9-10 между взрослой и детской поликлиникой (со стороны дворовой территории) деформационный температурный шов закрыт декоративным защитным слоем, который разрушается (недостаточная деформационная устойчивость шва), не соответствует пунктам 6.10.2., 6.10.3 СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

Экспертом определены виды и объемы ремонтно-восстановительных работ по устранению выявленных строительных недостатков, а также определены способы и технологические процессы выполнения работ с учетом их последовательности, по результатам составлена дефектная ведомость.

Также экспертом выявлены недостатки, возникшие вследствие неправильной эксплуатации, такие как:

1)           оконные ПВХ конструкции повреждены ввиду отсутствия их обслуживания, не очищаются дренажные отверстия от грязи, уплотнителей в притворах (п. 10.8. ГОСТ 23166-2021. «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. Общие технические условия» 11.8., 11.9 СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения»;

2)           Из-за чрезмерной нагрузки подоконные доски ПВХ имеют механические повреждения;

3)           Не производится очистка снега с покрытия и содержание в исправном состоянии наружных водостоков с кровли входных групп с разрушением штукатурного слоя и наружных стен в местах примыкания кровли с нарушением наружного и внутреннего отделочного слоя, что не соответствует п. 11.3. СП 255.1325800.2016. «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения».

В ответе на 3 вопрос, экспертом определена стоимость ремонтно-восстановительных работ по устранению недостатков, которая составила 310 875 (триста десять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 14 копеек.

Исследовав изложенные обстоятельства дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В силу пункта 4 статьи 753 Гражданского кодекса Российской Федерации сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

Согласно статье 722 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В силу статей 64, 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

В соответствии со статьей 8 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Стороны пользуются равными правами на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление арбитражному суду своих доводов и объяснений, осуществление иных процессуальных прав и обязанностей, предусмотренных названным кодексом.

По правилам части 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно части 2 статьи 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. Таким образом, в силу статей 9, 65 АПК РФ суд на основе принципа состязательности с учетом представленных сторонами доказательств устанавливает значимые для дела обстоятельства. 

При этом каждая из сторон несет риск процессуальных последствий непредоставления доказательств. В соответствии со ст. 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Между сторонами сложились гражданско-правовые отношения договора на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (далее - государственный или муниципальный контракт) подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со 

строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Согласно ст. 756 ГК РФ при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 ГК РФ. При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет.

Президиум Высшего Арбитражного Суда в своем Постановлении от 16 января 2007 г. N 12354/06 также указал, что в соответствии со статьями ст. 724 и 756 ГК РФ обязанность подрядчика по устранению дефектов сохраняется и после истечения гарантийного срока, если он установлен менее предельного срока (пять лет).

Учитывая изложенное, а также тот факт, что на дату рассмотрения спора недостатки не устранены, суд считает обоснованными и подлежащими частичному удовлетворению требования Министерства здравоохранения Республики Башкортостан к ООО «Дортрансстрой» об обязании  устранить следующие  недостатки работ на объекте «Строительство взрослой поликлиники на 400 посещений в смену и детской поликлиники на 200 посещений в смену в р.п. Чишмы чишминского района РБ», а именно:

1) В местах обхода кровельной картиной слуховых окон в осях 6-9 / Г-Ж, внутренние (нижние) ендовы не обнаружены, примыкания не герметичны, имеются просветы, прокладки, уплотнительная лента (герметик) отсутствует, вследствие чего происходит намокание и повреждение отделки наружной стены в помещениях 6-7 технического чердака с отслоением штукатурки, повреждение отделки помещений 25-27, 21, 21* 6-ого этажа;

В местах расположения водоприемных воронок (2 шт) внутренней системы водоотведения с плоской кровли на отметке +23,580, следы протекания, не герметичны примыкания, вследствие чего производит намокание и повреждение конструкции подвесного потолка типа «Армстронг» в коридоре 6-ого этажа в осях 4-6 / Г-Д.

Конструктивное исполнение примыкания крыши к слуховым окнам, не герметичное примыкание водосливных воронок к покрытию кровли не соответствует пункту 6.4.4.5. СП 71.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76», пунктам 5.8.7., 5.9.7. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», пунктам 7.14., 7.19., 7.22. МДС 12-33.2007. «Кровельные работы», не выполняется требование к обеспечению защиты от влаги - статьи 25 Федерального закона от 30.12.2009 № 384- ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

2) В осях 9-10 между взрослой и детской поликлиникой (со стороны дворовой территории) деформационный температурный шов закрыт декоративным защитным слоем, который разрушается (недостаточная деформационная устойчивость шва), не соответствует пунктам 6.10.2., 6.10.3 СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

путем производства следующих работ:

 

№ пп

Наименование работ

Ед.

изм.

Кол-во

1

2

3

4

Раздел 1. Кровля (слуховые окна)

1

демонтаж металлоконструкций покрытий (ТЕР 46-02-004-01) 27,5 м2х6,7 кг

тн

0,184

2

демонтаж решеток жалюзийных (прим. ТЕР20-02-002-02) с сохранением материала

шт

3

3

демонтаж слуховых окон (прим. ТЕР10-01-003-01) с сохранением материала

шт

3

4

устройство пароизоляции прокладочной в один слой (ТЕР12-01-015-03)

м2

15,9

5

гидроизол (ТССЦ-101-1564)

м2

17,5

6

устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ТЕР12-01-010-01)

м2

14,5

7

сталь листовая оцинкованная окрашенная толщиной 0,55 мм (ТССЦ-101-3741) 14,5 м2х4,2 кг

тн

0,06

8

устройство слуховых окон (ТЕР10-01-003-01) (пиломатериал вторичного применения)

шт

3

9

устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (ТЕР 1201-007-08)

м2

27,5

10

профнастил оцинкованный: Н60-845-0,7 (ТССЦ-101-4540)

м2

30,2

11

установка решеток жалюзийных (ТЕР20-02-002-02) без стоимости новых решеток

шт

3

12

устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (ТЕР 11-01004-09)

м2

2

13

устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: без фартуков (ТЕР 12-01-004-04)

шт

2

Раздел 2. Восстановление отделки помещений технического этажа (чердака) и помещений 6-ого этажа

14

отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (ТЕР 46-02009-02) (чердак)

м2

33,6

15

антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор" (ТЕР 10-01-092-01) (чердак)

м2

33,6

16

штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (ТЕР 15-02-01603) (чердак)

м2

33,6

17

простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (ТЕР15-04-024-08) (чердак)

м2

33,6

18

демонтаж / монтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (прим. ТЕР15-01-047-15) (новый материал, без направляющих)

м2

19,0

19

демонтаж / установка светильников в подвесных потолках (ТЕРр67-4-3, ТЕРм 08-03-593-19)

шт

4

20

отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит (ТЕР15-02-035-04)

м2

94,8

21

окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (ТЕР15-04-005-02)

м2

94,8

Раздел 3. Фасад Деформационный /температурный шов в осях 9-10

22

устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных (ТЕР 07-05-038-02)

м

18,2

23

гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (ТЕР08-01-003-05)

м2

2,7

24

компенсатор из листовой оцинкованной стали (устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали) (ТЕР12-01-010-01)

м2

5,6

25

сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм (ТССЦ-101-3741) 5,6 м2х4,2 кг

тн

0,023

26

установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (ТЕР08-07-001-02) высота 18 м

м2

24,0

Отказывая в удовлетворении требований Министерства здравоохранения Республики Башкортостан об обязании устранить иные недостатки, которые были заявлены изначально в исковом заявлении, суд учитывает, что они не подтверждены судебной экспертизой

Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г. N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек (статьи 98, 102, 103 ГПК РФ, статья 111 КАС РФ, статья 110 АПК РФ) не подлежат применению при разрешении: иска неимущественного характера.

Расходы по судебной экспертизе согласно ст. 110 АПК РФ относятся на лиц, участвующих в деле.

Согласно частям 1, 2 ст. 109 АПК РФ, денежные суммы, причитающиеся экспертам, выплачиваются с депозитного счета арбитражного суда по выполнении ими своих обязанностей.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине подлежат отнесению на ответчика в размере, установленном статьей 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования Министерства здравоохранения Республики Башкортостан удовлетворить частично.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Дортрансстрой" в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу решения Арбитражного суда безвозмездно устранить строительные дефекты, допущенные при строительстве  объекта «Строительство взрослой поликлиники на 400 посещений в смену и детской поликлиники на 200 посещений в смену в р.п. Чишмы Чишминского района РБ» а именно:

1) В местах обхода кровельной картиной слуховых окон в осях 6-9 / Г-Ж, внутренние (нижние) ендовы не обнаружены, примыкания не герметичны, имеются просветы, прокладки, уплотнительная лента (герметик) отсутствует, вследствие чего происходит намокание и повреждение отделки наружной стены в помещениях 6-7 технического чердака с отслоением штукатурки, повреждение отделки помещений 25-27, 21, 21* 6-ого этажа;

В местах расположения водоприемных воронок (2 шт) внутренней системы водоотведения с плоской кровли на отметке +23,580, следы протекания, не герметичны примыкания, вследствие чего производит намокание и повреждение конструкции подвесного потолка типа «Армстронг» в коридоре 6-ого этажа в осях 4-6 / Г-Д.

Конструктивное исполнение примыкания крыши к слуховым окнам, не герметичное примыкание водосливных воронок к покрытию кровли не соответствует пункту 6.4.4.5. СП 71.13330.2017 «Кровли. Актуализированная редакция СНиП П-26-76», пунктам 5.8.7., 5.9.7. СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87», пунктам 7.14., 7.19., 7.22. МДС 12-33.2007. «Кровельные работы», не выполняется требование к обеспечению защиты от влаги - статьи 25 Федерального закона от 30.12.2009 № 384- ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

2) В осях 9-10 между взрослой и детской поликлиникой (со стороны дворовой территории) деформационный температурный шов закрыт декоративным защитным слоем, который разрушается (недостаточная деформационная устойчивость шва), не соответствует пунктам 6.10.2., 6.10.3 СП 70.13330.2012. «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87».

путем производства следующих работ:

 

№ пп

Наименование работ

Ед.

изм.

Кол-во

1

2

3

4

Раздел 1. Кровля (слуховые окна)

1

демонтаж металлоконструкций покрытий (ТЕР 46-02-004-01) 27,5 м2х6,7 кг

тн

0,184

2

демонтаж решеток жалюзийных (прим. ТЕР20-02-002-02) с сохранением материала

шт

3

3

демонтаж слуховых окон (прим. ТЕР 10-01-003-01) с сохранением материала

шт

3

4

устройство пароизоляции прокладочной в один слой (ТЕР12-01-015-03)

м2

15,9

5

гидроизол (ТССЦ-101-1564)

м2

17,5

6

устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ТЕР 12-01 -010-01)

 

м2

14,5

7

сталь листовая оцинкованная окрашенная толщиной 0,55 мм (ТССЦ-101-3741) 14,5 м2х4,2 кг

тн

0,06

8

устройство слуховых окон (ТЕР 10-01-003-01) (пиломатериал вторичного применения)

шт

3

9

устройство кровель из оцинкованной стали: без настенных желобов (ТЕР 1201- 007-08)

м2

27,5

10

профнастил оцинкованный: Н60-845-0,7 (ТССЦ-101-4540)

м2

30,2

11

установка решеток жалюзийных (ТЕР20-02-002-02) без стоимости новых решеток

шт

3

12

устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (ТЕР 11-01004- 09)

м2

2

13

устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: без фартуков (ТЕР 12-01-004-04)

шт

2

Раздел 2. Восстановление отделки помещений технического этажа (чердака) и помещений 6-ого этажа

14

отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (ТЕР 46-02009- 02)(чердак)

м2

33,6

15

антисептическая обработка каменных, бетонных, кирпичных и деревянных поверхностей биопиреном "Нортекс-Дезинфектор” (ТЕР 10-01-092-01) (чердак)

м2

33,6

16

штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (ТЕР 15-02-01603) (чердак)

м2

33,6

17

простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, под1 отселенных под окраску (ТЕР 15-04-024-08) (чердак)

м2

33,6

18

демонтаж / монтаж подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля (прим. ТЕР 15-01-047-15) (новый материал, без направляющих)

м2

19,0

19

демонтаж / установка светильников в подвесных потолках (ТЕРр67-4-3, ТЕРм 08-03-593-19)

шт

4

20

отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит (ТЕР 15-02-03 5-04)

м2

94,8

21

окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску (ТЕР 15-04-005-02)

м2

94,8

Раздел 3. Фасад Деформационный /температурный шов в осях 9-10

22

устройство деформационных вертикальных швов в зданиях: кирпичных и крупноблочных (ТЕР 07-05-038-02)

м

18,2

23

гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (ТЕР08-01-003-05)

м2

2,7

24

компенсатор из листовой оцинкованной стали (устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали) (ТЕР 12- 01-010-01)

м2

5,6

25

сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,55 мм (ТССЦ-101-3741) 5,6 м2х4,2 кг

тн

0,023

26

установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (ТЕР08-07-001-02) высота 18 м

м2

24,0

 

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Дортрансстрой" (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)   в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 6 000 рублей

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.

 

Судья                                                                          Д.П. Кузнецов