Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-82276/2020

10 марта 2021 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена  11 февраля 2021 года.

Полный текст решения изготовлен  10 марта 2021 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Нетосов С.В.,

при ведении протокола судебного заседания ФИО1 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД «ПРИЗМА» (адрес:  187110, Ленинградская область, Киришский район, город Кириши, проспект Победы, 20, ОГРН: 1134727000099, Дата присвоения ОГРН: 13.02.2013, ИНН: 4727000554);

ответчик: публичное акционерное общество «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» (адрес:  196247, Санкт-Петербург, площадь Конституции, 1, ОГРН: 1027809170300, Дата присвоения ОГРН: 22.07.2002, ИНН: 7803002209);

о взыскании, 

при участии

- от истца: ФИО2 по довренности от 12.10.2020; 

- от ответчика: ФИО3 по довренности от 23.07.2020; 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД «ПРИЗМА» (далее – истец)  обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» (далее – ответчик) о взыскании 9 914 468,17 руб. неустойки. 

Определением от 30.09.2020 возбуждено производство по делу, назначено предварительное и основное судебное заседание. 

В судебное заседание 11.02.2021 явились представители сторон. 

Учитывая достаточность собранных по делу материалов, суд из предварительного заседания перешел к судебному разбирательству дела по существу в настоящем судебном заседании в соответствии с п. 4 ст. 137 АПК РФ.

Истец поддержал исковые требования в редакции ходатайства об уточнении.

Ответчик возражал по доводам, изложенным в отзыве. 

Выслушав представителей сторон, исследовав материалы дела и оценив представленные в дело доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд пришел к следующему. 

Между ООО «Завод Призма» (Заявитель) и ПАО «Ленэнерго» (Сетевая организация) был заключен договор № ОД-579-15/36203-Э-14 от 30.12.2015 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (дополнительных соглашения № 1 от 24.04.2017, № 2 от 20.09.2017, № 3 от 20.12.2017, № 4 от 01.04.2018) объекта: базы металлоконструкций и стоянки автотранспорта, расположенного по адресу: 

<

...>. номер 47:27:0701010:152.

Согласно условиям Договора № ОД-579-15/36203-Э-14 Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, в том числе:

- установить и оборудовать новую ТП-10/0,4 кВ, с установкой трансформатора необходимой мощности (на стадии разработки проекта место установки ТП, комплектацию и тип устанавливаемого оборудования согласовать с филиалом ПАО «Ленэнерго» «ТхЭС»);

- выполнить подъездные пути к ТП-10/0,4 кВ.;

- построить новую ЛЭП-10 кВ направлением от опоры №1 ЛЭП-10 кВ №30 «Березовская» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (конфигурацию сети, марку, сечение и протяженность ЛЭП-10 кВ уточнить проектом). Трассу новой ЛЭП-10 кВ определить проектом и согласовать с землевладельцем.

- определить проектом необходимость замены трансформаторов тока в ячейке РУ-10 фидера №30 «Березовская» ПС-35/10кВ № 40 «ЦРП г.Кириши»,

- организовать учет электроэнергии в РУ-0,4 кВ новой ТП по п.10.1 с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 650 кВт; категория надежности - электроприемники 1-ой категории 0кВт; электроприемники 2-ой категории 0кВт; электроприемники 3-ой категории 650кВт. класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4(кВ).

Согласно пункту 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения договора.

Срок действия технических условий - 2 года со дня заключения договора.

Размер платы за технологическое присоединение был определен Сетевой организацией в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Правительства Ленинградской области от 13.08.2015г. №92-п, учитывая отдаленность от основного источника питания и необходимость строительства новой трассы ЛЭП-10 кВ направлением от опоры №1 ЛЭП-10 кВ №30 «Березовская» до проектируемой ТП-10/0,4 кВ. и составил 9 789 167,43 руб.

Пунктом 11 Договора был предусмотрен следующий порядок платы:

А) 10% стоимости услуги, что составляет 978 916,74р. в течение 15 календарных дней с даты вступления в силу договора

Б) 30% стоимости услуги, что составляет 2936750,23р. в течение 60 календарных дней с даты вступления в силу договора.

В) 20% стоимости услуги, что составляет 1957833,49р. в течение 180 календарных дней с даты вступления в силу договора.

Г) 30% стоимости услуги, что составляет 2936750,23р. в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения.

Д) 10% стоимости услуги, что составляет 978 916,74р. в течение 10 календарных дней со дня подписания акта о технологическом присоединении.

ООО «Завод «Призма» перечислило ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» в соответствии подпунктами «а» - «в» пункта 11 Договора плату за присоединение в размере 5 873 500,46 руб. (платежные поручение от 15.01.2016, 24.02.2016, 24.06.2016).

Согласно переписке сторон, ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» письмом от 10 февраля 2017 года обратилось к Заявителю с предложением увеличения срока выполнения мероприятий технического присоединения до 31.12.2017г. ввиду необходимости согласования процедуры прохождения трассы ЛЭП-10 кВ.

Сторонами было заключено дополнительное соглашения №1 от 24.04.2017г. со сроком выполнения мероприятий до 30.06.2017г.

Обязательства ООО «Завод «Призма», предусмотренные Техническими условиями, были исполнены.

В целях согласования технических решений по установке ТП10/0.4 кВ., а также для работ по прокладке кабельной линии от ГРЩ (главного распределительного щита) до ТП10/0.4 кВ в сетевую организацию направлялись на согласование необходимые обращения. 27.09.2016.

ООО «Завод «Призма» заключило договор подряда с ООО «СМЭК» на установку и подключение щитов ГРЩ и КУ. ООО «СМЭК» работы выполнило и сдало по акту КС-2 от 31.01.2017.

Письмом ООО «Завод «Призма» от 29.05.2017 предоставлены спроектированные планы для согласования места установки ТП10/0.4 кВ.

К окончанию срока выполнения мероприятий (30.06.2017) трасса ЛЭП-10 кВ не была построена, производство работ сетевой организацией по прокладке кабелей и монтажу ТП не производилось.

Письмами от 19.06.2017 Заявитель обратился в сетевую организацию с требованием об объяснении причин не завершения работ в указанный в Договоре срок, а также к Председателю комитета топливно-энергетического комплекса Ленинградской области (Комитет по ТЭК) о неисполнении ПАО «Ленэнерго» обязательств по договору и осуществлении содействия в выполнении мероприятий технологического присоединения.

20.09.2017 стороны заключили дополнительное соглашение №2, в соответствии с которым срок выполнения мероприятий и срок действия технических условий были продлены до 30.12.2017.

Согласно позиции истца, к 20.09.2017 ПАО «Ленэнерго» получено 60% оплаты по договору, однако работ со стороны Сетевой организации произведено не было.

С учетом дополнительных соглашений № 4 от 01.04.2018 срок окончания осуществления технологического присоединения к электрическим сетям определен сторонами до 30.09.2018.

До настоящего времени мероприятия по технологическому присоединению ответчиком не завершены, в связи с чем истец начислил неустойку в размере 9 914 468,77 руб.  и обратился в суд с настоящим иском. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила № 861), технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов; односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренным  законом.

Согласно пункту 17 Договора «в случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему договору такая Сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой Стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения настоящего договора, и общего размера платы за технологическое присоединение по настоящему договору за каждый день просрочки».

Согласно абз. 3 пп. «в» п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила № 861) за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств предусмотрена обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Неисполнение обязательств по договору со стороны сетевой организации подтверждается  материалами дела. 

Истец представил расчет неустойки за период с 01.10.2018 по 21.01.2021 в размере 9 914 468,17 руб. 

Выполненный истцом расчет взыскиваемой денежной суммы проверен судом и не оспорен ответчиком. Оснований к снижению законной неустойки, соразмерность которой предполагается, суд не установил. 

Оценив в совокупности и взаимной связи документы, представленные в материалы дела, суд считает, что исковые требования обоснованы и подлежат удовлетворению, учитывая, что технологическое присоединение до настоящего времени не произведено. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В соответствии с частью 5 статьи 15, часть 1 статьи 177 и частью 1 статьи 186 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебный акт, выполненный в форме электронного документа, подписанного судьей усиленной квалифицированной электронной подписью, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с публичного акционерного общества «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЗАВОД «ПРИЗМА» 9 914 468,17 руб. неустойки, 67 663 руб. расходов по оплате государственной пошлины. 

Взыскать с публичного акционерного общества «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» в доход федерального бюджета 4909 руб. государственной пошлины. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Нетосов С.В.