Арбитражный суд Республики Карелия ул. Красноармейская, 24 а, 

<

...>, тел./факс: 

<

***> / 790-625  

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А26-6338/2025

г. Петрозаводск

02 октября 2025 года

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Республики Карелия  

РЕШИЛ:

1. Иск удовлетворить. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Реммонтажстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) выполнить работы по ремонту асфальтобетонного покрытия проездов, дорог картами в пределах гарантийного срока надлежащим образом, по государственным (муниципальным) контрактам от 29 августа 2024 года № 0806300010124000073 и от 10 июня 2024 года № 0806300010124000049 в течение строительного сезона 2025 года (до 01 ноября 2025. года), а именно: Ремонт асфальтобетонного покрытия следующих автомобильных дорог, проездов:  

1. автомобильной дороги картами проспекта Горняков-до проспекта Горняков дом 8;  

2. автомобильной дороги картами улица Строителей; 3. автомобильной дороги улица Интернациональная;  

 Ремонт асфальтобетонного покрытия следующих автомобильных дорог, проездов:  

1. автомобильной дороги картами перекресток улиц Антикайнена-Калевала- Ленина;  

2.автомобильной дороги картами перекресток улиц Парковая-Калевала; 3. автомобильной дороги улица Мира; 4. автомобильной дороги улица Строителей; 

2. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Реммонтажстрой» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) при производстве работ произвести: разборку деформированных асфальтобетонных покрытий с погрузкой и перевозкой лома асфальтобетона на расстоянии до 3 км, исправление профиля оснований щебеночных, с россыпью новых материалов (щебень фракция 10-20 мм), разравниванием и уплотнением катками самоходными вибрационными, устройство покрытия толщиной 50 мм из горячих асфальтобетонных смесей тип Б марка 1, устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии битумом дорожным.  

3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Реммонтажстрой" (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 50 000 руб. государственной пошлины за рассмотрение иска.  

4. Решение может быть обжаловано: 

- в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, 

<

...>);  

- в кассационном порядке в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в Арбитражный суд Северо-Западного округа (190000, 

<

...>) при условии, что данное решение было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражный суд апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Республики Карелия.  

 Судья Колесова Н.С.