Арбитражный суд Волгоградской области

 

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город  Волгоград

«09» октября 2024 г.

Дело № А12-13197/2024

 

Резолютивная часть решения оглашена 03 октября 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 09 октября 2024 года.

 

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Моториной Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Гребенниковой Я.Д., рассмотрев в судебном заседании дело по иску акционерного общества «Волгоградоблэлектро» в лице филиала Северные МЭС (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 400075, 

<

...>) к обществу с ограниченной ответственностью «ПеровоСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 403113, 

<

...>) о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности №52 от 13.02.2023г.(диплом представлен), после перерыва не явился, извещен

от ответчика – не явились, извещены,

 

акционерное общество «Волгоградоблэлектро» в лице филиала Северные МЭС (далее АО «Волгоградоблэлектро», истец) обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ПеровоСтрой»» (далее ООО «ПеровоСтрой», ответчик) о взыскании неустойки в сумме 197 196,50 руб. в рамках договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 24/23-25ТП/Д от 03.04.2023, судебных расходов.

            Исковые требования мотивированы не надлежащим исполнением ответчик взятых на себя обязательств.

            Ответчик возражений на иск не представил, извещен судом надлежащим образом о времени и месте рассмотрения спора.

            Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, суд

Установил:

Между АО «Волгоградоблэлектро» (Сетевая организация) и ООО «ПеровоСтрой» (Заявитель) заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 03.04.2023 № 24/23-25ТП/Д.

Согласно условиям договора Сетевая организация принимает на себя  обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, многоквартирный жилой дом, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства, с учетом следующих характеристи:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 95,0 кВт;

- категория надежности II (вторая);

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4кВ;

- максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств 15,0 кВТ по одному источнику питания.

  Заявитель обязуется оплатить расходы по технологическому присоединению согласно условиям договора.

Пунктом 8 договора предусмотрена обязанность заявителя надлежащим образом исполнить обязательства по оплате услуг, выполнить технические условия в части мероприятий, возлагаемых на Заявителя, после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Заявителя, уведомить Сетевую организацию о выполнении технических условий и др. 

Пунктом 6 договора определены мероприятия, которые возложены на сетевую организацию, а именно: выполнение мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств, урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, уведомления заявителя о выполнении технических условий и др.

Срок действий технических условий, приложенных к договору, определен сторонами и составляет 2 года со дня заключения договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев со дня заключения договора. 

Согласно Техническим условиям (далее ТУ) № 00024/25 точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения (кВт): первая – существующая на оп. №9-2/2 ВЛ-0,4кВ №9 ТП-6 Л-1 ПС 110 кВт Урюпинская, с максимальной мощностью – 94 кВт; вторая – проектируемая в ВПУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома, ТП-9 л-107 РП-1 Л-23 ПС 110 кВ Урюпинская, с максимальной мощностью – 95,0 кВт.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 28.11.2022 №45/1 и составляет 299904,03 руб. (п. 10 договора).

Истец возложенные на него технологические мероприятия выполнил своевременно, что подтверждается представленными в материалы дела актами выполненных работ, рабочей документацией, актами приемки-сдачи работ, договором подряда. В адрес ответчика направлено уведомление об обеспечении сетевой организации возможности присоединения к сетям, который ответчиком подписан не был.

За несвоевременное выполнение ответчиком мероприятий по технологическому присоединению, истцом была начислена неустойка за период с 04.10.2023 по 13.05.2024 в размере 167 196,50 руб., в адрес ответчика направлена досудебная претензия, отсутствие оплаты и послужило поводом для обращения в суд с настоящими требованиями.  

В пункте 17 договора сторонами согласовано условие, согласно которому в сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы, за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Суд находит требование истца о взыскании неустойки, подлежащим удовлетворению, исходя из следующего:

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона N 35-ФЗ, пунктом 6 Правил N 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Закона N 35-ФЗ и пункты 16, 17 Правил N 861).

В таком виде договор о технологическом присоединении по всем своим существенным условиям соответствует договору возмездного оказания услуг; к правоотношениям сторон по договору технологического присоединения применяются помимо специальных норм положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также общие положения об обязательствах и о договоре (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации).

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (пункт 1 статьи 779 ГК РФ).

Неустойка, определение которой содержится в пункте 1 статьи 330 ГК РФ, выполняя обеспечительную функцию, вместе с тем является мерой ответственности и направлена на компенсацию возможных потерь кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением другой стороной своего обязательства.

В подпункте "в" пункта 16 Правил N 861 установлена неустойка за нарушение одной из сторон договора сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

Доказательств того, что между сторонами подписан акт технологического присоединения, в материалы дела не представлено, более того Заказчик отказался от исполнения договора.

Пунктом 5 договора от 03.04.2023 №24/23-25ТП/Д предусмотрено, что срок мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. мероприятия должны быть выполнены до 03.10.2023.   

Пунктами 7 и 9 договора предусмотрена возможность продления сроков действия технических условий. Ответчик не обращался к истцу за их продлением, мероприятий по присоединению не исполнял. Письмом от 03.10.2023 № 127  АО «Волгоградоблэлектро» обратилось к ООО «ПеровоСтрой» с уведомлением об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, и только спустя почти год 19.06.2024 ответчик подписал акты ввода в эксплуатацию приборов учета.

Согласно статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации взыскание неустойки является одним из способов защиты нарушенного гражданского права.

В силу статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков (статья 330 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 331 Гражданского кодекса Российской Федерации соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Проверив расчет, суд находит его математически верным, исковые требования подлежат удовлетворению.

Судебные расходы, в силу положений ст. 110 АПК РФ, относятся на ответчика.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 102, 110,  167-170  АПК РФ,  суд,          

 

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ПеровоСтрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 403113, 

<

...>) в пользу акционерного общества «Волгоградоблэлектро» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 400075, 

<

...>) 167 196,50 руб. неустойки, а также 6016 руб. расходов на оплату госпошлины. 

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок.

 

Судья                                                                                                                   Е.В. Моторина