АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

660049, 

<

...>, https://krasnoyarsk.arbitr.ru/  

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 Именем Российс кой Федерации 

14 августа 2025 года Дело № А33-13534/2025  

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края  

РЕШИЛ:

1. Удовлетворить исковые требования. 

2. Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу осуществить в соответствии с условиями договора № 20.2400.10859.23 от 24.11.2023 и техническими условиями № 8000579355 технологическое присоединение энергопринимающего устройства общества с ограниченной ответственностью «МИРАЖ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) на объекте – «Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание)» по адресу: 

<

...>, с кадастровым номером земельного участка 24:50:0700201:2996, с точкой (точками) присоединения на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты, с учетом следующих характеристик:  

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 150 кВт; - категория надежности третья; 

- класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ.  

Технологическое присоединение осуществить путем выполнения следующих мероприятий, предусмотренных разделом 10 технических условий № 8000579355:  

- обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.  

- требования по проектированию, строительству новых и реконструкции существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Сибирь»«Красноярскэнерго» для электроснабжения объектов заявителя: выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.  

- выполнить строительство 6 кВ от точки, указанной в пункте № 7 технических условий № 8000579355, до проектируемой ТП 6 кВ (пункт 10.2.2. технических условий № 8000579355). Протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом.  

Код доступа к материалам дела - 

- выполнить строительство ТП 6 кВ. Тип, мощность силовых трансформаторов определить проектом.  

- выполнить строительство ЛЭП 0,4 кВ от новой ТП до точки присоединения, находящейся не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы, установленной правоустанавливающими документами заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП определить проектом.  

- выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии в соответствии с требованиями «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» (утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442).  

3. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МИРАЖ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) неустойку по договору № 20.2400.10859.23 от 24.11.2023 в размере 50 813,73 руб. за период с 25.05.2024 по 14.08.2025 с последующим начислением неустойки за каждый день неисполнения обязательств с 15.08.2025 до полного исполнения обязательств по договору № 20.2400.10859.23 от 24.11.2023 в размере 0,25% от суммы 45 470,90 руб.  

4. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МИРАЖ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый календарный день неисполнения судебного решения по настоящему делу со дня, следующего за днем истечения установленного судом срока исполнения настоящего решения (в течение одного месяца со дня вступления настоящего решения в законную силу).  

5. Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «МИРАЖ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 60 000 руб.  

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.  

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.  

Судья В.В. Белов