Шестой арбитражный апелляционный суд 

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№06АП-4005/2023

28 сентября 2023 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 21 сентября 2023 года.Полный текст  постановления изготовлен 28 сентября 2023 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе:

председательствующего Брагиной Т.Г.

судей  Волковой М.О., Воронцова А.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

при участии  в заседании:

от КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» - ФИО2, представитель по доверенности от 23.01.2023; 

от ООО «Дальстрой ДВ» - ФИО3, представитель по доверенности от 07.07.2023; 

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Дальстрой ДВ»

на решение от 28.06.2023

по делу №А73-16343/2022

Арбитражного суда Хабаровского края

по иску общества с ограниченной ответственностью «Дальстрой ДВ» 

к краевому государственному казенному учреждению «Хабаровское управление автомобильных дорог» 

о взыскании 5 127 460 руб.

по объединённому делу № А73-3394/2023 

по иску общества с ограниченной ответственностью «Дальстрой ДВ» 

к краевому государственному казенному учреждению «Хабаровское управление автомобильных дорог» 

о признании контракта от 04.12.2019 №409 незаключенным

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Дальстрой ДВ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, далее - истец, ООО «Дальстрой ДВ») обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском, уточнённым в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к краевому государственному казенному учреждению «Хабаровское управление автомобильных дорог» (ОГРН1032700295451, ИНН 

<

***>, далее - ответчик, КГКУ «Хабаровскуправтодор»)  о  признании контракт от 04.12.2019 №409 на выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога «Подъезд к с. Васильевка» на участке км 7+543 – км 13+543 незаключенным в связи с несогласованием сторонами существенного условия о предмете контракта, а также взыскать денежные средства в размере 5 127 460 руб.

Определением суда от 14.03.2023  заявление принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу №А73-16343/2022.

Кроме того, ООО «Дальстрой ДВ» обратилось с иском о признании контракта от 04.12.2019 №409 на выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога «Подъезд к с. Васильевка» на участке км 7+543 – км 13+543» незаключенным в связи с несогласованием сторонами существенного условия о предмете контракта.

Определением суда от 14.03.2023  заявление принято к рассмотрению, возбуждено производство по делу №А73-3394/2023.

Определением суда от 18.04.2023 дела №№А73-16343/2022 и                          А73-3394/2023 объединены в одно производство для совместного рассмотрения, объединенному делу присвоен номер А73-16343/2022.

Решением суда от 28.06.2023 в удовлетворении требований отказано.

ООО «Дальстрой ДВ», не согласившись с принятым с по делу судебным актом,  обратилось в Шестой арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой,  ссылаясь на наличие оснований предусмотренных статьёй 270 АПК РФ, просит решение суда отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении требований истца.

КГКУ «Хабаровскуправтодор» с доводами жалобы не согласно по мотивам, изложенным в отзыве на нее, с учетом дополнений, считает, что жалоба удовлетворению не подлежит.

Законность и обоснованность принятого по делу решения проверены  судом апелляционной инстанции в порядке главы 34 АПК РФ.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, заслушав пояснения представителей сторон по делу, суд апелляционной инстанции оснований для отмены обжалуемого  судебного акта не установил.

Как следует из материалов дела, между  КГКУ «Хабаровскуправтодор» (заказчик)  и ООО «Дальстрой ДВ» (подрядчик)  заключен контракт  №409 от 04.12.2019.

Согласно пункту 1.1  предметом контракта является  «Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога «Подъезд к с. Васильевка» на участке км 7+543 – км 13-543».

По условиям пунктов 1.1, 1.2 контракта заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы в соответствии с Технической частью (Приложение 1), являющейся неотъемлемой частью контракта, а заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. Объем выполняемых работ установлен в Технической части. 

Цена контракта в соответствии с пунктом 2.1 контракта составляет          15 852 495 руб., в том числе НДС по налоговой ставке 20 %.

Местом выполнения работ является Российская Федерация, Хабаровский край, Бикинский муниципальный район (пункт 5.2 контракта). 

Выполнение обществом работ по контракту подтверждается актом о приемке выполненных работ (форма КС-2) от 15.12.2019 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) от 15.12.2019 №3.

Оплата работ КГКУ «Хабаровскуправтодор» произведена платежными поручениями от 12.12.2019 №788761, от 19.12.2019 №15688, от 30.12.2019                №249975 на общую  сумму 15 846 607 руб.

Ссылаясь на акт осмотра объекта ремонта «Автомобильная дорога «Подъезд к с. Васильевка на участке км 7+543 – км 13+543»,  проходящего по территории Бикинского муниципального района от 03.02.2020 и акт определения объема уложенной щебеночно-песчаной смеси по объекту ремонта «Автомобильная дорога «Подъезд к с. Васильевка на участке км 7+543 – км 13+543», проходящего по территории Бикинского муниципального района от 03.02.2020,  согласно которым  общая площадь покрытия составляет 72 765 м2, тогда как по условиям контракта - 48 330 м2,  истец  заявил требование о взыскании стоимости неучтенных контрактом  объёмов  и стоимости инертных материалов  использованных при производстве работ по контракту,  всего  на общую сумму 5 127 460 руб.

При рассмотрении спора по существу судом установлено, что согласно извещению о проведении электронного аукциона №0122200002519006804 объектом закупки является выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога «Подъезд к с. Васильевка» на участке км 7+543 – км 13+543». 

Приложением к извещению является проект контракта, включающий в себя Техническую часть, ведомость дефектов, сметную документацию, график выполнения строительно-монтажных работ и график оплаты строительно- монтажных работ. 

Согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона от 20.11.2019, ООО «Дальстрой ДВ» признано победителем.

Пунктом 1.3 Технической части установлены технические показатели: в соответствии с технической классификацией по ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования» автомобильная дорога «Подъезд к с. Васильевка» относится к дорогам обычного типа (не скоростная дорога). 

Сметой к контракту предусмотрены работы по устройству дорожной одежды: устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаной серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см, с применением готовой смеси CI, С2. 

Объем инертных материалов (щебеночно-песчаная смесь), подлежащих использованию при устройстве покрытия, определен в локальном сметном расчете №03-01-03 и составляет 5316,3 т,  сметой также определена стоимость как самих работ по ремонту, так и стоимость инертных материалов и стоимость  их перевозки. 

В процессе исполнения контракта у сторон отсутствовали разногласия относительно объема и стоимости выполненных работ, количества затраченных для производства работ материалов, а также порядка его исполнения.

Между сторонами подписано соглашение о расторжении контракта от 26.12.2019,  по условиям которого  стороны  претензий друг к другу не имеют (пункт 2.2), на момент заключения соглашения подрядчиком выполнены работы на сумму     15 846 607 руб., заказчиком произведена оплата в полном объеме, все обязательства сторон по контракту, за исключением гарантийных обязательств, прекращаются  с момента  подписания  соглашения (2.3, 2.4).

         Оценив представленные доказательств, исходя  из  установленного факта выполнения работ подрядчиком в объеме  и  по цене, согласованной сторонами, в том числе  при  подписании соглашения от  26.12.2019,  руководствуясь статьями  432, 709,  711,  743,  744, 746, 753, 763, 1102, 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд пришёл к выводу об отсутствии  оснований для удовлетворения  требований о взыскания стоимости дополнительных работ  и признания  контракта не заключенным.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с решением суда, считает необходимым дополнительно отметить, что, обращаясь с иском в суд о взыскании стоимости неучтенных строительных объемов и материалов, истец, в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представил доказательства приобретения инертных материалов, равно как  и выполнения дополнительного объема работ.

 По сути, позиция истца основана на принципе обратного счёта, однако, без документального подтверждения фактических затрат требования о взыскании  стоимости материалов и работ  удовлетворению не подлежат.

В  связи с чем  довод апелляционной жалобы  со ссылкой на отсутствие у суда  специальных познаний в области  строительства и ремонта дорог и, как следствие, неправомерности выводов, судом апелляционной инстанции не принимается.

Также несостоятельными являются доводы о не заключенности контракта,   после получения  в 2019 году оплаты по  контракту  и подписания соглашения об отсутствии взаимных претензий от 26.12.2019,  истец утратил право ссылаться на несогласованность существенных условий контракта,  поскольку такое поведение  противоречит его предшествующему поведению, что недопустимо.

Доводы, изложенные в апелляционной жалобе, рассмотрены судом апелляционной  инстанции в полном объеме и признаны несостоятельными в связи с вышеизложенным.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ основаниями для безусловной отмены судебного акта, при рассмотрении дела апелляционным судом не установлено.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ расходы по государственной пошлине за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на заявителя.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от  28.06.2023 по делу №А73-16343/2022 Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции.

Председательствующий

Т.Г. Брагина

Судьи

 М.О. Волкова

А.И. Воронцов