11111202_385842 

Арбитражный суд Липецкой области 

пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А36-6226/2020

г.Липецк

25 августа 2021 года

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Коровина А.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Нестеровой Е.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

областного казенного учреждения «Управление капитального строительства  Липецкой области» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место  нахождения): 

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «ДСУ-1» (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, адрес (место нахождения): 

<

...>)  

с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, временного управляющего общества с ограниченной  ответственностью «ДСУ-1» ФИО1,  

об устранении недостатков выполненных работ и взыскании 46 006 руб. 35 коп., 

при участии в судебном заседании: от истца – представитель не явился, от ответчика – представитель не явился, от третьего лица – представитель не явился, 

Руководствуясь статьями 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «ДСУ-1» (ОГРН  1194827003425, ИНН 4804006419) в течение тридцати календарных дней со дня  вступления решения в законную силу устранить следующие недостатки (дефекты)  выполненных работ на объекте: «Строительство ФАП с.Ольховка Добринского  района»:  

- просадку тротуарной плитки и бордюра на площадке с возможностью  проезда площадью 11,415 кв.м., тротуарной дорожке внеплощадочной территории  площадью 3 кв.м.;  

- просадку асфальтового покрытия в районе канализационных колодцев К-1  и фильтрующего колодца площадью 15,25 кв.м., асфальтового внеплощадочного  покрытия площадью 6,75 кв.м.;  

- просадку грунта на территории под озеленение площадью 40,0 кв.м.,  внеплощадочной территории площадью 35,0 кв.м.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДСУ-1» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу областного казенного учреждения  «Управление капитального строительства Липецкой области» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) неустойку (пеню) за период с 10.12.2019 по  28.02.2021 в размере 46 006 руб. 35 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ДСУ-1» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 8 000 руб.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд (г.Воронеж)  через Арбитражный суд Липецкой области.  

Судья А.А.Коровин