Шестой арбитражный апелляционный суд

улица Пушкина, дом 45, город Хабаровск, 680000, 

официальный сайт:  http://6aas.arbitr.ru

e-mail: info@6aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

№ 06АП-4305/2018

03 сентября 2018 года

г. Хабаровск

Резолютивная часть постановления объявлена 28 августа 2018 года.Шестой арбитражный апелляционный суд  в составе:

председательствующего судьи Тихоненко А.А.

судей                                          Волковой М.О., Гричановской Е.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Жуком Д.А.

при участии в заседании: в отсутствие представителей сторон,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «КоксоХимЭлектроМонтаж-Восток»

на решение от 28.06.2018

по делу № А73-21239/2017

Арбитражного суда Хабаровского края

принятое судьей Малашкиным Д.Л.

по иску Акционерного общества «Энергоремонт» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «КоксоХимЭлектроМонтаж- Восток» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)

о взыскании 11 450 158 руб. 62 коп.  

 

УСТАНОВИЛ:

Акционерное общество «Энергоремонт» (далее – АО «Энергоремонт», истец) обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «КоксоХимЭлектроМонтаж - Восток» (далее – ООО «КХЭМ-Восток», ответчик) о взыскании 11 450 158 руб. 62 коп. (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; далее – АПК РФ).

Требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязанности по оплате поставленного товара по договору поставки продукции № 2/Д от 26.02.2015.

Решением от 28.06.2018 иск удовлетворен: с ответчика взыскано в пользу истца – основной долг в размере 11 450 158 руб. 62 коп., в доход федерального бюджета – государственная пошлина в размере 80 251 руб. 

Не согласившись с принятым по делу судебным актом, ООО «КХЭМ-Восток» обратилось в Шестой арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит отменить решение от 28.06.2018 , принять новый судебный акт и прекратить производство по делу.

В обоснование жалобы приводит доводы о не полной оценке судом обстоятельств, имеющих значение для дела, а также имеющихся в  материалах дела доказательств, указывает на письмо от 18.10.2017 № 46/17, в котором ООО «КХЭМ-Восток» отказало истцу в подписании УПД № 0000581 от 24.08.2017 в связи с отсутствием факта поставки материалов в его адрес на сумму 14 509 505, 44 руб. 

Также указывает на отсутствие в материалах дела документов, предусмотренных условиями заключенного сторонами договора, подтверждающих факт поставки продукции (спецификации, товарно-сопроводительные документы, первичные документы, платежные требования, счета и счета-фактуры на отгруженную продукцию). Считает неисследованным судом таких юридически значимых фактов как формирование цены поставки, согласования цены и срока поставки.

Полагает, что настоящий иск следует рассматривать во взаимосвязи с находящимся в производстве Арбитражного суда Хабаровского края делом № А73-17834/2017 по иску ООО «КХЭМ-Восток» о взыскании с АО «Энергоремонт» задолженности в размере 30 395 538 руб. 30 коп., в противном случае удовлетворение требований АО «Энергоремонт» в рамках настоящего дела направлено на получение истцом необоснованной выгоды, что является прямым нарушением пункта 4 статьи 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ.

Указывает на нарушение судом норм процессуального права, а именно не разрешение судом первой инстанции вопроса о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины при принятии искового заявления к производству.

Определением Шестого арбитражного апелляционного суда от 30.07.2018 апелляционная жалоба принята к производству, судебное заседание назначено на 28.08.2018 на 09 часов 40 минут, информация об этом размещена публично на официальном сайте суда в сети интернет.

В отзыве на апелляционную жалобу истец выразил несогласие с изложенными в ней доводами, просил оставить принятый по делу судебный акт без изменения, жалобу – без удовлетворения.

Стороны, извещенные в соответствии с требованиями статей 121 - 123 АПК РФ, с учетом постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», в судебное заседание своих представителей не направили, от АО «Энергоремонт»  поступило ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы в отсутствие его представителя. 

Апелляционная жалоба рассмотрена в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие не явившихся участников процесса.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, доводы апелляционной жалобы, отзыва, апелляционный суд не усматривает оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Согласно материалам дела, 26.02.2015 между АО «Энергоремонт» (поставщик) и ООО «КХЭМ-Восток» (покупатель) заключен договор поставки № 2/Д, в соответствии с условиями которого поставщик обязался поставить продукцию производственно-технического назначения, а покупатель – принять и оплатить товар. 

Согласно пункту 3.1 договора, цена на продукцию является договорной и подлежит уплате в рублях Российской Федерации. 

В пункте 3.3 договора оговорено, что оплата производится покупателем в порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца.

Установлено, в период 2015 и 2016 годы  АО «Энергоремонт» передавало ООО «КХЭМ-Восток» строительные материалы для выполнения работ по договору субподряда № 14/0012 суб 01/02 от 10.02.2014. На переданные за определенный период строительные материалы АО «Энергоремонт» оформляло товарную накладную по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ. Передача материалов сторонами оформлялась как поставка в рамках договора поставки № 2/Д от 26.02.2015. Материалы выдавались уполномоченным лицам ответчика на основании накладных на перемещение, актов приема-передачи материалов в монтаж, требований. 

Так, АО «Энергоремонт» передало ООО «КХЭМ-Восток» товары (строительные материалы) на общую сумму 14 509 505 руб. 44 коп., что подтверждается следующими документами:

2. Накладная на перемещение №3435 от 05.09.2016г. 

3. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.09.2016г. 

4. Накладная на перемещение №1693 от 27.04.2016г. 

5. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 27.04.2016г. 

6. Накладная на перемещение №1694 от 27.04.2016г. 

7. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 27.04.2016г. 

8. Накладная на перемещение №1633 от 25.04.2016г. 

9. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 25.04.2016г. 

10. Накладная на перемещение №1876 от 11.05.2016г.

11. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 11.05.2016г. 

12. Накладная на перемещение №1297 от 25.03.2016г. 

13. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 24.03.2016г. - 2шт. 

14. Накладная на перемещение №3291 от 10.08.2016г. 

15. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 10.08.2016г. 

16. Накладная на перемещение №64 от 18.01.2016г. 

17. Накладная на перемещение №3294 от 13.08.2016г. 

18. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 13.08.2016г. 

19. Накладная на перемещение №4409 от 14.12.2016г. 

20. Накладная на перемещение №3287 от 15.12.2016г. 

21. Накладная на перемещение №3440 от 05.09.2016г.

 22. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.09.2016г. 

23. Накладная на перемещение №4295 от 03.11.2016г. 

24. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 03.11.2016г. 

25. Накладная на перемещение №3627 от 21.09.2016г. 

26. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 21.09.2016г. 

27. Накладная на перемещение №3475 от 06.09.2016г.

28. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 06.09.2016г.

29. Накладная на перемещение №4210 от 31.10.2016г. 

30. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 31.10.2016г. 

31. Накладная на перемещение №3629 от 16.09.2016г. 

32. Накладная на перемещение №3616 от 20.09.2016г. 

33. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 20.09.2016г. 

34. Накладная на перемещение №3730 от 30.09.2016г. 

35. Накладная на перемещение №3989 от 13.10.2016г. 

36. Накладная на перемещение №4155 от 25.10.2016г. 

37. Требование №1542 и требование №1546 от 08.09.2016г.

38. Товарно-транспортная накладная №6К от 02.08.2016г. 

39. Товарно-транспортная накладная №4К от 02.08.2016г. 

40. Товарно-транспортная накладная №5К от 02.08.2016г. 

41. Товарно-транспортная накладная №1К от 20.08.2016г.

 42. Товарно-транспортная накладная №2К от 20.08.2016г. 

43. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 20.08.2016г.

44. Товарно-транспортная накладная №4К от 20.08.2016г. 

45. Товарно-транспортная накладная №5К от 20.08.2016г.

46.Товарно-транспортная накладная №6К от 20.08.2016г. 

47. Товарно-транспортная накладная №7К от 20.08.2016г. 

48. Товарно-транспортная накладная №8К от 20.08.2016г.

49. Товарно-транспортная накладная №9-К от 20.08.2016г. 

50. Товарно-транспортная накладная №10-К от 20.08.2016г. 

51. Товарно-транспортная накладная №11-К от 20.08.2016г. 

52. Товарно-транспортная накладная №12-К от 20.08.2016г. 

53. Товарно-транспортная накладная №13-К от 20.08.2016г. 

54. Товарно-транспортная накладная №14-К от 20.08.2016г. 

55. Товарно-транспортная накладная №1К от 24.08.2016г. 

56. Товарно-транспортная накладная №2К от 24.08.2016г. 

57. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 24.08.2016г. 

58. Товарно-транспортная накладная №4К от 24.08.2016г. 

59. Товарно-транспортная накладная №1/1К от 24.08.2016г. 

60. Товарно-транспортная накладная №1/2К от 24.08.2016г. 

61. Товарно-транспортная накладная №1К от 26.08.2016г. 

62. Товарно-транспортная накладная №2К от 26.08.2016г. 

63. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 26.08.2016г. 

64. Товарно-транспортная накладная №4К от 29.08.2016г. 

65. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 29.08.2016г. 

66. Товарно-транспортная накладная №2К от 29.08.2016г. 

67. Товарно-транспортная накладная №1К от 29.08.2016г. 

68. Товарно-транспортная накладная №1К от 30.08.2016г. 

69. Товарно-транспортная накладная №2К от 02.08.2016г. 

70. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 02.08.2016г. 

71. Накладная на перемещение №4640 от 07.12.2016г. 

72. Накладная на перемещение №4308 от 07.11.2016г. 

73. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 07.11.2016г. 

74. Накладная на перемещение №4775 от 22.12.2016г. 

75. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 22.12.2016г. 

76. Накладная на перемещение №3907 от 10.10.2016г. 

77. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 10.10.2016г. 

78. Накладная на перемещение №3994 от 14.10.2016г. 

79. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 14.10.2016г. 

80. Накладная на перемещение №4139 от 15.10.2016г. 

81. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.10.2016г. 

82. Накладная б/н от 12.09.2016г. 

83. Накладная б/н и №91 от 12.09.2016г.

84. Накладная на перемещение №2420 от 21.06.2016г. 

85. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 21.06.2016г. 

86. Накладная на перемещение №1793 от 04.05.2016г. 

87. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 04.05.2016г. 

88. Накладная на перемещение №4910 от 29.12.2016г. 

89. Накладная на перемещение №3154 от 09.08.2016г. 

90. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 09.08.2016г. 

91. Накладная на перемещение №4668 от 09.12.2016г. 

92. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 09.12.2016г. 

93. Накладная на перемещение №3529 от 01.09.2016г. 

94. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.09.2016г. 

95. Накладная на перемещение №4489 от 22.11.2016г. 

96. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 22.11.2016г. 

97. Накладная на перемещение №4489 от 22.11.2016г. 

98. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 22.11.2016г. 

99. Накладная на перемещение №4530 от 25.11.2016г. 

100. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 25.11.2016г 

101. Накладная на перемещение №4373 от 14.12.2016г. 

102. Накладная на перемещение №4531 от 25.11.2016г. 

103. Накладная на перемещение №4530 от 25.11.2016г. 

104. Накладная на перемещение №4533 от 25.11.2016г. 

105. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 25.11.2016г. 

106. Накладная на перемещение №4669 от 09.12.2016г. 

107. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 09.12.2016г. 

108. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 28.12.2016г. 

109. Накладная на перемещение №4774 от 22.12.2016г. 

110. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 22.12.2016г. 

111. Накладная на перемещение №4911 от 29.12.2016г. 

112. Накладная на перемещение №4771 от 22.12.2016г. 

113. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 22.12.2016г. 

114. Накладная на перемещение №4635 от 06.12.2016г. 

115. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 06.12.2016г. 

116. Накладная на перемещение №4181 от 26.10.2016г. 

117. Товарно-транспортная накладная №Р-1 К от 28.03.2016г. 

118. Товарно-транспортная накладная №1-К от 29.03.2016г. 

119. Товарно-транспортная накладная №2-К от 29.03.2016г. 

120. Товарно-транспортная накладная №3-К от 29.03.2016г. 

121. Товарно-транспортная накладная №Р-2-К от 29.03.2016г. 

122. Товарно-транспортная накладная №Р-1-К от 30.03.2016г. 

123. Накладная на перемещение №002629 от 01.07.2016г. 

124. Накладная на перемещение №002628 от 01.07.2016г. 

125. Накладная на перемещение №002626 от 01.07.2016г. 

126. Накладная на перемещение №002624 от 01.07.2016г. 

127. Накладная на перемещение №2066 от 17.05.2016г. 

128. Накладная на перемещение №2065 от 11.05.2016г. 

129. Накладная на перемещение №2391 от 18.06.2016г. 

130. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 18.06.2016г. 

131. Накладная на перемещение №3675 от 27.09.2016г. 

132. Накладная на перемещение №4014 от 14.10.2016г. 

133. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 14.10.2016г. 

134. Накладная на перемещение №2745 от 01.07.2016г. 

135. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 16.06.2016г. 

136. Накладная на перемещение №3316 от 23.08.2016г. 

137. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 23.08.2016г. 

138. Накладная на перемещение №3723 от 30.09.2016г. 

139. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 30.09.2016г. 

140. Накладная на перемещение №3518 от 08.09.2016г. 

141. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 08.09.2016г. 

142. Накладная на перемещение №2855 от 21.07.2016г. 

143. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 21.07.2016г. 

144. Накладная на перемещение №284 от 01.02.2016г. 

145. Накладная на перемещение №1520 от 12.04.2016г. 

146. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 12.04.2016г. 

147. Накладная б/н от 20.08.2016г. 

148. Накладная б/н от 31.08.2016г. 

149. Накладная б/н от 19.08.2017г. и 23.08.2016г. 

150. Накладная б/н от 19.08.2016г. 

151. Накладная б/н от 16.08.2016г. 

152. Накладная б/н от 03.09.2016г. 

153. Накладная б/н от 06.09.2016г. 

154. Накладная б/н от 24.09.2016г. 

155. Накладная б/н от 23.09.2016г. 

156. Накладная б/н от 27.09.2016г. и 30.09.2016г. 

157. Накладная на перемещение №1695 от 27.04.2016г. 

158. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 27.04.2016г. 

159. Накладная на перемещение №1957 от 17.05.2016г. 

160. Накладная на перемещение №2015 от 20.05.2016г. 

161. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 20.05.2016г. 

162. Накладная на перемещение №2042 от 24.05.2016г. 

163. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 24.05.2016г. 

164. Накладная на перемещение №2740 от 01.07.2016г. 

165. Накладная б/н от 13.07.2016г. 

166. Накладная на перемещение №1633 от 25.04.2016г. 

167. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 25.04.2016г. 

168. Накладная на перемещение №2343 от 16.06.2016г. 

169. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 16.06.2016г. 

170. Накладная на перемещение №1794 от 05.05.2016г. 

171. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.05.2016г. 

172. Накладная на перемещение №2529 от 29.06.2016г. 

173. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 29.06.2016г. 

174. Накладная на перемещение №2536 от 01.06.2016г. 

175. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.06.2016г. 

176. Накладная на перемещение №3149 от 08.08.2016г. 

177. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 08.08.2016г. 

178. Накладная на перемещение №3238 от 12.08.2016г. 

179. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 12.08.2016г. 

180. Накладная на перемещение №1703 от 27.04.2016г. 

181. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 27.04.2016г. 

182. Накладная на перемещение №3723 от 30.09.2016г. 

183. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 30.09.2016г. 

184. Накладная на перемещение №2707 от 01.07.2016г. 

185. Накладная на перемещение №2709 от 01.07.2016г. 

186. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 27.07.2016г. 

187. Товарно-транспортная накладная №4К от 27.07.2016г. 

188. Товарно-транспортная накладная №1К от 03.08.2016г. 

189. Товарно-транспортная накладная №2К от 03.08.2016г. 

190. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 03.08.2016г. 

191. Товарно-транспортная накладная №4К от 03.08.2016г. 

192. Товарно-транспортная накладная №1К от 27.07.2016г.

193. Товарно-транспортная накладная №2К от 27.07.2016г. 

194. Товарно-транспортная накладная №1К от 12.08.2016г. 

195. Товарно-транспортная накладная №2К от 12.08.2016г. 

196. Товарно-транспортная накладная №1К от 15.08.2016г. 

197. Товарно-транспортная накладная №2К от 15.08.2016г. 

198. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 15.08.2016г. 

199. Товарно-транспортная накладная №1К от 16.08.2016г.

200. Товарно-транспортная накладная №2К от 16.08.2016г.

201. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 16.08.2016г. 

202. Товарно-транспортная накладная №4К от 16.08.2016г. 

203. Товарно-транспортная накладная №5К от 16.08.2016г.

204. Товарно-транспортная накладная №6К от 16.08.2016г. 

205. Товарно-транспортная накладная №7К от 16.08.2016г. 

206. Товарно-транспортная накладная №8К от 16.08.2016г. 

207. Товарно-транспортная накладная №9К от 16.08.2016г. 

208. Товарно-транспортная накладная №10К от 16.08.2016г. 

209. Товарно-транспортная накладная №1/1К от 16.08.2016г. 

210. Товарно-транспортная накладная №Р-1К от 19.04.2016г. 

211. Товарно-транспортная накладная №Р-2К от 19.04.2016г. 

212. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 19.04.2016г.

213. Товарно-транспортная накладная №2К от 19.04.2016г. 

214. Товарно-транспортная накладная №1К от 19.04.2016г. 

215. Товарно-транспортная накладная №1К от 19.08.2016г. 

216. Товарно-транспортная накладная №2К от 19.08.2016г. 

217. Товарно-транспортная накладная №4К от 19.08.2016г. 

218. Товарно-транспортная накладная №7К от 19.08.2016г. 

219. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 19.08.2016г. 

220. Товарно-транспортная накладная №6К от 19.08.2016г. 

221. Товарно-транспортная накладная №5К от 19.08.2016г. 

222. Накладная на перемещение №2536 от 01.06.2016г.

223. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.06.2016г. 

224. Накладная на перемещение №1703 от 27.04.2016г. 

225. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 27.04.2016г. 

226. Накладная на перемещение №1762 от 03.05.2016г. 

227. Накладная на перемещение №1700 от 27.04.2016г. 

228. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 22.04.2016г. 

229. Накладная на перемещение №3655 от 01.07.2016г. 

230. Накладная на перемещение №2311 от 15.06.2016г.

231. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.06.2016г. 

232. Накладная на перемещение №2309 от 15.06.2016г. 

233. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.06.2016г. 

234. Накладная на перемещение №2716 от 01.07.2016г. 

235. Накладная на перемещение №2715 от 01.07.2016г. 

236. Накладная на перемещение №2076 от 26.05.2016г. 

237. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 26.05.2016г. 

238. Накладная на перемещение №3932 от 11.10.2016г.

239. Накладная на перемещение №2382 от 18.06.2016г. 

240. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 21.06.2016г. 

241. Накладная на перемещение №2076 от 26.05.2016г

242. Накладная на перемещение №2420 от 21.06.2016г. 

243. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 18.06.2016г. 

244. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 11.10.2016г.

245. Накладная на перемещение №2157 от 01.06.2016г. 

246. Накладная на перемещение №2182 от 02.06.2016г. 

247. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 02.06.2016г. 

248. Накладная на перемещение №2031 от 24.05.2016г.

249. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 24.05.2016г. 

250. Накладная на перемещение №2134 от 31.05.2016г. 

251. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 31.05.2016г. 

252. Накладная на перемещение №2169 от 01.06.2016г.

253. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.06.2016г. 

254. Накладная на перемещение №2073 от 07.05.2016г.

255. Накладная на перемещение №2068 от 15.05.2016г. 

256. Накладная на перемещение №2070 от 04.05.2016г. 

257. Накладная на перемещение №2068 от 15.05.2016г.

258. Накладная на перемещение №2066 от 17.05.2016г. 

259. Накладная на перемещение №2858 от 02.07.2016г. 

260. Накладная на перемещение №1305 от 01.04.2016г. 

261. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.04.2016г. 

262. Накладная на перемещение №4272 от 01.12.2016г. 

263. Накладная на перемещение №4854 от 29.12.2016г. 

264. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 29.12.2016г. 

265. Накладная на перемещение №3601 от 05.09.2016г. 

266. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.09.2016г. 

267. Накладная на перемещение №2190 от 03.06.2016г. 

268. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 03.06.2016г. 

269. Накладная на перемещение №2790 от 14.07.2016г. 

270. Накладная на перемещение №2710 от 01.07.2016г. 

271. Товарно-транспортная накладная №1К от 24.06.2016г.

272. Товарно-транспортная накладная №Р-1К от 24.06.2016г. 

273. Накладная на перемещение №002625 от 01.07.2016г.

274. Накладная на перемещение №002621 от 01.07.2016г. 

275. Накладная на перемещение №2039 от 24.05.2016г. 

276. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 24.05.2016г. 

277. Накладная на перемещение №2858 от 02.07.2016г. 

278. Накладная на перемещение №2500 от 17.06.2016г. 

279. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.06.2016г. 

280. Накладная на перемещение №4657 от 08.12.2016г. 

281. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 08.12.2016г. 

282. Накладная на перемещение №2815 от 15.07.2016г. 

283. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.07.2016г.

284. Накладная на перемещение №3617 от 20.09.2016г. 

285. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 20.09.2016г. 

286. Накладная на перемещение №1857 от 10.05.2016г. 

287. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 10.05.2016г. 

288. Накладная на перемещение №1589 от 02.11.2015г. 

289. Накладная на перемещение №107 от 24.01.2017г.

290. Накладная на перемещение №2747 от 01.07.2016г. 

291. Накладная на перемещение №4628 от 01.12.2016г. 

292. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.12.2016г. 

293. Накладная на перемещение №3621 от 21.09.2016г. 

294. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 21.09.2016г.

295. Накладная на перемещение №3297 от 10.08.2016г. 

296. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 10.08.2016г.

297. Накладная на перемещение №2809 от 18.07.2016г. 

298. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 18.07.2016г.

299. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 17.03.2015г. 

300. Накладная на перемещение №3238 от 12.08.2016г. 

301. Накладная на перемещение №3149 от 08.08.2016г. 

302. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 08.08.2016г. 

303. Накладная на перемещение №3317 от 18.08.2016г. 

304. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 18.08.2016г. 

305. Накладная на перемещение №3428 от 05.09.2016г. 

306. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.09.2016г. 

307. Накладная на перемещение №1488 от 14.04.2016г. 

308. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 14.04.2016г.

309. Требование №1647 от 16.09.2016г. 

310. Требование№1646 от 16.09.2016г. 

311. Требование №1576, №1580, от 12.09.2016г. 

312. Требование №1577, №1581, от 12.09.2016г.

313. Требование №1556, №1560, №1564 от 09.09.2016г. 

314. Требование №1562от 09.09.2016г.

315. Требование №1531, №1532, №1534 от 07.09.2016г. 

316. Требование №1538, №1536, от 07.09.2016г.

317. Требование №1537, №1535, №1533 от 07.09.2016г. 

318. Требование №1489, №1488, от 03.09.2016г. 

319. Требование №988 от 29.06.2016г. 

320. Требование №1572 от 10.09.2016г. 

321. Накладная б/н от 06.09.2016г. 

322. Требование №1051 от 02.07.2016г.

323. Требование №1023, №1029, №1030 от 02.07.2016г. 

324. Требование №1026, №1024, №1022 от 02.07.2016г.

325. Требование №1028, №1027, №1025 от 02.07.2016г. 

326. Товарно-транспортная накладная №5/1-К от 25.03.2016г. 

327. Товарно-транспортная накладная №4/1-К от 25.03.2016г. 

328. Товарно-транспортная накладная №3/1-К от 25.03.2016г. 

329. Товарно-транспортная накладная №2/1-К от 25.03.2016г.

330. Товарно-транспортная накладная №1/1-К от 25.03.2016г.  

331. Товарно-транспортная накладная №1К от 31.08.2016г. 

332. Товарно-транспортная накладная №2К от 31.08.2016г. 

333. Товарно-транспортная накладная №ЗК от 31.08.2016г.

334. Товарно-транспортная накладная №4К от 31.08.2016г. 

335. Накладная на перемещение №3428 от 05.09.2016г. 

336. Накладная на перемещение №3476 от 03.09.2016г.

337. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 03.09.2016г. 

338. Накладная на перемещение №1876 от 11.05.2016г. 

339. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 11.05.2016г. 

340. Накладная на перемещение №2441 от 24.06.2016г. 

341. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 24.06.2016г. 

342. Накладная на перемещение №1699 от 27.04.2016г.

343. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 26.04.2016г. 

344. Накладная на перемещение №4210 от 31.10.2016г. 

345. Товарно-транспортная накладная №Р-1К от 05.07.2016г. 

346. Товарно-транспортная накладная №Р-1К от 08.07.2016г. 

347. Накладная на перемещение №2072 от 06.05.2016г. 

348. Накладная на перемещение №2069 от 14.05.2016г. 

349. Накладная на перемещение №2712 от 01.07.2016г. 

350. Накладная на перемещение №002627 от 01.07.2016г. 

351. Накладная на перемещение №2074 от 08.05.2016г. 

352. Накладная на перемещение №2071 от 19.05.2016г.

353. Накладная на перемещение №002620 от 01.07.2016г. 

354. Товарно-транспортная накладная №2-К от 03.06.2016г. 

355. Товарно-транспортная накладная №1-К от 03.06.2016г.

356. Товарно-транспортная накладная №3-К от 03.06.2016г. 

357. Товарно-транспортная накладная №1К от 18.04.2016г. 

358. Накладная на перемещение №2709 от 01.07.2016г. 

359. Накладная на перемещение №2713 от 01.07.2016г. 

360. Накладная на перемещение №002706 от 01.07.2016г. 

361. Накладная на перемещение №2065 от 11.05.2016г. 

362. Накладная на перемещение №1317 от 04.04.2016г. 

363. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 04.04.2016г. 

364. Накладная на перемещение №1696 от 27.04.2016г. 

365. Накладная на перемещение №4155 от 25.10.2016г.

366. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 25.10.2016г. 

367. Накладная на перемещение №1368 от 05.04.2016г. 

368. Накладная на перемещение №3287 от 15.12.2016г. 

369. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.12.2016г. 

370. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.04.2016г.

371. Накладная на перемещение №3989 от 13.10.2016г. 

372. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 13.10.2016г. 

373. Накладная на перемещение №1635 от 16.10.2016г. 

374. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 16.10.2016г. 

375. Накладная на перемещение №1303 от 01.07.2016г.

376. Накладная на перемещение №3122 от 04.08.2016г. 

377. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 04.08.2016г.

378. Накладная б/н от 13.08.2016г. 

379. Накладная на перемещение №2310 от 15.06.2016г. 

380. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 15.06.2016г. 

381. Накладная на перемещение №4638 от 01.12.2016г. 

382. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 01.12.2016г. 

383. Накладная на перемещение №4842 от 29.12.2016г. 

384. Накладная б/н от 05.10.2016г. 385. Накладная б/н от 20.09.2016г.

386. Накладная на перемещение №4837 от 29.12.2016г. 

387. Накладная на перемещение №116 от 09.01.2017г. 

388. Накладная на перемещение №1983 от 19.05.2016г. 

389. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 12.05.2016г. 

390. Накладная на перемещение №3137 от 05.08.2016г. 

391. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.08.2016г. 

392. Накладная на перемещение №4180 от 26.10.2016г. 

393. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 05.08.2016г. 

394. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 26.10.2016г. 

395. Накладная на перемещение №3291 от 10.08.2016г. 

396. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 10.08.2016г. 

397. Накладная на перемещение №1099 от 12.09.2015г.

398. Накладная на перемещение №3534 от 13.09.2016г.

399. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 13.09.2016г. 

400. Накладная на перемещение №3425 от 05.09.2016г. 

401. Накладная на перемещение №2861 от 21.07.2016г. 

402. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 21.07.2016г. 

403. Накладная на перемещение №4853 от 29.12.2016г.

 404. Накладная на перемещение №3995 от 13.10.2016г.

405. Акт приема-передачи материалов в монтаж от 13.10.2016г. 

406. Требование №986, №987, №988 от 29.06.2016г. 

407. Требование №988 от 29.06.2016г. 

408. Накладная на перемещение №2075 от 30.05.2016г.

409. Накладная №033 от 30 марта 2015г. 

410. Накладная б/н от 30 марта 2016г.

 Истцом был оформлен универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 581 от 24.08.2017 на сумму 14 509 505 руб. 44 коп. и направлен  письмом исх. № 1836 от 06.10.2017 в адрес ООО «КХЭМ-Восток» для подписания и оплаты. 

Письмом исх. № 46/17 от 18.10.2017 ООО «КХЭМ-Восток» сообщило об отказе в подписании УПД № 581 от 24.08.2017. 

АО «Энергоремонт» обратилось к ответчику с претензией исх. № 012/2179 от 07.11.2017  об оплате задолженности за поставленный товар в размере 14 509 505 руб. 44 коп. 

Оставление претензии без ответа и удовлетворения послужило основанием для обращения АО «Энергоремонт» с настоящим иском (с учетом принятого судом уточнения иска) в арбитражный суд.

Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам. 

Правоотношения сторон квалифицированы судом первой инстанции  главой 30 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и общими положениями ГК РФ об обязательствах. 

В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Согласно пункту 1 статьи 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями. 

Пунктом 1 статьи 486 ГК РФ предусмотрено, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. 

В ходе рассмотрения настоящего спора, принимая во внимание возражения ответчика по некоторым позициям,  истец уточнился в исковых требованиях, уменьшив их размер до 11 450 158 руб. 62 коп., исходя из следующих позиций по УПД № 581 от 24.08.2017, подтверждаемых первичными документами о передаче товаров:

N п/п по УПД

Наименование товара

Стоимость по УПД

Документ о передаче товара

 

   1

Арматура 10 A III прутки 25Г2С ГОСТ 5781-82

99 317,00

1. Накладная на перемещение N 2443

от 20.06.2016 г.;

2. Накладная на перемещение N 3435

05.09.2016 г.

   2

Цемент М400 50 кг

80 757,60

8. Накладная на перемещение N 1633

от 25.04.2016 г.;

6. Накладная на перемещение N 1694

от 27.04.2016 г.;

10. Накладная на перемещение N 1876 от 11.05.2016 г.

3

Цемент ПЦ-400/50 кг

30 360,00

12. Накладная на перемещение N 1297 от 25.03.2016 г.

4

Профиль вертикальный СТАФФ ПВ 20x20x65 Зм

53 988,38

14. Накладная на перемещение N 3291 от 10.08.2016 г.

5

ФИО1 "СТАФФ" нерж. 10 мм

99,99

14. Накладная на перемещение N 3291 от 10.08.2016 г.;

16. Накладная на перемещение N 64

от 18.01.2016 г.

6

Заклепка вытяжная 4,0*10,0 мм нерж. сталь

33 847,33

14. Накладная на перемещение N 3291 от 10.08.2016 г.

7

Дюбель фасадный универсальный S-UF 10x80 HEX

29 476,53

14. Накладная на перемещение N 3291 от 10.08.2016 г.

8

Гидротэкс-В 25 кг (водоостанавливающий)

7 788,35

17. Накладная на перемещение N 3294 от 13.08.2016 г.

9

Албес белый 3,7

4 162,42

19. Накладная на перемещение N 4409 от 14.12.2016 г.

10

Албес белый 0,6

4 042,94

19. Накладная на перемещение N 4409 от 14.12.2016 г.

11

Угол пристенный PL 19x19 белый 3м

1 320,66

19. Накладная на перемещение N 4409 от 14.12.2016 г.

12

Подвес-евро

2 595,78

20. Накладная на перемещение N 3287 от 15.12.2016 г.

13

ТЕФОНД Плюс 2,07x20м

53 109,65

21. Накладная на перемещение N 3440 от 05.09.2016 г.

14

Кисть радиаторная угловая

1 214,40

23 Накладная на перемещение N 4295 от 03.11.2016 г.

15

Ворота сварные 2000x6000 зеленые

71 625,31

25. Накладная на перемещение N 3627 от 21.09.2016 г.

16

Плита минераловатная 1200*600*50 мм

19 130,85

27. Накладная на перемещение N 3475 от 06.09.2016 г.

17

Дюбель для изоляции Партнер-ДВ 10x160 IZO

6 130,98

29. Накладная на перемещение N 4210 от 31.10.2016 г.

18

Шпатлевка гипсовая 20 кг

3 286,97

31. Накладная на перемещение N 3629 от 16.09.2016 г.

19

Столб круглого сечения Д=60мм высота 2500мм

951,78

32. Накладная на перемещение N 3616 от 20.09.2016 г.

20

Сетка панель 2500*2035, 5мм, 4 ребра

84 026,36

32. Накладная на перемещение N 3616 от 20.09.2016 г.

21

Калитка 2000*900 с засовом (фланец 240*186мм)

9 310,40

32. Накладная на перемещение N 3616 от 20.09.2016 г.

22

Столб круглого сечения Д=60мм высота 2100мм

46 724,04

32. Накладная на перемещение N 3616 от 20.09.2016 г.

23

ГКЛВ 2500*1200*12,5

532,31

34. Накладная на перемещение N 3730 от 30.09.2016 г.

24

Профиль направляющий ППН 28x27x0,5

376,47

34. Накладная на перемещение N 3730 от 30.09.2016 г.

25

ГВЛВ 2500*1200*10

14 967,48

34. Накладная на перемещение N 3730 от 30.09.2016 г.

26

Шпатлевка гипсовая финишная

25 кг

7 691,20

34. Накладная на перемещение N 3730 от 30.09.2016 г.

27

Кафель стеновой Юнона желтая 200x300

20 329,06

35. Накладная на перемещение N 3989 от 13.10.2016 г.

28

Кафель стеновой Белая премиум 200x300

13 236,96

36. Накладная на перемещение N 4155 от 25.10.2016 г.

30

Эмаль ПФ-115 белая 25 кг

25 050,03

34. Накладная на перемещение N 3730 от 30.09.2016 г.

31

Смесь сухая ремонтная MasterFlow мешок 30 кг

309 124,38

Акт приема-передачи оборудования в монтаж Nб/н от 17.03.2015

33

Отвод крутоизогнутый 159*8

53 682,56

392. Накладная на перемещение N 4180 от 26.10.2016 г.

34

Краска огнезащитная Defender (25 кг)

814 786,50

72. Накладная на перемещение N 4308 от 07.11.2016 г.;

114. Накладная на перемещение N 04635 от 06.12.2016 г.;

71. Накладная на перемещение N 4640 от 07.12.2016 г.;

74. Накладная на перемещение N 4775 от 22.12.2016 г.

35

Профнастил НС-21 1051 (1000) (6000*0,7мм RAL5005 (синий))

57 380,39

76. Накладная на перемещение N 3907 от 10.10.2016 г.

37

Отвод крутоизогнутый 159*4,5

15 081,23

78. Накладная на перемещение N 3994 от 14.10.2016 г.

38

Дюбель для изоляции 10x90

2 433,86

80. Накладная на перемещение N 4139 от 15.10.2016 г.

40

Профиль вертикальный ПВ 20x20x65x3000

73 835,81

23. Накладная на перемещение N 4295 от 03.11.2016 г.

41

Кафель стеновой Вечер-1 200x300

4 796,18

36. Накладная на перемещение N 4155 от 25.10.2016 г.

42

Техноэласт Фикс ЭПМ

395 423,84

29. Накладная на перемещение N"4210 от 31.10.2016 г.

43

Пленка гидро-ветрозащитная 1600*31250 80 г/м2 50м2

3 213,13

29. Накладная на перемещение N 84210 от 31.10.2016 г.

44

ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ (6 плит) 1200x600x50мм

22 618,01

29. Накладная на перемещение N 4210 от 31.10.2016 г.

45

Профиль горизонтальный ПГ 40*40 Зм

5 768,46

23. Накладная на перемещение N 4295 от 03.11.2016 г.

46

Пена монтажная Момент 65 л 850 мл всесезон. проф

10 055,30

23. Накладная на перемещение N 4295 от 03.11.2016 г.

47

Шайба плоская оцинк. 20,0 (25 кг)

3 749,66

86. Накладная на перемещение N 1793 от 04.05.2016 г.

48

Подвес Евро

147,71

19. Накладная на перемещение N 4409 от 14.12.2016 г.

49

Техноэласт ЭКП сланец серый

517 995,29

84. Накладная на перемещение N 2420 от 21.06.2016 г.;

89. Накладная на перемещение N 3154 от 09.08.2016 г.;

91. Накладная на перемещение N 4668 от 09.12.2016 г.

50

Профнастил С-21 0,7 мм

71 967,77

336. Накладная на перемещение N 3476 от 03.09.2016 г.

51

Шпатлевка Старатели КР 20 кг

80 707,30

93. Накладная на перемещение N 3529 от 01.09.2016 г.

52

Шуруп 5,5*19 синий

2 833,59

95. Накладная на перемещение N 4489 от 22.11.2016 г.

53

клей плиточный "Стандарт"

1 933,97

97. Накладная на перемещение N 4485 от 22.11.2016 г.

54

Отвод крутоизогнутый 57*3

1 159,83

97. Накладная на перемещение N 4485 от 22.11.2016 г.

55

Плита BAJKAL (20 шт. /уп)

35 703,35

101. Накладная на перемещение N 4373 от 14.12.2016 г.

56

Плинтус Идеал орех миланский 2,5м

1 190,10

104. Накладная на перемещение N 4533 от 25.11.2016 г.

57

Арзамит - 5 порошок

37 436,92

106. Накладная на перемещение N 4669 от 09.12.2016 г.

58

Арзамит - 5 раствор

56 037,15

106. Накладная на 

перемещение N 4669 от 09.12.2016 г.

59

Плитка к/у ТКШ ПС-8-35

119 893,19

106. Накладная на перемещение N 4669 от 09.12.2016 г.

60

Подвес Евро (1,5 м)

288,39

19. Накладная на перемещение N 4409 от 14.12.2016 г.

61

Линолеум Acczent Mineral Pro 100011 / 3

43 091,54

Акт приема-передачи оборудования в монтаж Nб/н от 28.12.2016

62

Техноруф В60 1200*600*30 мм 5 плит

415 244,54

109. Накладная на перемещение N 4774 от 22.12.2016 г.

63

Профнастил С-44 1035 (980)х6000х0,7мм (5005 синий)

2 906,45

111. Накладная на перемещение N 4911 от 29.12.2016 г.

64

OSB-3 Kronospan 1220x2440x22

11 759,44

112. Накладная на перемещение N 4771 от 22.12.2016 г.

65

Линолеум Зм Идеал

4 871,23

114. Накладная на перемещение N 4635 от 06.12.2016 г.

66

Плинтус

425,06

116. Накладная на перемещение N 4181 от 26.10.2016 г.

68

Бетонная смесь тяжелого бетона В 20 ПЗ F200 W6 ГОСТ 7473-2010

252 714,11

128. Накладная на перемещение N 2065 от 11.05.2016 г.;

127. Накладная на перемещение N 2066 от 17.05.2016 г.;

174. Накладная на перемещение N 2536 от 01.06.2016 г.;

126. Накладная на перемещение N 002624 от 01.07.2016 г.;

125. Накладная на перемещение N 002626 от 01.07.2016 г.;

124. Накладная на перемещение N 002628 от 01.07.2016 г.;

123. Накладная на перемещение N 002629 от 01.07.2016 г.;

184. Накладная на перемещение N 2707 от 01.07.2016 г.;

185. Накладная на перемещение N 2709 от 01.07.2016

69

Труба 159x4,5 ГОСТ 10705-80 ст. 20

121 170,63

129. Накладная на перемещение N 2391 от 18.06.2016 г.

70

Краска ВД 14 кг

33 200,00

134. Накладная на перемещение N 2745 от 01.07.2016 г.;

136. Накладная на перемещение N 3316 от 23.08.2016 г.;

140. Накладная на перемещение N 3518 от 08.09.2016 г.;

131. Накладная на перемещение N 3675 от 27.09.2016 г.;

138. Накладная на перемещение N 3723 от 30.09.2016 г.;

132. Накладная на перемещение N 4014 от 14 10 2016 г.

71

АЛЬФАПОЛ ШТ-1/25 кг

2 449,05

142. Накладная на перемещение N 2855 от 21.07.2016 г.

72

Бишофит отвердитель 210ж/200л

8 568,10

142. Накладная на перемещение N 2855 от 21.07.2016 г.

73

Щебень 40*70

37 889,27

145. Накладная на перемещение N 1520 от 12.04.2016 г.

75

Песок из отсевов дробления

333 231,37

145. Накладная на перемещение N 1520 от 12.04.2016 г.;

157. Накладная на перемещение N 1695 от 27.04.2016 г.;

159. Накладная на перемещение N 1957 от 17.05.2016 г.;

164. Накладная на перемещение N 2740 от 01.07.2016 г.;

160. Накладная на перемещение N 2015 от 20.05.2016 г.;

162. Накладная на перемещение N 2042 от 24.05.2016 г.

76

Профиль 27x60

13 115,52

142. Накладная на перемещение N 2855 от 21.07.2016 г.

77

Грунтовка интерьерная акриловая GOLexpert (Юл)

2 149,48

367. Накладная на перемещение N 1368 от 05.04.2016 г.

79

Гипсокартон 1200x2500x12,5мм

3 643,31

8. Накладная на перемещение N 1633 от 25.04.2016 г.

80

Профиль стеновой ПС 100*50 Зм

9 172,96

8. Накладная на перемещение N 1633 от 25.04.2016 г.

81

Комплект уголков "Идеал" Орех миланский

331,93

104. Накладная на перемещение N 4533 от 25.11.2016 г.

82

Цемент М400 (50 кг)

8 500,99

284. Накладная на перемещение N 3617 от 20.09.2016 г.

83

Стеклообои Рогожка средняя "GlassBand"1x25M 80гр/м2

8 288,32

114. Накладная на перемещение N 4635 от 06 12.2016 г.

84

Клей обойный д/стеклооб. Quelyd, 500 г.

1 786,16

114. Накладная на перемещение N 4635 от 06.12.2016 г.

85

Штукатурка гипсовая СТАРАТЕЛИ 30 кг

29 321,89

180. Накладная на перемещение N 1703 от 27.04.2016 г.;

170. Накладная на перемещение N 1794 от 05.05.2016 г.;

168. Накладная на перемещение N 2343 от 16.06.2016 г.;

84. Накладная на перемещение N 2420 от 21.06.2016 г.;

172. Накладная на перемещение N 2529 от 29.06.2016 г.;

93. Накладная на перемещение N 3529 от 01.09.2016 г.

86

Шпатлевка КР СТАРАТЕЛИ 20 кг финишная

20 953,65

180. Накладная на перемещение N 1703 от 27.04.2016 г.

87

Сетка арматурная сварочная 100x100/2,0хЗ,0/ВР-14 (с.)ТУ

5 683.70

226. Накладная на перемещение N 1762 от 03.05.2016 г.

88

Колер Palizh MIX 006 желтый кукурузный 0,02л

829.82

227. Накладная на перемещение N 1700 от 27.04.2016 г.

89

Палиж Грунтовка интерьерная акриловая (Юл)

3 582,48

227. Накладная на перемещение N 1700 от 27.04.2016 г.

90

Отсев дробления

205 639,01

232. Накладная на перемещение N 2309 от 15.06.2016 г.;

230. Накладная на перемещение N"2311 от 15.06.2016 г.;

234. Накладная на перемещение N 2716 от 01.07.2016 г.;

229. Накладная на перемещение N 3655 от 01.07.2016 г.

91

Раствор М-150

3 090,50

235. Накладная на перемещение N 2715 от 01.07.2016 г.

92

Шпатлевка КР СТАРАТЕЛИ 20 кг финишная

54 711,18

275. Накладная на перемещение N 2039 от 24.05.2016 г.;

236. Накладная на перемещение N 2076 от 26.05.2016 г.;

239. Накладная на перемещение N 2382 от 18.06.2016 г.;

84. Накладная на перемещение N 2420 от 21.06.2016г

93

Цемент М400 (50 кг)

63 332,35

245. Накладная на перемещение N 2157 от 01.06.2016 г.;

246.Накладная на перемещение N 2182 от 02.06.2016 г.;

84. Накладная на перемещение N 2420 от 21.06.2016 г.;

297. Накладная на перемещение N 2809 от 18 07.2016 г.

94

Краска огнезащитная Defender

868 293,70

248. Накладная на перемещение N 2031 от 24.05.2016 г.;

236. Накладная на перемещение N 2076 от 26.05.2016 г.;

250. Накладная на перемещение N 2134 от 31.05.2016 г.;

252. Накладная на перемещение N 2169 от 01.06.2016 г.

95

Бетонная смесь тяжелого бетона В22.5 ПЗ F200 W6

787 311,05

12 Л Накладная на перемещение N 2066 от 17.05.2016 г.;

255. Накладная на перемещение N 2068 от 15.05.2016 г.;

254. Накладная на перемещение N 2073 от 07.05.2016 г.;

174. Накладная на перемещение N 2536 от 01 06 2016 г.

96

ТЕФОНД рулон 2,07x20м

6 940,14

142. Накладная на перемещение N 2855 от 21.07.2016 г.-

97

Поддон

43 212,38

260. Накладная на перемещение N 1305 от 01 04.2016 г.;

259. Накладная на перемещение N 2858 от 02.07.2016 г.;

142. Накладная на перемещение N 2855 от 21.07.2016 г.;

265. Накладная на перемещение N 3601 от 05.09.2016 г.;

238. Накладная на перемещение N 3932 от 11.10.2016 г.;

262. Накладная на перемещение N 4272 от 01.12.2016 г.;

263. Накладная на перемещение N 4854 от 29.12.2016 г.

98

сетка арматурная сварочная 100x100/1,0х2,0/ВР-15 (с.)ТУ

89 583,78

267. Накладная на перемещение N 2190 от 03.06.2016 г.

99

сетка арматурная сварная 100x100/1,0х2,0/ВР ф 4ТУ21

16 350,94

269. Накладная на перемещение N 2790 от 14.07.2016 г.;

142. Накладная на перемещение N 2855 от 21.07.2016 г.

100

Краска интерьерная строительная акриловая 14 кг

35 381,56

168. Накладная на перемещение N 2343 от 16.06.2016 г.;

84. Накладная на перемещение N 2420 от 21.06.2016 г.

101

сетка арматурная сварочная 100x100/1,0х2,0/ВР-15 (с.)ТУ

16 829,98

142. Накладная на перемещение N 2855 от 21.07.2016 г.

102

Герметик Сазиласт-24 Снежинка полиуретан (16,5 кг) белый

11 271,47

131. Накладная на перемещение N 3675 от 27.09.2016 г.

103

Раствор М-100

41 779,14

174. Накладная на перемещение N 2536 от 01.06.2016 г.;

353. Накладная на перемещение N 002620 от 01.07.2016 г.;

274. Накладная на перемещение N 002621 от 01.07.2016 г.;

273. Накладная на перемещение N 002625 от 01.07.2016 г.;

270. Накладная на перемещение N 2710 от 01.07.2016 г.

104

Кронштейн КР 100*50*50*2,0

3 489,51

14. Накладная на перемещение N 3291 от 10.08.2016 г.

105

Кирпич М-150

369 729,08

260. Накладная на перемещение N 1305 от 01.04.2016 г.;

84. Накладная на перемещение N 2420 от 21.06.2016 г.;

142. Накладная на перемещение N 2855 от 21.07.2016 г.;

265. Накладная на перемещение N 3601 от 05.09.2016 г.;

238. Накладная на перемещение N 3932 от 11.10.2016 г.;

262. Накладная на перемещение N 4272 от 01.12.2016 г.;

263. Накладная на перемещение N 4854 от 29.12.2016 г.

106

Щебень 5*10

17811,14

278. Накладная на перемещение N"2500 от 17.06.2016 г.

107

Сетка арматурная сварная 100x100/1,0x2,0/ ВР-1,5

79 035,24

305. Накладная на перемещение N"3428 от 05.09.2016 г.

108

АЛЬФАПОЛ АМШ/25 кг

1 426,93

142. Накладная на перемещение N 2855 от 21.07.2016 г.

109

АЛЬФАГРУНТ концентрат/10л

6 462,65

280. Накладная на перемещение N"4657 от 08.12.2016 г.

110

Соединитель желоба д 140

200.38

282. Накладная на перемещение N 2815 от 15.07.2016 г.

111

Медная лента 801

1 443,63

284. Накладная на перемещение N"3617 от 20.09.2016 г.

112

Штукатурка гипсовая 30 кг

17 487,37

307. Накладная на перемещение N"1488 от 14.04.2016 г.;

286. Накладная на перемещение N 1857 от 10.05.2016 г.;

275. Накладная на перемещение N 2039 от 24.05.2016 г.;

172. Накладная на перемещение N"2529 от 29.06.2016 г.

113

Свая С 50-35-3

154289,48

288. Накладная на перемещение N 1589 от 02.11.2015 г.

114

Свая С 90.35-11

34 449,49

288. Накладная на перемещение N 1589 от 02.11.2015 г.

115

Плита дорожная ПД 6

138847,36

289. Накладная на перемещение N 107 от 24.01.2017 г.

118

Бетон ВЗО с ПФМ

170461,07

Накладная на перемещение N 2747

от 01.07.2016

119

Портландцемент марки ПЦ-400-Д20 50 кг

11 415,21

293. Накладная на перемещение N 3621 от 21.09.2016 г.

120

Шпатлевка Старатели финишная КР-20 кг

28 639,54

29. Накладная на перемещение N 4210 от 31.10.2016 г.

121

Сетка арматурная сварная 100x100/1,0х2,0/ВР 15 ТУ 21

93 952,33

295. Накладная на перемещение N 3297 от 10.08.2016 г.;

303. Накладная на перемещение N 3317 от 18.08.2016 г.

122

Пластина полиизобутиленовая

ПСГ-2.5

244 425,45

297. Накладная на перемещение N 2809 от 18.07.2016 г.;

106. Накладная на перемещение N 4669 от 09.12.2016 г.

124

Смесь сухая ремонтная MasterFlow@928 (мешок 30 кг)

103 667,25

Акт приема-передачи оборудования в монтаж Nб/н от 17.03.2015

127

сетка арматурная сварная 100х100/2,0хЗ,0/ВР-1 5 (с.) ТУ 21

14 174,77

303. Накладная на перемещение N 3317 от 18.08.2016 г.

128

Профиль 27/28 Зм

3 697,66

142. Накладная на перемещение N 2855 от 21.07.2016 г.;

176. Накладная на перемещение N 3149 от 08.08.2016 г.;

178. Накладная на перемещение N 3238 от 12.08.2016 г.

129

Плитка керамическая 200*300

6 193,51

176. Накладная на перемещение N 3149 от 08.08.2016 г.

131

Краска В/Д Интерьерная 14 кг

41 516,74

342. Накладная на перемещение N 1699 от 27.04.2016 г.;

227. Накладная на перемещение N 1700 от 27.04.2016 г.;

10. Накладная на перемещение N 1876 от 11.05.2016 г.;

168. Накладная на перемещение N 2343 от 16.06.2016 г.;

340. Накладная на перемещение N 2441 от 24.06.2016 г.;

336. Накладная на перемещение N 3476 от 03.09.2016 г.

132

Пленка гидро-ветрозащитная арированная 1600*31250 80 г/м2 50м2

5 140,98

29. Накладная на перемещение N 4210 от 31.10.2016 г.

134

Раствор М150

113962,11

348. Накладная на перемещение N 2069 от 14.05.2016 г.;

347. Накладная на перемещение N 2072 от 06.05.2016 г.;

350. Накладная на перемещение N 002627 от 01.07.2016 г.;

123. Накладная на перемещение N 002629 от 01.07.2016 г.;

349. Накладная на перемещение N 2712 от 01.07.2016 г.

135

Бетонная смесь тяжелого бетона В 15 ПЗ F200 W4 ГОСТ 7473-2010

246 216,76

128. Накладная на перемещение N 2065 от 11.05.2016 г.;

359. Накладная на перемещение N 2713 от 01.07.2016 г.;

270. Накладная на перемещение N 2710 от 01.07.2016 г.;

185. Накладная на перемещение N 2709 от 01.07.2016 г.;

184. Накладная на перемещение N 2707 от 01.07.2016 г.;

360. Накладная на перемещение N 002706 от 01.07.2016 г.;

124. Накладная на перемещение N 002628 от 01.07.2016 г.;

353. Накладная на перемещение N 002620 от 01.07.2016 г.;

174. Накладная на перемещение N 2536 от 01.06.2016 г.;

352. Накладная на перемещение N 2071 от 19.05.2016 г.

136

Шпатлевка КР 20 кг финишная

40 885,17

362. Накладная на перемещение N 1317 от 04.04.2016 г. - КХЭМ

137

Цемент 50 кг М-400 Спасскцемент

d 20

99 091,44

367. Накладная на перемещение N 1368 от 05.04.2016 г.;

102. Накладная на перемещение N 4531 от 25.11.2016 г.;

36. Накладная на перемещение N 4155 от 25.10.2016 г.;

138. Накладная на перемещение N 3723 от 30.09.2016 г.;

20. Накладная на перемещение N 3287 от 15.12.2016 г.;

84. Накладная на перемещение N 2420 от 21.06.2016 г.;

162. Накладная на перемещение N 2042 от 24.05.2016 г.;

364. Накладная на перемещение N 1696 от 27.04.2016 г.

138

Портландцемент ПЦ 400-Д20 50 кг

87 517,74

373. Накладная на перемещение N 1635

от 25.04.2016 г.;

36. Накладная на перемещение N 4155 от 25.10.2016 г.;

35. Накладная на перемещение N 3989 от 13.10.2016 г.;

93. Накладная на перемещение N 3529 от 01.09.2016 г.;

295. Накладная на перемещение N 3297 от 10.08.2016 г.;

376. Накладная на перемещение N 3122 от 04.08.2016 г.;

134. Накладная на перемещение N 2745 от 01.07.2016 г.;

375. Накладная на перемещение N 1303 от 01.07.2016 г.

139

Техноэласт ЭПП (рулон)

183 602,10

170. Накладная на перемещение N 1794 от 05.05.2016 г.

140

Щебень 20x40

53 433,60

159. Накладная на перемещение N 1957 от 17.05.2016 г.

141

Щебень фракции 20-40

100 778,74

232. Накладная на перемещение N 2309 от 15.06.2016 г.

142

Отвод 90*133x4 ст. 20

971,52

381. Накладная на перемещение N 4638 от 01.12.2016 г.

143

Отвод кругоизогнутый 159*6

6 387,85

381. Накладная на перемещение N"4638 от 01.12.2016 г.

144

Песок

37 849,68

162. Накладная на перемещение N 2042 от 24.05.2016 г.;

386. Накладная на перемещение N 4837 от 29.12.2016 г.

145

Техноэласт ЭПП (м2)

676521,47

180. Накладная на перемещение N 1703 от 27.04.2016 г.;

388. Накладная на перемещение N 1983 от 19.05.2016 г.;

297. Накладная на перемещение N 2809 от 18.07.2016 г.;

390. Накладная на перемещение N 3137 от 05.08.2016 г.;

88. Накладная на перемещение N 4910 от 29.12.2016 г.;

387. Накладная на перемещение N 116 от 09.01.2017 г.

146

Фланец 1-150-16 ст. 20

14 709,48

392. Накладная на перемещение N 4180 от 26.10.2016 г.

147

Паронитовая прокладка 55*55*2

4 212,45

14. Накладная на перемещение N 3291 от 10.08.2016 г.

148

Профиль горизонтальный СТАФФ ПГ 40x40 3 м

35 195,07

14. Накладная на перемещение N 3291 от 10.08.2016 г.

149

Профиль вертикальный Z-образный 20x20x40 3 м

1 090,28

14. Накладная на перемещение N 3291 от 10.08.2016 г.

150

Болт 24*130 ГОСТ 52644-2006 кл.пр. 10,9

2158,15

397. Накладная на перемещение N 1099 от 12.09.2015 г.

151

Пленка 200мкм, ширина 3 м

11 941,60

398. Накладная на перемещение N 3534 от 13.09.2016 г.

152

Гайка оцинк М16. ГОСТ 5915-70

200,79

381. Накладная на перемещение N 4638 от 01.12.2016 г.

153

Гайка оцинк М20. ГОСТ 5915-70

6 502,82

86. Накладная на перемещение N 1793 от 04.05.2016 г.

154

Краска Homaton 10 л

6 967,57

138. Накладная на перемещение N 3723 от 30.09.2016 г.

155

Арматура 12 А Ш 25Г2С ГОСТ 5781-82

309967,71

2. Накладная на перемещение N 3435

от 05.09.2016 г.

156

Арматура 12 A III 25Г2С ГОСТ 5781-82

818 258,42

401. Накладная на перемещение N 2861 от 21.07.2016 г.;

400. Накладная на перемещение N 3425 от 05.09.2016 г.;

403. Накладная на перемещение N 4853 от 29.12.2016 г.

157

Отвод РР 110x45 гр

476,05

404. Накладная на перемещение N 3995 от 13.10.2016 г.

Всего 11 450 158, 62 рублей.

 

       В соответствии с положениями статей 65, 67, 68 АПК РФ обстоятельства на которые ссылаются участники арбитражного процесса, подлежат доказыванию надлежащим с точки зрения закона и относимыми к спорным правоотношениям доказательствами. 

В соответствии со статьей 89 АПК РФ допускается предоставление в суд в качестве доказательств документов и материалов, если они содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

В подтверждение факта передачи ответчику товаров на сумму 14 509 505 руб. 44 коп истцом представлен в материалы дела универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 581 от 24.08.2017, а также накладные на перемещение и акты приема-передачи материалов в монтаж, в которых имеются подписи уполномоченных представителей ООО «КХЭМ-Восток», подтверждающие получение строительных материалов. 

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

Удовлетворяя исковые требования истца в размере 11 450 158 руб. 62 коп., суд первой инстанции  исходил из доказанности факта поставки товара истцом, что подтверждено представленными в материалы дела документами (универсальный передаточный документ (счет-фактура) № 581 от 24.08.2017, а также накладные на перемещение и акты приема-передачи материалов в монтаж), признанными судом надлежащими доказательствами, и отсутствия доказательств, подтверждающих  оплату поставленного  и полученного уполномоченными лицами ООО «КХЭМ-Восток» товара. 

В данном  случае, суд первой инстанции пришел к выводу, что в материалах дела имеется достаточно доказательств, позволяющих признать иск подлежащим удовлетворению в заявленном размере.

Правовых оснований для переоценки правильных выводов суда первой инстанции у апелляционного суда не имеется.

В связи с чем, возражения апелляционной жалобы о недоказанности факта поставки товара апелляционным судом отклоняются.

При этом суд апелляционной инстанции отмечает, что в соответствии со статьей 89 АПК РФ допускается предоставление в суд в качестве доказательств документов и материалов, если они содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.

Согласно   части   6   статьи 71 АПК РФ арбитражный суд не может считать   доказанным   факт,   подтвержденный   только   копией   документа или   иного   письменного   доказательства,   если   утрачен   или   не   передан   в   суд   оригинал  документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

Таким образом, указанной нормой права допускается использование в качестве доказательств копий документов, если не выявлено их нетождественных экземпляров.

Заявителем не представлено ни одного доказательства, свидетельствующего о том, что находящиеся в материалах дела копии документов противоречат их подлинникам, а также доказательств того, что ксерокопии этих документов получены с нарушением требований действующего законодательства. 

При  этом  заявлений о фальсификации представленных суду доказательств в порядке, предусмотренном статьей 161 АПК РФ, в суд первой инстанции не подавалось.

Ссылка в жалобе на то, что настоящий иск следует рассматривать  во взаимосвязи с находящимся в производстве Арбитражного суда Хабаровского края делом № А73-17834/2017, в противном случае удовлетворение требований АО «Энергоремонт» в рамках настоящего дела направлено на получение истцом необоснованной выгоды, что является прямым нарушением пункта 4 статьи 1 статьи 10 ГК РФ, не может быть принята апелляционным судом, поскольку согласно материалам дела, предметом настоящего иска является требование о взыскании задолженности за поставленный товар по договору поставки продукции № 2/Д от 26.02.2015, тогда как предметом иска по делу № А73-17834/2017 – взыскание основного долга за работы, выполненные на основании договора субподряда № 14/001суб 01/02 от 10.02.2014. Следовательно, в данном случае отсутствует единая система доказывания, указанные иски имеют разные самостоятельные правовые основания, круг подлежащих установлению обстоятельств по ним различен.

Довод апелляционной жалобы о неразрешении судом первой инстанции вопроса о предоставлении отсрочки уплаты государственной пошлины при принятии искового заявления к производству апелляционным судом не принимается, поскольку указанное само по себе не может повлиять на выводы суда о наличии оснований для удовлетворения исковых требований в полном объеме.

При этом апелляционным судом принято во внимание, что вопрос по госпошлине разрешен судом  первой инстанции по результату рассмотрения дела на основании положений статьей 102, 110 АПК РФ.

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В ходе повторной оценки имеющихся доказательств, с учетом доводов заявителя жалобы и установления всех юридически значимых обстоятельств, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы не установлено.  

Нарушений, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ основанием для безусловной отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд 

 

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 28.06.2018 по делу № А73-21239/2017 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня его принятия, через арбитражный суд первой инстанции.

 

Председательствующий

А.А. Тихоненко

Судьи

М.О. Волкова

 

Е.В. Гричановская