АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А05-14044/2022

г. Архангельск

13 апреля 2023 года

 

Резолютивная часть решения объявлена 06 апреля 2023 года  

Полный текст решения изготовлен 13 апреля 2023 года 

Арбитражный суд Архангельской области в составе судьи Болотова Б.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кудиновым А.С.,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Управления городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области "Котлас" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: Россия, 165300, 

<

...>)

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Каскад" (ОГРН 

<

***>; ИНН 

<

***>; адрес: Россия, 165300, 

<

...>)

об обязании устранить недостатки по муниципальному контракту,

при участии в судебном заседании представителей:

истца: не явился (извещен);

ответчика: не явился (извещен),

установил:

Управление городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области "Котлас" (далее – истец, управление, заказчик) обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением об обязании общества с ограниченной ответственностью "Каскад" (далее – ответчик, общество, подрядчик) в течение 30 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу провести работы по устранению недостатков по муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер Победы» на территории городского округа «Котлас» №угх-15/21 от 15.03.2021 (далее – контракт), а именно безвозмездно выполнить работы по замене парковых качелей «ФИКС» в соответствии с условиями, предусмотренными контрактом. 

В обоснование предъявленных требований истец указал, что в ходе комиссионного осмотра заказчиком зафиксирован факт вандализма парковых качелей «ФИКС», расположенных на общественной территории городского округа «Котласа» - «Сквер Победы», которые ответчик приобретал и устанавливал при исполнении обязательств по контракту. Также при данном осмотре установлено, что толщина металла, из которого установлены данные качели, не соответствует характеристикам, указанным в паспорте.

Стороны, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного заседания, своих представителей в суд не направили. 

Ответчик представил отзыв на исковое заявление, в котором с предъявленными требованиями не согласился, указав, что в материалах дела отсутствуют доказательства извещения ответчика о проведении осмотра и составления акта фиксации выявленных недостатков. 

Исследовав материалы дела, суд установил следующие фактические обстоятельства. 

Между сторонами заключен контракт, в соответствии с пунктом 1.1 которого, подрядчик по заданию заказчика обязуется выполнить работы по благоустройству общественной территории «Сквер Победы» на территории городского округа «Котлас» (далее - работы) в соответствии с условиями контракта, заданием (приложение №1 к контракту) и локальным сметным расчетом на благоустройство общественной территории «Сквер Победы» по адресу: 

<

...> Октября, в районе ГБУ АО «Котласский РЦ» (далее - локальный сметный расчет), утвержденным заказчиком (приложение №2 к Контракту).

В приложении №1 к дополнительному соглашению к контракту №1 от 30.06.2021 приведено задание, в котором поименованы требования к материалам (товару, оборудованию), в том числе в отношении парковых качелей «Фикс»:

- стойки и перекладина металлические: труба профильная не менее 80 х 80 мм, толщина не менее 4 мм, цвет RAL 9005. Закладные пластины толщиной не менее 3 мм. Сиденье качели - брус, покрытый антисептической пропиткой и маслом для дерева, цвет дерева - палисандр. Подвесы: петли - 2 шт., цепь короткозвенная 6 мм, карабины винтовые. Каркас сиденья из трубы 40 х 20 х 2 мм и трубы 20 х 20 х 2 мм, деревянный брусок 40 х 40 х 2000 мм, термоусадка для гибкого подвеса из ПВХ, цвет черный. Перекладина и стойки кренятся на болты (размер не менее M18). Наличие светильника длиной не менее 400 мм, потребляемая мощность 25 Вт. Температура эксплуатации от +40° С и до не менее - 35° С.

В пункте 2.1 контракта установлено, что работы должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС РФ, требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации, строительных норм и правил (СНиП), сводов правил (СП), санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), ПЭУ, технических регламентов и других норм, действующих на территории Российской Федерации при выполнении данного вида работ, а также соответствовать требованиям, установленным заказчиком.

Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом сроки (пункт 2.2 контракта).

Согласно пункту 2.4 контракта подрядчик гарантирует:

-  выполнение работ в соответствии с объемами и видами работ, указанными в локальном сметном расчете;

-   надлежащее качество используемых материалов и оборудования, обеспеченность их документами, удостоверяющими их качество и безопасность;

-  качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами в сфере строительства и условиями контракта.

Гарантийный с рок на весь выполненный объем работ с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) составляет 3 года. 

Между сторонами подписан акт о приемке выполненных работ по форме №КС-2 от 30.06.2021 №1 на сумму 3 136 781 руб. 53 коп. (в том числе принято 3 парковые качели "Фикс")

Стороны подписали соглашение о расторжении контракта от 27.08.2021, в пункте 3 которого установили, что выполненные по контракту работы оплачены заказчиком на основании вышеуказанного акта на сумму 3 136 781 руб. 53 коп. 

Из акта осмотра общественной территории «Сквер Победы» на территории городского округа «Котлас» от 14.06.2022 следует, что комиссией произведен осмотр парковых качелей «Фикс» с подсветкой и установлено, что последние не соответствуют характеристикам, указанным в паспорте на данные качели. 

В актах осмотра от 13.03.2023 установлено, что толщина металлических конструкций двух парковых качелей «Фикс» составляет 2,13 мм., одной парковой качели «Фикс»  - 2,11 мм. и не соответствует характеристикам, указанным в паспорте и в муниципальном контракте (4 мм). 

 Истец направил в адрес ответчика претензию №01-09/5038 от 03.10.2022, в которой предложил устранить выявленные недостатки выполненных по контракту работ, а именно заменить парковые качели «Фикс». 

Поскольку, несмотря на направление в адрес общества вышеуказанной претензии, последнее недостатки выполненных работ не устранило, управление обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с исковым заявлением, рассмотренным в настоящем деле. 

Оценив доводы и доказательства, представленные сторонами в обоснование своих требований и возражений, суд считает заявление истца подлежащим удовлетворению ввиду следующего. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В соответствии с пунктом 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Пунктом 1 статьи 722 ГК РФ определено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Пунктом 2.4 контракта установлено, что гарантийный срок на весь выполненный объем работ с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) составляет 3 (три) года.

Гарантийные обязательства распространяются на все работы, предусмотренные локальным сметным расчетом и выполненные подрядчиком, в том числе на используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование.

При обнаружении в период гарантийного срока недостатков (дефектов), которые являются следствием ненадлежащего выполнения подрядчиком работ, в том числе будут обнаружены материалы, которые не соответствуют документам качества или требованиям заказчика и которые не позволяют осуществлять нормальную эксплуатацию результатов работ до их устранения, подрядчик обязан устранить недостатки (дефекты) за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки.

Согласно пункту 3 статьи 724 ГК РФ заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

По правилам, предусмотренным пунктом 1 статьи 723 ГК РФ, в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика, в том числе безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Факт несоответствия толщины металлических конструкций парковых качелей «Фикс» характеристикам, указанным в задании к контракту и паспорте на данные качели установлен в акте осмотра общественной территории «Сквер Победы» на территории городского округа «Котлас» от 14.06.2022, а также актах осмотра от 13.03.2023. 

При этом, акты осмотра от 13.03.2023 составлены с участием представителя общества, соответственно довод ответчика о том, что его не извещали о проведении осмотра и составления акта фиксации выявленных недостатков не может являться основанием для отказа в удовлетворении предъявленных требований. 

Указанный недостаток является существенным, так как способствует фактам вандализма, что зафиксировано в акте осмотра от 14.06.2022.

С учетом указанных обстоятельств, предъявленные требования подлежат удовлетворению. 

В соответствии с частью 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Предложенный истцом срок на устранение недостатков (в течении 30 календарных дней с момента вступления в законную силу решения) суд считает обоснованным.

При таких обстоятельствах на ответчика подлежит возложению обязанность в течении в течении 30 календарных дней с момента вступления в законную силу настоящего решения произвести работы по устранению недостатков по контракту, заключенному с управлением, а именно, безвозмездно выполнить работы по замене парковых качелей "ФИКС" в соответствии с условиями, предусмотренными контрактом.  

На основании статьи 110 АПК РФ с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию 6000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины. 

Руководствуясь статьями 106, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Каскад" (ИНН 

<

***>) в течении 30 календарных дней с момента вступления в законную силу настоящего решения произвести работы по устранению недостатков по муниципальному контракту №угх-15/21 от 15.03.2021 на выполнение работ по благоустройству общественной территории  "Сквер Победы" на территории городского округа "Котлас", заключенному с Управлением городского хозяйства администрации городского округа Архангельской области "Котлас" (ИНН  

<

***>), а именно, безвозмездно выполнить работы по замене парковых качелей "ФИКС" в соответствии с условиями, предусмотренными контрактом.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Каскад" (ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета 6000 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

 

Судья

Б.В. Болотов