1815/2018-15504(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-19689/2017

город Казань

25 января 2018 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего  судьи Р.Р. Абдуллиной,  

при ведении аудиопротоколирования и составлении протокола судебного  заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с  ограниченной ответственностью «Татпромэко» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Топ-Проект» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) об обязании устранить недостатки  выполненных работ по договору № 1305 от 15.08.2016,  

при участии: 

ФИО2, представлюящего интересы истца по доверенности от  10.07.2017, третьего лица ООО «АЗС-Строй» по доверенности от 05.12.2017,  

ФИО3, представляющей интересы ответчика по доверенности от  26.04.2017,  

ФИО4, представляющей интересы третьего лица ООО «Татнефть- АЗСЦентр», по доверенности от 17.03.2015,  

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 176 Арбитражного  

процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л :

Уточнение исковых требований принять. 

Обязать ответчика ООО «ТОП-ПРОЕКТ» (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) в тридцатидневный срок с момента вступления в законную силу  настоящего решения на объекте – АЗС № 182, находящегося по адресу  Республика Татарстан, МО «Казань», 167 квартал Зеленодольского лесхоза»  выполнить:  

работы по устройству однорядного одностороннего барьерного ограждения  на переходно-скоростных полосах (торможения и разгона) высотой 0,75м (- 11ДО  - 0.75 - 2.0-Н.О) в количестве 440 п.м.;  

работы по устройству однорядного двустороннего барьерного ограждения  на зеленом островке (газоне), ограждающем территорию АЗС от автодорожной  магистрали высотой 0,75м (11ДД - ТУ 5216-001-05765820-2007/300-0,75-2.00- 0.95) в количестве 82 п.м.;  

работы по отсыпке обочин из щебня М800 фр.40-70мм по способу заклинки  ГОСТ 8267-93 п-0,2м шириной 3,00м с уклоном 40% в сторону оврага на  площади 1425м2 по присыпным обочинам из песка на переходно-скоростных  полосах (разгона и торможения);  

работы по устройству дорожной разметки термопластиком (линии, стрелы  и др.обозначения), определенные рабочим проектом 08-ПИР/2015-ПЗУ  «Транспортная схема с расстановкой дорожных знаков М 1:500» лист 5,  утвержденным ДИ и ОД № 2 ГИБДД МВД РФ исх. № 15774и от 08.10.15 г. на  усовершенствованном покрытии дороги переходно-скоростных полос (разгона и  торможения) и на территории АЗС.  

Обязать ответчика ООО «ТОП-ПРОЕКТ» (ИНН 

<

***> ОГРН  

<

***>) в тридцатидневный срок с момента вступления в законную силу  настоящего решения безвозмездно устранить в выполненных работах по  договору на производство строительно-монтажных работ № 1305 от 15.08.2016  

года на объекте АЗС № 182, находящегося по адресу Республика  Татарстан, МО «Казань», 167 квартал Зеленодольского лесхоза». следующие  недостатки:  

заменить уличные камеры AKS-1903 V IP РОЕ наружной системы  видеонаблюдения, на предусмотренные рабочим проектом 08-ПИР/2015-ИОСЗ- ВН видеокамеры Polyvision PN9-IP2-V12PL/PN-M2-V12IRMPA-1P со встроенным  блоком грозозащиты;  

заменить установленные вдоль переходно-скоростных полос торможения и  разгона, на территории АЗС и под навесами ТРК, светодиодные светильники  неизвестного производителя неизвестной марки (не проектной), на  предусмотренные рабочим проектом 08-ПИР/2015-ИОС1-ЭС лист 9  светодиодные светильники производства «Ферекс» типа ДКУ 01-130-50-Ш на  территории АЗС, типа ДКУ 01-208-50-Ш на ПСП. типа ДВУ 02-80-50-Д110 под  навесами ТРК;  

 усовершенствованное асфальтобетонное покрытие дороги выполнить в  соответствие с рабочим проектом 08-ПИР/2015-ПЗУ «План благоустройства  территории М 1:500», с устройством пандусов высотой 0,2 м на въезде и выезде с  территории АЗС и пандусов высотой 0,15 м на въезде и выезде с площадки АЦ,  общее количество 56 п.м.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Перечислить согласно выставленному счету № 83 от 08.12.2017 денежные  средства в сумме 80 000 рублей с депозитного счета Арбитражного суда  Республики Татарстан на соответствующий счет общества с ограниченной  ответственностью «Институт негосударственной экспертизы» за проведение  экспертизы.  

Излишне оплаченные денежные средства в сумме 20 000 рублей перечислить  обществу с ограниченной ответственностью «Топ-проект» по реквизитам,  указанным в платежном поручении № 301 от 12.09.2017.  

 Решение может быть обжаловано в течение месяца с даты его принятия в  Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд путем направления  апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Татарстан.  

Судья Р.Р. Абдуллина 

1815/2018-15504(1) 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный  

апелляционный суд в месячный срок. 

Судья Р.Р. Абдуллина