АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

Дело №

А70-15238/2018

г.

Тюмень

12 декабря 2018 года

Резолютивная часть решения оглашена 05 декабря 2018 года.

Решение изготовлено в полном объеме 12 декабря 2018 года.

Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи А.Н. Курындиной при ведении протокола помощником судьи Я.А. Авериной, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Сибгеокарта» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации: 18.09.2006, адрес: 628602, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

<

...>) к Акционерное общество «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>, дата регистрации: 18.01.1994, адрес: 625000, 

<

...>) о взыскании 32 943 061 рубля 34 копеек, третье лицо - временный управляющий ООО «Гипронг-Эком» ФИО1,

при участии: 

от истца: не явился, извещен надлежащим образом;    

от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом; 

от третьего лица: не явился, извещен надлежащим образом, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Сибгеокарта»  (далее – ООО «НПП «Сибгеокарта», истец) обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с иском к акционерное общество «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (далее – АО «ГИПРОНГ-ЭКОМ», ответчик) о взыскании 28 646 562 рубля 09 копеек задолженности, 4 296 499 рублей 25 копеек неустойки.  

Требования со ссылками на статьи 309, 310, 702 Гражданского кодекса Российской Федерации мотивированы неисполнением ответчиком обязательства по оплате выполненных работ в рамках договоров от 21.03.2012 № 1182П-ИИ, от 15.07.2013 № 1218П-ИИ/296, от 23.10.2013 № 1227П-ИИ/309, от 14.10.2016 № 1355П-ИИ/509, от 14.06.2017 № 1378П-ИИ/545, от 07.10.2016 № 1356П-ИИ/507, от 28.07.2017 № 1387П-ИИ/1388П-ИИ/1389П-ИИ/584, от 13.04.2017 № 1361П-ИИ/518, от 20.11.2017 № 1358П-ИИ/635, от 12.02.2018 № 1395П-ИИ/599, от 12.02.2018 № 1396П-ИИ/600, от 01.03.2018 № 1407П-ИИ/632.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился. Возражений против заявленных требований не представил.

Ответчик извещен о назначении судебного заседания по настоящему делу заказными письмами №№ 62505227115686, 62505227115679, 62505227115662, 62505227115655, 62505227115648. Уведомления №№  62505227115686, 62505227115679, 62505227115662, 62505227115648 о вручении почтовых отправлений вернулись в суд.

Представитель истца в судебное заседание не явился. Истец извещен о назначении судебного заседания по настоящему делу заказным письмом № 62505227115631. Уведомление вернулось в суд. 

Третье лицо в судебное заседания не явилось. Третье лицо извещено о назначении судебного заседания по настоящему делу заказным письмом № 62505228154257, которое вернулось в суд по причине «Истек срок хранения», что в соответствии со статьей 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считается надлежащим извещением о времени и месте судебного заседания. 

В соответствии с частью 3, 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие не явившихся представителей истца, ответчика и третьего лица надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного разбирательства. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям. 

В соответствии с частью 1 статьи 64, статьями 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств.

Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена обязанность сторон доказать те обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений.

Как следует из материалов дела, 21.03.2012 между ЗАО «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (после переименования – АО «ГИПРОНГ-ЭКОМ», заказчик) и ООО «НПП «Сибгеокарта» (исполнитель) был заключен договор на выполнение инженерных изысканий № 1182П-ИИ (далее – договор № 1182П-ИИ), в соответствии с пунктом 1.1. которого заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по объекту: 1182П «Пробная эксплуатация зимнего месторождения. ДНС с УПСВ. Система подогрев нефтяной эмульсии». Работа выполняется в соответствии с календарным планом (Приложение № 3). 

Содержание работы, вид продукции и ее технико-экономические параметры, сроки выполнения работы и отдельных этапов определяются заданием на проектирование, календарным планом, сметами, составляющими неотъемлемую часть настоящего договора (Приложения №№ 1-6) (пункт 1.2. договора № 1182П-ИИ). 

Согласно пункту 2.1. договора № 1182П-ИИ, за выполненную работу согласно настоящему договору заказчик уплачивает исполнителю 2 124 000 рублей. 

В соответствии с пунктом 4.2. договора № 1182П-ИИ, по завершении каждого этапа работы исполнитель предоставляет заказчику акт приемки-сдачи работ с приложением к нему комплекта документации в 5 (пяти) экземплярах на бумажном носителе и в 3 (трех) экземплярах в электронном виде. 

По утверждению истца, во исполнение условий договора ООО «НПП «Сибгеокарта» выполнило и сдало ответчику результаты работ, что подтверждается актом № 1 от 07.06.2012, который был подписан ответчиком без каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполнения. 

Истцом была выставлена счет-фактура от 07.06.2012 № 00000033 ответчику одновременно с подписанием указанного акта.

Пунктом 2.2. договора № 1182П-ИИ предусмотрено, что оплата выполненных работ производится заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания сторонами акта приемки-сдачи выполненных работ, предоставлением исполнителем счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя в соответствии с реквизитами, указанными в разделе 6 настоящего договора, при условии поступления денежных средств за выполненные работы от генерального заказчика на расчетный счет заказчика.

Ответчик выполненные истцом работы оплатил частично в размере 2 092 649 рублей 26 копеек, что подтверждается платежным поручением от 24.08.2012 № 881.

Таким образом, задолженность ответчика по договору № 1182П-ИИ составила 31 350 рублей 74 копейки.

В соответствии с пунктом 5.3. договора № 1182П-ИИ, в случае задержки выдачи исполнителем документации либо задержки оплаты заказчиком законченных (этапов) работы виновная сторона уплачивает партнеру штраф в размере 0,1 % от стоимости документации (задержанной суммы) за каждый день просрочки сверх вышеуказанного срока, но не более 10 % договорной цены.

Истец начислил ответчику неустойку по договору № 1182П-ИИ в размере 168 423 рубля 23 копейки. 

15.07.2013 между ЗАО «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (после переименования – АО «ГИПРОНГ-ЭКОМ», генподрядчик) и  ООО «НПП «Сибгеокарта» (субподрядчик) был заключен договор субподряда № 1218П-ИИ/296 (далее – договор № 1218П-ИИ/296), в соответствии с пунктом 2.1. которого генподрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению собственными силами и средствами изысканий. 

Содержание и сроки выполнения работ по договору определяются техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1), календарным планом работ (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть договора.

Согласно пункту 6.1. договора № 1218П-ИИ/296, общая стоимость изысканий по настоящему договору не превысит 30 000 000 рублей. 

Сдача и приемка выполненных работ по договору № 1218П-ИИ/296 производится заказчиком в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к договору № 1218П-ИИ/296) в порядке, определенном сторонами в разделе 3 договора № 1218П-ИИ/296. 

В соответствии с пунктом 3.4. договора № 1218П-ИИ/296, генподрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 3.2. настоящего договора, рассматривает их и подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (при условии подписания аналогичного акта сдачи-приемки выполненных работ генподрядчика заказчиком) или направляет субподрядчику мотивированный отказ от приемки изысканий. Количество мотивированных отказов не ограничено. Несоблюдение указанного в настоящем пункте срока генподрядчиком, в случае если оно вызвано задержкой подписания аналогичного акта сдачи-приемки выполненных работ генподрядчика заказчиком, не является нарушением договорных обязательств генподрядчиком, изыскания не считаются принятыми, а акт сдачи-приемки выполненных работ - подписанным. 

По утверждению истца, во исполнение условий договора ООО «НПП «Сибгеокарта» выполнило и сдало ответчику результаты работ, что подтверждается актами № 1 от 25.11.2013, № 2 от 30.05.2014, которые были подписаны ответчиком без каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполнения. 

Истцом были выставлены счета-фактуры от 25.11.2013 № 120, от 30.05.2014 № 41 ответчику одновременно с подписанием указанных актов. 

Пунктом 6.3 договора № 1218П-ИИ/296 стороны предусмотрели, что генподрядчик перечисляет субподрядчику аванс в размере 30 % от стоимости настоящего договора в сумме: 9 000 000 рублей, на основании предоставленного субподрядчиком счета на оплату. Погашение аванса, уплаченного генподрядчиком согласно настоящему пункту, производится в каждом выполненном этапе в размере 30 % от стоимости выполненного субподрядчиком и принятого генподрядчиком объема изысканий до полного погашения аванса. 

Окончательный расчет производится после полного исполнения субподрядчиком своих обязательств, составляющих предмет настоящего договора (пункт 6.4. договора № 1218П-ИИ/296). 

Ответчик в нарушение условий договора выполненные истцом работы оплатил частично на сумму 27 200 000 рублей, что подтверждается платежными поручениями от 26.01.2015 № 41, от 10.02.2015 № 89, от 03.03.2015 № 174, от 02.04.2015 № 283, от 09.04.2015 № 299, от 22.05.2015 № 477, от 05.06.2015 № 529, от 15.07.2013№ 586.

Таким образом, задолженность ответчика по договору № 1218П-ИИ/296 составила           2 800 000 рублей. 

В силу пункта 9.2. договора № 1218П-ИИ/296, в случае просрочки оплаты изысканий, кроме оплаты авансового платежа, указанного в пункте 6.3. настоящего договора. субподрядчик вправе предъявить генподрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно оплаченных изысканий за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

Истец начислил ответчику неустойку по договору № 1218П-ИИ/296 в размере 280 000 рублей. 

23.10.2013 между ЗАО «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (после переименования – АО «ГИПРОНГ-ЭКОМ», генподрядчик) и  ООО «НПП «Сибгеокарта» (субподрядчик) был заключен договор субподряда № 1227П-ИИ/309 (далее – договор № 1227П-ИИ/309), в соответствии с пунктом 2.1. которого генподрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению собственными силами и средствами изысканий. 

Содержание и сроки выполнения работ по договору определяются техническим заданием на выполнение работ (Приложение № 1), календарным планом работ (Приложение № 2), составляющим неотъемлемую часть договора. 

Общая стоимость изысканий по настоящему договору не превысит 8 860 717 рублей 77 копеек (пункт 6.1. договора № 1227П-ИИ/309). 

Сдача и приемка выполненных работ по договору производится заказчиком в соответствии с календарным планом выполнения работ (Приложение № 2 к договору) в порядке, определенном сторонами в разделе 3 договора. 

В соответствии с пунктом 3.4. договора № 1227П-ИИ/309, генподрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения документов, указанных в пункте 3.2. настоящего договора, рассматривает их и подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (при условии подписания аналогичного акта сдачи-приемки выполненных работ генподрядчика заказчиком) или направляет субподрядчику мотивированный отказ от приемки изысканий. 

По утверждению истца, во исполнение условий договора ООО «НПП «Сибгеокарта» выполнило и сдало ответчику результаты работ, что подтверждается актами № 1 от 29.11.2013, № 2 от 19.12.2013, которые были подписаны ответчиком без каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполнения.

Истцом были выставлены счета-фактуры от 29.11.2013 № 129, от 19.12.2013 № 149 ответчику одновременно с подписанием указанных актов. 

Пунктом 6.6. договора № 1227П-ИИ/309 стороны предусмотрели, что  оплата изысканий производится генподрядчиком на основании подписанного им акта сдачи-приемки выполненных работ, оригинала счета на оплату и счета-фактуры субподрядчика, выставляемых в срок до 25 (двадцать пятого) числа месяца выполнения изысканий. 

Ответчик в нарушение условий договора, выполненные истцом работы, оплатил частично, что подтверждается платежными поручениями от 29.11.2013 № 13, от 26.03.2014 № 244 на общую сумму 7 974 645 рублей 99 копеек.

Таким образом, задолженность ответчика по договору № 1227П-ИИ/309 составила 886 071 рубль 78 копеек. 

В соответствии с пунктом 9.2. договора № 1227П-ИИ/309, в случае просрочки оплаты изысканий, кроме оплаты авансового платежа, указанного в пункте 6.3. настоящего договора, субподрядчик вправе предъявить генподрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно оплаченных  изысканий за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

Истец начислил ответчику неустойку по договору № 1227П-ИИ/309 в размере 88 607 рублей 18 копеек. 

14.10.2016 между ЗАО «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (после переименования – АО «ГИПРОНГ-ЭКОМ», генподрядчик) и  ООО «НПП «Сибгеокарта» (субподрядчик) был заключен договор субподряда № 1355П-ИИ/509 (далее – договор № 1355П-ИИ/509), в соответствии с пунктом 3.1. которого субподрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Инженерная подготовка. Обустройство объектов Гавриковского месторождения» в соответствии с заданиями и календарным планом и передать результаты работ генподрядчику.

Генподрядчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях, установленных договором (пункт 3.2. договора № 1355П-ИИ/509). 

Стоимость работ по договору № 1355П-ИИ/509 определена в пункте 4.1. договора и с учетом дополнительных соглашений составляет 36 936 579 рублей 25 копеек. 

В соответствии с пунктом 6.2.1. договора № 1355П-ИИ/509, генподрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ и полного объема отчетных документов обязан рассмотреть результаты работ и при условии подписания аналогичного акта сдачи-приемки выполненных работ генподрядчика заказчиком направить субподрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.  

По утверждению истца, во исполнение условий договора ООО «НПП «Сибгеокарта» выполнило и сдало ответчику результаты работ, что подтверждается актами № 1 от 30.03. 2017, от 30.08.2017 № 2, от 29.06.2018 № 3, которые  были подписаны ответчиком без каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполнения.

Истцом были выставлены счета-фактуры от 30.03.2017 № 23, от 29.06.2018 № 29, от 30.08.2017 № 72 ответчику одновременно с подписанием указанных актов. 

Пунктом 5.2.1. договора № 1355П-ИИ/509 стороны предусмотрели, что  оплата выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ производится генподрядчиком после предоставления субподрядчиком генподрядчику оригиналов: подписанных сторонами договора и акта сдачи-приемки выполненных работ, всех комплектов разработанных документов и отчетов с устраненными в полном объеме замечания генподрядчика, выявленными в процессе приемки генподрядчиком результатов работ, счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и пункта 5.3. договора, по факту выполнения субподрядчиком работ в полном объеме в размере 60 % от договорной цены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств от заказчика на расчетный счет генподрядчика. 

Оплата выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ при при окончательной приемке производится после получения генподрядчиком положительных заключений государственной и (или) негосударственной экспертиз, предоставления субподрядчиком генподрядчику оригиналов: подписанных сторонами договора и акта сдачи-приемки выполненных работ, всех комплектов разработанных документов и отчетов с устраненными в полном объеме замечаниями генподрядчиком и экспертных организаций, счета на оплату и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и пункта 5.3. договора, в размере 40 % от договорной цены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств от заказчика на расчетный счет генподрядчика (пункт 5.2.2. договора № 1355П-ИИ/509). 

Ответчик в нарушение условий договора выполненные истцом работы оплатил частично, что подтверждается платежными поручениями от 17.04.2017 № 303, от 24.05.2017 № 408, от 01.12.2017 № 962, от 27.02.2018 № 149 на общую сумму 12 681 397 рублей 75 копеек.

Таким образом, задолженность ответчика по договору № 1355П-ИИ/509 составила 12 293 543 рубля 31 копейка.

Истец начислил ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с неисполнением ответчиком обязательств  по договору № 1355П-ИИ/509 в размере 742 476 рублей 49 копеек. 

14.06.2017 между  АО «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (генподрядчик) и  ООО «НПП «Сибгеокарта» (субподрядчик) был заключен договор субподряда № 1378П-ИИ/545 (далее – договор № 1378П-ИИ/545), в соответствии с пунктом 2.1. которого для целей строительства (технического перевооружения, реконструкции и др. видов строительства) по стройке «Обустройство Чатылькинского месторождения. Реконструкция ДНС с УПСВ Чатылькинского месторождения» субподрядчик обязуется:

2.1.1. по утвержденному заданию выполнить работы в соответствии с утвержденной генподрядчиком программой инженерных изысканий;

2.1.2. по заданию разработать и передать генподрядчику материалы инженерных изысканий;

2.1.3. обеспечить обязательное прохождение комплексной экспертизы заказчика материалов инженерных изысканий;

2.1.4. осуществлять все необходимые и достаточные юридические и фактические действия, необходимые для получения генподрядчиком заключений, согласований, обследований и экспертиз.

Генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные субподрядчиком в соответствии с договором материалы инженерных изысканий (пункт 2.2. договора № 1378П-ИИ/545). 

Пунктом 3.1. договора № 1378П-ИИ/545, стороны согласовали следующие сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 16.01.2017; окончание выполнения работ – 17.03.2017. 

Согласно пункту 4.1. договора № 1378П-ИИ/545, договорная цена составляет 2 826 496 рублей 92 копейки. 

В соответствии с пунктом 8.1.1. договора № 1378П-ИИ/545, в сроки, установленные календарным планом, субподрядчик передает генподрядчику акт сдачи-приемки выполненных работ и материалы инженерных изысканий в электронной форме на материальном носителе по накладной, а также положительное сводное экспертное заключение результата проведения внутренней экспертизы субподрядчика. Дата подписания накладной генподрядчиком (в случае передачи нарочным) либо дата вручения, указанная в уведомлении о вручении (в случае направления по почте), подтверждает получение генподрядчиком материалов инженерных изысканий на рассмотрение.

По утверждению истца, во исполнение условий договора ООО «НПП «Сибгеокарта» выполнило и сдало ответчику результаты работ, что подтверждается актом № 1 от 27.06.2017, который был подписан ответчиком без каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполнения.

Истцом была выставлена счет-фактура от 27.06.2017 № 51 ответчику одновременно с подписанием указанного акта. 

Пунктом 4.7.1. договора № 1378П-ИИ/545 стороны предусмотрели, что, оплата фактически выполненных работ при первичной приемке производится генподрядчиком в соответствии с календарным планом в размере 60 % от стоимости работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств от заказчика на расчетный счет генподрядчика, на основании подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления субподрядчиком генподрядчику всех комплектов материалов инженерных изысканий, получивших положительное заключение комплексной экспертизы заказчика, после выполнения требований пункта 8.1. договора, предоставления исполнительных смет, оригиналов акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями применимого права, а также пункта 4.5. договора.

Оплата фактически выполненных работ при окончательной приемке производится генподрядчиком после получения положительного заключения государственной экспертизы. негосударственной экспертизы в соответствии с календарным планом в размере 40 % от стоимости работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств от заказчика на расчетный счет генподрядчика, на основании подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ и предоставления субподрядчиком генподрядчику всех комплектов материалов инженерных изысканий, получивших положительное заключение комплексной экспертизы заказчика, после выполнения требований пункта 8.1. договора, предоставления исполнительных смет, оригиналов акта сдачи-приемки выполненных работ и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями применимого права, а также пункта 4.5. договора (пункт 4.7.2. договора № 1378П-ИИ/545).

Ответчик, в нарушение условий договора, выполненные истцом работы, оплатил частично, что подтверждается платежными поручениями от 05.09.2017 № 676, от 08.09.2017 № 690 на общую сумму 1 230 699 рублей 68 копеек.

Таким образом, задолженность ответчика по договору № 1378П-ИИ/545 составила 820 466 рублей 44 копейки.

В силу пункта 11.13.1. договора № 1378П-ИИ/545, за нарушение генподрядчиком сроков оплаты выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ субподрядчик вправе взыскать с генподрядчика   неустойку,   предусмотренную   статьей   395   Гражданского   кодекса   Российской Федерации, которая взимается не более чем за 30 (тридцать) календарных дней со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.

Истец начислил ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами по договору № 1378П-ИИ/545 в размере 96 585 рублей 33 копейки.

07.10.2016 между ЗАО «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (после переименования – АО «ГИПРОНГ-ЭКОМ», генподрядчик) и  ООО «НПП «Сибгеокарта» (субподрядчик) был заключен договор субподряда № 1356П-ИИ/507 (далее – договор № 1356П-ИИ/507), в соответствии с пунктом 2.1. которого субподрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с заданием, требованиями ГОСТ и другими действующими нормативными документами РФ в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации, передать материалы инженерных изысканий генподрядчику в установленные сроки, а генподрядчик обязуется принять и оплатить выполненные субподрядчиком работы в порядке, предусмотренном договором. 

Пунктом 3.1. договора № 1356П-ИИ/507 стороны установили сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 01.08.2016; окончание выполнения работ – 31.10.2016.

Согласно пункту 4.1. договора № 1356П-ИИ/507, договорная цена составляет 8 850 000  рублей. 

В соответствии с пунктом 5.1.1. договора № 1356П-ИИ/507, субподрядчик направляет генподрядчику материалы инженерных изысканий в количестве, предусмотренном заданием, и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ. Передача генподрядчику материалы инженерных изысканий осуществляется по сопроводительным документам субподрядчика. Момент передачи материалов инженерных изысканий генподрядчику определяется датой получения материалов инженерных изысканий генподрядчиком, указанной в сопроводительных документах.

По утверждению истца, во исполнение условий договора ООО «НПП «Сибгеокарта» выполнило и сдало ответчику результаты работ, что подтверждается актами № 1 от 27.09.2016, № 2 от 30.06.2017, которые были подписаны ответчиком без каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполнения.

Истцом были выставлены счета-фактуры от 27.09.2016 № 83,  от 30.06.2017 № 53 ответчику одновременно с подписанием указанного акта. 

Пунктом 4.3. договора № 1356П-ИИ/507 стороны предусмотрели, что оплата выполненных субподрядчиком и принятых в соответствии с условиями договора работ производится генподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств от заказчика на расчетный счет генподрядчика, при наличии у генподрядчика предъявленных субподрядчиком оригиналов: счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, счета на оплату, оригинала договора, подписанного сторонами.  

Однако, ответчик, в нарушение условий договора, выполненные истцом работы, оплатил частично, что подтверждается платежными поручениями от 30.12.2016 № 1403, от 01.12.2017 № 964 на общую сумму 7 199 409 рублей.

Таким образом, задолженность ответчика по договору № 1356П-ИИ/507 составляет 1 650 591 рублей. 

В силу пункта 12.3.1. договора № 1356П-ИИ/507, в случае нарушения генподрядчиком сроков оплаты работ, предусмотренных разделом 4 договора, субподрядчик вправе предъявить генподрядчику письменное требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от суммы просроченного генподрядчиком платежа за каждый день просрочки.

Истец начислил ответчику неустойку по договору № 1356П-ИИ/507 в размере 1 838 935 рублей 13 копеек. 

28.07.2017 между  АО «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (генподрядчик) и  ООО «НПП «Сибгеокарта» (субподрядчик) был заключен договор субподряда №  1387П-ИИ/1388П-ИИ/1389П-ИИ/584 (далее – договор № 1387П-ИИ/1388П-ИИ/1389П-ИИ/584), в соответствии с пунктом 2.1. которого субподрядчик обязуется по заданию генподрядчика выполнить работы по объектам: 

15817 «Реконструкция системы ППД Абдуловского месторождения (2018 г.)», 

15821 «Реконструкция системы ППД Серафимовского месторождения (2018 г.)», 

15896 «Расширение обустройства Туймазинского месторождения (2018 г.)»

 в соответствии с условиями договора, а генподрядчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

Пунктом 3.1. договора № 1387П-ИИ/1388П-ИИ/1389П-ИИ/584 стороны согласовали, что сроки выполнения работ в целом и этапов работ, а также стоимость этапов работ согласованы сторонами в календарном плане. 

В соответствии с пунктом 7.1. договора № 1387П-ИИ/1388П-ИИ/1389П-ИИ/584, сдача-приемка результатов работ осуществляется поэтапно в 7 (семи) экземплярах на бумажном и в 3 (трех) экземплярах на электронном носителе согласно пункту 15.1. договора, в том числе с электронными файлами в исходных, редактируемых форматах, указанных в заданиях. При завершении этапа работ в соответствии с календарным планом в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ, субподрядчик предоставляет генподрядчику акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный и заверенный представителем субподрядчика, с приложением к нему результатов работ, с заполнением «Реестра приема-передачи проектно-сметной документации» согласно образцу (приложение № 10 к договору), а также счета-фактуры и счета на оплату. 

По утверждению истца, во исполнение условий договора ООО «НПП «Сибгеокарта» выполнило и сдало ответчику результаты работ, что подтверждается актом № 1 от 29.09.2017 на сумму 14 455 000 рублей, который был подписан ответчиком без каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполнения.

Истцом была выставлена счет-фактура от 29.09.2017 № 91 ответчику одновременно с подписанием указанного акта. 

Пунктом 4.4. договора № 1387П-ИИ/1388П-ИИ/1389П-ИИ/584 стороны предусмотрели, что оплата выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ производится генподрядчиком путем перечисления денежных средств в размере 80 % от стоимости выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств от заказчика на расчетный счет генподрядчика при условии наличия у генподрядчика оригиналов: подписанных сторонами договора и акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу работ без разногласий, счета-фактуры, счета на оплату, а также при условии передачи субподрядчиком генподрядчику всех предусмотренных договором документов. 

Сумма в размере 20 % от стоимости выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ удерживается генподрядчиком до получения положительных заключений всех внешних экспертиз, а также подписания всех актов сдачи-приемки выполненных работ по договору. 

Подписанием договора субподрядчик дает согласие на удержание суммы в размере 20 % от стоимости выполненных работ и для удержания генподрядчиком не требуется получения дополнительно от субподрядчика его письменного согласия.

Ответчик в нарушение условий договора выполненные истцом работы оплатил несвоевременно и частично, что подтверждается платежными поручениями от 29.12.2017 № 1070, от 23.04.2018 № 345, от 11.05.2018 № 381, от 23.05.2018 № 413, от 03.07.2018 № 570, от 06.07.2018 № 588, от 19.07.2018 № 640 на общую сумму 12 650 000 рублей.

Таким образом, задолженность ответчика по договору № 1387П-ИИ/1388П-ИИ/1389П-ИИ/584 составляет 2 405 000 рублей. 

В силу пункта 10.4.1. договора № 1387П-ИИ/1388П-ИИ/1389П-ИИ/584, за просрочку оплаты принятых результатов работ (этапов работ) на срок не свыше 30 (тридцати) календарных дней генподрядчик выплачивает неустойку (пени) в размере 0,01 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, а после 30 (тридцати) календарных дней - 0,05 % от своевременно неоплаченной суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от своевременно не оплаченной суммы.

Истец начислил ответчику неустойку по договору № 1387П-ИИ/1388П-ИИ/1389П-ИИ/584 в размере 240 500 рублей.

13.04.2017 ЗАО «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (после переименования АО «ГИПРОНГ-ЭКОМ», генподрядчик) и  ООО «НПП «Сибгеокарта» (субподрядчик) был заключен договор субподряда № 1361П-ИИ/518 (далее – договор № 1361П-ИИ/518), в соответствии с пунктом 1.1. которого предметом договора является комплекс основных работ и услуг по выполнению изыскательских работ по объекту: «Обустройство куст скважин № 68 Поттымско-Ингинского лицензионного участка Красноленинского НГК месторождения», выполняемых субподрядчиком самостоятельно (далее – работы).

Виды и содержание (состав) работ, требования к выполняемым работам, технико-экономические параметры определяются заданием на производство комплексных инженерных изысканий (Приложение № 1 к договору, далее – задание) (пункт 1.2. договора № 1361П-ИИ/518).

Генподрядчик обязуется оплатить выполненные субподрядчиком работы согласно условиям раздела 3 договора (пункт 1.3. договора № 1361П-ИИ/518). 

Договорная цена основных работ по договору согласно смете (Приложение № 2 к договору) составляет 1 073 006 рублей (пункт 3.1. договора № 1361П-ИИ/518). 

В соответствии с пунктом 4.4. договора № 1361П-ИИ/518, при завершении работ субподрядчик вместе с результатами работ представляет генподрядчику подписанные субподрядчиком оригиналы акта сдачи-приемки выполненных работ. 

Генподрядчик (при условии подписания аналогичного акта сдачи-приемки выполненных работ генподрядчика заказчиком) в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ направляет субподрядчику подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ. 

При наличии замечаний к результатам работ генподрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки выполненных работ направляет субподрядчику мотивированный отказ от приемки работ. Причиной отказа может быть некомплектность документации и (или) ее несоответствие заданию и или) действующему законодательству Российской Федерации. 

По утверждению истца, во исполнение условий договора ООО «НПП «Сибгеокарта» выполнило и сдало ответчику результаты работ, что подтверждается  актом № 1 от 22.12.2017 на сумму 1 073 006 рублей, который был подписан ответчиком без каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполнения. 

Пунктом 3.2. договора № 1361П-ИИ/518, оплата выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ производится генподрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств от заказчика на расчетный счет генподрядчика при условии наличия у генподрядчика оригиналов подписанных сторонами договора и акта сдачи-приемки выполненных работ, а также оригиналов счета-фактуры и счета на оплату.

Ответчик в нарушение условий договора выполненные истцом работы не оплатил.

Таким образом, задолженность ответчика по договору № 1361П-ИИ/518 составляет 1 073 006 рублей. 

В соответствии с пунктом 6.2.3. договора № 1361П-ИИ/518, при нарушении по вине генподрядчика срока оплаты выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ субподрядчик вправе предъявить генподрядчику требование об уплате пеней за каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы задержанного генподрядчиком платежа. При просрочке более 60 (шестидесяти) календарных дней размер пеней возрастает до 0,2 % от суммы задержанного генподрядчиком платежа.

Истец начислил ответчику неустойку по договору № 1361П-ИИ/518 в размере 450 660 рублей 52 копейки.

20.11.2017 между  АО «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (генподрядчик) и  ООО «НПП «Сибгеокарта» (субподрядчик) был заключен договор субподряда № 1358П-ИИ/635 (далее – договор № 1358П-ИИ/635), в соответствии с пунктом 2.1. которого субподрядчик обязуется выполнить работы в соответствии с заданием, требованиями ГОСТ и другими действующими нормативными документами РФ в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации, передать результаты работ генподрядчику в установленные сроки, а генподрядчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке, предусмотренном договором. 

Виды и содержание (состав) работ, требования к выполняемым работам, технико-экономические параметры определяются заданием на производство комплексных инженерных изысканий (приложение № 1 к договору, далее «задание»).

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 31.10.2017; окончание выполнения работ – 30.11.2017 (пункт 3.1. договора № 1358П-ИИ/635).

Договорная цена составляет 699 956 рублей 82 копейки (пункт 4.1. договора № 1358П-ИИ/635). 

В соответствии с пунктом 5.1.1. договора № 1358П-ИИ/635, субподрядчик направляет генподрядчику результаты работ и подписанный со своей стороны акт.

Передача генподрядчику результатов работ осуществляется по сопроводительным документам субподрядчика.

Момент передачи результатов работ генподрядчику определяется датой получения результатов работ генподрядчиком, указанной в сопроводительных документах.

По утверждению истца, во исполнение условий договора ООО «НПП «Сибгеокарта» выполнило и сдало ответчику результаты работ, что подтверждается актом № 1 от 13.06.2017 на сумму 699 956 рублей 82 копейки, который был подписан ответчиком без каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполнения.

Истцом была выставлена счет-фактура от 13.06.2018 № 30 ответчику одновременно с подписанием указанного акта. 

Пунктами 4.3.-4.3.2. договора № 1358П-ИИ/635, стороны предусмотрели, что оплата выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ производится генподрядчиком  при условии наличия у генподрядчика оригиналов подписанных сторонами: договора, акта, а также оригинала оформленных в соответствии с действующим законодательством РФ: счета-фактуры и счета на оплату в следующем порядке: в размере 20 %  от стоимости принятых генподрядчиком работ после прохождения государственной экспертизы проектной документации в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств от заказчика на расчетный счет генподрядчика. 

Ответчик, в нарушение условий договора, выполненные истцом работы, не оплатил.

Таким образом, задолженность ответчика по договору № 1358П-ИИ/635 составляет 699 956 рублей 82 копейки. 

В соответствии с пунктом 12.3.1. договора № 1358П-ИИ/635, в случае нарушения генподрядчиком сроков оплаты принятых генподрядчиком работ, предусмотренных разделом 4, субподрядчик вправе предъявить генподрядчику письменное требование об уплате неустойки в размере 0,05 % от суммы просроченного генподрядчиком платежа за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости неоплаченных  генподрядчиком работ.

Истец начислил ответчику неустойку по договору № 1358П-ИИ/635 в размере 20 648 рублей 73 копейки.

12.02.2018 между АО «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (генподрядчик) и  ООО «НПП «Сибгеокарта» (субподрядчик) был заключен договор субподряда № 1395П-ИИ/599 (далее – договор № 1395П-ИИ/599), в соответствии с пунктом 1.1. которого субподрядчик обязуется на условиях договора выполнить инженерные изыскания по объекту «Расширение кустов скважин №№ 2,  6, 10 Ярудейского месторождения на период пробной эксплуатации» в соответствии с заданием, условиями договора и действующими нормативно-правовыми актами РФ (далее «работы»). 

Генподрядчик обязуется принять и оплатить результаты работ, указанных в пункте 1.1. договора, в порядке и размере, предусмотренном договором (пункт 1.2. договора № 1395П-ИИ/599). 

Пунктом 4.1. договора № 1395П-ИИ/599 стороны установили календарные сроки выполнения работ: начало работ: 09.01.2018; окончание работ: 28.02.2018. 

Разделом 7 договора № 1395П-ИИ/599 стороны определили порядок сдачи-приемки выполненных работ.

По утверждению истца, во исполнение условий договора ООО «НПП «Сибгеокарта» выполнило и сдало ответчику результаты работ, что подтверждается актом № 1 от 02.06.2018  на сумму 3 538 820 рублей, который был подписан ответчиком без каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполнения. 

Истцом была выставлена счет-фактура от 02.06.2018 № 37 ответчику одновременно с подписанием указанного акта. 

Расчеты по договору за выполненные субподрядчиком и принятые генподрядчиком работы осуществляются генподрядчиком в следующем порядке:

пункт 5.4.1. договора № 1395П-ИИ/599 предусмотрено, что 90 % договорной цены (а именно: 3 184 938 рублей, в том числе НДС 18 % - 485 838 рублей  - 10 (десять) рабочих дней с момента поступления денежных средств от заказчика на расчетный счет генподрядчика, при наличии у генподрядчика документов, указанных в пунктах 5.1., 7.2. договора.

Ответчик в нарушение условий договор, выполненные истцом работы не оплатил.

Таким образом, задолженность ответчика по договору № 1395П-ИИ/599 составляет        3 184 938 рублей. 

В соответствии с пунктом 10.3.1. договора № 1395П-ИИ/599, в случае нарушения генподрядчиком сроков оплаты выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ субподрядчик вправе предъявить генподрядчику требование об уплате субподрядчику неустойки в виде пеней из расчета 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ, указанной в пункте 3.1. договора.

Истец начислил ответчику неустойку по договору № 1395П-ИИ/599 в размере 222 945 рублей 66 копеек.

12.02.2018 между АО «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (генподрядчик) и  ООО «НПП «Сибгеокарта» (субподрядчик) был заключен договор субподряда № 1396П-ИИ/600 (далее – договор № 1396П-ИИ/600), в соответствии с пунктом 1.1. которого субподрядчик обязуется на условиях договора выполнить инженерные изыскания по объекту «Обустройство кустов скважин № 12, 14, 18, 19 Ярудейского месторождения на период пробной эксплуатации. Корректировка» в соответствии с заданием, условиями договора и действующими нормативно-правовыми актами РФ (далее - «работы»). 

Генподрядчик обязуется принять и оплатить результаты работ, указанных в пункте 1.1. договора, в порядке и размере, предусмотренном договором (пункт 1.2. договора № 1396П-ИИ/600).

Пунктом 3.1. договора № 1396П-ИИ/600 предусмотрено, что стоимость работ определяется сводной сметой (Приложение № 2 к договору) и составляет 1 001 820 рублей.

Пунктом 4.1. договора № 1396П-ИИ/600 предусмотрены календарные сроки выполнения работ: начало работ: 09.01.2018; окончание работ: 28.02.2018. 

Разделом 7 договора № 1396П-ИИ/600 стороны определили порядок сдачи-приемки выполненных работ.

По утверждению истца, во исполнение условий договора ООО «НПП «Сибгеокарта» выполнило и сдало ответчику результаты работ, что подтверждается актом № 1 от 02.06.2018 на сумму 1 001 820 рублей, который был подписан ответчиком без каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполнения. 

Истцом была выставлена счет-фактура от 02.06.2018 № 38 ответчику одновременно с подписанием указанного акта. 

Расчеты по договору за выполненные субподрядчиком и принятые генподрядчиком работы осуществляются генподрядчиком в следующем порядке: 90 % договорной цены (а именно: 901 638 рублей, в том числе НДС 18% - 137 538 рублей  - 10 (десять) рабочих дней с момента поступления денежных средств от заказчика на расчетный счет генподрядчика, при наличии у генподрядчика документов, указанных в пунктах 5.1., 7.2. договора (пункт 5.4.1. договора № 1396П-ИИ/600).

Ответчик в нарушение условий договора выполненные истцом работы не оплатил.

Таким образом, задолженность ответчика по договору № 1396П-ИИ/600 составила 901 638 рублей. 

В соответствии с пунктом 10.3.1. договора № 1396П-ИИ/600, в случае нарушения генподрядчиком сроков оплаты выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ субподрядчик вправе предъявить генподрядчику требование об уплате субподрядчику неустойки в виде пеней из расчета 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ, указанной в пункте 3.1. договора.

Истец начислил ответчику неустойку по договору № 1396П-ИИ/600 в размере 63 114 рублей 66 копеек.

01.03.2018 между АО «ГИПРОНГ-ЭКОМ» (генподрядчик) и  ООО «НПП «Сибгеокарта» (субподрядчик) был заключен договор субподряда № 1407П-ИИ/632 (далее – договор № 1407П-ИИ/632), в соответствии с пунктом 1.1. которого генподрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательство выполнить комплексные инженерные изыскания по объекту: «Парк храпения и отгрузки газового конденсата» (далее - работы) в соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий, являющимся неотъемлемой частью договора (Приложение № 1, далее - задание), передать результаты работ генподрядчику в установленные договором сроки, а генподрядчик обязуется принять результаты надлежаще выполненных работ и оплатить их в согласованном порядке. 

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ -21.12.2017; окончание выполнения работ - 06.03.2018 (пункт 1.2. договора № 1407П-ИИ/632). 

Максимальная стоимость работ определена сторонами в соответствии со сводной сметой, являющейся неотъемлемой частью договора (Приложение № 2, далее - смета) и составляет 1 900 000 рублей. 

В соответствии с пунктом 3.1. договора № 1407П-ИИ/632, приемка выполненных субподрядчиком работ производится генподрядчиком на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.

По утверждению истца, во исполнение условий договора ООО «НПП «Сибгеокарта» выполнило и сдало ответчику результаты работ, что подтверждается актом № 1 от 28.06.2018 на сумму 1 900 000 рублей, который был подписан ответчиком без каких-либо замечаний по объему, качеству и срокам выполнения.

Истцом была выставлена счет-фактура от 28.06.2018 № 72 ответчику одновременно с подписанием указанного акта. 

Пунктом 2.4. договора № 1407П-ИИ/632 предусмотрено, что оплата выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств от заказчика на расчетный счет генподрядчика, при наличии у генподрядчика оригиналов подписанных сторонами: договора и акта сдачи-приемки выполненных работ, а также оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оригиналов: счета-фактуры и счета на оплату. 

Ответчик в нарушение условий договора выполненные истцом работы не оплатил.

Таким образом, задолженность ответчика по договору № 1407П-ИИ/632 составила 1 900 000 рублей.

В соответствии с пунктом 5.6. договора № 1407П-ИИ/632, при нарушении генподрядчиком предусмотренных договором сроков оплаты выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ субподрядчик вправе предъявить генподрядчику требование об уплате пеней в размере 0,1 %  от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

Истец начислил ответчику неустойку по договору № № 1407П-ИИ/632 в размере 83 600 рублей. 

Истец в порядке досудебного урегулирования спора направлял в адрес ответчика претензию от 21.06.2018,  с требованием оплатить задолженность по договорам. Претензия оставлена ответчиком без ответа, в связи с чем истец обратился в суд с исковыми требованиями. 

Отношения сторон по договорам от 21.03.2012 № 1182П-ИИ, от 15.07.2013                      № 1218П-ИИ/296, от 23.10.2013 № 1227П-ИИ/309, от 14.10.2016 № 1355П-ИИ/509,                       от 14.06.2017 № 1378П-ИИ/545, от 07.10.2016 № 1356П-ИИ/507, от 28.07.2017                           № 1387П-ИИ/1388П-ИИ/1389П-ИИ/584, от 13.04.2017 № 1361П-ИИ/518, от 20.11.2017                  № 1358П-ИИ/635, от 12.02.2018 № 1395П-ИИ/599, от 12.02.2018 № 1396П-ИИ/600,                        от 01.03.2018 № 1407П-ИИ/632 регламентируются соответствующими нормами Гражданского кодекса Российской Федерации о подряде. 

Статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации регулирует, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу статьи 758 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.

Статьей 762 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором: уплатить подрядчику установленную цену полностью после завершения всех работ или уплачивать ее частями после завершения отдельных этапов работ.

В порядке статьи 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно статьям 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от их исполнения не допускается. 

Судом установлено, что истец выполнил работы в соответствии с условиями договоров от 21.03.2012 № 1182П-ИИ, от 15.07.2013 № 1218П-ИИ/296, от 23.10.2013 № 1227П-ИИ/309, от 14.10.2016 № 1355П-ИИ/509, от 14.06.2017 № 1378П-ИИ/545, от 07.10.2016 № 1356П-ИИ/507, от 28.07.2017 № 1387П-ИИ/1388П-ИИ/1389П-ИИ/584, от 13.04.2017 № 1361П-ИИ/518, от 20.11.2017 № 1358П-ИИ/635, от 12.02.2018 № 1395П-ИИ/599, от 12.02.2018 № 1396П-ИИ/600, от 01.03.2018 № 1407П-ИИ/632, что подтверждается подписанными без замечаний актами сдачи-приемки выполненных работ, ответчик принял выполненные работы, однако оплату в полном объеме не произвел.  

Пунктом 3.1. статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Принимая во внимание изложенные нормы и обстоятельства, руководствуясь статьями 64, 65, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что исковые требования о взыскании задолженности являются обоснованными и подлежащими удовлетворению в заявленном размере 28 646 562 рубля 09 копеек.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика неустойку в размере:

- 168 423 рубля 23 копейки по договору № 1182П-ИИ;

- 280 000 рублей  по договору № 1218П-ИИ/296;

- 88 607 рублей 18 копеек по договору № 1227П-ИИ/309;

- 1 838 935 рублей 13 копеек по договору № 1356П-ИИ/507;

- 240 500 рублей по договору № 1387П-ИИ/1388П-ИИ/1389П-ИИ/584;

- 450 660 рублей 52 копейки по договору № 1361П-ИИ/518;

- 20 648 рублей 73 копейки по договору № 1358П-ИИ/635;

- 222 945 рублей 66 копеек по договору № 1395П-ИИ/599;

- 63 114 рублей 66 копеек по договору № 1396П-ИИ/600;

- 83 600 рублей по договору № № 1407П-ИИ/632

В соответствии с пунктом 5.3. договора № 1182П-ИИ, в случае задержки выдачи исполнителем документации либо задержки оплаты заказчиком законченных (этапов) работы виновная сторона уплачивает партнеру штраф в размере 0,1 % от стоимости документации (задержанной суммы) за каждый день просрочки сверх вышеуказанного срока, но не более 10 % договорной цены.

В силу пункта 9.2. договора № 1218П-ИИ/296, в случае просрочки оплаты изысканий, кроме оплаты авансового платежа, указанного в пункте 6.3. настоящего договора. субподрядчик вправе предъявить генподрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно оплаченных изысканий за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

В соответствии с пунктом 9.2. договора № 1227П-ИИ/309, в случае просрочки оплаты изысканий, кроме оплаты авансового платежа, указанного в пункте 6.3. настоящего договора, субподрядчик вправе предъявить генподрядчику требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно оплаченных  изысканий за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы задолженности.

В силу пункта 12.3.1. договора № 1356П-ИИ/507, в случае нарушения генподрядчиком сроков оплаты работ, предусмотренных разделом 4 договора, субподрядчик вправе предъявить генподрядчику письменное требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от суммы просроченного генподрядчиком платежа за каждый день просрочки.

В силу пункта 10.4.1. договора № 1387П-ИИ/1388П-ИИ/1389П-ИИ/584, за просрочку оплаты принятых результатов работ (этапов работ) на срок не свыше 30 (тридцати) календарных дней генподрядчик выплачивает неустойку (пени) в размере 0,01 % от своевременно не оплаченной суммы за каждый день просрочки, а после 30 (тридцати) календарных дней - 0,05 % от своевременно неоплаченной суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки за весь период просрочки по неисполненному обязательству не может превышать 10 % от своевременно не оплаченной суммы.

В соответствии с пунктом 6.2.3. договора № 1361П-ИИ/518, при нарушении по вине генподрядчика срока оплаты выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ субподрядчик вправе предъявить генподрядчику требование об уплате пеней за каждый день просрочки в размере 0,1 % от суммы задержанного генподрядчиком платежа. При просрочке более 60 (шестидесяти) календарных дней размер пеней возрастает до 0,2 % от суммы задержанного генподрядчиком платежа.

В соответствии с пунктом 12.3.1. договора № 1358П-ИИ/635, в случае нарушения генподрядчиком сроков оплаты принятых генподрядчиком работ, предусмотренных разделом 4, субподрядчик вправе предъявить генподрядчику письменное требование об уплате неустойки в размере 0,05 % от суммы просроченного генподрядчиком платежа за каждый день просрочки, но не более 20 % от стоимости неоплаченных  генподрядчиком работ.

В соответствии с пунктом 10.3.1. договора № 1395П-ИИ/599, в случае нарушения генподрядчиком сроков оплаты выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ субподрядчик вправе предъявить генподрядчику требование об уплате субподрядчику неустойки в виде пеней из расчета 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ, указанной в пункте 3.1. договора.

В соответствии с пунктом 10.3.1. договора № 1396П-ИИ/600, в случае нарушения генподрядчиком сроков оплаты выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ субподрядчик вправе предъявить генподрядчику требование об уплате субподрядчику неустойки в виде пеней из расчета 0,1 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости работ, указанной в пункте 3.1. договора.

В соответствии с пунктом 5.6. договора № 1407П-ИИ/632, при нарушении генподрядчиком предусмотренных договором сроков оплаты выполненных субподрядчиком и принятых генподрядчиком работ субподрядчик вправе предъявить генподрядчику требование об уплате пеней в размере 0,1 %  от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

В соответствии с частью 1 статьи 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств  может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В силу части 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения. 

Таким образом, учитывая, что материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком срока оплаты, суд считает правомерным взыскать неустойку за нарушение сроков оплаты выполненных работ, период начисления неустойки истцом также подтвержден документально.

Следовательно, требование истца о взыскание неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договорам является обоснованным. Расчет проверен судом и признан обоснованным.

По договорам № 1355П-ИИ/509, № 1378П-ИИ/545 истец начислил ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами, в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 742 476 рублей 49 копеек и 96 585 рублей 33 копейки соответственно. Иной размер ответственности в указанных договорах не предусмотрен.

Согласно пункту 1 статьи 395 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Суд полагает, что размер процентов за пользование чужими денежными средствами определен истцом арифметически верно, в соответствии с требованиями закона. Период просрочки определен в соответствии с фактическими обстоятельствами дела. В этой связи суд полагает, что отраженные в расчете данные, относительно периодов и размера просрочки, соответствуют действительности.

Согласно вышеизложенному, суд считает, что требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Определением от 10.10.2018 Арбитражного суда Тюменской области (дело № А70-14126/2018) в отношении АО «Гипронг-Эком» введена процедура наблюдения. 

Настоящее требование рассмотрено судом в рамках искового производства, поскольку исковое заявление было подано истцом 21.09.2018, то есть до введения процедуры наблюдения.

Суд в определениях от 08.11.2018, от 09.11.2018 разъяснял истцу, что после введения в отношении должника процедуры наблюдения у истца возникло право заявить о приостановлении производства по настоящему делу до рассмотрения вопроса о включении требования в реестр кредиторов. Истец данным правом не воспользовался, соответствующее ходатайство не заявил.

В связи с данными обстоятельствами суд отмечает, в соответствии с пунктом 28 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» если исковое заявление о взыскании с должника долга по денежным обязательствам или обязательным платежам, за исключением текущих платежей, было подано до даты введения наблюдения, то в ходе процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления право выбора принадлежит истцу: либо по его ходатайству суд, рассматривающий его иск, приостанавливает производство по делу на основании части 2 статьи 143 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, либо в отсутствие такого ходатайства этот суд продолжает рассмотрение дела в общем порядке; при этом в силу запрета на осуществление по подобным требованиям исполнительного производства в процедурах наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления (абзац четвертый пункта 1 статьи 63, абзац пятый пункта 1 статьи 81 и абзац второй пункта 2 статьи 95 Закона о банкротстве) исполнительный лист в ходе упомянутых процедур по такому делу не выдается. 

На основании вышеуказанных разъяснений суд рассмотрел данное требование в рамках искового производства; исполнительный лист во исполнение настоящего решения не выдается.

При подаче искового заявления истец уплатил в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 187 715 рублей, что подтверждается платежным поручением от 19.09.2018 № 1392.    

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с удовлетворением исковых требований государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в размере 187 715 рублей.  

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-171, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с Акционерного общества «ГИПРОНГ-ЭКОМ» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Сибгеокарта» 28 646 562 рубля 09 копеек задолженности, 4 296 499 рублей 25 копеек неустойки, а также 187 715 рублей государственной пошлины.

Исполнительный лист не выдается.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тюменской области.

Судья А. Н. Курындина