АРБИТРАЖНЫЙ СУД БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Народный бульвар, д.135, 

<

...> 

Тел./ факс 

<

***>, 32-85-38 Сайт: http://belgorod.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А08-2806/2022

г. Белгород

09 июля 2025 года

Арбитражный суд Белгородской области в составе судьи Петряева А.В., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудио- и видеозаписи секретарём судебного заседания Поданевой О.Л.,  

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "Полевой" к ООО "АДЕН", третьи лица: ООО «Железногорская строительная компания», ИП ФИО1  

о взыскании 916 517,87 руб. (с учетом уточнения искового заявления в порядке ст. 49 АПК РФ),  

при участии в судебном заседании представителей сторон: 

от истца: ФИО2, доверенность № 17/25 от 09.01.2025, выданная сроком до 31.12.2025, паспорт (участие посредством использования системы веб-конференции);  

от ответчика: не явился, уведомлен; от третьих лиц: от ООО «Железногорская строительная компания»: не явился, уведомлен; от ИП ФИО1: не явился, уведомлен, 

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд первой инстанции  

Р Е Ш И Л:

Уточненные исковые требования ООО "Полевой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

Взыскать с ООО "АДЕН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "Полевой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) стоимость невозвращенного (неиспользованного) давальческого материала по договору подряда № 193/21-540/03911 от 04.08.2021 г. в размере 391 460,24 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с 15.09.2021 г. по 30.09.2021 г. в размере 28 866,10 руб., за период с 01.10.2021 г. по 01.03.2022 г. в размере 22 532,82 руб., неустойку за нарушение сроков предоставления исполнительной документации за период с 01.10.2021 г. по 23.03.2022 г. в размере  

313 918,84 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 03.10.2022 г. по 16.05.2025 г. в размере 145 306,82 руб., расходы по оплате проведенных по делу судебных экспертиз в размере 104 507,91 руб.  

На сумму 391 460,24 руб. с 17.05.2025 г. с ООО "АДЕН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ООО "Полевой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 395 ГК РФ по день фактического исполнения обязательства.  

Взыскать с ООО "Полевой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 335,90 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела судом первой инстанции.  

Взыскать с ООО "АДЕН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 20 994,10 руб. государственной пошлины за рассмотрение дела судом первой инстанции.  

Взыскать с ООО "Полевой" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФГБУ Белгородская ЛСЭ Минюста России (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 107 руб. 95 коп. в качестве оплаты проведенной по делу дополнительной судебной экспертизы.  

Взыскать с ООО "АДЕН" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФГБУ Белгородская ЛСЭ Минюста России (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 69 248,05 руб. в качестве оплаты проведенной по делу дополнительной судебной экспертизы.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Белгородской области.  

Судья А.В. Петряев