Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-258807/23-96-1836

27 февраля 2024 года

г. Москва

 

Резолютивная часть решения объявлена 20.02.2024

Полный текст решения изготовлен  27.02.2024

 

Арбитражный суд в составе:

судья Гутник П.С. (единолично), при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению ООО "ЗЕТТА" 125167, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР-КТ, Д. 47, СТР. 2, ПОМЕЩ. 28А, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 20.02.2019, ИНН: 

<

***>, КПП: 771401001 к ООО "ИЗОЛФИН РАША" 105064, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ УЛ., Д. 9, ПОМЕЩ. 2/4, ОГРН: 

<

***>, Дата присвоения ОГРН: 08.07.2020, ИНН: 

<

***>, КПП: 770901001 о взыскании задолженности в размере 5 192 192,76 руб.

при участии:

от истца: ФИО2 по дов. от 10.10.23г.; диплом;

от ответчика: не явился, извещён,

Рассмотрев материалы дела, суд 

 

УСТАНОВИЛ:

ООО "ЗЕТТА" (далее по тексту – Истец) обратилось в арбитражный суд с иском к ООО "ИЗОЛФИН РАША" (далее по тексту – Ответчик) о взыскании задолженности в размере 5 192 192 руб. 76 коп.

Представитель истца поддержал заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске.

Представитель ответчика, надлежащим образом извещённый, в судебное заседание не явился. Дело рассмотрено в порядке ст.ст. 123, 156 АПК РФ.

Заслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, арбитражный суд приходит к следующему.

Между сторонами заключен договор подряда, к правоотношениям сторон применяются положения гл. 37 ГК РФ.

Согласно п. 1 ст. 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (ч. 1 ст. 708 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.

Как установлено ч. 1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.

Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ).

Частью 1 ст. 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Между ООО "Изолфин Раша" (далее - Подрядчик) и ООО "Зетта" (далее -Субподрядчик) заключен договор субподряда на выполнение малярных, пескоструйных и инспекционных работ № 0122 от 24.12.2022 (далее - Договор), а также дополнительные соглашения к указанному договору № 1 от 11.01.2023. № 2 от 03.02.2023, № 3 от 14.04.2023, № 4 от 28.04.2023.

Со стороны Субподрядчика обязательства. Предусмотренные указанным договором и дополнительными соглашениями исполнены, работы выполнены в полном объёме.

Вместе с тем Подрядчиком оплата выполненных работ в полном объёме не произведена.

Согласно пункта 4.1 Договора Оплата принятых подрядчиком работ, предусмотренных договором и выполняемых Субподрядчиком производится в отчетный период при предоставлении оформленных субподрядчиком и подписанных полномочными представителями сторон следующих документов:

- Журнал учета выполненных работ (форма КСб-а)

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2). счет фактуры

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

Расчет за отчетный период в котором выполнялись работы, производится Подрядчиком в течении 30 календарных дней, после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 на основании счета Субподрядчика.

Субподрядчиком в адрес Подрядчика направлен пакет документов, предусмотренный пунктом 4.1 Договора за период с мая 2023 г. по август 2023 г., что подтверждается почтовыми квитанциями № 1750 от 11.10.2023, № 1751 от 11.10.2023, № 1752 от 11.10.2023. № 1753 от 11.10.2023.

Согласно пунктам 13.1, 13.2 Договора сдача-приемка выполненных работ за календарный месяц осуществляется на основании полного комплекта учетной документации, указанной в п. 4.1, 16.1 Договора, представленной субподрядчиком Подрядчику. В течении 5 рабочих дней, следующих за датой получения от Субподрядчика документов, указанных в п. 4.1 Договора, подрядчик обязан подписать акты выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 либо дать мотивированный отказ от приемки выполненных Субподрядчиком работ.

Полный пакет учетной документации, предусмотренный пунктом 4.1 Договора получен Подрядчиком

В срок установленный пунктом 13.2 Договора мотивированный отказ от приемки выполненных работ от Подрядчика в адрес Субподрядчика не поступил.

На момент предъявления искового заявления не оплачены следующие работы (услуги):

Счет №39 от 31.05.2023

Счет №40 от 31.05.2023

Счет № 44 от 30.06.2023

Счет № 45 от 30.06.2023

Счет №46 от 30.06.2023

Счет №49 от 31.07.2023

Счет №50 от 31.07.2023

Счет№51 от 31.07.2023

Счет №52 от 31.07.2023

Счет №58 от 31.08.2023

Счет № 59 от 31.08.2023

Общая сумма задолженности по состоянию на 31.08.2023 составляет 5 192 192.76 (пять миллионов сто девяносто две тысячи сто девяносто два рубля 76 коп.)

В силу положений статей 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями, при том, что односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Из положений статей 702, 740, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что основанием для возникновения у заказчика денежного обязательства по оплате работ по договору является совокупность следующих обстоятельств: выполнение работ и передача их результата заказчику.

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате обусловленных договором работ является сдача работ заказчику путем подписания акта выполненных работ (пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 №51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» (далее - информационное письмо №51).

Судом установлен факт надлежащего исполнения истцом обязательств по договору, что подтверждается подписанными сторонами без разногласий актами выполненных работ.

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих оплату работ в полном объёме ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ, суду не представлено и по существу не оспаривается ответчиком.

Мотивированный отказ от подписания актов ответчик не заявил, как не представил возражений относительно объемов предъявленных к оплате выполненных работ.

Принятие работ свидетельствует о потребительской ценности произведенных работ для заказчика и желании ими воспользоваться. Таким образом, при приемке работ без разногласий ответчик обязан произвести ее оплату.

Кроме того, ответчик не воспользовался правом на отказ от договора на основании ст. 717 ГК РФ.

Частью 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В свою очередь иных доказательств, подтверждающих наличие недостатков в выполненных истцом работах, ответчиком в нарушение статьи 65 АПК РФ в материалы дела не представлено.

Поскольку доказательств погашения спорной задолженности по оплате выполненных истцом работ в предусмотренный договором срок ответчиком не представлено, требования иска о взыскании задолженности в размере 5 192 192 руб. 76 коп. основного долга подлежат удовлетворению в полном объеме.

Госпошлина распределена на основании ч. 1 ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

 

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ИЗОЛФИН РАША" (ИНН: 

<

***>) в пользу ООО "ЗЕТТА" (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 5 192 192 руб. 76 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 48 961 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

 

Судья                                                                                                     П.С. Гутник