130/2019-29703(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

г. Салехард, ул. Республики, д.102, тел. (34922) 5-31-00, 

 www.yamal.arbitr.ru, e-mail: info@yamal.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А81-2309/2019

г. Салехард

07 июня 2019 года

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи  Антоновой Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного  заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по  исковому заявлению Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности  Ямало-Ненецкого автономного округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью «Артстрой - 21 век» (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о взыскании неустойки по государственному контракту   № 0190200000318002422_178355 от 16.05.2018 в размере 2 091 437 рублей 33 копеек и  понуждении к исполнению обязательств,  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО2, доверенность от 25.01.2019 (до перерыва); от ответчика – ФИО3, доверенность от 14.01.2019 (до перерыва); 

руководствуясь статьями 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности  Ямало-Ненецкого автономного округа (629003, Ямало-Ненецкий автономный округ,  

<

...>; дата регистрации – 18.11.2005; ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) удовлетворить частично.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Артстрой - 21 век»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу Департамента гражданской защиты  

и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа (ИНН 8901017188,  ОГРН 1058900021795) пени в размере 877 837 рублей 33 копеек, штраф в размере  606 800 рублей. Всего взыскать 1 484 637 рублей 33 копеек.  

 Обществу с ограниченной ответственностью «Артстрой - 21 век»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в течение месяца со дня вступления решения  суда в законную силу устранить выявленные в течение гарантийного срока недостатки  работ, выполненных в рамках государственного контракта   № 0190200000318002422_178355 от 16.05.2018, а также предоставить  предусмотренную данным контрактом документацию на товар и работы, а именно:  

 по модульному зданию в селе Белоярск Приуральского района Ямало-Ненецкого  автономного округа:  

1) представить Департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности  Ямало-Ненецкого автономного округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  следующую документацию на модульное здание:  

- о техническом исполнении несущих и ограждающих конструкций модульного  здания;  

- экспликацию помещений модульного здания; 

- сведения об общей площади модульного здания, в том числе по отапливаемому  объёму здания; документацию на инженерные сети и коммуникации;  

- справку о выполнении ТУ на подключение модульного здания к тепловым  сетям;  

- справку о выполнении ТУ на подключение модульного здания к сетям  водоснабжения;  

- справку о выполнении ТУ на подключение модульного здания к электрическим  сетям;  

- исполнительную документацию на инженерные системы, их монтаж и наладку;  

- акты проверки заземлений; 

2) обеспечить надежную фиксацию в верхнем положении подъемных ворот  модульного здания;  

3) установить редуктор на подъемные ворота модульного здания; 

4) восстановить полиуретановое покрытие пола гаражного помещения  модульного здания;  

5) закрыть заглушками самонарезающие болты на крыше модульного здания; 

6) заменить смонтированную в гаражном помещении модульного здания  систему удаления выхлопных газов от пожарных автомобилей серии Медуза-150-5-150  

на аналогичную систему, выполняющую, в том числе, функции обязательного  автоматического сброса (отсоединения) от выхлопной трубы пожарных автомобилей  при начале их движения, обеспечения плотности, герметичности подключения к  выхлопной трубе пожарного автомобиля, обеспечения автозапуска вентилятора  вытяжки и автоматический сброс шланга при начале движения автомобиля с  использованием подвесной системы движения шланга на ролике по треку, со  сработкой клапана сброса для снятия давления в муфте обжима выхлопной трубы;  

7) устранить проседание железобетонных плит пола гаражного помещения  модульного здания;  

8) устранить трещины в местах соединения железобетонных плит пола  гаражного помещения модульного здания;  

9) устранить деформацию металлических частей крыльца запасного выхода из  административно-бытового комплекса модульного здания;  

10) установить крепежные элементы (металлические болты и гайки) в  количестве 34 штук на соединениях металлических конструкций модульного здания;  

по модульному зданию в селе Катравож Приуральского района Ямало- Ненецкого автономного округа:  

1) представить Департаменту гражданской защиты и пожарной безопасности  Ямало-Ненецкого автономного округа (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  следующую документацию на модульное здание:  

- о техническом исполнении несущих и ограждающих конструкций модульного  здания;  

- экспликацию помещений модульного здания; 

- сведения об общей площади модульного здания, в том числе по отапливаемому  объёму здания;  

- документацию на инженерные сети и коммуникации; 

- справку о выполнении ТУ на подключение модульного здания к тепловым  сетям;  

- справку о выполнении ТУ на подключение модульного здания к сетям  водоснабжения;  

- справку о выполнении ТУ на подключение модульного здания к электрическим  сетям;  

- исполнительную документацию на инженерные системы, их монтаж и наладку;  

- акты проверки заземлений; 2) заполнить пустоты между плитами в пандусе модульного здания; 

3) устранить деформацию обшивки цоколя по периметру модульного здания;  

4) установить зеркало для въезда и выезда техники посередине гаражного  помещения модульного здания;  

5) устранить отслоения полиуретанового покрытия пола гаражного помещения  модульного здания;  

6) закрыть заглушками самонарезающие болты на крыше модульного здания;  

7) заменить смонтированную в гаражном помещении модульного здания  систему удаления выхлопных газов от пожарных автомобилей серии Медуза-150-5-150  на аналогичную систему, выполняющую, в том числе, функции обязательного  автоматического сброса (отсоединения) от выхлопной трубы пожарных автомобилей  при начале их движения, обеспечения плотности, герметичности подключения к  выхлопной трубе пожарного автомобиля, обеспечения автозапуска вентилятора  вытяжки и автоматический сброс шланга при начале движения автомобиля с  использованием подвесной системы движения шланга на ролике по треку, со  сработкой клапана сброса для снятия давления в муфте обжима выхлопной трубы;  

8) установить крепежные элементы (металлические болты и гайки) в количестве  30 штук на соединениях металлических конструкций модульного здания;  

9) устранить имитацию болтовых соединений на элементах металлоконструкций  модульного здания;  

10) устранить проседание железобетонных плит пола гаражного помещения  модульного здания;  

11) устранить деформацию металлических частей крыльца запасного выхода из  административно-бытового комплекса модульного здания.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Артстрой - 21 век»  (182111, 

<

...>; дата регистрации  – 05.12.2006; ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 29 750 рублей.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой  арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Ямало-Ненецкого  автономного округа.  

В соответствии с частью 5 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации настоящий судебный акт выполнен в форме электронного  документа и подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.  

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа разъясняет, что в  соответствии со статьей 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации решение, выполненное в форме электронного документа, направляется  лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте  арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в  режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.  

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут  быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего  ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или  вручены им под расписку.  

Е.В. Антонова

Судья 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 23.04.2019 13:51:23

Кому выдана Антонова Елена Викторовна