11111202_270776 

Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого, 7, г. Липецк, 398019 

http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А36-13739/2017

г.Липецк

11 апреля 2018 года

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Коровина А.А.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  

муниципального казенного учреждения «Управление строительства города  Липецка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), адрес (место нахождения):  

<

...>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Липецкое дорожно-строительное  предприятие № 1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес (место  нахождения): 

<

...> вл.40А)  

об обязании устранить недостатки и взыскании 763 997 руб. 42 коп.,  

при участии в заседании: от истца – ФИО2, доверенность от 12.03.2018, 

от ответчика – ФИО3, доверенность № 18-12-2017 от 18.12.2017,  

Руководствуясь статьями 167-171, 180, 181 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в части.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Липецкое дорожно- строительное предприятие № 1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в срок  до 01.06.2018 безвозмездно устранить следующие недостатки в выполненных  работах по муниципальному контракту № 145-кс от 20.11.2014:  

 - по ул.Кривенкова: 

 а) устранить разрушение асфальтобетонного покрытия площадью 5 кв.м. в  районе остановочного кармана остановки «28 микрорайон»;  

б) устранить разрушение асфальтобетонного покрытия площадью 5 кв.м.  напротив остановки «28 микрорайон»;  

в) устранить разрушение асфальтобетонного покрытия вокруг смотрового  колодца площадью 5 кв.м. в месте примыкания к кольцевой развязке по  ул.Кривенкова;  

г) посадить клен остролистный в количестве 24 шт. и снежноягодник в  количестве 516 шт. в районе домов № 31 и № 29 по ул.Кривенкова, в районе  автомобильной стоянки по ул.Кривенкова;  

- по ул.Свиридова: 

а) восстановить асфальтобетонное покрытие от кернов площадью 5 кв.м.  между домов № 6 и № 8 по ул.Свиридова;  

б) осуществить посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных  вручную на местном проезде площадью 200 кв.м. в районе дома № 1а по  ул.Свиридова;  

в) осуществить посадку кустарников сирени в количестве 6 шт. и  снежноягодника в количестве 21 шт. в районе дома № 1 и № 1а по ул.Свиридова;  

г) восстановить асфальтобетонное покрытие грязевой дорожки площадью 3 кв.м. в районе дома № 4 по ул.Свиридова. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Липецкое дорожно- строительное предприятие № 1» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, адрес  (место нахождения): 

<

...> вл.40А) в  пользу муниципального казенного учреждения «Управление строительства города  Липецка» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), адрес (место нахождения):  

<

...>) неустойку (штраф) в размере 40 000 руб., а также  судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 24 280 руб.  

В остальной части отказать. 

 На решение в месячный срок может быть подана апелляционная жалоба в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд  Липецкой области.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в  Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Судья А.А.Коровин