263/2023-409780(2) 

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6 http://www.spb.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-67035/2023

04 октября 2023 года

г.Санкт-Петербург

 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:  судьи Кузнецова М.В.,  

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску: 

истец: НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФОНД-РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР  КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМАХ" (адрес: Россия 194044, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  ТОБОЛЬСКАЯ УЛ. 6, ОГРН: 

<

***>);  

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТН-ГРУПП"  (адрес: Россия 196105, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, УЛ. СВЕАБОРГСКАЯ  Д./25, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 4Н, ОГРН: 

<

***>);  

о взыскании 132 926руб. 39коп. 

установил:

Некоммерческая организация «Фонд – региональный оператор капитального  ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – истец) обратилось в  Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к  Обществу с ограниченной ответственностью «ТН-ГРУПП» (далее – ответчик) о  взыскании 132 926руб. 39коп. штрафа за нарушение срока окончания работ по договору  от 11.06.2021г. № 6/17-474/А/КР/2021.  

Определением суда от 21 июля 2023 года дело назначено к рассмотрению в  порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со статьей  228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).  Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам,  участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих  доводов.  

Истец и ответчик надлежащим образом извещены о принятии искового заявления  к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.  

Ответчик возражал относительно удовлетворения иска по основаниям,  изложенным в отзыве.  

В соответствии со статьями 227-229 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, дело рассмотрено в порядке упрощенного производства по  имеющимся в деле доказательствам.  

Резолютивная часть решения вынесена 16 сентября 2023 года.  

От ответчика поступила апелляционная жалоба, в связи с чем изготовлено  решение в полном объеме.  

Исследовав представленные документы сторон, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в режиме ограниченного доступа арбитражный  суд установил следующее.  

Между некоммерческой организацией «Фонд - региональный оператор  капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Истец,  Фонд) и обществом с ограниченной ответственностью «ТН-ГРУПП» (далее - Ответчик,  Подрядчик) заключен договор от 11.06.2021 № 6/17-474/A/KP/2021 (далее - Договор) на  оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирных домах.  

В соответствии с пунктом 1.1 Договора Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя обязательства по оказанию услуг и (или) волнению работ по  капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном (-ых) доме (-ах) (далее -  работы) по адресу (-ам) (далее - объекты) согласно Приложению № 1 к Договору,  являющемуся неотъемлемой частью Договора.  

Согласно адресному перечню объектов, приведенному в Приложении № 1 к  Договору Подрядчик принял на себя обязательства по оказанию услуг и (или)  выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в том числе в  многоквартирном доме, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Бухарестская ул.,  д.9 литера А (далее - Объект).  

В силу пункта 1.2 Договора Подрядчик выполняет работы в соответствий с  требованиями, предъявляемыми действующим законодательством к данным работам,  согласно технической документации, включающей техническое задание на оказание  услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в  многоквартирном доме (п. 2 раздел XV I документации об электронном аукционе) или  проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации  необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности),  определяющих вид, объем, содержание работ и другие предъявляемые к работам  требования, и, сметной документации (Приложение № 3), согласованной и  утвержденной в установленном порядке, а также условиями Договора, определяющими,  в том числе, стоимость работ и сроки их выполнения.  

Согласно пункту 5.2.4 Договора Подрядчик несет ответственность в соответствии  с Договором и действующим законодательством Российской Федераций перед  Заказчиком за допущенные нарушения требований, установленных Договором и  приложениями к нему, а также предусмотренных в действующих правовых актах, в том  числе нормативных, регламентирующих правила осуществления работ, являющихся  предметом Договора и приложений к нему, за снижение или потерю прочности,  устойчивости, надежности здания, сооружения или его части.  

В силу пункта 5.2.5 Договора Подрядчик обеспечивает надлежащее выполнение  работ по Договору и обеспечивает сдачу результата работ Заказчику в порядке и в  сроки, установленные Договором.  

Согласно пункту 8.6 Договора виды работ по Объекту (-ам) считаются принятыми  в эксплуатацию со дня подписания Акта (-ов) о приемке в эксплуатацию в соответствии  с пунктом 8.5 Договора.  

В соответствии с пунктом 2.2 Договора датой окончания выполнения работ на  объекте по виду работ считается дата подписания Акта приемки оказанных услуг и  (или) выполненных работ по капитальному ремонту (далее - Акт приемки в  эксплуатацию).  

Объект был передан для выполнения работ 18.06.2021 Подрядчику для  производства работ по капитальному ремонту по акту передачи объекта для  производства работ по капитальному ремонту общего имущества.  

В соответствии с пунктом 2.1 Договора срок окончание работ по Договору - через  17 недель (119 календарных дней) с момента передачи первого объекта для выполнения  работ. Сроки начала и окончания выполнения отдельных этапов по каждому объекту  определяются Графиком выполнения работ согласно Приложению № 4 к Договору. С  учетом того, что акты передачи объектов подписаны сторонами 18.06.2021, срок  окончания выполнения работ по Договору приходится на 15.10.2021.  

В ходе проведения мероприятий строительного контроля Фондом было  установлено, что Подрядчик дважды допустил нарушение сроков окончания  выполнения работ по видам работ (покрытие кровли верхним слоем, сдача объекта в  эксплуатацию), установленных Приложением № 4 к Договору на Объекте, что  подтверждается актами от 18.10.2021 и 22.10.2021.  

Положениями статей 309 и 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны  исполнятся надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и  требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и  требований в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми  требованиями, кроме того, односторонний отказ от исполнения обязательства или  одностороннее изменение его условий не допускается.  

Согласно статье 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик)  обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и  сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить  его.  

Согласно пункту 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного  Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 основанием для возникновения  обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ  заказчику.  

В силу статьи 12 ГК РФ защита гражданских прав осуществляется, в частности,  путем присуждения к исполнению обязанности в натуре, а также взыскания неустойки.  

В соответствии со статьей 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается  определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан  уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате  неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.  

В соответствии с пунктом 11.4. Договора за нарушение Подрядчиком срока  окончания выполнения работ по видам работ на объекте, установленных Графиком  выполнения работ согласно Приложению № 4 к Договору, а также срока окончания  проведения основных этапов выполнения работ, установленных Графиком выполнения  работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости вида или  этапа работ на объекте за каждый факт просрочки. Стоимость работ по ремонту крыши  по адресу: Санкт-Петербург, Бухарестская ул., д.9 литера А в соответствии с  Приложением № 2 к Договору составляет 6 646 319 (Шесть миллионов шестьсот сорок  шесть тысяч триста девятнадцать) рублей 50 копеек.  

Расчет штрафа по пункту 11.4. Договора: 

6 646 319,50 руб. (стоимость выполнения вида работ по Договору) х 1% (размер  штрафа) х 2 (количество фактов) = 132 926,39 руб.  

Следовательно, у Подрядчика возникла задолженность перед Фондом по оплате  штрафа за нарушение сроков окончания проведения основных этапов волнения работ по  Договору в размере 132 926 (Сто тридцать две тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей  39 копеек.  

С целью соблюдения досудебного порядка разрежения спора в адрес Ответчика  была направлена претензия № 2-61852/21 от 29.11.2021, однако Ответчик в  добровольном порядке требования Фонда не исполнил.  

Доводы ответчика в отзыве прямого значения для отказа во взыскании договорной  неустойки при наличии просрочки не имеют.  

В силу требований, изложенных в статье 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в  деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание  своих требований и возражений.  

Ответчиком не изложены достаточные основания его возражений в отношении  заявленного требования, в связи с чем иск подлежит удовлетворению, с отнесением  расходов по госпошлине на основании статьи 110 АПК РФ на ответчика.  

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации  

решил:

Взыскать с ООО "ТН-ГРУПП" (адрес: Россия 196105, Санкт-Петербург, Санкт- Петербург, УЛ. СВЕАБОРГСКАЯ Д./25, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 4Н, ОГРН:  

<

***>) в пользу Некоммерческой организации "ФОНД-РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ОПЕРАТОР КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В  МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ" (адрес: Россия 194044, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, г  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ТОБОЛЬСКАЯ УЛ. 6, ОГРН: 

<

***>) 132 926руб.  39коп. штрафа за нарушение срока выполнения работ по договору от 11.06.2021г.   № 6/17-474/А/КР/2021 и 4 988руб. расходов по госпошлине.  

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в  Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня  принятия.  

Судья Кузнецов М.В.