АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

 

Дело № А28-11109/2024

г. Киров

11 февраля 2025 года

Резолютивная часть решения объявлена 04 февраля 2025 года 

В полном объеме решение изготовлено 11 февраля 2025 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Шамовой О.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Чураковой А.Д.,

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению

акционерного общества «Горэлектросеть» (ИНН:

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610014, Россия, 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель плюс» (ИНН:

<

***>, ОГРН:

<

***>, адрес: 429170, Россия, 

<

...>),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Стройтек» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>, место нахождения: 610035, 

<

...> «а»)

о взыскании 884 392 рублей 02 копеек,

без участия в судебном заседании представителей,

установил:

акционерное общество «Горэлектросеть» (далее – истец, АО «Горэлектросеть») обратилось в Арбитражный суд Кировской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель плюс» (далее – ответчик, ООО «Строитель плюс») о взыскании 462 427 рублей 20 копеек платы за технологическое присоединение к электрическим сетям по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 17.02.2021 №103/24-21ТП/Л (далее - договор), неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по договору в размере 421 964 рублей 82 копеек, а также судебных расходов.

Исковые требования основаны на положениях статей 307, 309, 310, 314, 330 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком обязательств по договору.

Определением Арбитражного суда Кировской области от 17.09.2024 исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

Определением суда от 17.10.2024 произведена замена судьи Заболотских Е.М. на судью Шамову О.В.

Определением от 07.11.2024 суд перешел к рассмотрению дела в общем порядке; к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Стройтек» (далее – третье лицо, ООО «Стройтек»).

Лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. 

Ответчик отзыв по существу спора не представил. В силу части 2 статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) ответчик принял на себя риск наступления последствий за несовершение процессуальных действий по представлению в суд отзывов на исковое заявление.

Третье лицо отзыв в письменном виде не представило.

На основании статьи 156 АПК РФ судебное заседание проведено в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле.

Исследовав имеющиеся материалы дела, суд установил следующее.

17.02.2021 между истцом (сетевая организация) и ООО «Стройтек» (заявитель) заключен договор, по которому сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ВРУ реконструкции здания МБОУ МУК №4 под среднюю общеобразовательную школу, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

17.05.2023 АО «Горэлектросеть» (сетевая организация) и ООО «Строитель Плюс» заключили договор о передаче прав и обязанностей по договору от 17.02.2021 №103/24-21тп/Л, в соответствии с которым Заявителем и приемником прав и обязанностей по договору признано ООО «Строитель Плюс».

17.05.2023 АО «Горэлектросеть» и ООО «Строитель Плюс» заключили дополнительное соглашение №1 к договору, изложив преамбулу договора, реквизиты сторон договора, а также п.5, 10 в новой редакции. 

Согласно п.5 договора, в редакции дополнительного соглашения от 17.05.2023, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – до 01.06.2023.

Согласно п.8 договора заявитель обязался надлежащим образом исполнять указанные в разделе III договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение. 

В соответствии с п.5 договора, в редакции дополнительного соглашения от 17.05.2023, размер платы за технологическое присоединение составляет 544 032 рублей 00 копеек, в том числе НДС 90 672 рубля 00 копеек. На момент заключения дополнительного соглашения №1 оплачена сумма 81 604 рублей 80 копеек, в том числе НДС. Оставшуюся сумму необходимо внести согласно подпунктам «б», «в» и «г» п.11 договора.

Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 

а) 15% платы за технологическое присоединение, что составляет 81 604 рубля 80 копеек, в том числе НДС 13 600 рублей – вносятся в течение пяти рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета; 

б) 30% платы за технологическое присоединение, что составляет 163 209 рублей 60 копеек, в том числе НДС 27 201 рубль 60 копеек – вносятся в течение шестидесяти дней со дня заключения договора, но не позднее дня фактического присоединения; 

в) 45% платы за технологическое присоединение, что составляет 244 814 рублей 40 копеек, в том числе НДС 40 802 рубля 40 копеек – вносятся в течение пятнадцати дней со дня фактического присоединения; 

г) 10% платы за технологическое присоединение, что составляет 54 403 рубля 20 копеек, в том числе НДС 9 067 рублей 20 копеек – вносятся в течение пятнадцати дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения (п.11 договора).

Согласно п.12 договора датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации.

Выполнение АО «Горэлектросеть» обязательств по договору подтверждается актами об осуществлении технологического присоединения и о выполнении технических условий от 18.05.2023, ответчиком не оспорено. 

Поскольку обязательства по внесению платы за технологическое присоединение со стороны ответчика не выполнены в установленный договором срок, истец направлял ответчику претензию с требованием оплатить задолженность. Претензия оставлена без ответа.

Неурегулирование спора во внесудебном порядке явилось основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Суд, оценив по правилам статьи 71 АПК РФ доказательства, представленные в материалы дела, приходит к следующим выводам.

Из статьи 8 ГК РФ следует, что гражданские права и обязанности, в частности, возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, договоров.

Согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» утверждены Правила технологического присоединения (далее – Правила № 861).

Правила № 861 определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, регламентируют процедуру технологического присоединения, устанавливают существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения.

Договор технологического присоединения по своей правовой природе является договором возмездного оказания услуг, регулирование которого осуществляется, в том числе статьями 779 - 783 ГК РФ.

Согласно статье 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу положений статей 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таковых ? в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается. 

Согласно статье 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора, условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

Во исполнение условий договора истец выполнил свои обязательства надлежащим образом.

Ответчик факт надлежащего исполнения истцом своих обязательств не оспорил, доказательства оплаты в установленные договором сроки не представил, в связи с чем, требование истца о взыскании 462 427 рублей 20 копеек платы за технологическое присоединение к электрическим сетям по договору является законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению в полном объеме.

Требование о взыскании с ответчика неустойки за нарушение обязательств по оплате за технологическое присоединение подлежит удовлетворению на основании пункта 18 договора, статей 330, 331 ГК РФ.

В соответствии с пунктом 18 договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

По расчету истца сумма неустойки составляет 421 964 рублей 82 копеек.

Суд проверил расчет истца и признает его арифметически верным. Ответчиком расчет не оспорен.

Оснований для освобождения от взыскания неустойки или снижения ее размера судом не установлено.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины в размере 20 687 рублей 00 копеек подлежат возмещению истцу со стороны ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель плюс» (ИНН:

<

***>, ОГРН:

<

***>, адрес: 429170, Россия, 

<

...>) в пользу акционерного общества «Горэлектросеть» (ИНН:

<

***>, ОГРН: 

<

***>, адрес: 610014, Россия, 

<

...>) задолженность в размере 462 427 (четыреста шестьдесят две тысячи четыреста двадцать семь) рублей 20 копеек, неустойку в размере 421 964 (четыреста двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рубля 82 копейки, судебные расходы в размере 20 687 (двадцать тысяч шестьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

Судья                                                                                                  О.В. Шамова