АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А53-27092/2023

24 октября 2023 года

г. Ростов-на-Дону

 

Резолютивная часть решения объявлена   17 октября 2023 года

Полный текст решения изготовлен            24 октября 2023 года

 

Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Запорожко Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А53-27092/2023

по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-Т» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Таганрогское ДСУ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>)

о взыскании 1 829 193 руб. задолженности, 222 840,22 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты задолженности,

в отсутствие лиц, участвующих в деле, 

установил:

общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-Т» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Таганрогское ДСУ» о взыскании 2 052 033,22 руб. задолженности, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактической оплаты задолженности.

Исковые требования мотивированы ненадлежащим исполнением ответчиком договорных обязательств по оплате выполненных работ.

От истца поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие представителя.

Ответчик явку представителя в судебное заседание не обеспечил, отзыв на иск не направил, о рассмотрении дела уведомлен надлежащим образом, что подтверждается приобщенным к материалам дела почтовым уведомлением о вручении корреспонденции суда представителю ответчика.

Истец и ответчик явку представителей в судебное заседание не обеспечили, в связи с чем суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей указанных лиц в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом правил статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о том, что лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.

Суд, исследовав материалы дела, изучив все представленные документальные доказательства и оценив их в совокупности, установил следующее.

Между ООО «Стройкомплекс-Т» (подрядчик) и ООО «Таганрогское ДСУ» (заказчик) 04 февраля 2021 года заключен договор подряда № 07-02/21, в соответствии с которым, подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту наружного освещения на объекте: а/д г. Ростов-на-Дону - сл. Родионово-Несветайская - г. Новошахтинск - х. Ленина на участке км 9+000, (далее - объект), в соответствии с условиями настоящего договора и сметой (приложение №1) являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Срок окончания работ в соответствии с п. 2.1 договора 11 февраля 2021 года.

В соответствии с п. 2.2 договора выполненные работы подтверждаются актом приемки выполненных работ (форма КС-2), а их стоимость - справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписываемыми уполномоченными на то представителями подрядчика и заказчика.

Согласно п. 3.1 договора стоимость работ определяется сметой и составляет 82 518 (восемьдесят две тысячи пятьсот восемнадцать) рублей, без НДС. Стоимость работ включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

В силу с п. 5.1 договора сдача и приемка выполненных работ по настоящему договору осуществляется путем подписания уполномоченными представителями сторон акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). По результатам приемки заказчик подписывает акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, либо предоставляет подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

Подрядчик свои обязательства по договору подряда № 07-02/21 выполнил своевременно и в полном объеме.

В соответствии с актом выполненных работ № 1 от 11.02.2021 (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.02.2021, работы выполненные подрядчиком по договору подряда № 07-02/21 приняты заказчиком без замечаний. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не поступало.

Пунктом 3.3 договора предусмотрено, что оплата по настоящему договору осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

ООО «Таганрогское ДСУ» нарушило принятые на себя обязательства в части своевременной оплаты выполненных работ.

Срок оплаты выполненных работ истек 16 марта 2021 года.

По состоянию на 18.07.2023 сумма задолженности ООО «Таганрогское ДСУ» перед ООО «Стройкомплекс-Т»  за выполненные работы по договору подряда № 07-02/21 составляет 82 518 руб.

Истцом также начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17.03.2021 по 18.07.2023 в сумме 11 530,47 руб., с исключением периода моратория, введенного Постановлением Правительства РФ № 497.

Истец 06.06.2023 направил в адрес ответчика претензию с просьбой погасить задолженность, однако указанная претензия было оставлена ответчиком без удовлетворения.

Между ООО «Стройкомплекс-Т»  (подрядчик) и ООО «Таганрогское ДСУ» (заказчик) 05 февраля 2021 года заключен договор подряда № 08-02/21.

В соответствии с п. 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить работы по установке светофора Т7 с автономным питанием и дополнительным освещением на объекте: Старое направление а\д Ростов-на-Дону-Таганрог (до гр. с Украиной) на участке км2+000-км3+000 (далее - объект), в соответствии с условиями настоящего договора и сметой (Приложение №1) являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Срок выполнения работ в соответствии с п.2.1 договора с даты заключения договора до 11.02.2021.

В соответствии с п. 2.2 договора выполненные работы подтверждаются актом приемки выполненных работ (форма КС-2), а их стоимость - справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписываемыми уполномоченными на то представителя подрядчика и заказчика.

В силу п. 3.1 договора подряда стоимость работ определяется сметой и составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей, без НДС. Стоимость работ включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

Пунктом 5.1 договора предусмотрено, что сдача и приемка выполненных работ по настоящему договору осуществляется путем подписания уполномоченными представителями сторон акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). По результатам приемки заказчик подписывает акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, либо предоставляет подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

Подрядчик свои обязательства по договору подряда № 08-02/21 выполнил своевременно и в полном объеме.

В соответствии с актом выполненных работ № 1 от 11.02.2021 (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.02.2021, работы выполненные подрядчиком по договору подряда № 08-02/21 приняты заказчиком без замечаний. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не поступало.

Согласно п. 3.3 договора оплата по настоящему договору осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

ООО «Таганрогское ДСУ» нарушило принятые на себя обязательства в части своевременной оплаты выполненных работ.

Срок оплаты выполненных работ истек 16 марта 2021 года.

По состоянию на 17.07.2023 сумма задолженности ООО «Таганрогское ДСУ» перед ООО «Стройкомплекс-Т»  за выполненные по договору подряда № 08-02/21 работы составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей.

Истец также начислил проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17.03.2021 по 18.07.2023 в сумме 97 813,01 руб., с исключением периода моратория.

Истец 06.06.2023 направил в адрес ответчика претензию с просьбой погасить задолженность, однако указанная претензия было оставлена ответчиком без удовлетворения.

05 февраля 2021 года между ООО «Стройкомплекс-Т» (подрядчик) и ООО «Таганрогское ДСУ» (заказчик) заключен договор подряда № 9-02/21.

В соответствии с п. 1.1 договора подряда № 9-02/21 подрядчик обязуется выполнить из собственных материалов работы по ремонту светофоров с автономным питанием и дополнительным освещением на объекте: старое направление а\д Ростов-на-Дону - Таганрог (до гр. с Украиной (далее - объект), в соответствии с условиями настоящего договора и сметой (приложение №1) являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Срок выполнения работ в соответствии с п.2.1 договора в течение 10 дней с даты заключения договора.

В соответствии с п. 2.2 договора подряда выполненные работы подтверждаются актом приемки выполненных работ (форма КС-2), а их стоимость -  справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписываемыми уполномоченными на то представителя подрядчика и заказчика.

В соответствии с п. 3.1 договора стоимость работ определяется сметой и составляет 181 500 (сто восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей, без НДС (УСН). Стоимость работ включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

В соответствии с п. 5.1 договора подряда сдача и приемка выполненных работ по настоящему договору осуществляется путем подписания уполномоченными представителями сторон акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). По результатам приемки заказчик подписывает акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, либо предоставляет подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

Подрядчик свои обязательства по договору подряда № 9-02/21 выполнил своевременно и в полном объеме.

В соответствии с актом выполненных работ № 1 от 11.02.2021 (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.02.2021, работы выполненные подрядчиком по договору подряда № 9-02/21 приняты заказчиком без замечаний. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от Заказчика не поступало.

В соответствии с п. 3.3 договора подряда оплата по настоящему договору осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

ООО «Таганрогское ДСУ» нарушило принятые на себя обязательства в части своевременной оплаты выполненных работ.

Срок оплаты выполненных работ истек 16 марта 2021 года.

По состоянию на 18.07.2023 сумма задолженности ООО «Таганрогское ДСУ» перед ООО «Стройкомплекс-Т» за выполненные по договору подряда № 9-02/21 работы составляет 181 500 (сто восемьдесят одна тысяча пятьсот) рублей.

Истец также начислил проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17.03.2021 по 18.07.2023 в сумме 25 361,51 руб., с исключением периода моратория.

Истец 06.06.2023 направил в адрес ответчика претензию с просьбой погасить задолженность, однако указанная претензия было оставлена ответчиком без удовлетворения.

12 марта 2021 года между ООО «Стройкомплекс-Т»  (подрядчик) и ООО «Таганрогское ДСУ» (заказчик) заключен договор подряда № 18-03/21.

В соответствии с п. 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить из собственных материалов работы по Ремонту светофоров Т7 с автономным питанием и дополнительным освещением на объекте: а/д с. Чалтырь - с. Александровка - с. Калмыково - с. Петровка на участке км23+150, на участке км23+300, на участке км22+387, на участке км23+770, на участке км26+460, на участке км27+180, на участке км28+280 (далее - объект), в соответствии с условиями настоящего договора и сметой (приложение №1) являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Срок выполнения работ в соответствии с п.2.1 договора в течение 10 дней с даты заключения договора.

В соответствии с п. 2.2 договора выполненные работы подтверждаются актом приемки выполненных работ (форма КС-2), а их стоимость  справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписываемыми уполномоченными на то представителя подрядчика и заказчика.

В соответствии с п. 3.1 договора стоимость работ определяется сметой и составляет 202 000 (двести две тысячи) рублей, без НДС (УСН). Стоимость работ включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

В соответствии с п. 5.1 договора сдача и приемка выполненных работ по настоящему договору осуществляется путем подписания уполномоченными представителями сторон акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). По результатам приемки заказчик подписывает акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, либо предоставляет подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

Подрядчик свои обязательства по договору выполнил своевременно и в полном объеме.

В соответствии с актом выполненных работ № 1 от 17.03.2021 (форма КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 17.03.2021, работы выполненные подрядчиком по договору подряда № 18-03/21 приняты заказчиком без замечаний. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не поступало.

В соответствии с п. 3.3 договора оплата по настоящему договору осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

ООО «Таганрогское ДСУ» нарушило принятые на себя обязательства в части своевременной оплаты выполненных работ.

Срок оплаты выполненных работ истек 16 апреля 2021 года.

По состоянию на 18.07.2023 сумма задолженности ООО «Таганрогское ДСУ» перед ООО «Стройкомплекс-Т»  за выполненные по Договору подряда № 18-03/21 работы составляет 202 000 (двести две тысячи) рублей.

Истец также начислил проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 17.04.2021 по 18.07.2023 в сумме 27 460,93 руб., с исключением периода моратория.

Истец   06.06.2023   направил   в   адрес   ответчика   претензию   с   просьбой   погасить задолженность, однако указанная претензия было оставлена ответчиком без удовлетворения.

11 октября 2021 года между ООО «Стройкомплекс-Т»  (подрядчик) и ООО «Таганрогское ДСУ» (заказчик) заключен договор подряда № 86-10/21.

В соответствии с п. 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить из собственных материалов работы по установке светодиодных дорожных знаков с автономным питанием на объекте: «Федеральная дорога А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог - гр. Украины на участке км 5+670-км 6+200, км76+313-км76+616 (далее - объект), в соответствии с условиями настоящего договора и локальными сметами (приложение №1, приложение №2) являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Срок выполнения работ в соответствии с п.2.1 договора с даты заключения договора до 15 ноября 2021г.

В соответствии с п. 2.2 договора выполненные работы подтверждаются актом приемки выполненных работ (форма КС-2), а их стоимость справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписываемыми уполномоченными на то представителя подрядчика и заказчика.

В соответствии с п. 3.1 договора стоимость работ определяется сметами и составляет 437 000 (четыреста тридцать семь тысяч) рублей, без НДС (УСН). Стоимость работ включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

В соответствии с п. 5.1 договора по результатам приемки заказчик подписывает акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, либо предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

Подрядчик свои обязательства по договору подряда № 86-10/21 выполнил своевременно и в полном объеме.

В соответствии с актом выполненных работ № 1 от 15.11.2021 (форма КС-2), актом выполненных работ № 2 от 15.11.2021, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 15.11.2021 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 15.11.2021, работы выполненные подрядчиком по договору подряда № 86-10/21 приняты заказчиком без замечаний. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не поступало.

В соответствии с п. 3.3 договора оплата по настоящему договору осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3.

ООО «Таганрогское ДСУ» нарушило принятые на себя обязательства в части своевременной оплаты выполненных работ.

Срок оплаты выполненных работ истек 15 декабря 2021 года.

По состоянию на 18.07. 2023 сумма задолженности ООО «Таганрогское ДСУ» перед ООО «Стройкомплекс-Т» за выполненные по договору подряда № 86-10/21 работы составляет 437 000 (четыреста тридцать семь тысяч) рублей.

Истец также начислил проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 16.12.2021 по 18.07.2023 в сумме 41 353,38 руб., с исключением периода моратория.

Истец 06.06.2023 направил в адрес ответчика претензию с просьбой погасить задолженность, однако, указанная претензия было оставлена ответчиком без удовлетворения.

29 ноября 2021 года между ООО «Стройкомплекс-Т»  (подрядчик) и ООО «Таганрогское ДСУ» (заказчик) заключен договор подряда № 105-11/21.

В соответствии с п. 1.1 договора подрядчик обязуется выполнить из собственных материалов работы по установке светодиодных дорожных элементов с автономным питанием на объекте: «Федеральная дорога А-280 Ростов-на-Дону – Таганрог - гр. Украины на участке км 5+670-км 6+200, км55+228 (далее - объект), в соответствии с условиями настоящего договора и локальными сметами (приложение №1, приложение №2) являющееся неотъемлемой частью настоящего договора), а заказчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.

Срок выполнения работ в соответствии с п. 2.1 договора с даты заключения договора до 29 декабря 2021г.

В соответствии с п. 2.2 договора выполненные работы подтверждаются актом приемки выполненных работ (форма КС-2), а их стоимость справкой о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписываемыми уполномоченными на то представителя подрядчика и заказчика.

В соответствии с п. 3.1 договора стоимость работ определяется сметами и составляет 226 175 (двести двадцать шесть тысяч сто семьдесят пять) рублей, без НДС (УСН). Стоимость работ включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

В соответствии с п. 5.1  договора по результатам приемки заказчик подписывает акт приемки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат, либо предоставляет подрядчику мотивированный отказ от приемки выполненных работ.

Подрядчик свои обязательства по договору подряда № 105-11/21 выполнил своевременно и в полном объеме.

В соответствии с актом выполненных работ № 1 от 23.12.2021 (форма КС-2), актом выполненных работ № 2 от 23.12.2021, справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 23.12.2021 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 23.12.2021, работы выполненные подрядчиком по договору подряда № 105-11/21 приняты заказчиком без замечаний. Претензий по качеству и срокам выполнения работ от заказчика не поступало.

В соответствии с п. 3.3 договора оплата по настоящему договору осуществляется в течение 30 календарных дней после подписания акта выполненных работ КС-2, справки о стоимости выполненных работ КС-3.

ООО «Таганрогское ДСУ» нарушило принятые на себя обязательства в части своевременной оплаты выполненных работ.

Срок оплаты выполненных работ истек 24 января 2022 года.

По состоянию на 18.07.2023 сумма задолженности ООО «Таганрогское ДСУ» перед ООО «Стройкомплекс-Т» за выполненные по договору подряда № 105-11/21 работы составляет 226 175 (двести двадцать шесть тысяч сто семьдесят пять) руб.

Истец также начислил проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.01.2022 по 18.07.2023 в сумме 19 320,92 руб., с исключением периода моратория.

Истец 06.06.2023 направил в адрес ответчика претензию с просьбой погасить задолженность, однако указанная претензия было оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

Спорные правоотношения по своей правовой природе возникли из договора на выполнение подрядных работ, в силу чего подпадают под правовое регулирование общих норм обязательственного права части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, и подлежат специальному регулированию нормами главы 37 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда (пункт 1 статьи 746 Гражданского кодекса). При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 указанного Кодекса.

По смыслу названных норм основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача ему результата работ подрядчиком.

В пункте 4 статьи 753 Гражданского кодекса установлено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляется актом, подписанным сторонами.

Как разъяснено в пункте 8 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» в соответствии с пунктом 1 статьи 711 и пунктом 1 статьи 746 Гражданского кодекса по договору строительного подряда оплате подлежит фактически выполненный (переданный заказчику) результат работ. Принятие заказчиком результата работ свидетельствует о его потребительской ценности для него и желании им воспользоваться. В таком случае выполненные работы подлежат оплате.

В силу части 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Нормы статьи 70 АПК РФ содержат положения, освобождающие сторон от доказывания признанных ими обстоятельств. Часть 3.1 статьи 70 АПК РФ закреплена с целью повышения дисциплины заинтересованных участников процесса в надлежащем использовании ими своих процессуальных прав и обязанностей. В связи с изложенным участники процесса в силу статьи 9 АПК РФ должны нести риск наступления последствий несовершения ими процессуальных действий.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований.

В соответствии со статьей 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Ответчик с учетом принципа добросовестности в реализации процессуальных прав и обязанностей, установленному статьей 41 АПК РФ, все доказательства и пояснения обязан представлять суду своевременно.

Ответчик каких-либо возражений относительно заявленных требований, порядка расчета суммы, доказательств оплаты возникшей задолженности не направил, а потому требование о взыскании задолженности по вышеуказанным договорам подлежит удовлетворению в полном объеме в размере 1 829 193 руб.

Предметом иска также является требование о взыскании с ответчика 222 840,22 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами; проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на остаток суммы задолженности 1 829 193 руб., исходя из ключевой ставки Центрального Банка России, действующей в соответствующие периоды,  за каждый день просрочки, за период с 19.07.2023 по день фактической оплаты задолженности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Судом проверен представленных истцом расчет процентов и признан верным, период просрочки определен правильно, а потому требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 22 «О некоторых вопросах присуждения взыскателю денежных средств за неисполнение судебного акта», по смыслу статей 330, 395, 809 Гражданского кодекса Российской Федерации истец вправе требовать присуждения неустойки или иных процентов по день фактического исполнения обязательства.

При присуждении неустойки по день фактического исполнения обязательства расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, по смыслу п. 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», осуществляется в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (ч. 1 ст. 7, ст. 8, п. 16 ч. 1 ст. 64 и ч. 2 ст. 70 Закона об исполнительном производстве) по ставке, действующей на дату исполнения судебного решения.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ судебные расходы по оплате государственной пошлины подлежат отнесению на ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Таганрогское ДСУ» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс-Т» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) 1 829 193 руб. задолженности; 222 840,22 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами; проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на остаток суммы задолженности 1 829 193 руб., исходя из ключевой ставки Центрального Банка России, действующей в соответствующие периоды,  за каждый день просрочки, за период с 19.07.2023 по день фактической оплаты задолженности, а также 33 260 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

 

Судья                                                                                                       Е.В. Запорожко