500/2021-20374(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru  

Именем Российской Федерации  

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г. Архангельск Дело № А05-3843/2020  

от 04 марта 2021 года 

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области  

РЕШИЛ:

Обществу с ограниченной ответственностью строительная компания "Константа"  (ОГРН 

<

***>) в течение 30 дней с момента вступления решения в законную силу  устранить недостатки в работах по ремонту приемного отделения ГБУЗ АО "Архангельская  областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова" по адресу: 

<

...>, выполненные по контракту № 316-К-18 от 29.12.2018, а  именно:  

- в гардеробе площадью 18,2 кв.м. (помещение № 1 плана) произвести: замену  облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС  профилей листами в один слой, окраску поливинилацетатными водоэмульсионными  составами улучшенная, по сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску;  разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со  свариванием полотнищ в стыках;  

- в кабинете старшей медицинской сестры площадью 15,8 кв.м. (помещение № 3 плана)  произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому  каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску  поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным  конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума;  устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену  плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;  

- в санузле площадью 1,4 кв.м. (помещение № За плана) произвести: замену плитки  керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;  

- в кабинете сестры-хозяйки (кастелянши) площадью 18,5 кв. м. (помещение № 2  плана) произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному  металлическому каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску  поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным  конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума;  устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;  

- в сестринской площадью 18,5 кв.м. (помещение № 4 плана) произвести: замену  облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС  профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными  составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску;  

разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со  свариванием полотнищ в стыках;  

- в ординаторской площадью 26,5 кв.м. (помещение № 24 плана) произвести: замену  облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС  профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными  составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску;  разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со  свариванием полотнищ в стыках;  

- в приемно-смотровом боксе № 1 площадью 12,3 кв.м. (помещение № 5 плана)  произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому  каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными  водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен,  подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из  линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену дверного полотна и коробки;  

- в приемно-смотровом боксе № 2 площадью 12,3 кв.м. (помещение № 5а плана)  произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому  каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными  водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен,  подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из  линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену дверного полотна и коробки;  

- в шлюзе между боксами № 1 и 2 площадью 5,9 кв.м. (помещение № 5г плана)  произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому  каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными  водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен,  подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из  линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;  

- в кабинете заведующего отделением площадью 13,2 кв.м. (помещение № 21 плана)  произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому  каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными  водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен,  подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из  линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;  

- в приемно-смотровом боксе № 3 площадью 12,3 кв.м. (помещение № 6 плана)  произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому  каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными  водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным  под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со  свариванием полотнищ в стыках; замену дверного полотна и коробки;  

- в приемно-смотровом боксе № 4 площадью 12,3 кв.м. (помещение № 6а плана)  произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому  каркасу из ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными  водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен,  подготовленным под окраску; разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из  линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках; замену дверного полотна и  коробки;  

- в шлюзе между боксами № 3 и 4 площадью 5,9 кв.м. (помещение № 6г плана) произвести:  замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС  профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами  улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий:  из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;  

- на посту медицинской сестры площадью 18,5 кв.м. (помещение № 7 плана) произвести:  замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС  профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами  улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; разборку покрытий:  из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;  

- в тамбуре соматического отделения площадью 14,5 кв.м. (помещение № 8 плана)  произвести: замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из  ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными  составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску;  устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов;  

- в инфекционном боксе № 1 площадью 19,8 кв.м. (помещение № 9 плана) произвести:  замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен; замену дверного  полотна и коробки;  

- в шлюзе площадью 3,9 кв.м. (помещение № 9а) произвести замену дверного полотна и  коробки;  

- в инфекционном боксе № 2 площадью 19,8 кв.м. (помещение № 10 плана) произвести  замену дверного полотна и коробки;  

- в шлюзе площадью 3,9 кв.м. (помещение № 10а) произвести замену дверного полотна и  коробки;  

- в шлюзе площадью 3,6 кв.м. (помещение № 9в) произвести замену плитки керамической  глазурованной для внутренней облицовки стен;  

- в процедурной площадью 20 кв.м. (помещение № 20) произвести: замену плитки  керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;  

- в санитарной комнате площадью 15,3 кв.м. (помещение № 11) произвести: замену облицовки  стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей  листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная,  по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску; замену плитки керамической  глазурованной для внутренней облицовки стен;  

- в клизменной площадью 13 кв.м. (помещение № 12) произвести замену плитки  керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;  

-  в коридоре общей площадь 111,7 кв.м. (помещения №№ 13,15,25,26,27) произвести: замену  облицовки стен но системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС  профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными  составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску;  разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со  свариванием полотнищ в стыках;  

- в тамбуре инфекционного отделения площадью 4,5 кв.м, (помещение № 13а)  произвести замену плитки керамической глазурованной для внутренней облицовки стен;  замену дверного полотна и коробки;  

- в тамбуре - шлюзе площадью 2,4 кв.м. (помещение № 29) произвести: замену  облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС  профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными водоэмульсионными  составами улучшенная, по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску;  разборку покрытий: из линолеума; устройство покрытий: из линолеума насухо со  свариванием полотнищ в стыках;  

- в кабинете сестры-хозяйки площадью 12,9 кв.м. (помещение № 17) произвести:  замену облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из  ПН и ПС профилей листами в один слой; окраску поливинилацетатными  

водоэмульсионными составами улучшенная, по сборным конструкциям стен,  подготовленным под окраску.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания  "Константа" (ОГРН 

<

***>) в пользу государственного бюджетного учреждения  здравоохранения АО "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г.  Выжлецова" (ОГРН 

<

***>) 62 382 руб. расходов по экспертизе и 6000 руб. расходов  по уплате государственной пошлины.  

Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный  апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд  Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.  

Судья Н.Ю. Вахлова