АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

Дело № А66-17959/2024

г.Тверь

27 февраля 2025 года

 

(резолютивная часть) 

Руководствуясь статьями 167-171, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

Р Е Ш И Л:

Обязать общество с ограниченной ответственностью "ТДК 97", г. Тверь, (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в срок до 30 апреля 2025 года, выполнить гарантийные обязательства, предусмотренные государственным контрактом № 10/2020-ИС от 20 апреля 2020 года, а именно: устранить дефекты конструктивных элементов автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь - Хрустальный - Рязань - ФИО1 - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль:  

 1. на участке км 1167+223-км 1172+617: 

- раскрытые продольные и поперечные трещины путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;  

- раскрытый осевой шов путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;  

- повреждения (выбоины) на участке полосы движения заделать горячим асфальтобетоном;  

2. на участке км 1176+920 - км 1179+643: 

- раскрытые продольные и поперечные трещины путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;  

- не обработанные места отбора контрольных проб обработать битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;  

- колейность на участке полосы отвода движения км 1178+755 - км 1178+969 (слева) путем фрезерования и укладки верхнего слоя покрытия;  

- повреждения (выбоины) на участке полосы движения заделать горячим асфальтобетоном;  

3. на участке км 1197+032 - км 1198+545: 

- раскрытые продольные и поперечные трещины путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;  

- колейность на участке полосы отвода движения км 1198+545 - км 1197+787 (слева) путем фрезерования и укладки верхнего слоя покрытия;  

4. на участке км 1222+963 - км 1230+448 ФАД Р-132 «Золотое кольцо»: 

- раскрытые продольные и поперечные трещины путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;  

- раскрытый осевой шов путем обработки битумной эмульсией с целью предотвращения дальнейшего разрушения верхнего слоя дорожного покрытия;  

- повреждения (выбоины) на участке полосы движения заделать горячим асфальтобетоном.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТДК 97", г. Тверь, (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) в доход федерального бюджета 50 000 рублей государственной пошлины в установленном порядке.  

Исполнительные листы выдать взыскателям в порядке статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации после вступления решения в законную силу.  

 Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд город Вологда в течение месяца со дня его принятия.  

Судья Н.А. Борцова