ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                                                 

РЕШЕНИЕ

Дело №А40-233262/16-96-2083

09 февраля 2017 года

г. Москва

Резолютивная часть решения объявлена  08 февраля 2017 года    

Полный текст решения изготовлен 09 февраля 2017 года 

Арбитражный суд  города Москвы в составе Судьи Гутник П.С.,  при ведении протокола секретарем судебного заседания В.В. Пятковым, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Дизайн и строительные технологии» к ответчику Общество с ограниченной ответственностью «СМУ Ингеоком» о взыскании денежных средств  в размере 11 793 635,70 руб. 

В судебное заседание явились: 

от истца: ФИО2, по доверенности от 08.08.2016; ФИО3, по доверенности от 08.08.2016; 

от ответчика: не явился, извещен;

УСТАНОВИЛ:

Общества с ограниченной ответственностью «Дизайн и строительные технологии» обратилось  в  Арбитражный  суд  г.  Москвы  с иском к обществу с ограниченной ответственностью «СМУ Ингеоком» о взыскании задолженности в размере 10561792 руб. 80 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1231842 руб. 90 коп.

Ответчик, извещенный надлежащим образом о месте и времени судебного разбирательства в порядке ст.ст. 121, 122 АПК РФ, в заседание не явился. 

Спор рассматривается в отсутствие ответчика в порядке ст. 156 АПК РФ. 

Суд, исследовав доказательства, имеющиеся в материалах дела, считает иск  подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

Судом установлено, что 17 ноября 2011 года между Обществом с ограниченной ответственностью «СМУ ИНГЕОКОМ» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Дизайн и строительные технологии» (Субподрядчик) заключен договор подряда № 520/11-11САД (1) (Договор 1).

Согласно п.2.1. Договора 1 Субподрядчик обязался выполнить работы по устройству облицовки гранитом и покраске стен и отделочные работы на объекте: Строительство федеральной автодороги М-27 Джубга-Сочи до границы с Грузией на участке Адлер-Веселое» - II этап строительства, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а Подрядчик обязался произвести оплату за фактически выполненные объемы работ по ценам, обусловленным настоящим Договором.

В соответствии с п.3.1. Договора 1 Цена работ ориентировочно составляет 25000000 руб.

Согласно п.5.8. Договора 1 Подрядчик обязался принимать от Субподрядчика выполненные работы и оплачивать их в порядке, указанном в статье 7 настоящего Договора.

В соответствии с п.7.3. Договора 1 за координацию работ и управление настоящим Договором Подрядчик удерживает с Субподрядчика услуги генподряда в размере 6% от стоимости работ по настоящему договору с начислением НДС 18%.

Согласно п.7.4. Договора 1 на основании оформленных в установленном порядке акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и предоставленных Субподрядчиком счетов-фактур. Подрядчик в срок не позднее 10 банковских дней со дня подписания вышеуказанных документов производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика.

В соответствии с п.9.1. Договора 1 Стороны несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договор) в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

Согласно п. 12.1. Договора настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

В ходе исполнения Договора 1 Стороны подписали дополнительное соглашение № 1 от 13.12.2011г., дополнительное соглашение № 1 от 27.01.2012г. и дополнительное соглашение № 2 от 13.10.2012г., которыми

1)дополнили ст. 3 Договора 1 пунктом 3.2. следующего содержания:

-«п.3.2. Перед началом работ Подрядчик имеет право перечислить Субподрядчику аванс в размере 5 000 000 руб., в т.ч. НДС 18% - 762 711,86 руб.

2)Пункт 6.1. раздела 6 Договора 1 изложить в следующей редакции:6.1. Календарные сроки выполнения работ по объекту:

-1 этап строительства:

Начало выполнения работ: с момента заключения Договора.

Окончание выполнения работ: июль 2012г.

-3 этап сооружения и инженерные сети:

Начало выполнения работ: с момента заключения Договора.

 Окончание выполнения работ: 30.08.2013г.

25 декабря 2012г. между Обществом с ограниченной ответственностью «СМУ ИНГЕОКОМ» (Подрядчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Дизайн и строительные технологии» (Субподрядчик) заключен договор подряда № 742/12-12САД (2) (Договор 2).

Согласно п. 1.1. Договора 2 Субподрядчик обязался выполнить работы по облицовке гранитом и покраске стен и отделочные работы на объекте: Строительство федеральной автодороги М-27 Джубга-Сочи до границы с Грузией на участке Адлер-Веселое (включая проектно-изыскательские работы)» -1 этап строительства (далее - Объект) в соответствии с Проектом, утвержденным распоряжением Федерального дорожного агентства от 27.01.2010 № 46-р, (далее - Проект) и условиями настоящего Договора, а Подрядчик обязался принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

В соответствии с п.3.1. Договора 2 общая стоимость работ по настоящему Договору определяется протоколом согласования договорной цены (Приложение № 1) и ориентировочно составляет 86 000 000 руб., в т.ч. НДС 18% - 13 118 644,07 руб.

Согласно п.4.1. Договора 2 оплата за выполненные работы осуществляется ежемесячно по технической готовности конструктивных элементов, этапов, комплексов, или видов работ, на основании утвержденных Заказчиком единичных расценок, на основании подписанных обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счета на оплату выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика за вычетом предоставленного аванса, но ранее поступления соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчиком от Заказчика.

В соответствии с п.4.2. Договора 2 Подрядчик в течение пяти рабочих дней после получения от Субподрядчика рассматривает и оформляет представленные документы или направляет обоснованный отказ.

Согласно п.4.5. Договора 2 за услуги «Генерального подряда» (обеспечение технической документацией, координация СМР, выполняемых Субподрядчиком, и т.д.) Субподрядчик выплачивает Подрядчику сумму в размере 6% от стоимости выполненных Субподрядчиком работ на Объекте. Сумма услуг Генподряда удерживается Подрядчиком при проведении расчетов за выполненные работы и отражается в Справке о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. По факту оказания услуг генподряда Стороны составляют Акт сдачи-приемки услуг Генподряда с оформлением счета-фактуры.

В соответствии с п.5.2. Договора 2 срок выполнения работ:

Начало: с момента заключения настоящего Договора.

Окончание: 2-й квартал 2013г.

Согласно п. 10.2. Договора 2 Подрядчик вправе отказать Субподрядчику в приемке работ, если их объем, стоимость или качество не подтверждаются исполнительной и другой технической документацией. Об отказе в приемке работ Субподрядчику выдается мотивированный отказ.

В соответствии с п. 10.3. Договора 2 в случае установления Подрядчиком при приемке очередного этапа работ несоответствия качества выполненных Субподрядчиком работ требованиям настоящего Договора, Акт выполненных работ Подрядчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

Согласно п. 12.1. Договора 2 Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору.

В соответствии с п.18.4. Договора 2 любые изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в виде Дополнительного соглашения к Договору. Согласно п.21.7. Договора 2 срок действия Договора:

-начало - с момента заключения Договора;

-окончание - до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору.

Факт выполнения Субподрядчиком работ по Договору 1 и передачи их Подрядчику подтверждается следующими документами:

Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2):

-№ 1 от 31.07.2012г. за период с 26.07.2012г. по 31.07.2012г. на сумму 11 997 000,00 руб.;

-№ 2 от 06.11.2012г. за период с 26.09.2012г. по 06.11.2012г. на сумму        6 181 012,78 руб.;

-№ 3 от 25.04.2013г. за период с 26.03.2013г. по 25.04.2013г. на сумму        4 272 667,36 руб.;

-№ 4 от 25.06.2013г. за период с 26.05.2013т по 25.06.2013г. на сумму         3 816 210,67 руб.;

-№ 5 от 20.12.2013г. за период с 26.08.2013г. по 30.08.2013г. на сумму       3 985 200,00 руб.;

Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3):

-№ 1 от 31.07.2012г. за период с 26.07.2012г. по 31.07.2012г. на сумму      11 997 000,00 руб., в том числе НДС (18%) - 1 830 050,85 руб.;

Удерживается генподрядных услуг в размере 6% от стоимости выполненных работ -719 820,00 руб., в том числе НДС 18% - 109 803,05 руб.

-№ 2 от 06.11.2012г. за период с 26.09.2012г. по 06.11.2012г. на сумму        6 181 012,78 руб., в том числе НДС (18%) - 942 866,36 руб.;

Удерживается генподрядных услуг в размере 6% от стоимости выполненных работ -370 860,77 руб., в том числе НДС 18% - 56 571,98 руб.

-№ 3 от 25.04.2013г. за период с 26.03.2013г. по 25.04.2013г. на сумму       4 272 667,36 руб., в том числе НДС (18%) - 651 762,79 руб.;

Удерживается генподрядных услуг в размере 6% от стоимости выполненных работ -256 360,03 руб., в том числе НДС 18% - 39 105,77 руб.

-№ 4 от 25.06.2013г. за период с 26.05.2013г. по 25.06.2013г. на сумму        3 816 210,67 руб., в том числе НДС (18%) - 582 133,83 руб.;

Удерживается генподрядных услуг в размере 6% от стоимости выполненных работ -228 972,64 руб., в том числе НДС 18%'- 34 928,03 руб.

-№ 5 от 20.12.2013г. за период с 26.08.2013г. по 30.08.2013г. на сумму                     3 985 200,00 руб., в том числе НДС (18%) - 607 911,86 руб.;

Удерживается генподрядных услуг в размере 6% от стоимости выполненных работ -239 112,00 руб., в том числе НДС 18% - 36 474,71 руб.;

Актами сдачи-приемки услуг генподрядчика:

- Акт от 31.07.2012 г. сдачи-приемки услуг генподрядчика в размере 719 820,00 руб. (6%) от стоимости выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 за июль 2012 г. на сумму 11 997 000,00 руб.;

- Акт от 06.11.2012 г. сдачи-приемки услуг генподрядчика в размере 343 780.80 руб. (6%) от стоимости выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ КС-2 № 2 за ноябрь 2012 г. на сумму 6 181 012,78 руб.;

- Акт от 25.04.2013 г. сдачи-приемки услуг генподрядчика в размере 651 762.79 руб. (6%) от стоимости выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ КС-2 № 3 за апрель 2013 г. на сумму 4 272 667,36 руб.;

- Акт от 25.06.2013 г. сдачи-приемки услуг генподрядчика в размере 582 133.83 руб. (6%) от стоимости выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ КС-2 № 4 за июнь 2013 г. на сумму 3 816 210.67 руб.;

-Акт от 20.12.2013 г. сдачи-приемки услуг генподрядчика в размере 239 112.00 руб. (6%) от стоимости выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ КС-2 № 5 за декабрь 2013 г. на сумму 3 985 200.00 руб.;

Исполнительными ведомостями объемов и стоимости выполненных работ (Приложения № 1 к Актам КС-2):

Исполнительная ведомость объемов и стоимости выполненных работ № 1 от 31.07.2012 г. (Приложение № 1 к Акту КС-2 № 1) на сумму 11 997 000,00 руб. (25.80 кв.м. х 2000 руб. + 1 990.90 кв.м. х 6 000 руб.);

-Исполнительная ведомость объемов и стоимости выполненных работ № 2 от 06.11.2012г. (Приложение № 1 к Акту КС-2 № 2) на сумму 6 181 012.78 руб. (2 290,20 кв.м. х 2000 руб. + 262.8 кв.м. х 6 000 руб.);

-Исполнительная ведомость объемов и стоимости выполненных работ № 3 от  25.04.2013 г. (Приложение № 1 к Акту КС-2 № 3) на сумму 4 272 667.36 руб.;

- Исполнительная ведомость объемов и стоимости выполненных работ № 4 от 25.06.2013 г. (Приложение № 1 к Акту КС-2 № 4) на сумму 3 816 210,67 руб.;

- Исполнительная ведомость объемов и стоимости выполненных работ № 5 от 20.12.2013 г. (Приложение № 1 к Акту КС-2 № 5) на сумму 3 985 200,00 руб.

Таким образом, в ходе выполнения работ по Договору 1 Субподрядчиком было выполнено и передано Подрядчику работ на общую сумму: -30 252 090,61 руб., из которых, 1 815 125.44 руб. учтены как предоставление Подрядчиком генподрядных услуг в размере 6% от стоимости выполненных работ.

Факт выполнения Субподрядчиком работ по Договору 2 и передачи их Подрядчику подтверждается следующими документами:

Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2):

-№ 1 от 25.09.2013г. за период с 26.08.2013г. по 25.09.2013г. на сумму        2 023 400,00руб.;

-№ 2 от 25.10.2013г. за период с 26.09.2013г. по 25.10.2013г. на сумму       13 432 960,00 руб.;

-№ 3 от 25.11.2013г. за период с 26.10.2013г. по 25.11.2013г. на сумму      22 918 740,00 руб.;

-№ 4 от 20.12.2013г. за период с 26.11.2013г. по 29.11.2013г. на сумму      12 082 140,00 руб.;

-№ 5 от 20.12.2013г. за период с 26.11.2013г. по 29.11.2013г. на сумму       5 729 680,00 руб.;

Справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3):

-№ 1 от 25.09.2013г. за период с 26.08.2013г. по 25.09.2013г. на сумму        2 023 400,00 руб., в том числе НДС (18%) - 308 654,24 руб.;

Удерживается генподрядных услуг в размере 6% от стоимости выполненных работ -121 404,01 руб.. в том числе НДС 18% - 18 519,26 руб.

-№ 2 от 25.10.2013г. за период с 26.09.2013г. по 25.10.2013г. на сумму      13 432 960,00 руб.. в том числе НДС (18%) - 2 049 095,59 руб.;

Удерживается генподрядных услуг в размере 6% от стоимости выполненных работ -805 977,59 руб., в том числе НДС 18% - 122 945,73 руб.

- № 3 от 25.11.2013г. за период с 26.10.2013г. по 25.11.2013г. на сумму                22 918 740,00 руб., в том числе НДС (18%) - 3 496 078,98 руб.;

Удерживается генподрядных услуг в размере 6% от стоимости выполненных работ -1 375 124,40 руб., в том числе НДС 18% - 209 764,74 руб.

-№4 от 20.12.2013г. за период с 26.11.2013г. по 29.11.2013г. на сумму 12 082 140,00 руб.. в том числе НДС (18%) - 1 843 038,31 руб.;

Удерживается генподрядных услуг в размере 6% от стоимости выполненных работ - 724 928.40 руб.. в том числе НДС 18% - 110 582,30 руб.

-№ 5 от 20.12.2013г. за период с 26.11.2013г. по 29.11.2013г. на сумму        5 729 680,00 руб., в том числе НДС (18%)- 874 018,98 руб.;

Удерживается генподрядных услуг в размере 6% от стоимости выполненных работ -343 780,80 руб., в том числе НДС 18% - 52 441,14 руб.

Актами сдачи-приемки услуг генподрядчика:

- Акт от 25.09.2013 г. сдачи-приемки услуг генподрядчика в размере 121 404,01 руб. (6%) от стоимости выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ КС-2 № 1 за сентябрь 2013 г. на сумму 2 023 400,00 руб.;

- Акт от 25.10.2013 г. сдачи-приемки услуг генподрядчика в размере 805 977.59 руб. (6%) от стоимости выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ КС-2 № 2 за октябрь 2013 г. на сумму 13 432 960,00 руб.;

- Акт от 25.11.2013 г. сдачи-приемки услуг генподрядчика в размере 1 375 124.40 руб. (6%) от стоимости выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ КС-2 № 3 за ноябрь 2013 г. на сумму 22 918 740,00 руб.;

- Акт от 20.12.2013 г. сдачи-приемки услуг генподрядчика в размере 724 928,40 руб. (6%) от стоимости выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ КС-2 № 4 за декабрь 2013 г. на сумму 12 082 140,00 руб.;

- Акт от 20.12.2013 г. сдачи-приемки услуг генподрядчика в размере 343 780,80 руб. (6%) от стоимости выполненных работ на основании Акта о приемке выполненных работ КС-2 № 5 за декабрь 2013 г. на сумму 5 729 680.00 руб.

Исполнительными ведомостями объемов и стоимости выполненных работ(Приложения к Актам КС-2):

- Исполнительная ведомость объемов и стоимости выполненных работ № 1/1 от 25.09.2013 г. (Приложение № 1 к Акту КС-2 № 1) на сумму 2 023 400,00 руб.;

- Исполнительная ведомость объемов и стоимости выполненных работ № 2/1 от 25.10.2013 г. (Приложение № 1 к Акту КС-2 № 2) на сумму 13 432 960,00 руб.;

- Исполнительная ведомость объемов и стоимости выполненных работ № 3/1 от 26.11.2013 г. (Приложение № 1 к Акту КС-2 № 3) на сумму 22 918 740,00 руб.;

- Исполнительная ведомость объемов и стоимости выполненных работ № 4/1 от 20.12.2013 г. (Приложение № 1 к Акту КС-2 № 4) на сумму 12 082 140,00 руб.;

- Исполнительная ведомость объемов и стоимости выполненных работ № 5/1 от 20.12.2013 г. (Приложение № 1 к Акту КС-2 № 5) на сумму 5 729 680,00 #б.

Таким образом, в ходе выполнения работ по Договору 2 Субподрядчиком было выполнено и передано Подрядчику работ на общую сумму:

-56 186 920,00 руб., из которых, 3371215,20 руб. учтены как предоставление Подрядчиком генподрядных услуг в размере 6% от стоимости выполненных работ,

Работы по Договор 1 и Договору 2 были выполнены Субподрядчиком в срок установленный указанными договорами и приняты Подрядчику без замечаний на общую сумму 86 466 486,33 руб.

По окончании работ Сторонами был составлен Акт сверки, согласно которого на 31.12.2013 г. задолженность Подрядчика в пользу Субподрядчика с учетом оплаты и зачета составила 25 561 792,80 руб.

В период с 01.01.2014г. по 30.06.2015г. Подрядчиком было оплачено работ по Договору 1 и Договору 2 на сумму 15 000 000 руб.

На 30.06.2015г. задолженность ООО «СМУ ИНГЕОКОМ» перед ООО «ДСТ» составила 10 561 792,80 руб.

17.08.2016г. Субподрядчик направил Подрядчику претензию по Договору 1 и Договору 2, которой просил Подрядчика оплатить имеющуюся задолженность в течение 5 рабочих дней после получения претензии. Претензия была получена Подрядчиком 28.08.2015г. До настоящего времени не оплачена.

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ст. 711 ГК РФ, по договору подряда оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном договором, в сроки и порядке, которые установлены законом или договором подряда.

В соответствии с п.4 ст.753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.

В соответствии с п.1 ст.746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.

Статьей 309 ГК РФ определено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства является недопустимым, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Оценив и исследовав в порядке, предусмотренном статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, представленные в материалы дела доказательства, проанализировав условия договора, суд пришел к выводу о том, что  требования истца о взыскании задолженности в судебном порядке являются обоснованными и подлежат удовлетворению в заявленном размере 10561792 руб. 80 коп.

Истец заявил также требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, сумма которых согласно расчету истца составила 1231842 руб. 90 коп.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Представленный истцом расчет процентов за пользование чужими денежными средствами судом проверен, арифметически и методологически выполнен верно.

В связи с изложенным, суд пришёл к выводу о том, что требование истца о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 1231842 руб. 90 коп. является также законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.

Ответчик отзыв на иск не представил, наличие долга и расчет неустойки, составленный истцом, не оспорил. 

    В соответствии с ч. 2 ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Расходы по государственной пошлине распределены в соответствии с ст. 110 АПК РФ. 

Руководствуясь ст. ст. 167-176 АПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СМУ Ингеоком» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Дизайн и строительные технологии» задолженность в размере 10561792 руб. 80 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1231842 руб. 90 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 81968 руб.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Судья                 П.С. Гутник