43_35254026 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ) 

03. 04. 2023 года. Дело № А40-278609/22-43-2172  Арбитражный суд г. Москвы  

в составе председательствующего Романова О.В., единолично,  протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску АО " ГУОВ " (ОГРН 

<

***>) к ООО " Триглав " (ОГРН 

<

***>) 

об обязании ответчика устранить недостатки указанные в письме № исх.-1964-дсп (шифр Т-12/18- 35) от 24.08.2022 г. в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу,  

с участием представителей: от истца – не явился, от ответчика – не явился.  

Руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 81, 102, 103, 105, 110, 112, 121-124, 155, 156,  162, 166-171, 174, 176, 177, 180-182, 318, 319 АПК РФ, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Иск АО " ГУОВ " (ОГРН 

<

***>) к ООО " Триглав " (ОГРН 

<

***>) об 

обязании ответчика устранить недостатки указанные в письме № исх.-1964-дсп (шифр Т-12/18-35)  от 24.08.2022 г. в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу удовлетворить.  

Обязать ООО " Триглав " (ОГРН 

<

***>) в 30-тидневный срок с момента вступления в законную силу решения суда, безвозмездно устранить недостатки указанные в письме №  исх.-1964-дсп (шифр Т-12/18-35) от 24.08.2022 г., в рамках договора № 2018/2-4377 от 07.11.2018  г. на объекте, расположенном по адресу: 

<

...>, лит. А, а именно: - просушить и обработать биоцидными составами участки в местах регулярных намоканий и гниения  древесины конструкции мауэрлата и стропил по периметру здания; - просушить и обработать био- цидными составами участки в местах поражений древесины биологиченской коррозией стропил и  подкосов в чердачном помещении общей площадью до 850 кв.м.; - заменить деревянные конструкции стропильной системы в соответствии с проектом (фактически установлены элементы  сечением 140х40 мм вместо сечения 150х50 мм) общей площадью до 850 кв.м; устранить дефор- маци. Козырька вывода фоновой трубы в осях 7-8/Б-В; - выполнить работы по герметизации и дополнительному обжиму фланцевых соединений металлических элементов картины карнизного  свеса общей протяженностью 200 м.п.; - выполнить повторное окрашивание металлических листов покрытия на площади до 800 кв.м; - устранить поверхностную коррозию ограждений кровли  общей протяженностью до 170 м.п..  

Взыскать с ООО " Триглав " (ОГРН 

<

***>) в пользу АО " ГУОВ " (ОГРН  

<

***>) расходы по уплате госпошлины в сумме 6 000 руб. 00 коп.  

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный  срок со дня принятия.  

Судья О.В. Романов  

 2 

 2