Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 

город Пермь 

26.02.2020 года Дело № А50-27129/18  

Арбитражный суд Пермского края  

в составе судьи Кудиновой О.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1 

рассмотрел в заседании суда дело по иску общества с ограниченной  ответственностью «Инвест-групп» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью «Виталстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

об обязании безвозмездно устранить недостатки 

Руководствуясь ст.ст.110, 167-171, 174, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Виталстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) безвозмездно устранить  недостатки, выявленные и указанные в экспертном заключении № 103/10-3/18  от 27.12.2018г.по работам выполненным согласно договоров подряда № 05-16  от 11.04.2016г., № 07-16 от 11.05.2016г., № 08-16 от  11.05.2016г., № 09-16 от 26.05.2016г., № 11-16 от 14.06.2016г., № 12-16 от  20.06.2016г. на объекте многоквартирного жилого дома по адресу: 

<

...>, путем выполнения следующих работ с учетом  материалов:  

1. Переустройство кровли 

1.1 Разборка кровельного пирога 

1 

ФЕР12-01-012-  

01 

Приказ Минстроя  России от  30.12.2016 № 1039/пр  

Снятие ограждения кровель перилами 

(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических  конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к  

расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

100 м 

4,5231 

2 

ФЕРр58-7-6  

Приказ Минстроя  России от  30.12.2016 № 1039/пр  

Смена существующих рулонных кровель на покрытия из  

наплавляемых рулонных материалов: в два слоя 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

100 м2  

21,4031 

3 

мастика битумно-латексная кровельная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

т 

0,0449 

4 

ФССЦ-12.1.02.030205  

Приказ  Минстроя России от  

30.12.2016 № 1039/пр  

Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

м2 

2440 

5 

ФССЦ- 12.1.02.030206 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Унифлекс: ЭПП 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

м2 

2868 

6 

101-1875 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Сталь оцинкованная толщиной: 0,7 мм ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):  

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

т 

2,14 

7 

Раствор цементный кладочный М 100 ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):  

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

м3 

32,1 

8 

ФЕР12-01-017- 01 Приказ 

Минстроя России от  30.12.2016  

 № 1039/пр  

Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных  

толщиной 15 мм 

(Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и  железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8;  ЭМ=0,8 красх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 красх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)  

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

100 м2  

21,4031 

9 

ФЕР12-01-017- 02 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения  

толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 

(до толщ. 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25;  МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25); Табл.2, п. 1 Демонтаж  (разборка) сборных бетонных и железобетонных  строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.;  ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)  

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

100 м2  

21,4031 

10 

ФЕРр58-17-2 Приказ 

Минстроя России от  30.12.2016  

 № 1039/пр  

Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной  толщиной 100 мм  

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

100 м2  

21,4031 

11 

ФЕРр54-7-1 Приказ 

Минстроя России от  30.12.2016  

 № 1039/пр  

Смена засыпки перекрытия: с укладкой толя прим. 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

100 м2  

21,4031 

12 

гравий керамзитовый 20-40, марка 400 ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):  

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

м3 

330,7 

Разборка парапета 

13 

ФЕРр58-3-1 Приказ 

Минстроя России от  30.12.2016  

 № 1039/пр  

Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  

поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

100 м 

4,897 

1.2 устройство кровельного пирога 

14 

ФЕР12-01-012- 01 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):  

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

100 м 

4,5231 

16 

ФЕР12-01-017- 01 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016  

Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных  

толщиной 15 мм 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

100 м2  

21,4031 

 № 1039/пр  

18 

ФЕР12-01-017- 02 Приказ 

Минстроя России от  30.12.2016  

 № 1039/пр  

Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм 

изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12- 01-017-01  

(до толщ. 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25;  МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25))  

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

100 м2  

21,4031 

19 

Раствор цементный кладочный М 100 ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

м3 

87,33 32,75+54,58 

20 

ФЕР26-01-039- 01 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и  зернистых материалов насухо ИНДЕКС К  

ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

м3 

428,062 

21 

ФССЦ- 12.2.05.050035 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно  (ТУ 5762-043-179251622006), марки: ТЕХНОРУФ В50  

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

м3 

107,02 

21 

ФССЦ- 12.2.05.050039 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно  (ТУ 5762-043-179251622006), марки: ТЕХНОРУФ Н30  

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

м3 

321,05 

23 

ФЕР12-01-004- 05 Приказ 

Минстроя России от  30.12.2016  

 № 1039/пр  

Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов  к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним  

фартуком 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

100 м 

4,897 

24 

ФССЦ- 12.1.02.030205 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Унифлекс: ЭКП-4,5, сланец серый ИНДЕКС К 

ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

м2 

925,5 

25 

ФССЦ- 12.1.02.030206 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Унифлекс: ЭПП 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

м2 

925,5 

Раздел 2. Ремонт системы мокрый фасад 

Разборка 

49 

ФЕР08-07-001- 02 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 

16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

100 м2  

50,624 

ФССЦ-01.7.16.020001  Приказ  

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Детали деревянные лесов из пиломатериалов  хвойных пород  

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

м3 

0,4556 

ФССЦ-01.7.16.020002  Приказ  

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Детали лесов стальные, укомплектованные пробками, 

крючками и хомутами, окрашенные ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):  

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

т 

1,772 

50 

ФЕР46-02-009- 02 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков  кирпичных  

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

100 м2  

47,6672 

51 

ФЕР26-01-041- 01 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

разборка изоляции изделиями из пенопласта на битуме  

холодных поверхностей: стен и колонн прямоугольных  

(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических  конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к  расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)  

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

м3 

9,951 

52 

ФЕР26-01-039- 01 Приказ 

Разборка. Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из 

волокнистых и зернистых материалов насухо  

м3 

45,677 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических  конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к  расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)  

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

Устройство 

53 

ФЕРр61-27-1 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок,  прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных  поверхностей большого радиуса: по кирпичу ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):  

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

100 м2  

1,9902 

54 

ФЕР15-01-080- 01 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой  

штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

100 м2  

47,6672 

55 

ФССЦ- 12.2.05.090004 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-  200 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

м3 

9,752 

56 

ФССЦ- 12.2.05.050045 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно  (ТУ 5762-043-179251622006), марки: ТЕХНОФАС  

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

м3 

228,385 

57 

ФЕР07-07-003- 02 Приказ 

Минстроя России от  30.12.2016  

 № 1039/пр  

Устройство перегородок панельных из плоских 

асбестоцементных листов в стальной обвязке в одноэтажных  производственных зданиях при площади панелей: от 5 до 10  м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):  

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

100 м2  

58 

ФЕР15-02-024- 01 Приказ 

Минстроя России от 

30.12.2016   № 1039/пр  

Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при  отделке под окраску прим  

ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21;  МАТ=5,03  

100 м2  

1,9054 

59 

Панели стеновые асбестоцементные ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):  

1 4 квартал 2018 ОЗП=17,21; ЭМ=6,82; ЗПМ=17,21; МАТ=5,03  

м2 

204,8 

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Виталстрой»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) безвозмездно устранить  недостатки, выявленные и указанные в экспертном заключении № АС18/03  АНО Экспертное агентство «Урал» по работам выполненным согласно  договора подряда № 13-16 от 04.07.2016 г. на объекте многоквартирного  жилого дома по адресу: 

<

...>,  путем выполнения следующих работ с учетом материалов:  

1 

ФЕР26-01-036-02 

Изоляция изделиями из волокнистых и  

зернистых материалов с креплением на клее и  дюбелями холодных поверхностей: внутренних  стен и перегородок  

НР (34руб.): 100% от ФОТ (34руб.) СП (24 руб.): 

70% от ФОТ(34 руб.) 

100 м2 поверхности  

0,254 

25,4 /100 

2 

ФССЦ-104-0920 

Плиты из минеральной ваты на синтетическом  связующем П-75 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96)  

м3 

1,27 

25,4*0,05 

3 

ФЕРр61-10-5 

Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и  бетону с земли и лесов: декоративным  

раствором площадью отдельных мест до 5 м2  толщиной слоя 30 мм  

НР (1045 руб.): 79% от ФОТ (1323 руб.) СП (662 

руб.): 50% от ФОТ (1323 руб.) 

100 м2 отремонтированной поверхности 

0,42 

42 /100 

4 

ФЕР08-07-001-02 

Установка и разборка наружных инвентарных 

лесов 

НР (290 руб.): 122% от ФОТ(238 руб.) СП (190 

руб.): 80% от ФОТ (238 руб.) 

100 м2 вертикальной  проекции для наружных  

лесов 

0,55 

55 / 100 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Виталстрой»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  

ответственностью «Инвест-групп» (ОГРН 1135906006576, ИНН 5906123346)  6 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, 152 руб.  почтовых расходов.  

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в  законную силу.  

 Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

 Судья О.В. Кудинова