АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

25 июля 2025 года

Дело № А33-10265/2025

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании «16» июля 2025 года.

В полном объёме решение изготовлено «25» июля 2025 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Кошеваровой Е.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «ИНЖСЕРВИС» (ИНН 2464017992, ОГРН 1022402296730)

к акционерному обществу «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КРАСНОЯРСКАЯ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании задолженности, неустойки,

в присутствии в судебном заседании:

от истца: ФИО1, представителя по доверенности от 21.02.2025, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Огнёвой А.С.,

установил:

общество с ограниченной ответственностью «ИНЖСЕРВИС» (далее – истец) обратилось Арбитражный суд Красноярского края с иском к акционерному обществу «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КРАСНОЯРСКАЯ» (далее – ответчик) о взыскании 1 535 205,30 руб. задолженности, неустойки по состоянию на 27.03.2025 в сумме 395 059, 17 руб., за период с 28.03.2025 по день вынесения судом решения, исчисляемые в соответствии со ст. 395 ГК РФ, за период со дня, следующего за днем вынесения судом решения, по день фактической уплаты долга истцу – исчисленные в соответствии с ст. 395 ГК РФ. 

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 15.04.2025 возбуждено производство по делу.

От истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований. Согласно ходатайству истец просит взыскать 1 535 205,30 руб. основного долга, 470 892,44 руб. неустойки по состоянию на 16.07.2025, далее за период со дня вынесения решения по день фактической уплаты долга.

В соответствии со статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявление об уточнении размера исковых требований принято судом. Исковое заявление рассматривается с учетом указанных уточнений.

Ответчик в судебное заседание не явился, отзыв на исковое заявление не представил.

В соответствии с частью 1 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса извещаются арбитражным судом о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта в порядке, установленном АПК РФ, не позднее, чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

В силу части 4 статьи 121 Кодекса судебные извещения, адресованные юридическому лицу, направляются арбитражным судом по адресу данного юридического лица. Если иск вытекает из деятельности филиала или представительства юридического лица, такое извещение направляется также по адресу этого филиала или представительства. Адрес юридического лица, его филиала или представительства определяется на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в качестве юридического адреса акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КРАСНОЯРСКАЯ» (ИНН 

<

***>) указан следующий адрес: 660028, 

<

...>.

Согласно почтовому отслеживанию копия определения суда от 15.04.2025, направленная по указанному адресу, получена ответчиком 23.04.2025.

Согласно части 4 статьи 131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся доказательствам.

Суд, руководствуясь статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие ответчика.

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

Согласно письму о преобразовании № 3 от 19.02.2025, деятельность муниципального предприятия города Красноярска ««Муниципальная управляющая компания Красноярская» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в связи с реорганизацией в форме преобразования прекращена. 

17.02.2025 создано акционерное общество «Управляющая компания «КРАСНОЯРСКАЯ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>).

На основании статьи 58 ГК РФ АО «УК «Красноярская» является полным правопреемником МП «МУК Красноярская», права и обязанности МП «МУК Красноярская» в полном объеме переходят к АО «УК «Красноярская».

01.02.2022 муниципальным предприятием города Красноярска «Муниципальная управляющая компания Красноярская» (далее - заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «ИНЖСЕРВИС» (далее – исполнитель) был заключен договор № 01/22-ИНЖ на проведение работ по оценке соответствия лифтов при эксплуатации в форме периодического технического освидетельствования.

В соответствии с пунктом 1.1 договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по оценке соответствия лифтов при эксплуатации в форме периодического технического освидетельствования.

Исполнитель после выполнения работ предоставляет заказчику акт периодического технического освидетельствования (пункт 4.3 договора).

Согласно пункту 4.4 договора завершением работ считается передача заказчику акта периодического технического освидетельствования.

Стоимость работ определяется по согласованному графику-смете и составляет 1 071 756 руб. (в редакции соглашения № 1 от 21.10.2022 к договору № № 01/22-ИНЖ от 01.02.2022).

Пунктом 5.2 договора установлено, что оплата за фактически выполненные работы производится в течение 30 календарных дней после подписания сторонами акта о приеме работ.

В соответствии с разделом 8 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством, в случае несвоевременной оплаты выполненных работ заказчик уплачивает исполнителю пени, рассчитанные по правилам статьи 395 ГК РФ.

23.03.2023 между истцом и ответчиком был заключен договор № 01/04-ИНЖ на проведение работ по оценке соответствия лифтов при эксплуатации в форме периодического технического освидетельствования.

В соответствии с пунктом 1.1 договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по оценке соответствия лифтов при эксплуатации в форме периодического технического освидетельствования.

Исполнитель после выполнения работ предоставляет заказчику акт периодического технического освидетельствования (пункт 4.3 договора).

Согласно пункту 4.4 договора завершением работ считается передача заказчику акта периодического технического освидетельствования.

Стоимость работ определяется по согласованному графику-смете и составляет 883 260 руб. (в редакции соглашения № 1 от 10.04.2023 к договору № № 01/04-ИНЖ от 23.03.2023).

Пунктом 5.2 договора установлено, что оплата за фактически выполненные работы производится в течение 15 календарных дней после подписания сторонами акта о приеме работ.

В соответствии с разделом 8 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

01.04.2024 между муниципальным предприятием города Красноярска «Муниципальная управляющая компания Красноярская» и обществом с ограниченной ответственностью «ИНЖСЕРВИС» был заключен договор № 14/24-ИНЖ на проведение работ по оценке соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы и по оценке соответствия лифтов при эксплуатации.

В соответствии с пунктом 1.1 договора заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по оценке соответствия лифтов, отработавших назначенный срок службы, в форме обследования технического состояния лифтов, отработавших назначенный срок службы, а также по оценке соответствия лифтов при эксплуатации в форме периодического технического освидетельствования.

Исполнитель после выполнения работ предоставляет заказчику заключение о соответствии лифта, акт периодического технического освидетельствования (пункт 4.3 договора).

Согласно пункту 4.4 договора завершением работ считается передача заказчику заключения о соответствии лифта и акта периодического технического освидетельствования.

Стоимость работ определяются по согласованному графику-смете и составляют 951 742,50 руб. (пункт 5.1 договора).

Пунктом 5.2 договора установлено, что оплата за фактически выполненные работы производится в течение 15 календарных дней после подписания сторонами акта о приеме работ.

В соответствии с разделом 8 договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В ходе исполнения обязательств по договорам ООО «ИНЖСЕРВИС» оказало АО «УК «КРАСНОЯРСКАЯ» следующие услуги, а АО «УК «КРАСНОЯРСКАЯ», в свою очередь, осуществило следующие платежи:

Акт

Работы (руб.)

Оплата

Примечание

Договор № 01/22-ИНЖ от 01.02.2022 г

1. 

Акт № 1 о приемке работ от 28.02.2022 г.

148 554,00

-

2. 

Акт № 2 о приемке работ от 31.03.2022 г.

146 160,00

-

3. 

Акт № 3 о приемке работ от 30.04.2022 г.

141 246,00

-

4. 

Акт № 4 о приемке работ от 31.05.2022 г.

91 476,00

-

5. 

Акт № 5 о приемке работ от 30.06.2022 г.

86 436,00

-

6. 

Акт № 6 о приемке работ от 29.07.2022 г.

93 240,00

-

7. 

Платежное поручение №503 от 03.08.2022 г.

-

146 160,00

Без ссылки на конкретный счет

8. 

Акт № 7 о приемке работ от 31.08.2022 г.

79 506,00

-

9. 

Акт № 8 о приемке работ от 23.09.2022 г.

56 070,00

-

10. 

Платежное поручение №816 от 18.10.2022 г.

-

340 000,00

Без ссылки на конкретный счет

11. 

Акт № 9 о приемке работ от 28.10.2022 г.

76 608,00

-

12. 

Акт № 10 о приемке работ от 25.11.2022 г.

61 110,00

-

13. 

Акт № 11 о приемке работ от 23.12.2022 г.

91 350,00

-

14. 

Платежное поручение №190 от 31.01.2023 г.

-

194 246,00

Без ссылки на конкретный счет

15. 

Платежное поручение №1025 от 01.06.2023 г.

-

253 008,00

Без ссылки на конкретный счет

Договор № 01/04-ИНЖ от 23.03.2023 г.

1. 

Акт № 1 о приемке работ от 28.04.2023 г.

253 008,00

-

2. 

Акт № 2 о приемке работ от 31.05.2023 г.

149 436,00

-

3. 

Акт № 3 о приемке работ от 29.06.2023 г.

77 112,00

-

4. 

Акт № 4 о приемке работ от 02.08.2023 г.

57 456,00

-

5. 

Акт № 5 о приемке работ от 19.09.2023 г.

60 858,00

-

6. 

Акт № 6 о приемке работ от 06.10.2023 г.

46 746,00

-

7. 

Акт № 7 о приемке работ от 02.11.2023 г.

76 608,00

-

8. 

Платежное поручение №4572 от 13.11.2023 г.

-

23 000,00

Оплата по счету №1267

9. 

Платежное поручение №4743 от 20.11.2023 г.

-

23 746,00

Оплата по счету №1267

10. 

Акт № 8 о приемке работ от 18.12.2023 г.

61 110,00

-

11. 

Акт № 9 о приемке работ от 11.01.2024 г.

100 926,00

-

12. 

Платежное поручение №379 от 05.04.2024 г.

-

61 110,00

Оплата по счету №1669

Договор № 14/24-ИНЖ от 01.04.2024 г.

1. 

Акт № 1 о приемке работ от 27.04.2024 г.

291 921,60

-

2. 

Акт № 2 о приемке работ от 31.05.2024 г.

237 255,70

-

3. 

Акт № 3 о приемке работ от 28.06.2024 г.

92 282,00

-

ИТОГО

2 576 475,30 

1 041 270,00

Сальдо оконченное

1 535 205,30

Таким образом, в рамках договоров ООО «ИНЖСЕРВИС» оказало услуги на общую сумму 2 576 475,30 руб., а АО «УК «КРАСНОЯРСКАЯ» приняло и оплатило оказанные услуги частично в размере 1 041 270 руб.

Задолженность заказчика, срок оплаты которой наступил, по договорам составила 1 535 205,30 руб.

Поскольку в договорах ответственность в виде договорной пени не установлена, истец начислил проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Расчет процентов с учетом положений п. 5.2. Договора № 01/22-ИНЖ от 01.02.2022 г., на дату 16.07.2025:

Акт № 1 о приемке работ от 28.02.2022 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Оплата

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

сумма, руб.

дата

примечание

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[1]x[4]x[8]/[9]

148 554

31.03.2022

31.03.2022

1

0

-

-

20%

365

81,40

148 554

01.04.2022

03.08.2022

125

0

-

-

0%(мораторий)

365

0

2 394

04.08.2022

01.10.2022

59

146 160

03.08.2022

Платежное поручение №503 от 03.08.2022 г. без ссылки на конкретный счет

0%(мораторий)

365

0

2 394

02.10.2022

18.10.2022

17

0

-

-

7,50%

365

8,36

-337 606

19.10.2022

23.07.2023

0

340 000

18.10.2022

Платежное поручение №816 от 18.10.2022 г. без ссылки на конкретный счет

7,50%

365

0

-337 606

24.07.2023

14.08.2023

0

0

-

-

8,50%

365

0

-337 606

15.08.2023

17.09.2023

0

0

-

-

12%

365

0

-337 606

18.09.2023

29.10.2023

0

0

-

-

13%

365

0

-337 606

30.10.2023

17.12.2023

0

0

-

-

15%

365

0

-337 606

18.12.2023

31.12.2023

0

0

-

-

16%

365

0

-337 606

01.01.2024

28.07.2024

0

0

-

-

16%

366

0

-337 606

29.07.2024

15.09.2024

0

0

-

-

18%

366

0

-337 606

16.09.2024

27.10.2024

0

0

-

-

19%

366

0

-337 606

28.10.2024

31.12.2024

0

0

-

-

21%

366

0

-337 606

01.01.2025

08.06.2025

0

0

-

-

21%

365

0

-337 606

09.06.2025

16.07.2025

0

0

-

-

20%

365

0

Итого:

202

486 160

0,73%

89,76

Акт № 2 о приемке работ от 31.03.2022 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Оплата

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

сумма, руб.

дата

примечание

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[1]x[4]x[8]/[9]

146 160

01.05.2022

01.10.2022

154

0

-

-

0%(мораторий)

365

0

146 160

02.10.2022

18.10.2022

17

0

-

-

7,50%

365

510,56

-191 446

19.10.2022

23.07.2023

0

337 606

18.10.2022

Платежное поручение №816 от 18.10.2022 г. без ссылки на конкретный счет

7,50%

365

0

-191 446

24.07.2023

14.08.2023

0

0

-

-

8,50%

365

0

-191 446

15.08.2023

17.09.2023

0

0

-

-

12%

365

0

-191 446

18.09.2023

29.10.2023

0

0

-

-

13%

365

0

-191 446

30.10.2023

17.12.2023

0

0

-

-

15%

365

0

-191 446

18.12.2023

31.12.2023

0

0

-

-

16%

365

0

-191 446

01.01.2024

28.07.2024

0

0

-

-

16%

366

0

-191 446

29.07.2024

15.09.2024

0

0

-

-

18%

366

0

-191 446

16.09.2024

27.10.2024

0

0

-

-

19%

366

0

-191 446

28.10.2024

31.12.2024

0

0

-

-

21%

366

0

-191 446

01.01.2025

08.06.2025

0

0

-

-

21%

365

0

-191 446

09.06.2025

16.07.2025

0

0

-

-

20%

365

0

Итого:

171

337 606

0,75%

510,56

Акт № 3 о приемке работ от 30.04.2022 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Оплата

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

сумма, руб.

дата

примечание

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[1]x[4]x[8]/[9]

141 246

31.05.2022

01.10.2022

124

0

-

-

0%(мораторий)

365

0

141 246

02.10.2022

18.10.2022

17

0

-

-

7,50%

365

493,39

-50 200

19.10.2022

23.07.2023

0

191 446

18.10.2022

Платежное поручение №816 от 18.10.2022 г. без ссылки на конкретный счет

7,50%

365

0

-50 200

24.07.2023

14.08.2023

0

0

-

-

8,50%

365

0

-50 200

15.08.2023

17.09.2023

0

0

-

-

12%

365

0

-50 200

18.09.2023

29.10.2023

0

0

-

-

13%

365

0

-50 200

30.10.2023

17.12.2023

0

0

-

-

15%

365

0

-50 200

18.12.2023

31.12.2023

0

0

-

-

16%

365

0

-50 200

01.01.2024

28.07.2024

0

0

-

-

16%

366

0

-50 200

29.07.2024

15.09.2024

0

0

-

-

18%

366

0

-50 200

16.09.2024

27.10.2024

0

0

-

-

19%

366

0

-50 200

28.10.2024

31.12.2024

0

0

-

-

21%

366

0

-50 200

01.01.2025

16.07.2025

0

0

-

-

21%

365

0

Итого:

141

191 446

0,90%

493,39

Акт № 4 о приемке работ от 31.05.2022 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Оплата

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

сумма, руб.

дата

примечание

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[1]x[4]x[8]/[9]

91 476

01.07.2022

01.10.2022

93

0

-

-

0%(мораторий)

365

0

91 476

02.10.2022

18.10.2022

17

0

-

-

7,50%

365

319,54

41 276

19.10.2022

31.01.2023

105

50 200

18.10.2022

Платежное поручение №816 от 18.10.2022 г. без ссылки на конкретный счет

7,50%

365

890,54

-152 970

01.02.2023

23.07.2023

0

194 246

31.01.2023

Платежное поручение №190 от 31.01.2023 г. без ссылки на конкретный счет

7,50%

365

0

-152 970

24.07.2023

14.08.2023

0

0

-

-

8,50%

365

0

-152 970

15.08.2023

17.09.2023

0

0

-

-

12%

365

0

-152 970

18.09.2023

29.10.2023

0

0

-

-

13%

365

0

-152 970

30.10.2023

17.12.2023

0

0

-

-

15%

365

0

-152 970

18.12.2023

31.12.2023

0

0

-

-

16%

365

0

-152 970

01.01.2024

28.07.2024

0

0

-

-

16%

366

0

-152 970

29.07.2024

15.09.2024

0

0

-

-

18%

366

0

-152 970

16.09.2024

27.10.2024

0

0

-

-

19%

366

0

-152 970

28.10.2024

31.12.2024

0

0

-

-

21%

366

0

-152 970

01.01.2025

08.06.2025

0

0

-

-

21%

365

0

-152 970

09.06.2025

16.07.2025

0

0

-

-

20%

365

0

Итого:

215

244 446

4,26%

1 210,08

Акт № 5 о приемке работ от 30.06.2022 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Оплата

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

сумма, руб.

дата

примечание

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[1]x[4]x[8]/[9]

86 436

31.07.2022

01.10.2022

63

0

-

-

0%(мораторий)

365

0

86 436

02.10.2022

31.01.2023

122

0

-

-

7,50%

365

2 166,82

-66 534

01.02.2023

23.07.2023

0

152 970

31.01.2023

Платежное поручение №190 от 31.01.2023 г. без ссылки на конкретный счет

7,50%

365

0

-66 534

24.07.2023

14.08.2023

0

0

-

-

8,50%

365

0

-66 534

15.08.2023

17.09.2023

0

0

-

-

12%

365

0

-66 534

18.09.2023

29.10.2023

0

0

-

-

13%

365

0

-66 534

30.10.2023

17.12.2023

0

0

-

-

15%

365

0

-66 534

18.12.2023

31.12.2023

0

0

-

-

16%

365

0

-66 534

01.01.2024

28.07.2024

0

0

-

-

16%

366

0

-66 534

29.07.2024

15.09.2024

0

0

-

-

18%

366

0

-66 534

16.09.2024

27.10.2024

0

0

-

-

19%

366

0

-66 534

28.10.2024

31.12.2024

0

0

-

-

21%

366

0

-66 534

01.01.2025

08.06.2025

0

0

-

-

21%

365

0

-66 534

09.06.2025

16.07.2025

0

0

-

-

20%

365

0

Итого:

185

152 970

4,95%

2 166,82

Акт № 6 о приемке работ от 29.07.2022 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Оплата

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

сумма, руб.

дата

примечание

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[1]x[4]x[8]/[9]

93 240

29.08.2022

01.10.2022

34

0

-

-

0%(мораторий)

365

0

93 240

02.10.2022

31.01.2023

122

0

-

-

7,50%

365

2 337,39

26 706

01.02.2023

01.06.2023

121

66 534

31.01.2023

Платежное поручение №190 от 31.01.2023 г. без ссылки на конкретный счет

7,50%

365

663,99

-226 302

02.06.2023

23.07.2023

0

253 008

01.06.2023

Платежное поручение №1025 от 01.06.2023 г. без ссылки на конкретный счет

7,50%

365

0

-226 302

24.07.2023

14.08.2023

0

0

-

-

8,50%

365

0

-226 302

15.08.2023

17.09.2023

0

0

-

-

12%

365

0

-226 302

18.09.2023

29.10.2023

0

0

-

-

13%

365

0

-226 302

30.10.2023

17.12.2023

0

0

-

-

15%

365

0

-226 302

18.12.2023

31.12.2023

0

0

-

-

16%

365

0

-226 302

01.01.2024

28.07.2024

0

0

-

-

16%

366

0

-226 302

29.07.2024

15.09.2024

0

0

-

-

18%

366

0

-226 302

16.09.2024

27.10.2024

0

0

-

-

19%

366

0

-226 302

28.10.2024

31.12.2024

0

0

-

-

21%

366

0

-226 302

01.01.2025

08.06.2025

0

0

-

-

21%

365

0

-226 302

09.06.2025

16.07.2025

0

0

-

-

20%

365

0

Итого:

277

319 542

6,58%

3 001,38

Акт № 7 о приемке работ от 31.08.2022 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Оплата

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

сумма, руб.

дата

примечание

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[1]x[4]x[8]/[9]

79 506

01.10.2022

01.10.2022

1

0

-

-

0%(мораторий)

365

0

79 506

02.10.2022

01.06.2023

243

0

-

-

7,50%

365

3 969,85

-146 796

02.06.2023

23.07.2023

0

226 302

01.06.2023

Платежное поручение №1025 от 01.06.2023 г. без ссылки на конкретный счет

7,50%

365

0

-146 796

24.07.2023

14.08.2023

0

0

-

-

8,50%

365

0

-146 796

15.08.2023

17.09.2023

0

0

-

-

12%

365

0

-146 796

18.09.2023

29.10.2023

0

0

-

-

13%

365

0

-146 796

30.10.2023

17.12.2023

0

0

-

-

15%

365

0

-146 796

18.12.2023

31.12.2023

0

0

-

-

16%

365

0

-146 796

01.01.2024

28.07.2024

0

0

-

-

16%

366

0

-146 796

29.07.2024

15.09.2024

0

0

-

-

18%

366

0

-146 796

16.09.2024

27.10.2024

0

0

-

-

19%

366

0

-146 796

28.10.2024

31.12.2024

0

0

-

-

21%

366

0

-146 796

01.01.2025

08.06.2025

0

0

-

-

21%

365

0

-146 796

09.06.2025

16.07.2025

0

0

-

-

20%

365

0

Итого:

244

226 302

7,47%

3 969,85

Акт № 8 о приемке работ от 23.09.2022 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Оплата

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

сумма, руб.

дата

примечание

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[1]x[4]x[8]/[9]

56 070

29.09.2022

01.10.2022

3

0

-

-

0%(мораторий)

365

0

56 070

02.10.2022

01.06.2023

243

0

-

-

7,50%

365

2 799,66

-90 726

02.06.2023

23.07.2023

0

146 796

01.06.2023

Платежное поручение №1025 от 01.06.2023 г. без ссылки на конкретный счет

7,50%

365

0

-90 726

24.07.2023

14.08.2023

0

0

-

-

8,50%

365

0

-90 726

15.08.2023

17.09.2023

0

0

-

-

12%

365

0

-90 726

18.09.2023

29.10.2023

0

0

-

-

13%

365

0

-90 726

30.10.2023

17.12.2023

0

0

-

-

15%

365

0

-90 726

18.12.2023

31.12.2023

0

0

-

-

16%

365

0

-90 726

01.01.2024

28.07.2024

0

0

-

-

16%

366

0

-90 726

29.07.2024

15.09.2024

0

0

-

-

18%

366

0

-90 726

16.09.2024

27.10.2024

0

0

-

-

19%

366

0

-90 726

28.10.2024

31.12.2024

0

0

-

-

21%

366

0

-90 726

01.01.2025

08.06.2025

0

0

-

-

21%

365

0

-90 726

09.06.2025

16.07.2025

0

0

-

-

20%

365

0

Итого:

246

146 796

7,41%

2 799,66

Акт № 9 о приемке работ от 28.10.2022 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Оплата

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

сумма, руб.

дата

примечание

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[1]x[4]x[8]/[9]

76 608

28.11.2022

01.06.2023

186

0

-

-

7,50%

365

2 927,89

-14 118

02.06.2023

23.07.2023

0

90 726

01.06.2023

Платежное поручение №1025 от 01.06.2023 г. без ссылки на конкретный счет

7,50%

365

0

-14 118

24.07.2023

14.08.2023

0

0

-

-

8,50%

365

0

-14 118

15.08.2023

17.09.2023

0

0

-

-

12%

365

0

-14 118

18.09.2023

29.10.2023

0

0

-

-

13%

365

0

-14 118

30.10.2023

17.12.2023

0

0

-

-

15%

365

0

-14 118

18.12.2023

31.12.2023

0

0

-

-

16%

365

0

-14 118

01.01.2024

28.07.2024

0

0

-

-

16%

366

0

-14 118

29.07.2024

15.09.2024

0

0

-

-

18%

366

0

-14 118

16.09.2024

27.10.2024

0

0

-

-

19%

366

0

-14 118

28.10.2024

31.12.2024

0

0

-

-

21%

366

0

-14 118

01.01.2025

08.06.2025

0

0

-

-

21%

365

0

-14 118

09.06.2025

16.07.2025

0

0

-

-

20%

365

0

Итого:

186

90 726

7,50%

2 927,89

Акт № 10 о приемке работ от 25.11.2022 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Оплата

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

сумма, руб.

дата

примечание

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[1]x[4]x[8]/[9]

61 110

26.12.2022

01.06.2023

158

0

-

-

7,50%

365

1 983,98

46 992

02.06.2023

23.07.2023

52

14 118

01.06.2023

Платежное поручение №1025 от 01.06.2023 г. без ссылки на конкретный счет

7,50%

365

502,11

46 992

24.07.2023

14.08.2023

22

0

-

-

8,50%

365

240,75

46 992

15.08.2023

17.09.2023

34

0

-

-

12%

365

525,28

46 992

18.09.2023

29.10.2023

42

0

-

-

13%

365

702,95

46 992

30.10.2023

17.12.2023

49

0

-

-

15%

365

946,28

46 992

18.12.2023

31.12.2023

14

0

-

-

16%

365

288,39

46 992

01.01.2024

28.07.2024

210

0

-

-

16%

366

4 314,02

46 992

29.07.2024

15.09.2024

49

0

-

-

18%

366

1 132,43

46 992

16.09.2024

27.10.2024

42

0

-

-

19%

366

1 024,58

46 992

28.10.2024

31.12.2024

65

0

-

-

21%

366

1 752,57

46 992

01.01.2025

08.06.2025

159

0

-

-

21%

365

4 298,80

46 992

09.06.2025

16.07.2025

38

0

-

-

20%

365

978,46

Итого:

934

14 118

15,18%

18 690,60

Акт № 11 о приемке работ от 23.12.2022 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]x[4]x[5]/[6]

91 350

23.01.2023

23.07.2023

182

7,50%

365

3 416,24

91 350

24.07.2023

14.08.2023

22

8,50%

365

468,01

91 350

15.08.2023

17.09.2023

34

12%

365

1 021,12

91 350

18.09.2023

29.10.2023

42

13%

365

1 366,50

91 350

30.10.2023

17.12.2023

49

15%

365

1 839,51

91 350

18.12.2023

31.12.2023

14

16%

365

560,61

91 350

01.01.2024

28.07.2024

210

16%

366

8 386,23

91 350

29.07.2024

15.09.2024

49

18%

366

2 201,39

91 350

16.09.2024

27.10.2024

42

19%

366

1 991,73

91 350

28.10.2024

31.12.2024

65

21%

366

3 406,91

91 350

01.01.2025

08.06.2025

159

21%

365

8 356,65

91 350

09.06.2025

16.07.2025

38

20%

365

1 902,08

Итого:

906

15,42%

34 916,98

Общий размер процентов по Договору № 01/22-ИНЖ от 01.02.2022 г. составляет: 70 776,97 руб.

Расчет процентов, с учетом положений п. 5.2. Договора № 01/04-ИНЖ от 23.03.2023 г., на дату 16.07.2025:

Акт № 1 о приемке работ от 28.04.2023 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]x[4]x[5]/[6]

253 008

14.05.2023

23.07.2023

71

7,50%

365

3 691,14

253 008

24.07.2023

14.08.2023

22

8,50%

365

1 296,23

253 008

15.08.2023

17.09.2023

34

12%

365

2 828,14

253 008

18.09.2023

29.10.2023

42

13%

365

3 784,72

253 008

30.10.2023

17.12.2023

49

15%

365

5 094,82

253 008

18.12.2023

31.12.2023

14

16%

365

1 552,71

253 008

01.01.2024

28.07.2024

210

16%

366

23 226,96

253 008

29.07.2024

15.09.2024

49

18%

366

6 097,08

253 008

16.09.2024

27.10.2024

42

19%

366

5 516,40

253 008

28.10.2024

31.12.2024

65

21%

366

9 435,95

253 008

01.01.2025

08.06.2025

159

21%

365

23 145,03

253 008

09.06.2025

16.07.2025

38

20%

365

5 268,11

Итого:

795

16,52%

90 937,29

Акт № 2 о приемке работ от 31.05.2023 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]x[4]x[5]/[6]

149 436

16.06.2023

23.07.2023

38

7,50%

365

1 166,83

149 436

24.07.2023

14.08.2023

22

8,50%

365

765,60

149 436

15.08.2023

17.09.2023

34

12%

365

1 670,41

149 436

18.09.2023

29.10.2023

42

13%

365

2 235,40

149 436

30.10.2023

17.12.2023

49

15%

365

3 009,19

149 436

18.12.2023

31.12.2023

14

16%

365

917,09

149 436

01.01.2024

28.07.2024

210

16%

366

13 718,71

149 436

29.07.2024

15.09.2024

49

18%

366

3 601,16

149 436

16.09.2024

27.10.2024

42

19%

366

3 258,19

149 436

28.10.2024

31.12.2024

65

21%

366

5 573,23

149 436

01.01.2025

08.06.2025

159

21%

365

13 670,32

149 436

09.06.2025

16.07.2025

38

20%

365

3 111,54

Итого:

762

16,91%

52 697,67

Акт № 3 о приемке работ от 29.06.2023 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]x[4]x[5]/[6]

77 112

15.07.2023

23.07.2023

9

7,50%

365

142,60

77 112

24.07.2023

14.08.2023

22

8,50%

365

395,07

77 112

15.08.2023

17.09.2023

34

12%

365

861,96

77 112

18.09.2023

29.10.2023

42

13%

365

1 153,51

77 112

30.10.2023

17.12.2023

49

15%

365

1 552,80

77 112

18.12.2023

31.12.2023

14

16%

365

473,24

77 112

01.01.2024

28.07.2024

210

16%

366

7 079,13

77 112

29.07.2024

15.09.2024

49

18%

366

1 858,27

77 112

16.09.2024

27.10.2024

42

19%

366

1 681,29

77 112

28.10.2024

31.12.2024

65

21%

366

2 875,90

77 112

01.01.2025

08.06.2025

159

21%

365

7 054,16

77 112

09.06.2025

16.07.2025

38

20%

365

1 605,62

Итого:

733

17,29%

26 733,55

Акт № 4 о приемке работ от 02.08.2023 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]x[4]x[5]/[6]

57 456

18.08.2023

17.09.2023

31

12%

365

585,58

57 456

18.09.2023

29.10.2023

42

13%

365

859,48

57 456

30.10.2023

17.12.2023

49

15%

365

1 156,99

57 456

18.12.2023

31.12.2023

14

16%

365

352,61

57 456

01.01.2024

28.07.2024

210

16%

366

5 274,65

57 456

29.07.2024

15.09.2024

49

18%

366

1 384,60

57 456

16.09.2024

27.10.2024

42

19%

366

1 252,73

57 456

28.10.2024

31.12.2024

65

21%

366

2 142,83

57 456

01.01.2025

08.06.2025

159

21%

365

5 256,04

57 456

09.06.2025

16.07.2025

38

20%

365

1 196,34

Итого:

699

17,71%

19 461,85

Акт № 5 о приемке работ от 19.09.2023 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]x[4]x[5]/[6]

60 858

05.10.2023

29.10.2023

25

13%

365

541,89

60 858

30.10.2023

17.12.2023

49

15%

365

1 225,50

60 858

18.12.2023

31.12.2023

14

16%

365

373,48

60 858

01.01.2024

28.07.2024

210

16%

366

5 586,96

60 858

29.07.2024

15.09.2024

49

18%

366

1 466,58

60 858

16.09.2024

27.10.2024

42

19%

366

1 326,90

60 858

28.10.2024

31.12.2024

65

21%

366

2 269,70

60 858

01.01.2025

08.06.2025

159

21%

365

5 567,26

60 858

09.06.2025

16.07.2025

38

20%

365

1 267,18

Итого:

651

18,11%

19 625,45

Акт № 6 о приемке работ от 06.10.2023 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Оплата

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

сумма, руб.

дата

примечание

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[1]x[4]x[8]/[9]

46 746

22.10.2023

29.10.2023

8

0

-

-

13%

365

133,19

46 746

30.10.2023

13.11.2023

15

0

-

-

15%

365

288,16

23 746

14.11.2023

20.11.2023

7

23 000

13.11.2023

Оплата по счету №1267

15%

365

68,31

0

-

-

0

23 746

20.11.2023

Оплата по счету №1267

-

-

0

Итого:

30

46 746

14,47%

489,66

Акт № 7 о приемке работ от 02.11.2023 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]x[4]x[5]/[6]

76 608

18.11.2023

17.12.2023

30

15%

365

944,48

76 608

18.12.2023

31.12.2023

14

16%

365

470,14

76 608

01.01.2024

28.07.2024

210

16%

366

7 032,87

76 608

29.07.2024

15.09.2024

49

18%

366

1 846,13

76 608

16.09.2024

27.10.2024

42

19%

366

1 670,31

76 608

28.10.2024

31.12.2024

65

21%

366

2 857,10

76 608

01.01.2025

08.06.2025

159

21%

365

7 008,06

76 608

09.06.2025

16.07.2025

38

20%

365

1 595,13

Итого:

607

18,42%

23 424,22

Акт № 8 о приемке работ от 18.12.2023 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Оплата

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

сумма, руб.

дата

примечание

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[1]x[4]x[8]/[9]

61 110

03.01.2024

05.04.2024

94

0

-

-

16%

366

2 511,19

0

-

-

0

61 110

05.04.2024

Оплата по счету №1669

-

-

0

Итого:

94

61 110

16%

2 511,19

Акт № 9 о приемке работ от 11.01.2024 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]x[4]x[5]/[6]

100 926

27.01.2024

28.07.2024

184

16%

366

8 118,20

100 926

29.07.2024

15.09.2024

49

18%

366

2 432,15

100 926

16.09.2024

27.10.2024

42

19%

366

2 200,52

100 926

28.10.2024

31.12.2024

65

21%

366

3 764,04

100 926

01.01.2025

08.06.2025

159

21%

365

9 232,66

100 926

09.06.2025

16.07.2025

38

20%

365

2 101,47

Итого:

537

18,79%

27 849,04

Общий размер процентов по Договору № 01/04-ИНЖ от 23.03.2023 г., составляет 263 729,92 руб.

Расчет процентов, с учетом положений п. 5.2. Договора № 14/24-ИНЖ от 01.04.2024 г., г., на дату 16.07.2025:

Акт № 1 о приемке работ от 27.04.2024 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]x[4]x[5]/[6]

291 921,60

13.05.2024

28.07.2024

77

16%

366

9 826,43

291 921,60

29.07.2024

15.09.2024

49

18%

366

7 034,83

291 921,60

16.09.2024

27.10.2024

42

19%

366

6 364,85

291 921,60

28.10.2024

31.12.2024

65

21%

366

10 887,24

291 921,60

01.01.2025

08.06.2025

159

21%

365

26 704,83

291 921,60

09.06.2025

16.07.2025

38

20%

365

6 078,37

Итого:

430

19,48%

66 896,55

Акт № 2 о приемке работ от 31.05.2024 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]x[4]x[5]/[6]

237 255,70

16.06.2024

28.07.2024

43

16%

366

4 459,89

237 255,70

29.07.2024

15.09.2024

49

18%

366

5 717,47

237 255,70

16.09.2024

27.10.2024

42

19%

366

5 172,95

237 255,70

28.10.2024

31.12.2024

65

21%

366

8 848,47

237 255,70

01.01.2025

08.06.2025

159

21%

365

21 704,02

237 255,70

09.06.2025

16.07.2025

38

20%

365

4 940,12

Итого:

396

19,78%

50 842,92

Акт № 3 о приемке работ от 28.06.2024 г.

Задолженность,руб.

Период просрочки

Ставка

Днейвгоду

Проценты,руб.

c

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]x[4]x[5]/[6]

92 282

14.07.2024

28.07.2024

15

16%

366

605,13

92 282

29.07.2024

15.09.2024

49

18%

366

2 223,84

92 282

16.09.2024

27.10.2024

42

19%

366

2 012,05

92 282

28.10.2024

31.12.2024

65

21%

366

3 441,66

92 282

01.01.2025

08.06.2025

159

21%

365

8 441,91

92 282

09.06.2025

16.07.2025

38

20%

365

1 921,49

Итого:

368

20,07%

18 646,08

Общий размер процентов по Договору № 14/24-ИНЖ от 01.04.2024 г. составляет 136 385,55руб.

Общая сумма процентов по всем договорам составила 470 892,44 руб., проценты истец предъявляет к взысканию с последующим начислением по день фактической оплаты долга.

Истец направил в адрес ответчика претензию с просьбой оплатить образовавшуюся задолженность и пени.

Поскольку предпринятые истцом меры по урегулированию спора в досудебном порядке не принесли результатов, истец обратился в суд за защитой нарушенного права.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы присутствующих в заседании лиц, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Согласно статье 123 Конституции Российской Федерации, статьям 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равенства сторон. 

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. 

Согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

В силу статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Заключенные между сторонами договоры по своей правовой природе является договорами возмездного оказания услуг, следовательно, отношения сторон подлежат регулированию главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Пунктом 1 статьи 779 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу пункта 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. 

Факт оказания услуг подтвержден представленными в материалы дела актами о приемке услуг. 

Указанные документы подписаны со стороны ответчика без замечаний по объему, срокам и качеству оказанных услуг.

Доказательств, опровергающих оказание услуг, либо претензий по их объёму и качеству, не представлено. Таким образом, не имеется оснований для сомнений в факте оказания услуг.

Исследовав и оценив в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства в их совокупности, установив факт оказания услуг истцом ответчику, принимая во внимание отсутствие в материалах дела доказательств оплаты оказанных услуг в полном объеме, срок оплаты которых наступил, суд пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения требования истца о взыскании задолженности в заявленном размере.

Согласно правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

В соответствии с пунктом 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца указывает в резолютивной части решения на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами, рассчитанных в соответствии с правилами статьи 395 ГК РФ, в общей сумме 470 892,44 руб. 

Истец требует взыскания процентов с последующим начислением по день фактической уплаты долга.

Факт нарушения ответчиком срока оплаты оказанных услуг установлен судом на основании материалов дела, ответчиком по существу не оспорен.

Проверив расчет истца, суд находит его арифметически верным. Расчет процентов не противоречит фактическим обстоятельствам дела, условиям договора. Требование подлежит удовлетворению в заявленном размере.

Таким образом, иск подлежит удовлетворению в полном объеме. 

Согласно части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. 

Государственная пошлина по иску составляет 85 183 руб., исходя из цены иска 2 006 097,74 руб. При подаче искового заявления платежным поручением № 203 от 02.04.2025 истцом уплачена государственная пошлина в сумме 82 908 руб. Учитывая результат рассмотрения дела, судебные расходы истца по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. В доход федерального бюджета с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 2 275 руб. 

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа. 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170 АПК РФ, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

иск удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КРАСНОЯРСКАЯ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ИНЖСЕРВИС» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 2 006 097,74 руб., в том числе 1 535 205,30 руб. долга, 470 892,44 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 16.07.2025, с 17.07.2025 проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму долга, рассчитанные по ключевой ставке Банка России, действующей в соответствующие периоды просрочки, по день фактической оплаты долга, а также 82 908 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

Взыскать с акционерного общества «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КРАСНОЯРСКАЯ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета 2 275 руб. государственной пошлины. 

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья

Е.А. Кошеварова