Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

город Мурманск Дело № А42-7329/2016   « 24 » января 2017 года  

 Руководствуясь статьями 167-170, 110 Арбитражного процессуального Кодекса  Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области   

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить. 

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Служба инженерных сетей» в течение  14 дней с момента вступления решения в законную силу выполнить гарантийный ремонт  

стадиона, расположенного по адресу: 

<

...> район дома № 8, - заменить отдельные части металлического ограждения  

спортивных площадок для мини футбола и баскетбола общей площадью 120 кв.м.  

 Обязать общество с ограниченной ответственностью «Служба инженерных сетей» в период  май-август 2017 года выполнить гарантийный ремонт стадиона, расположенного по адресу:  

<

...> район дома номер 8, а  именно выполнить ямочный ремонт асфальта в местах проседания асфальта (около стоек) в  

общем количестве 8,8 кв.м. и заменить искусственное покрытие на футбольном поле в объеме  800 кв.м.  

 Все работы должны быть выполнены с использованием материалов, указанных в  

приложении 2 к Муниципальному контракту № 3-А/2015 от 10.08.2015 на выполнение работ по  капитальному ремонту стадиона, расположенного по адресу: 

<

...> район дома № 8.  

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Служба инженерный сетей» в  доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6000 рублей 00 копеек..  

 Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции месячный срок со дня  принятия.  

 Судья: Н.В. Быкова